РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-86039/24-110-637 

21.03.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11.03.2025

Решение в полном объеме изготовлено 21.03.2025

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПЕЛИСКЕР" (121353, Г.МОСКВА, Ш. СКОЛКОВСКОЕ, Д. 31, СТР. 2, ЭТАЖ 7 ПОМ I КОМН 24, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "ГОРОД" (123290, Г.МОСКВА, ТУП. 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, Д. 11, СТР. 1, ЭТ 2 ПОМ IV КОМ 2, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 25 237 577,99 руб.,

Временный управляющий -ФИО1,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 04.07.2024

от ответчика- ФИО3 по дов. от 14.11.2024,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПЕЛИСКЕР" обратилось с иском к акционерному обществу "ГОРОД" о взыскании 18 183 486 руб. 35 коп. задолженности по Договору подряда №47-02/2019/СП/3 от 02.09.2019, 6 934 091 руб. 64 коп. гарантийного удержания, 120 000 руб. задолженности по первичному обследованию и испытанию моста на объекте №ОИС57/06-23 от 4.07.2023.

Судом, в порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле привлечен ФИО1.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

 Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как усматривается из материалов дела, между ООО «ПЕЛИСКЕР» (Субподрядчик) и АО «Город» (Подрядчик) заключен договор подряда от 02.09.2019 № 47-02/2019/СП/31 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству моста через р.Десна на объекте капитального строительства: «Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево» (далее - «Объект»/Договор/Договор подряда).

В соответствии с п. 1.7 Договора Государственный заказчик - ГКУ «Москворечье», Генподрядчик - АО «Объединение «ИНГЕОКОМ».

В соответствии с п.2.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по строительству моста через р.Десна на строительстве объекта капитального строительства: «Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево» (далее - Объект), в соответствии с проектной документацией соблюдая срок строительства Объекта, а Подрядчик - принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

На основании п.3.1. Договора цена Договора определяется в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение №2) и составляет 545 801 442 (Пятьсот сорок пять миллионов восемьсот одну тысячу четыреста сорок два рубля) 10 копеек, в том числе НДС 20 % - 90 966 907 (Девяносто миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семь) рублей 02 копейки. Цена Договора подлежит изменению в случаях, предусмотренных п.3.2.

В соответствии с пунктом 4.3 Договора подряда (в редакции дополнительного соглашения к договору от 27.07.2022 № 5) срок окончания работ - 31.08.2023.

Истцом выполнены работы в срок и в полном объеме, что подтверждается Заключением от 01.09.2023 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, утвержденным Распоряжением Федеральной службы по экологическому и атомному надзору.

За период до 31.08.2023 истец передал в адрес АО «Город» акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем выполненных работ по Договору в количестве 24 шт. Последние КС-2 и КС-3 №26 от 26.10.2023 на сумму 6 645 028,30 руб. (к оплате 0,00 руб.) направлены в АО «ГОРОД» 01.11.2023 (исх. 2698 от 31.10.2023, входящий В-1157-11-23 от 01.11.2023).

В соответствии с п.5.1.2. Подрядчик осуществляет приемку Работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика указанного акта. В случае если Субподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, и/или качество предъявляемых к приемке Работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке Работы не соответствуют требованиям проектной документации и/или фактически выполненным объемам Работ, Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке Работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки, нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Подрядчиком предъявляемых Субподрядчиком к приемке Работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке Работ в установленном настоящим пунктом порядке.

Таким образом, 35 рабочих дней на рассмотрение КС-2 и КС-3 №26 от 26.10.2023г. истекли 20.12.2023г.

В установленный п.5.1.2. Договора срок мотивированный отказ от подписания актов от АО «Город» не поступал.

В соответствии с п.3.8.4. Договора Подрядчик осуществляет платежи Субподрядчику в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней с даты подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее КС-3), при наличии полного пакета исполнительной документации, при условии предоставления Субподрядчиком счета и счета-фактуры и получения денежных средств по оплате работ со стороны Генподрядчика.

Ответчиком, в том числе, подписаны без замечаний КС-2, КС-3 № 23 от 17.07.2023г. на сумму 12 547 162,70 руб., КС-2, КС-3 № 24 от 21.07.2023 г.на сумму 12 623 196,97 руб.

Таким образом, истец указывает, что срок оплаты по КС-2, КС-3 № 23 от 17.07.2023г. наступил 21.08.2023г., по КС-2, КС-3 № 24 от 21.07.2023 - 25.08.2023г.

С учетом проведенного сальдирования встречных взаимных обязательств от 14.11.2023г., задолженность по КС-2, КС-3 № 23 от 17.07.2023 составляет 6 140 956,44 руб., по КС-2, КС-3 № 24 от 21.07.2023г. - 12 042 529,91 рублей. Всего 18 183 486,35 руб.

В соответствии с п. 3.8.5. Договора Подрядчик производит оплату выполненных работ по каждому виду работ, указанному в Ведомости распределения цены договора в пределах, не превышающих 97,5% стоимости этих работ.

Подрядчик производит оплату выполненных работ с учетом удержания 2,5% (двух целых пяти десятых процента) от стоимости работ, принятых по Акту о приемке выполненных работ и Справке о стоимости выполненных работ и затрат за соответствующий период (далее - Гарантийная сумма).

В соответствии с абз.3 п. 3.8.5. возврат Гарантийной суммы в размере 2,5% осуществляется отдельно по каждому виду работ в соответствии с Главами Ведомости распределения цены договора на основании уведомления Субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами последних Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по каждой главе Ведомости распределения цены договора и передачи Субподрядчиком Подрядчику исполнительной документации на выполненные работы по каждой Главе Ведомости распределения цены договора соответственно. Передача исполнительной документации оформляется соответствующим двусторонним актом.

В соответствии с п. 6.3.53. Договора Датой исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Подрядчиком Акта (ов) по форме согласно Приложению № 5 к Договору.

Истец ссылается на тот факт, что им был передан ответчику весь объем исполнительной документации по Договору, а также направил акт по форме №5 к Договору, что подтверждается письмами: исх.№3249 от 21.12.2023г., исх.3328 от 21.12.2023г., исх.№458 от 22.02.2024г. Последние КС-2 и КС-3 от 26.10.2023г. на сумму 6 645 028,30 руб. (к оплате 0,00 руб.) направлены в АО «ГОРОД» 01.11.2023г. (исх. 2698 от 31.10.2023г., входящий В-1157-11-23 от 01.11.2023), 35 рабочих дней на их рассмотрение истекли 20.12.2023г. 

Таким образом, срок оплаты по возврату гарантийного удержания, с учетом истечения 30 календарных дней с момента подписания последней КС наступил 19.01.2024г.

Истец представил расчет суммы задолженности по гарантийному удержанию:

-КС №1 от 23.10.2019г. на сумму 14 946 625,94 руб.- 448 398,78 руб.

-КС №2 от 20.11.2019г. на сумму 11 632 055,33 руб.- 348 961,66 руб.

-КС №3 от 30.11.2019г. на сумму 26 648 771,26 руб.- 799 463,14 руб.

-КС №4 от 23.03.2020г. на сумму 64 285 640,01 руб.- 1 928 569,20 руб.

-КС №5 от 22.04.2020г. на сумму 53 309 828,73 руб.- 1 599 294,86 руб.

-КС №6 от 22.05.2020г. на сумму 33 508 048,77 руб.- 1 005 241,46 руб.

-КС №7 от 19.06.2020г. на сумму 18 413 350,30 руб.- 552 400,51 руб.

-КС №8 от 21.07.2020г. на сумму 20 140 694,81 руб.- 604 220,84 руб.

-КС №9 от 21.08.2020г. на сумму 1 667 923,11 руб.- 50 037,69,51 руб.

-КС №10 от 21.09.2020г. на сумму 2 722 522,59 руб.- 81 675,68 руб.

-КС №11 от 30.10.2020г. на сумму 33 679 901,78 руб.- 1 010 397,05 руб.

-КС №12 от 24.05.2021г. на сумму 2 113 029,65 руб.- 63 391,89 руб.

-КС №13 от 22.06.2021г. на сумму 1 300 241,77 руб.- 39 007,25 руб.

-КС №14 от 25.10.2021г. на сумму 342 476,02 руб.- 10 274,28 руб.

-КС №15 от 23.06.2022г. на сумму 6 404 398,57 руб.- 0,00 руб.

-КС №16 от 21.09.2022г. на сумму 29 754 947,76 руб.- 0,00 руб.

-КС №17 от 24.10.2022г. на сумму 3 638 635,27 руб.- 0,00 руб.

-КС №18 от 21.11.2022г. на сумму 1 193 076,33 руб.- 0,00 руб.

-КС №19 от 07.12.2022г. на сумму 16 262 373,61 руб.- 0,00 руб.

-КС №20 от 25.04.2023г. на сумму 18 614 595,33 руб.- 0,00 руб.

-КС №21 от 06.06.2023г. на сумму 9 356 496,21 руб.- 0,00 руб.

-КС №22 от 05.07.2023г. на сумму 19 868 210,89 руб.- 0,00 руб.

-КС №23 от 17.07.2023г. на сумму 12 547 162,70 руб.- 0,00 руб.

-КС №24 от 21.07.2023г. на сумму 12 623 196,97 руб.- 0,00 руб.

-КС №25 от 24.08.2023г. на сумму 8 629 772,72 руб.- 0,00 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением №4 от 11.05.2022г. к Договору из п.3.8.5 Договора исключено право Генподрядчика на гарантийное удержание в размере 2,5%

Сумма гарантийных удержаний составила 8 541 333,29 руб.

Между сторонами был подписан зачет встречных однородных требований от 01.10.2021 г. на сумму 1 607 241,65 руб.

Таким образом, истец считает, что сумма задолженности в части зарезервированного гарантийного удержания составляет 6 934 091,64 (шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девяносто один) рубль, 64 коп.

Кроме того, в рамках выполнения основного Договора между ООО «ПЕЛИСКЕР» (Исполнитель) и АО «ГОРОД» (Заказчик) был заключен договор №ОИС 57/06-23 от 04.07.2023 на оказание услуг по первичному обследованию и испытанию моста через реку Десну на объекте на общую сумму 1 942 520,00 рублей.

Истцом выполнены работы в полном объеме, что подтверждается техническим заключением по результату обследования и испытания, направленным в АО «Город» повторно 17.11.2023г (исх. 2960 от 17.11.2023 входящий В-1215-11 -23 от 17.11.2023).

В соответствии с п.3.3. вышеуказанного договора заказчик производит оплату работ в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.

С учетом ранее выплаченного аванса по вышеуказанному договору в размере 1 822 520,00 руб., стоимость неоплаченных работ составила 120 000,00 рублей.

ООО «ПЕЛИСКЕР» направляло в адрес Ответчика в составе приложений к досудебной претензии исх.№3319 от 25.12.2023г. акт выполненных работ №203, счет-фактуру №212 и счет на оплату №168 от 28.08.2023г. с требованием подписать данные документы в соответствии с п.4.3. договора и произвести доплату 120 000,00 руб. по договору №ОИС 57/06-23 от 04.07.2023г.

В соответствии с п.4.3. договора №ОИС 57/06-23 от 04.07.2023г. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения им документов (технической документации, акта сдачи-приемки работ), обязан подписать Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ.

Согласно данным с официального сайта почты РФ досудебная претензия была получена Ответчиком 11.01.2024г. Таким образом, срок рассмотрения документов согласно п.4.3. договора №ОИС 57/06-23 от 04.07.2023г. истек 22.01.2024г.

Согласно положениям ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон договорных правоотношений должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить исполнителю обусловленную иену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный двором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить е строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 1740 ГК РФ).

Из. п. 1 ст. 746 ГК РФ следует, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Доводы ответчика о том, что истец не доказал наличие задолженности признаны судом необоснованными, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества "ГОРОД" (ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕЛИСКЕР" (ОГРН: 

<

***>) 25 237 577 руб. 99 коп. задолженности, 149 188 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко