АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

 

«

Дело № А32-41278/2022

г. Краснодар

02» февраля 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи А.С. Хмелевцевой, 

руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ООО «Стройгарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) о назначении повторной экспертизы – отказать.  

Обязать ООО «Стройгарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) произвести  замену деревьев и кустарников с высадкой на новый посадочный материал в количестве:  рябина - 10 шт.; клен - 3 шт.; береза — 5 шт.; ива – 2 штуки, магнолия – 1 шт. в  ближайший благоприятный посадочный период, согласно раздела 2.6. Правил создания,  охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. МДС 13- 5.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. № 153).  

Обязать ООО «Стройгарант» безвозмездно в течение 90 (девяноста) календарных  дней провести работы по устранению дефектов и повреждений тротуарной плитки на  объекте - парк им. А.С. Пушкина, расположенном на земельном участке с кадастровым  номером 23:30:0000000:3823 по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,  

<

...> по муниципальным контрактам от 09.03.2021 

 № 0318300008821000037, от 15.10.2021 № 0318300008821000433 а именно: 

- разборка тротуаров и дорожек из плит; - разработка грунта (ЦПС); - демонтаж прослойки из геотекстиля; - разработка грунта экскаваторами с погрузкой (песок); 

- исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала;  - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;  

- устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ); 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев (ЦПС);  

- устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с  заполнением швов песком (сухой смесью);  

- разборка бортовых камней: на бетонном основании; - установка бортовых камней бетонных. В удовлетворении остальных требований – отказать. 

Взыскать с ООО «Стройгарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  муниципального бюджетного учреждения Темрюкского городского поселения  Темрюкского района «Общественно-социальный центр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) расходы на проведение судебной экспертизы в размере 140 000 руб.  

Взыскать с ООО «Стройгарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 000 рублей.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения Темрюкского городского  поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.04.2009, ИНН: 

<

***>), г. Темрюк в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

Финансовому отделу Арбитражного суда Краснодарского края перечислить с  

депозита суда денежные средства в размере 140 000 руб., поступивших на основании  

платежного поручения от 08.12.2022 № 460045 в адрес ООО «Глобал Эксперт» по  

следующим реквизитам: Получатель: ООО «Глобал Эксперт» ИНН 

<

***> КПП 230801001 Банк АО ТИНЬКОФФ БАНК» БИК 044525974 Сч. № 30101810145250000974 Сч. № 40702810010000522367 

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение 1 месяца с даты его принятия.  

Судья   А.С. Хмелевцева