АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 17.01.2019 г.)

Дело № А82-22254/2018

г. Ярославль

21 января 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "СМО-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании    216272.39  руб.

при участии:

от истца – ФИО1 – представитель по доверенности от 29.06.2018 г., ФИО2 - представитель по доверенности от 29.06.2018 г.

от ответчика – ФИО3 – представитель по доверенности от 20.10.2018 г., ФИО4 – представитель по доверенности от 20.10.2018 г.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СМО-1" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" о взыскании 660 246 руб. 66 коп., в том числе 216 272 руб. 39 коп. пени, 443 974 руб. 27 коп. убытки.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 17.01.2019 г. судом выделено в отдельное производство требование общества с ограниченной ответственностью "СМО-1" к обществу с ограниченной ответственностью  "ПрестижСтрой" о взыскании убытков в сумме 443 974 руб. 27 коп., делу присвоен № А82-722/2019.

Судом рассматривается требование о взыскании пени за просрочку выполнения работ.

Истец в судебном заседании требования поддержал.

Ответчик возражений относительно исковых требований не заявил.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

07.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "СМО-1" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" /Субподрядчик/ заключен контракт № 1, согласно п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 6.1.1 которого Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства: выполнение работ объекту «Парковая зона мкр. «Слип» в районе Южной улицы городского округа город Рыбинск. Благоустройство парковой зоны», в соответствии с ведомостями объемов и стоимости работ, техническим заданием. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.08.2016 г. Стоимость настоящего контракта составляет 3 700 000 руб., с НДС. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней и (или) штрафов. Субподрядчик обязан уплатить Заказчику пени и (или) штрафы в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного (почтой или электронной почтой) требования Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Порядок исчисления пени предусмотрен п.6.1.2 Контракта. 

07.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "СМО-1" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" /Субподрядчик/ заключен контракт № 2, согласно п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 6.1.1 которого Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства: выполнение работ объекту «Площадь Герасимова А.А. городского округа город Рыбинск. Благоустройство площади», в соответствии с ведомостями объемов и стоимости работ, техническим заданием. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.08.2016 г. Стоимость настоящего контракта составляет 5 000 000 руб., с НДС. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней и (или) штрафов. Субподрядчик обязан уплатить Заказчику пени и (или) штрафы в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного (почтой или электронной почтой) требования Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Порядок исчисления пени предусмотрен п.10.1.2 Контракта. 

12.07.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "СМО-1" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" /Подрядчик/ заключен контракт № 3, согласно п.п. 1.1, 3.1, 5.1, 10.1.1 которого Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Рыбинск (список № 5), в соответствии с ведомостями объемов и стоимости работ, техническим заданием, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.08.2016 г. Стоимость настоящего контракта составляет 1 936 700 руб., в том числе НДС. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней и (или) штрафов. Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени и (или) штрафы в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного (почтой или электронной почтой) требования Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Порядок исчисления пени предусмотрен п.10.1.2 Контракта. 

12.07.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "СМО-1" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" /Подрядчик/ заключен контракт № 4, согласно п.п. 1.1, 3.1, 5.1, 10.1.1 которого Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Рыбинск (список № 6), в соответствии с ведомостями объемов и стоимости работ, техническим заданием, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.08.2016 г. Стоимость настоящего контракта составляет 1 626 200 руб., в том числе НДС. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней и (или) штрафов. Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени и (или) штрафы в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного (почтой или электронной почтой) требования Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Порядок исчисления пени предусмотрен п.10.1.2 Контракта. 

12.07.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "СМО-1" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" /Подрядчик/ заключен контракт № 5, согласно п.п. 1.1, 3.1, 5.1, 10.1.1 которого Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Рыбинск (список № 7), в соответствии с ведомостями объемов и стоимости работ, техническим заданием, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.08.2016 г. Стоимость настоящего контракта составляет 1 772 000 руб., в том числе НДС. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней и (или) штрафов. Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени и (или) штрафы в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного (почтой или электронной почтой) требования Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Порядок исчисления пени предусмотрен п.10.1.2 Контракта. 

12.07.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "СМО-1" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" /Подрядчик/ заключен контракт № 6, согласно п.п. 1.1, 3.1, 5.1, 10.1.1 которого Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Рыбинск (список № 8), в соответствии с ведомостями объемов и стоимости работ, техническим заданием, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.08.2016 г. Стоимость настоящего контракта составляет 1 665 100 руб., в том числе НДС. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней и (или) штрафов. Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени и (или) штрафы в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного (почтой или электронной почтой) требования Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Порядок исчисления пени предусмотрен п.10.1.2 Контракта. 

Во исполнение условий заключенных контрактов истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят. 

Указывая на просрочку выполнения работ, истец обратился к ответчику с претензией от 17.08.2018 г., в которой просил оплатить пени.

Претензия направлялась заказным письмом с уведомлением. 

Отсутствие выплаты пени послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением. 

Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается. 

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, условиями Контрактов.

По расчету истца сумма пени за период допущенной просрочки составляет 216 272 руб. 39 коп.

Расчет ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен, судом проверен. 

Требование истца подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ у суда не имеется.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины относятся на ответчика. В излишне уплаченной части пошлина подлежит возврату из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СМО-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 216 272 руб. 39 коп. пени, 7325 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СМО-1" из федерального бюджета 8 880 руб. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 100 от 18.09.2018г. на основании п/п 1 п. 1 ст. 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Бессонова И.Ю.