РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  14 мая 2024 года  по делу № А33-5126/2024 Красноярск  

«14» мая 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.7507.21 от 26.11.2021,  осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  объекта «Опора двойного назначения», расположенного (который будет располагаться) по  адресу: г. Красноярск, Ленинский район, в границах кадастрового квартала 24:50:0500128, в  точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 10 кВт. ТП ГО 719 Ячейка ПС яч. 46 в ст. ТП-704 ПС ПС № 119 «Мичуринская» 110/6 кВ Основной источник питания: ПС № 119 «Мичуринская» 110/6 кВ Резервный источник питания: отсутствует. 

в том числе по обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства (включая их  проектирование, строительство, реконструкцию.) к присоединению энергопринимающих  устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,40 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  отсутствует.  

Включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000478870: 

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением  Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными  организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки  присоединения, находящейся не далее 15 метров о внешнюю сторону от границы,  установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и  сечение провода определить проектом;  

- определить необходимость установки коммутационного аппарата 0,4 кВ в ТП 719, в  случае необходимости, тип и технические параметры определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства Российской  Федерации от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 80 833,50 руб.  договорной неустойки за период с 02.10.2022 по 15.02.2024, неустойку с 16.02.2024 по день  фактического исполнения обязательства из расчета 161,02 руб. за каждый день просрочки, 9  233,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

В случае неисполнения решения суда в полном объеме в течение календарного месяца со  дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного  акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000,00 руб. за каждый  день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения  суда.  

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки  отказать.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.В. Командирова