Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Москва 

«31» октября 2023 года Дело № А41-25250/23  Резолютивная часть решения объявлена «19» сентября 2023 года.  

Решение изготовлено в полном объеме «31» октября 2023 года.  

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "АГМ" к АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ о взыскании 1141918 руб.  75 коп.,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, директор, сведения из ЕГРЮЛ, от ответчика – ФИО3 по дов. № 3 от 09.01.2023 г.,  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «АГМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с  исковым заявлением к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее - ответчик) о  взыскании задолженности по муниципальному контракту от 06.06.2022 МК   № 08483000695220001210001 в размере 1075000 руб. 00 коп. и 66918 руб. 75 коп. неустойки  за период с 01.07.2022 по 06.03.2023.  

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком  договорных обязательств и заявлены на основании ст. ст. 10, 15, 309, 310, 330, 702  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В обоснование заявленных требований истец указал, что во исполнение принятых на  себя обязательств по вышеназванному контракту им выполнены работы по разработке  аналитических и презентационных материалов архитектурно-планировочной концепции  территории набережной и направлен ответчику соответствующий комплект на  согласование, который последний отказался принимать, ничем не мотивировав. 12.07.2022  

истцом было направлено в Администрацию письмо № 20220712-11 от 12.07.2022 о порядке  передачи комплекта документации на проверку в Министерство Благоустройства  Московской области. 14.07.2022 г. истцом был получен от ответчика отказ от приемки  проекта, в котором содержались замечания по проектной документации, однако срок на  устранение замечаний, не был указан, а сразу же было указано на рассмотрение вопроса об  одностороннем расторжении контракта. Впоследствии, Администрация на запрос истца  предоставила срок на устранение замечаний до 19.07.2022 г. Согласно замечаний,  

имеющиеся недостатки выполненной работы, являлись несущественными и  устранимыми, поэтому истец обратился с запросами к ответчику для предоставления  

дополнительных сведений для составления проекта и исполнения контракта, а также  просил увеличить сроки на устранение замечаний до 24.07.2022. Ответа на просьбу об  увеличении сроков от ответчика не поступило. Таким образом, результат работ передан  

заказчику, но наличие замечаний к проектной документации было вызвано  действиями самого ответчика, не предоставившего необходимую информацию для  выполнения контракта в установленный срок. Неоднократные запросы истца о  предоставлении исходных данных для исправления недостатков Администрацией были  проигнорированы. 22.07.2022 г. истец направил в адрес ответчика акты  

выполненных работ, однако 22.07.2022 г. Администрация уже направило в адрес истца  уведомление об одностороннем расторжении контракта, которое судом было признано  незаконным и не соответствующим условиям контракта и действующему законодательству,  в силу неисполнения самим ответчиком встречных обязательств. Таким образом, ответчик  ненадлежащим образом исполняет обязательства по приемке и оплате выполненных истцом  в рамках муниципального контракта. Неустойка начислена в соответствии с п. 7.2.2  контракта.  

Ответчик возражал относительно исковых требований, указав, что истцу был дан  мотивированный отказ от работ с соответствующими разъяснениями, а также  предоставлено время для устранения замечаний. После повторного предоставления  материалов на приемку работ истцом ответчиком принято решение о проведение  экспертизы. Однако по результатам экспертизы, работы истца не соответствуют условиям  муниципального контракта, в связи с чем был размещен на электронной площадке  14.07.2022 г. мотивированный отказ.  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в  полном объеме.  

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в отзыве на иск. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные  доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него и  выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд приходит к выводу о том,  что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как установлено судом и следует из материалов дела, 06.06.2022 между  Администрацией (Заказчик) и ООО «АГМ» (Исполнитель) заключен муниципальный  контракт № 08483000695220001210001 (Контракт) на разработку аналитических и  презентационных материалов архитектурно-планировочной концепции территории  набережной р. Осетр от плотины до Белого колодца города Зарайск Московской области и  разработка для участия в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания  комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения».  

Цена контракта составляет 1 075 000 руб. (п. 2.1 Контракта). 

Срок исполнения обязательств по Контракту установлен 30.06.2022 (график –  приложение № 2 к контракту).  

Срок исполнения контракта – 31.08.2022 (п. 13.1 Контракта). 

Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству  выполняемых Исполнителем работ, а также требования к порядку и способу их выполнения  Исполнителем, определяются Контрактом (п. 1.3 Контракта и приложение 5 к Контракту).  

Согласно п. 2.2 приложения 5 к Контракту, администрация предоставляет  следующие исходные данные на выполнение работ:  

1. Схему территории с утвержденными границами проектируемой территории; 

2. Информацию о существующих на территории проектирования зданиях и  

сооружениях (кадастровые планы, планы БТИ, ранее разработанная проектная  

документация (при наличии); 

3. Информацию о существующей организации движения транспорта в границах  

территории разработки проектных решений; 

4. Ограничения, действующие на проектируемой территории (зоны охраны, особо  

охраняемые природные территории и др.); 

5. Информацию о возможности подключения к объектам инженерной  

инфраструктуры, необходимые технические условия; 

6. Сведения о социально-экономическом развитии городского округа.  

30.06.2022 Исполнитель посредством ПИК ЕАСУЗ представил результаты работ  Заказчику.  

В соответствии с пунктами 4.2 - 4.4 Контракта заказчик, в течение 5 рабочих дней с  даты получения пакета документов от исполнителя, осуществляет приемку выполненных  работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии  (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же  сроки направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о  приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее -  Мотивированный отказ).  

Письмами от 05.07.2022 № 115Исх-4375/06-01, от 06.07.2022 № 115Исх-4423/06-01  Заказчик отклонил их прием, в том числе подписание акта выполненных работ, о чем был  дан мотивированный отказ с разъяснениями. Также Исполнителю предложено в срок не  позднее 11.07.2022 доработать и представить полный комплект аналитических и  презентационных материалов.  

07.07.2022 Исполнитель повторно предоставил результаты работ на приемку  Заказчику.  

Заказчик организовал проведение экспертизы в ООО «Архитектурное бюро  АПРЕЛЬ», согласно которой результаты работ в представленных материалах не  соответствуют по составу, объему и качеству требованиям описания объекта закупки.  

На основании указанного заключения заказчиком принято решение об отказе в  приемке результатов работ, в котором содержались замечания по проектной документации.  При чем, срок на устранение замечаний, указан ответчиком не был, а сразу же содержалась  ссылка на рассмотрение вопроса об одностороннем расторжении контракта.  

Письмом от 14.07.2022 № 20220712-12 Исполнитель просил Заказчика установить  срок устранения замечаний до 27.07.2022.  

В письме от 15.07.2022 № 20220715-15 Исполнитель сообщил о возможности  устранения недостатков не ранее 24.07.2022, в связи с чем просил увеличить срок внесения  изменений до 10 календарных дней.  

Письмом от 15.07.2022 № 115Исх-4663/01-01 Администрация установила срок для  устранения выявленных экспертизой недостатков до 19.07.2022.  

Исполнитель письмом от 18.07.2022 № 20220718-16 запросил у Заказчика исходные  данные для устранения замечаний.  

21.07.2022 ООО "АГМ" сообщило о том, что произведет загрузку проектной  документации по Контракту до 11 час. 00 мин. 22.07.2022 (письмо № 20220721-17).  

22.07.2022 истец направил в адрес ответчика акты выполненных работ,  предусмотренных по контракту и разместил в ЕИС результат работ - Комплект  аналитических и презентационных материалов архитектурно-планировочной концепции  территории набережной р. Осётр от плотины до Белого колодца города Зарайск Московской  области и разработке для участия в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания  комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения".  

Впоследствии, письмами от 25.07.2022 № 20220725-18, от 26.07.2022 № 20220726-19,  от 27.07.2022 № 20220727-20 Исполнитель обращался к Заказчику с просьбами о  представлении исходных сведений и разъяснений с целью устранения выявленных  недостатков работ.  

В ответ на указанные обращения Администрация письмами от 25.07.2022   № 115Исх-4895/01-01, от 26.07.2022 № 115Исх-4939/01-01, от 29.07.2022 № 115Исх- 

5022/01-01, от 29.07.2022 № 115Исх-5020/01-01 представила Исполнителю  соответствующие разъяснения и уточнения.  

В тоже время, 22.07.2022 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от  исполнения Контракта.  

Одновременно Администрацией подана жалоба в УФАС Московской области о  внесении сведений в отношении ООО "АГМ" в реестр недобросовестных поставщиков.  

Решением УФАС Московской области от 10.08.2022 в удовлетворении требований  Администрации отказано. При этом антимонопольный орган пришел к выводу о том, что  действия Заказчика нарушают требования части 14 статьи 95 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержат признаки состава  административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32 КоАП РФ.  

В связи с указанными обстоятельствами ООО "АГМ" направило в адрес  Администрации претензию от 11.08.2022 с требованием о приемке и оплате работ по  Контракту.  

Факт нарушения Администрацией приемки работ подтвержден ответом из  Финансового управления Администрации г.о. Зарайск от 29.09.2022.  

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от  13.03.2023 г. по делу № А41-75537/2022 признано недействительным решение  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от  22.07.2022 г. об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта   № 08483000695220001210001 от 06.06.2022 г.  

Поскольку ответчик не ответил на претензию в регламентированный контрактом  срок, не представил документы приемки, либо мотивированный отказ от подписания  указанных документов, оплату долга в заявленном размере не произвел, истец обратился в  арбитражный суд с настоящим иском.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из сделок, под  которыми статья 153 ГК РФ признает действия граждан и юридических лиц, направленные  на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо обязано совершить в  пользу другого лица определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить  работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор  имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают  из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском  кодексе Российской Федерации.  

В соответствии с положениями статьей 309 ГК РФ обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований -  в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми  требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда  (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и  изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения,  предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено  правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров (статья  702 ГК РФ).  

Исходя из существа заявленных требований и правовой природы отношений,  вытекающих из Контракта, к возникшему спору подлежат применению общие положения  об обязательства, а также специальные нормы Закона № 44-ФЗ и главы 37 ГК РФ о  договорах подряда.  

На основании пункта 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному  контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд  (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный  заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт  должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы,  сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах  обеспечения исполнения обязательств сторон.  

В силу статьи 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным  контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для  государственных или муниципальных нужд.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком  работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной  работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную  цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1  статьи 711 ГК РФ).  

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком  работ является сдача их результата заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ).  

В силу положений пункта 1 статьи 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение  подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного  подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан  немедленно приступить к его приемке.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 8 Информационного письма Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения  обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ  заказчику путем подписания акта выполненных работ.  

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе  одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается  другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть  признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными (пункт 4). При этом бремя доказывания обоснованности  отказа от приемки результата работ возлагается на заказчика.  

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка  его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Как выше установлено судом в ходе рассмотрения дела, вступившим в законную  силу решением Арбитражного суда Московской области от 13.03.2023 по делу № А4175537/2022 признано недействительным решение АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2022 г. об одностороннем отказе  от исполнения муниципального контракта № 08483000695220001210001 от 06.06.2022 г.  

Согласно статье 16 АПК РФ решение (постановление) арбитражного суда является  обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления,  иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей  территории Российской Федерации.  

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в  законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не  доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором  участвуют те же лица.  

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации № 13 от 31.10.1996 арбитражные суды должны учитывать, что  преюдициальное значение имеют факты, установленные решениями судов первой  инстанции, а также постановлениями апелляционной и надзорной инстанций, которыми  приняты решения по существу споров.  

Преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать  установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение  существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет  отменен в порядке, установленном законом.  

При этом преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По  общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств,  установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному  делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд  ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд  счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают  преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц,  участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем  процессах.  

Преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного  рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу  судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не  обстоятельство, которое должно быть установлено.  

Таким образом, вступивший в законную силу судебный акт по делу № А4175537/2022 на основании статьи 69 АПК РФ имеет силу преюдиции в части установленных  судом фактических обстоятельств недобросовестности и преждевременности отказа  заказчика от исполнения муниципального контракта.  

При этом судом также установлено, что 22.07.2022 Подрядчиком предоставлены  акты выполненных работ, предусмотренных по Контракту.  

Пунктом 5.2.2 Контракта установлено, что Заказчик должен сообщать в письменной  форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Исполнителем своих  обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких  недостатков.  

Вместе с тем, в ответ на акты выполненных работ от 22.07.2022 Заказчик в  определенный Контрактом срок не подписал акты о приемке выполненных работ, а также  не направил мотивированный отказ от подписания данных актов.  

Следовательно, Администрацией был нарушен регламентированный контрактом и  законом порядок приемки работ.  

Кроме того, решением Московского областного УФАС России от 10.08.2022 № РНП- 28690эп/22 сведения в отношении ООО «ATM» не были включены в реестр  недобросовестных поставщиков. На заседании Комиссии установлено, что доказательств,  указывающих на недобросовестное поведение при выполнении Участником работ по  условиям Контракта не представлено.  

Изложенные обстоятельства опровергают доводы отзыва на иск о том, что  Исполнителем не был предоставлен надлежащим образом оформленный пакет документов  после устранения недостатков, доработки.  

Учитывая изложенное, у Заказчика возникло обязательство по оплате Подрядчику  выполненных работ в полном объеме.  

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из  представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений  (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном  настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на  основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.  

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства,  объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.  

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к  рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены  определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными  доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств.  

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление  гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в  обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное  осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  

При таких обстоятельствах, суд считает, что требования истца о взыскании  задолженности за выполненные по муниципальному контракту МК   № 08483000695220001210001 от 06.06.2022 работы в размере 1075000 руб. 00 коп. являются  обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой  гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными  законом или договором.  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не  обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии с пунктом 7.2.2 Контракта пени начисляются Заказчику за каждый  день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня,  следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней  ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.  

Поскольку ответчиком были нарушены сроки оплаты выполненных работ,  требование истца о взыскании неустойки, основанное на условиях контракта (пункт 7.2.2  контракта), соответствует положениям ст. ст. 330, 331 ГК РФ.  

Представленный истцом расчет неустойки в размере 66918 рублей 75 копеек за  период с 01.07.2022 по 06.03.2023 судом проверен и не противоречит закону. Оснований  для применения ст. 333 ГК РФ арбитражным судом не установлено и ответчиком не  заявлено, в связи с чем, исковые требования в данной части также подлежат  удовлетворению.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Московской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в пользу ООО "АГМ" 1075000 руб. 00 коп. основного долга и  66918 руб. 75 коп. неустойки.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских