РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-142380/23-68-1027

25 декабря 2023 года

г.  Москва

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 декабря 2023 года

Судья Абрамова Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЗИ" (119530, 

<

...>, ПОМ.II КОМ. 31, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.09.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 772901001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЗЕМСТРОЙ" (117418, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д. 25А, ПОМЕЩ. Х, КОМ. 34, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.10.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 772701001) о взыскании 2 089 984,15 рублей 

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.02.2021. паспорт. диплом.

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.06.2023. паспорт. диплом. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Санзи» обратилось с исковым заявлением к ООО «Подземстрой» о взыскании 1 840 179руб. 75коп. задолженности, 249 804руб. 40коп. неустойки и неустойки, начисленной на сумму долга, за период с 23.06.2023г по дату вынесения решения по договору №131/2021/299-СУБ от 28.04.2021г. Кроме того, истец просит взыскать 757руб. 58коп. почтовых расходов. 

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 28.04.2021г. между истцом и ответчиком заключен договор №131/2021/299-СУБ. 

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнять работы, а ответчик принимать и оплачивать их.

  Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

  В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

  Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Указанная норма права, предусматривает возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Таким образом, исходя из буквального толкования указанной нормы, следует, что оформленный в таком порядке акт является доказательством исполнения стороной обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты, на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки. Обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на заказчика. При непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является основанием для оплаты в порядке, предусмотренном статьей 711 ГК РФ, так как работы считаются принятыми.

Истец свои обязательства по договору выполнил надлежащим образом на общую сумму 72 051 016руб. 21коп., о чем свидетельствуют акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и универсальные передаточные документы за период с 17.06.2021 по 26.11.2021, подписанные со стороны ответчика.

Ответчиком частично оплачены выполненные работы, задолженность составила 1 840 179руб. 75коп. и до настоящего времени им не погашена.

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

 Согласно ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Представленные в материалы дела доказательства подтверждают выполнение истцом и принятие ответчиком работ Доказательств погашения задолженности не представлено. 

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Довод ответчика о том, что оценка качества и объема работ была дана судом в рамках дела №А40-48921/22, признаны судом несостоятельным, поскольку в рамках указанного дела исковые требования были заявлены на основании работ, предъявленные ответчику к приемке 13.12.2021г. и 21.12.2021г. При этом, в выставленном счете от 13.12.2021г. также была учтена задолженность ООО «Подземстрой» по ранее принятым работам. Отказывая в удовлетворении заявленных ранее требований в рамках дела №А40-48921/22, суд основывал свои доводы на том обстоятельстве, что работы предъявленные к приемке 13 и 21 декабря 2021г., были сданы за пределами срока выполнения работ, о чем ответчик уведомил истца и требовал предъявить работы в срок до 30.11.2021г. Также суд отметил ненадлежащее качество работ по установке малых архитектурных форм которые были предъявлены к приемке 13 и 21 декабря 2021г.

В настоящем деле, истец заявляет требования о взыскании задолженности за работы, которые были выполнены и приняты ответчиком без нареканий в срок до 26.11.2021г.

Наличие указанной задолженности не было предметом исследования судами по делу №А40-48921/2022 соответствующая оценка не давалась, основания заявленных требований были иные. В экспертизе по делу №А40-48921/2022 отсутствуют ссылки на акты КС-2, КС-3 до декабря 2021г.

При этом, в судебном решении по делу № А40-48921/2022 установлено, что 26.11.2021г. ООО «Санзи» передало, а ООО «Подземстрой» приняло без нареканий работы по установке объектов наружного освещения. Каких-либо нареканий по качеству количеству и срокам предъявлено не было. Все работы были выполнены в строгом соответствии с техническим заданием и действующими нормами. Замечаний от подрядчика не поступало. Полный пакет технической документации был передан подрядчику при приемке выполненных работ, такой же комплект передавался в Северный РЭС АО «ОЭК» для согласования, однако ответа до настоящего момента не получено. 

Согласно п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица

Таким образом, судом по делу № А40-48921/2022 было установлено что работы, сданные к приемке 26.11.2021г. были приняты ответчиком. При этом суд не проверял и не исследовал обстоятельства наличия задолженности ООО «Подземстрой» перед ООО «Санзи» за выполненные и принятые работы по актам до 26.11.2021г. включительно. 

Таблица, составлена ответчиком не свидетельствует об обратном, поскольку в экспертном исследовании нет ссылок на акты, составленные до декабря 2021 года. При этом само по себе совпадение в наименовании видов работ не свидетельствует, что исследовались спорные акты.   

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о направлении ответчиком в адрес истца каких-либо претензий после получения актов по форме КС-2, КС-3, работы приняты в полном объеме и без замечаний, принимая также во внимание частичную оплату работ ответчиком, требование истца о взыскании задолженности правомерно и подлежит удовлетворению.

Доказательств, которые бы подтвердили наличие недостатков в работах, принятых без замечаний работ, в материалы дела ответчиком не представлено. 

Кроме того, истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 7.7 договора,  исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 249 804руб. 40коп. за период с 27.12.2021г. по 22.06.2023г.

Между тем, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Согласно подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ (ред. от 30.12.2021г., с изм. от 03.02.2022г.) «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022г. до окончания срока моратория начисление неустойки на установленную судебным актом задолженность в порядке исполнения судебного акта не производится.

Таким образом, с учетом положений Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», суд приходит к выводу о возможности взыскания неустойки, исключив период действия моратория, что составляет 165 254руб. 20коп.

О наличии оснований для снижения неустойки, предусмотренных ст. 333 ГК РФ, ответчиком не приведено, в связи с чем у суда отсутствуют основания для его снижения, поскольку в соответствии с п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ей приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.

В соответствии с п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требует ст. 71 АПК РФ.

Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

Ответчиком не представлено доказательств того, что размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

Для установления ответственности за неисполнение денежного обязательства имеет значение именно сам факт нарушения этого обязательства, выражающийся в неуплате соответствующих денежных средств в срок, а не факт использования должником этих средств.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Однако в настоящем споре ответчик не представил суду доказательств, свидетельствующих о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Необоснованное уменьшение неустойки судом с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам. Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами, однако никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Учитывая, что ответчиком не приведены доводы, изложенные в Постановлении  Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. №81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», то у суда отсутствуют основания для применения ст. 333 ГК РФ в отношении требования о взыскании неустойки.

Таким образом, размер неустойки судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке в установленной судом сумме. В удовлетворении остальной части требования суд отказывает. 

Кроме того, истец просит взыскать неустойку, начисленную на сумму долга, за период с 23.06.2023г. по дату вынесения решения.

Согласно п. 65. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016г. по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Таким образом, требования истца в указанной части также подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 757руб. 58коп. почтовых расходов.

Статьей 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Суд считает возможным взыскать с ответчика расходы на почтовые отправления в размере 757руб. 58коп. считая их доказанными, что подтверждается чеками, приобщенными к материалам дела.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в размере, пропорциональном удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 401, 405, 406, 407, 410, 702, 720 ГК РФ, ст. ст. 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд                                                 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ПОДЗЕМСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "САНЗИ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в сумме 1.840.179 руб. 75 коп., пени в сумме 165.254 руб. 20 коп. и за период с 23.06.2023 на день вынесения решения, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период за каждый день просрочки от суммы долга, в также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 32.096 руб. 78 коп., почтовые расходы в сумме 757 руб. 58 коп.  

В удовлетворении остальной части требования о взыскании пени отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

              Судья             Е.А. Абрамова