РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-278161/22-110-2087

г. Москва

14 сентября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 сентября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПРОДЖЕКТ СТРОЙ" (117452, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО ВН.ТЕР.Г., АЗОВСКАЯ УЛ., Д. 15А, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 3, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью   "ТСК ФАВОРИТ" (196128, 

<

...>, ЛИТЕР А, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 3 461 381,20 рублей,

Треть лицо- общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙДЕКС КОНСТРАКШН" (117452, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, АЗОВСКАЯ УЛ., Д. 15А, ПОМЕЩ. VII, ОГРН: 

<

***>),

 

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от  16.01.2023,

от ответчика- не явился,

от ООО "ПРАЙДЕКС КОНСТРАКШН"-не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПРОДЖЕКТ СТРОЙ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью   "ТСК ФАВОРИТ"  о взыскании 1 016 820 руб. неосновательного обогащения по договору подряда №СПД-21/21-Л/СПБ от 12.10.2021, 152 524,54 руб. штрафа, 1 418 478,22 руб. неустойки, 873 558,44 руб. стоимости материалов переданных по договору.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙДЕКС КОНСТРАКШН",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». Иск не признал, по мотивам, изложенным в отзыве.

Заслушав представителя истца участвующего в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, «25» ноября 2022г., года между Обществом с ограниченной ответственностью «Прайдекс Констракшн» (Цедент/Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Проджект Строй» (Цессионарий/Истец) был заключен договор об уступке прав требования (договор цессии) должника - ООО «ТСК ФАВОРИТ», в соответствии с которым Цедент передает, а Цессионарий принимает права требования (в том числе и требование неустойки за неисполнение обязательств по Договору подряда) к Должнику по денежным обязательствам последнего по Договору подряда № СПД-21/21-Л/СПБ от 12.10.2021 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТСК ФАВОРИТ» и ООО «Прайдекс Констракшн».

Согласно п. 1.1.6. Цессии права требования (Задолженность) - денежные обязательства Должника перед Цедентом, основанные на Договоре и состоящие из суммы основного долга, а также процентов за пользование денежными средствами, неустойки (пени, штрафов) и иных платежей, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, также права, обеспечивающие исполнение обязательства Должника.

В соответствии с п. 2.2. Цессии права требования Цедента по Договору переходят к Цессионарию в полном объеме и на тех условиях, которые существовали в отношениях между Цедентом и Должником на момент заключения настоящего Договора. К Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства Должника, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты за пользование денежными средствами, неустойки (пени, штрафы), госпошлина за рассмотрение Прав требований в судах и иные платежи, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, обязанность по уплате которых возложена на Должника и иных лиц.

Согласно п. 5.2. Цессии Цедент уведомляет Должника о состоявшейся уступке Прав требования. Уведомление Должника оформляется на бланке Цедента.

Цедент надлежащими образом уведомил Должника о заключении с Цессионарием Цессии о переуступке прав требования по Договору подряда № СПД-21/21 -Л/СПБ от 12.10.2021 г., ООО «ТСК ФАВОРИТ».

«12» октября 2021 года между Подрядчиком и Ответчиком, заключен договор подряда № СПД-21/21-Л/СПБ, в соответствии с которым Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнения комплекса строительно-монтажных работ по монтажу систем ВК, OBI, ОВ2, ХС, ЭОМ  в соответствии с Технической документацией, передаваемой по Акту передачи Технической документации в помещениях Многофункциональный комплекс (МФК) «Лахта центр», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, литера А (далее - «Объект»), в сроки и на условиях настоящего

Договора, материалами Подрядчика, в случае необходимости товарно-материальными ценностями Подрядчика.

Согласно п. 2.1. Договора стоимость Договора определена на основании Сметы (Приложение №2 к Договору), включает в том числе (но не ограничиваясь) стоимость подготовки*и передачи Подрядчику Исполнительной документации, а также включает компенсацию издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, и составляет 15 252 454 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 01 копейка, в т.ч. НДС 20% в размере 2 542 075 (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи семьдесят пять) рублей 67 копеек.

В силу ст. 4 Договора календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами: начало Работ: «20» октября 2021 г., окончание Работ: «28» апреля 2022 г. Датой фактического окончания Работ по Договору является дата подписания Сторонами Финального акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с разделом 3 Договора. На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ по Договору.

Согласно ст. 5 Договора Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Технической документацией обеспечить выполняемый объем Работ материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями. Субподрядчик, при передаче Подрядчиком давальческих материалов, ТМЦ и/или оборудования в производство работ по накладной М-15, и другими актами обязуется принять их и выполнить Работы с использованием переданных Подрядчиком материалов, ТМЦ и/или оборудования. По мере выполнения Работ с использованием материалов Подрядчика Субподрядчик обязан одновременно с Актами приемки выполненных работ (КС-2), оформленными по форме Приложения № 12 к Договору, предоставлять Акт переработки материалов (смонтированного оборудования) по форме Приложения №10 к Договору.

В силу п. 14.18 Договора Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность переданного ему имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента заключения Договора и до подписания Сторонами Финального акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, оборудования и результатов Работ или любой их части по любой причине Субподрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления.

Согласно п. 7.1. Договора для выполнения Работ по Договору Субподрядчик обязан качественно выполнить все строительно-монтажные и другие Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов, строительных норм и правил (СНиП).

В силу п.п., 14.1., 14.2., Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Штрафные санкции, указанные в разделе 14 настоящего Договора, за нарушение обязательств по Договору могут быть взысканы Подрядчиком из текущих платежей причитающихся Субподрядчику. Субподрядчик несет полную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки, причиненные Подрядчику Субподрядчиком и/или привлеченными Субподрядчиком лицами вследствие несоблюдения условий Договора, в том числе за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности, предоставляемой по Договору информации.

Ст. 16 Договора гласит, что Стороны признают и соглашаются, что настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Подрядчиком или Субподрядчиком во внесудебном порядке на основании условий, указанных в п. 16.2 Договора. Стороны согласовали следующее условие внесудебного досрочного расторжения Договора по инициативам Сторон (в том числе, но не исключительно): нарушение Субподрядчиком любого из сроков по настоящему Договору более чем на 10 (Десять) календарных дней. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, указанным в п. 16.2. Договора, направляет в адрес другой Стороны письменное уведомление, не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения Договора, указанной в уведомлении. Отправка уведомления осуществляет в порядке, предусмотренном п. 16.9. Договора. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления о расторжении, Стороны проводят сверку взаиморасчетов и объема выполненных Работ, с оформлением соответствующего Акта сверки.

В соответствии с платежными поручениями № 40189 от 27.10.2021г., № 47148 от 15.12.2021г., Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс в размере 1 016 820 (Один миллион шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Подрядчик -передал в соответствии с накладными Субподрядчику ТМЦ (материалы, оборудование, изделия и т.д.) с целью обеспечения выполнения объема Работ согласно следующим накладным: № 623/000021687/ф00016320, № 623/000021687/ф00016330, № 623/000021687/ф00016667, № 623/000021687/ф00017238, № 623/000021687/ф00017326, № 623/000021687/ф00017328, № 623/000021687/ф00018821, № 623/000021687/ф00020007, № 623/000021687/ф00020008, № 623/000021687/ф00020012, № 623/000021687/ф00020034, № 623/000021687/ф00020484, № 623/000021687/ф00022562, № 623/000021687/ф00022676, № 623/000021687/ф00023154, № 623/000021687/ф00023 53 7, № 623/000021687/ф00024388, № 623/000021687/ф00025316, № 623/000021687/ф00028787, № 623/000021687/ф00034084, № 623/000021687/ф00034087, № 623/000021687/ф00037966, № 623/000021687/ф00040790, № 623/000021687/ф00046922, № 623/000021687/ф00047037 в порядке ст.5 Договора.

Общая стоимость переданных ТМЦ 873 558 (Восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят восемь)рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 20 %.

Согласно п. 14.3. Договора в случае нарушения Субподрядчиком сроков начала и окончания Работ, указанных в п. 4.1 Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику на основании его письменного требования неустойку (единовременный штраф) в размере 1 % (Одного процента) от стоимости Договора.

Расчет единовременного штрафа в порядке п. 14.3. Договора:

15 252 454, 01 руб., * 1% = 152 524 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 54 копейки.

Согласно п. 14.4. Договора в случае нарушения Субподрядчиком сроков начала и окончания Работ, указанных в п. 4.1 Договора Субподрядчик на основании требования Подрядчика выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки (начиная со второго дня) до фактического исполнения обязательств, но не более 10% (Десять процентов) от цены Договора.

Расчет неустойки в порядке п. 14.4. Договора:

 

Период просрочки

 

Стоимость Договора

с

по

дней

Формула

Неустойка

15 252 454,01

28.04.2022

29.07.2022

93

15 252 454,01 х 93 х 0.1%

1 418 478,22 р.

 

 

Итого:

1 418 478,22 руб.

Стоимость Договора: 15 252 454,01 руб.

Сумма процентов: 1 418 478,22 руб.

 

 

В силу ст. 715 ГК РФ - если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 421 ГК РФ Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения иска в части неустойки и штрафа,  исходя из следующего.

Согласно п. 4  договора,  начало срока -20.10.2021,  окончание- 28.04.2021,  то есть сторонами срок не согласован, график выполнения работ не представлен.

Кроме того, заказчик не исполнил обязательства по своевременной передаче строительной площадки по акту приему-передачи.

В свою очередь, ООО «ТСК Фаворит» неоднократно уведомляло заказчика о невозможности приступить к выполнению работ.

Письмами № 8 от 31.03.2022 г. и № 7 от 22.03.2022 г. ООО «ТСК Фаворит» сообщало заказчику о наличии препятствующих к выполнению работ обстоятельств, а именно: об отсутствии оборудования и материала на объекте и об отсутствии фронта работ (строительной готовности), а также о существенном простое в связи с неисполнением заказчиком своих обязательств.

В последующем ООО «ТСК Фаворит» также направило заказчику письмо № 15 от 13.07. 2022 г. в котором сообщило:

Компания ООО "ТСК ФАВОРИТ" не приступила в полном объеме к производству работ по договору № СПД-21/21-Л/СПБ от 12.10.2021.-сдоговор по захватке Лахта 7-14 - Монтаж ВК, ОВ1, ОВ2, ХС, ЭОМ на 12 эт. в связи с:

ВК- выполнены работы в сердцевине лифтового холла на 12 этаж. В связи с отсутствием материалов, дальнейшие работы производить нет возможности и работы были не завершены. Материал был разобран сотрудниками смежных подрядных организаций и рабочими ООО «Прайдекс Констракшн», о чем неоднократно оповещали ответственных за систему, а так же оповещали вас в письме Исх № 8от 31.03.2022 г.

ОВ1 на 4 и 5 лепестке. Заявка на прием работ технадзором подана, исполнительная документация сдана. На сегодняшний день работы не ведутся в связи с отсутствием приемке техническим надзором и отсутствием материалов на объекте, о чем оповещали вас в письме Исх № 8 от 31.03.2022 г.

ООО «ПрайдексКонстракшн» также проигнорировано данное письмо.

Тем самым, со стороны ООО «ПрайдексКонстракшн» допущена просрочка кредитора, поскольку заказчик не передал своевременно фронт работ, не обеспечил возможность субподрядчику выполнять работы, нарушил сроки передачи материалов, связи с чем невозможно привлечение к ответственности за просрочку выполнения обязательств ООО «ТСК Фаворит».

Так, соответствии со ст. 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

В соответствии со ст. 747 ГК РФ, заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги (п. 2 ст. 747 ГК РФ).

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью   "ТСК ФАВОРИТ" (ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ""ПРОДЖЕКТ СТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере   1 016 820 руб., 873 558 руб.  44  коп. стоимости материалов, 22 013  руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

ФИО1