Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-2628/2022

г. Рязань

28 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2022 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Ушаковой И.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом  судебном заседании в помещении Арбитражного суда Рязанской области по адресу: 

<

...> дело по исковому заявлению  Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 390046, 

<

...>)

 к муниципальному предприятию "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани (ОГРН 

<

***>, 390026, 

<

...>)

о взыскании неустойки по договору №РТС262А200018 от 16.03.2020 в размере 215905 руб. 06 коп., по договору №РТС262А200010 от 04.03.2020 в размере 104565 руб. 60 коп., по договору №РТС262А190245 от 27.01.2020 в размере 74983 руб. 06 коп.

 

при участии в  судебном заседании:

от истца: ФИО2,  представитель по доверенности от 12.01.2022, личность установлена на основании предъявленного паспорта, 

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 16.08.2022, личность установлена на основании предъявленного паспорта,  удостоверения, 

 

установил:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением о взыскании с муниципального предприятия "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани неустойки по договору №РТС262А200018 от 16.03.2020 в размере 215905 руб. 06 коп., по договору №РТС262А200010 от 04.03.2020 в размере 104565 руб. 60 коп., по договору №РТС262А190245 от 27.01.2020 в размере 74983 руб. 06 коп., всего 395453,72руб.

16.06.2022 в материалы дела от муниципального предприятия "Ремонтно  строительное управление №1" города Рязани поступило заявление о признании исковых требований в части суммы 197801,66руб., с учетом дополнительного расчета истца (т.3л.д.93) с уточненными периодами просрочки исходя из дат фактического представления актов выполненных работ, ответчик признал исковые требования  истца на сумму 197783,42руб.

Из материалов дела следует: Региональный оператор в области проведения капитального ремонта многоквартирных домов является специализированной некоммерческой организацией, которая создается субъектом Российской Федерации и осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе такая организация выполняет функции технического заказчика работ.

Согласно ч. 1 ст. 178 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в соответствии со ст. 178 Жилищного кодекса Российской Федерации и в силу Закона Рязанской области от 18.11.2013 № 70-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» осуществляет деятельность регионального оператора в области проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Рязанской области.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 180 Жилищного кодекса Российской Федерации одной из функций регионального оператора является осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

Порядок привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяет Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 615 от 01.07.2016г.

04 марта 2020 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (далее по тексту - Фонд) и Муниципальным предприятием «Ремонтно-строительное управление № 1» города Рязани (далее -МП «РСУ № 1», Общество) в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона был заключен Договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по в капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № РТС262А200010 (далее по тексту - Договор). Договор заключается путем обмена электронными документами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком электронной цифровой подписью, в соответствии с регламентом деятельности электронной площадки www. rts-tender.ru.

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее Объект (ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении № 1.

Пунктом 2.1 Раздела 2 Договора установлено, что общая стоимость работ по договору определяется сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 130 431 759 рублей 00 копеек без учета НДС.

Стоимость по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Договору.

Пунктом 3.1 Договора предусматривается, что датой начала выполнения работ является день, следующий за датой заключения договора.

Дата окончания выполнения работ - не позднее 01 декабря 2020.

12 ноября 2020г. сторонами подписаны дополнительные соглашения № 33,38 к договору № РТС262А200010 от 04 марта 2020г., согласно которым стороны пришли к соглашению о продлении срока выполнения работ - не позднее 25 декабря 2020 г.

03,08,09,11,15,21,22,24,29,30 декабря 2020г. сторонами подписаны дополнительные соглашения № 40,41,42,44,45,47,49,51,55,56,57,58 к договору № РТС262А200010 от 04 марта 2020г., согласно которым стороны пришли к соглашению об изменении цены договора в связи с изменением локальных смет на капитальный ремонт системы ХВС дома по адресу г. Рязань, 

<

...>, ул. Павлова, 

<

...> на капитальный ремонт системы водоотведения дома по адресу 

<

...> на капитальный ремонт крыши дома по адресу 

<

...> 

<

...>, 

<

...>.

В Графике оказания услуг и (или) выполнения работ устанавливаются сроки этапов услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме (Приложение № 3 к договору).

Однако в нарушение вышеназванных норм Подрядчик не выполнил работы по капитальному ремонту в указанный в договоре срок.

В соответствии с п. 3.3 договора нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (услуг), влечет применение Заказчиком к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных договором, а также Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.2.1 договора.

Согласно п. 9.2 в случае каждого нарушения сроков отдельных этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (услуг), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту того Объекта, по которому нарушены сроки выполнения работ. Неустойка уплачивается в указанном размере за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Пунктом 5.1.18 Договора установлено, что подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором в соответствии со сметной документацией, и сдать объект рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно п. 6.1 договора все работы выполняются в соответствии с Техническими заданиями и регламентом организации производства ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, указанные в Графике выполнения работ (услуг), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

При исполнении обязательств по Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядчиком был нарушен срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

По претензии № 7/22317 от 14.12.2020

03 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, п. Остров, д. 16.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 2 дня (с 02 декабря по 03 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 3 212 310 руб. 85 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 2 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 6 424 руб. 62 коп.

03 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 2 дня (с 02 декабря по 03 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 596 877 руб. 35 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 2 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 1 193 руб. 75 коп.

По претензии № 7/22334 от 14.12.2020

08 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 7 дней (с 02 декабря по 08 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме неустойки составляет: 75 342 руб. 38 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 7 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 527 руб. 40 коп.

08 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 7 дней (с 02 декабря по 08 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме неустойки составляет: 102 827 руб. 95 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 7 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 719 руб. 80 коп.

По претензии № 7/22333 от 14.12.2020

09 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 8 дней (с 02 декабря по 09 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 286 931 руб. 70 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 8 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 2 295 руб. 45 коп.

По претензии № 7/22646 от 15.12.2020

11 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 10 дней (с 02 декабря по 11 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме неустойки составляет: 48 018 руб. 77 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 10 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 480 руб. 19 коп.

11 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 10 дней (с 02 декабря по 11 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 346 977 руб. 54 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 10 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 3 469 руб. 78 коп.

По претензии № 7/22902 от 17.12.2020

15 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 14 дней (с 02 декабря по 15 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 412 331 руб. 58 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 14 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 5 772 руб. 64 коп.

По претензии № 7/23681 от 25.12.2020

21 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 20 дней (с 02 декабря по 21 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме неустойки составляет: 112 313 руб. 71 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 20 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 2 246 руб. 27 коп.

21 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, п. Шпалозавода, д. 15.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 20 дней (с 02 декабря по 21 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 85 982 руб. 48 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 20 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 1 719 руб. 65 коп.

21 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 20 дней (с 02 декабря по 21 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 33 198 руб. 66 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 20 дней (количество дней просрочки) * 0,1 % (размер неустойки) = 663 руб. 97 коп.

По претензии № 7/23680 от 25.12.2020

22 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, п. Шпалозавода, д. 15.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 21 день (с 02 декабря по 22 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 464 517 руб. 08 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 21 день (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 9 754 руб. 86 коп.

22 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 21 день (с 02 декабря по 22 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме неустойки составляет: 17 699 руб. 04 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 21 день (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 371 руб. 68 коп.

22 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 21 день (с 02 декабря по 22 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 35 918 руб. 64 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 21 день (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 754 руб. 29 коп.

22 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 21 день (с 02 декабря по 22 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме неустойки составляет: 25 692 руб. 53 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 21 день (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 539 руб. 54 коп.

По претензии № 7/23679 от 25.12.2020 

23 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 22 дня (с 02 декабря по 23 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 280 319 руб. 40 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 22 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 6 167 руб. 03 коп.

По претензии № 7/23793 от 26.12.2020

24 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 23 дня (с 02 декабря по 24 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 45 730 руб. 44 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 23 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 1 051 руб. 80 коп.

По претензии № 7/23802 от 26.12.2020

25 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 24 дня (с 02 декабря по 25 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 180 624 руб. 06 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 24 дня (количество дней просрочки) * 0,1 % (размер неустойки) = 4 334 руб. 98 коп.

По претензии № 7/82 от 12.01.2021

26 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 25 дней (с 02 декабря по 26 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 299 839 руб. 62 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 25 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 7 495 руб. 99 коп.

По претензии № 7/78 от 12.01.2021

30 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 5 дней (с 26 декабря по 30 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 2 467 025 руб. 10 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 5 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 12 335 руб. 13 коп.

30 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 5 дней (с 26 декабря по 30 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 4 220 089 руб. 63 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 5 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 21 100 руб. 45 коп.

По претензии № 7/404 от 18.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 4 дня (с 26 декабря по 29 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 924 682 руб. 50 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 4 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 3 698 руб. 73 коп.

По претензии № 7/405 от 18.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 4 дня (с 26 декабря по 29 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 2 861 900 руб. 35 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 4 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 11 447 руб. 60 коп.

Таким образом, сумма неустойки по договору № РТС262А200010 от 04 марта 2020г., подлежащая взысканию с Ответчика, составила 104 565 руб. 60 коп.

16 марта 2020 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (далее по тексту - Фонд) и Муниципальным предприятием «Ремонтно-строительное управление № 1» города Рязани (далее -МП «РСУ № 1», Общество) в соответствии с результатами проведенного электронного аукцион был заключен Договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по в капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № РТС262А200018 (далее по тексту - Договор). Договор заключается путем обмена электронными документами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком электронной цифровой подписью, в соответствии с регламентом деятельности электронной площадки www. rts-tender.ru.

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее Объект (ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении № 1.

Пунктом 2.1 Раздела 2 Договора установлено, что общая стоимость работ по договору определяется сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 158 288 814 рублей 00 копеек без учета НДС.

Стоимость по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Договору.

Пунктом 3.1 Договора предусматривается, что датой начала выполнения работ является день, следующий за датой заключения договора.

Дата окончания выполнения работ - не позднее 01 декабря 2020.

12,30 ноября 2020г. сторонами подписаны дополнительные соглашения № 25,26,28 к договору № РТС262А200018 от 16 марта 2020г., согласно которому стороны пришли к соглашению о продлении срока выполнения работ по договору в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий и недопуском собственниками помещений в многоквартирном доме - не позднее 25 декабря 2020 (выборочно пообъектно).

30 ноября, 03,11,15,16,23,26,29 декабря 2020г. сторонами подписаны дополнительные соглашения № 27,28,29,32,33,35,39,41,42,43,44 к договору № РТС262А200018 от 16 марта 2020г., согласно которому стороны пришли к соглашению об изменении цены договора и изменении Локальных смет на капитальный ремонт системы ХВС в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> к.1,58, ул. Дзержинского, д. 51-53,61; на капитальный ремонт системы ГВС в доме по адресу 

<

...>, 11, ул. Вокзальная, 

<

...> на капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу 

<

...>/, ул. 6я Линия, 

<

...> в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

В Графике оказания услуг и (или) выполнения работ устанавливаются сроки этапов услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме (Приложение № 3 к договору).

Однако в нарушение вышеназванных норм Подрядчик не выполнил работы по капитальному ремонту в указанный в договоре срок.

В соответствии с п. 3.2 договора нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (услуг), влечет применение Заказчиком к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных договором, а также Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.2.1 договора.

Согласно п. 9.2 в случае каждого нарушения сроков отдельных этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (услуг), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту того Объекта, по которому нарушены сроки выполнения работ. Неустойка уплачивается в указанном размере за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Пунктом 5.1.18 Договора установлено, что подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором в соответствии со сметной документацией, и сдать объект рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно п. 6.1 договора все работы выполняются в соответствии с Техническими заданиями и регламентом организации производства ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, указанные в Графике выполнения работ (услуг), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

При исполнении обязательств по Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядчиком был нарушен срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

По претензии № 7/22318 от 14.12.2020

03 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 2 дня (с 02 декабря по 03 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 2 440 739 руб. 58 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 2 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 4 881 руб. 48 коп.

По претензии № 7/22440 от 15.12.2020

11 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 10 дней (с 02 декабря по 11 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 666 208 руб. 80 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 10 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 6 662 руб. 09 коп. 

По претензии № 7/22900 от 17.12.2020

15 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 14 дней (с 02 декабря по 15 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 157 858 руб. 20 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 14 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 2 210 руб. 01 коп.

По претензии М 7/23111 от 21.12.2020

16 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 15 дней (с 02 декабря по 16 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 201 576 руб. 60 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 15 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 3 023 руб. 65 коп.

По претензии № 7/23678 от 25.12.2020

18 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 17 дней (с 02 декабря по 18 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 1 867 230 руб. 18 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 17 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 31 742 руб. 91 коп.

По претензии М 7/23798 от 26.12.2020

23 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 22 дня (с 02 декабря по 23 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 243 520 руб. 92 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 22 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 5 357 руб. 46 коп.

По претензии М 7/23900 от 28.12.2020 /

26 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 1 день (с 26 декабря по 26 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 4 756 522 руб. 28 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 1 день (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 4 756 руб. 52 коп.

По претензии № 7/81 от 12.01.2021

26 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 25 дней (с 02 декабря по 26 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 163 993 руб. 68 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 25 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 4 099 руб. 84 коп.

По претензии № 7/394 от 18.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 9 дней (с 21 декабря по 29 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 468 184 руб. 32 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 9 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 4213 руб. 66 коп.

По претензии М 7/395 от 18.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 28 дней (с 02 декабря по 29 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 2 374 119 руб. 07 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 28 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 66 475 руб. 33 коп.

По претензии № 7/396 от 18.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ГВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 28 дней (с 02 декабря по 29 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 2 317 507 руб. 23 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 28 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 64 890 руб. 20 коп.

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 28 дней (с 02 декабря по 29 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ГВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 358 230 руб. 06 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 28 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 10 030 руб. 44 коп.

По претензии № 7/397 от 18.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 4 дня (с 26 декабря по 29 декабря 2019 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 1 890 368 руб. 06 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 4 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 7 561 руб. 47 коп.

Таким образом, сумма неустойки по договору № РТС262А200018 от 16 марта 2020г., подлежащая взысканию с Ответчика, составила 215 905 руб. 06 коп.

27 января 2020 года между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (далее по тексту - Фонд) и Муниципальным предприятием «Ремонтно-строительное управление № 1» города Рязани (далее -МП «РСУ № 1», Общество) в соответствии с результатами проведенного электронного аукцион был заключен Договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по в капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № РТС262А190245 (далее по тексту - Договор). Договор заключается путем обмена электронными документами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком электронной цифровой подписью, в соответствии с регламентом деятельности электронной площадки www. rts-tender.ru.

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее Объект (ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении № 1.

Пунктом 2.1 Раздела 2 Договора установлено, что общая стоимость работ по договору определяется сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 161 446 345 рублей 00 копеек без учета НДС.

Стоимость по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Договору.

Пунктом 3.1 Договора предусматривается, что датой начала выполнения работ является день, следующий за датой заключения договора.

Дата окончания выполнения работ - не позднее 01 декабря 2020.

12 ноября 2020г. сторонами подписаны дополнительные соглашения № 64 к договору № РТС262А190245 от 27.01.2020г., согласно которому стороны пришли к соглашению о продлении срока выполнения работ по договору в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий - не позднее 25 декабря 2020 (выборочно пообъектно).

11,16,18,23,24,25,29 декабря 2020г. сторонами подписано дополнительное соглашение № 67,68,69,70.71.72.73 к договору № РТС262А190245 от 27 января 2020г., согласно которому стороны пришли к соглашению об изменении цены договора и изменении Локальных смет на капитальный ремонт системы ХВС в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, 27,27 к. 1, 31, 31 к. 1, 33/67, ул. Ленинского Комсомолоа, д. 93 к. 1, 95 к. 2, ул. Гагарина, д. 160/2; на капитальный ремонт крыши в доме по адресу 

<

...> в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

В Графике оказания услуг и (или) выполнения работ устанавливаются сроки этапов услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме (Приложение № 3 к договору).

Однако в нарушение вышеназванных норм Подрядчик не выполнил работы по капитальному ремонту в указанный в договоре срок.

В соответствии с п. 3.2 договора нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (услуг), влечет применение Заказчиком к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных договором, а также Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.2.1 договора.

Согласно п. 9.2 в случае каждого нарушения сроков отдельных этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (услуг), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту того Объекта, по которому нарушены сроки выполнения работ. Неустойка уплачивается в указанном размере за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Пунктом 5.1.18 Договора установлено, что подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором в соответствии со сметной документацией, и сдать объект рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно п. 6.1 договора все работы выполняются в соответствии с Техническими заданиями и регламентом организации производства ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, указанные в Графике выполнения работ (услуг), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

При исполнении обязательств по Договору на выполнение работ по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах, подрядчиком был нарушен срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

По претензии № 7/22647 от 15.12.2020

11 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 10 дней (с 02 декабря по 11 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 142 837 руб. 45 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 10 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 1 428 руб. 37 коп.

11 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Полетаева, д. 25

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 10 дней (с 02 декабря по 11 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 374 885 руб. 28 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 10 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 3 748 руб. 85 коп.

11 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 10 дней (с 02 декабря по 11 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 452 096 руб. 06 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 10 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 4 520 руб. 96 коп.

По претензии № 7/23112 от 21.12.2020

16 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 15 дней (с 02 декабря по 16 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 336 522 руб. 72 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 15 дней (количество дней просрочки) * 0,1 % (размер неустойки) = 5 047 руб. 84 коп.

16 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 15 дней (с 02 декабря по 16 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 62 286 руб. 30 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 15 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 934 руб. 29 коп.

16 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 15 дней (с 02 декабря по 16 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 355 217 руб. 22 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 15 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 5 328 руб. 26 коп.

По претензии М 7/23408 от 23.12.2020

18 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 17 дней (с 02 декабря по 18 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 148 491 руб. 61 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 17 дней (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 2 524 руб. 36 коп.

По претензии № 7/23794 от 26.12.2020

24 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 23 дня (с 02 декабря по 24 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 390 745 руб. 62 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 23 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 8 987 руб. 15 коп.

По претензии № 7/23797 от 26.12.2020

23 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 22 дня (с 02 декабря по 23 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 412 927 руб. 74 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 22 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 9 084 руб. 41 коп.

По претензии № 7/23801 от 26.12.2020

25 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 24 дня (с 02 декабря по 25 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту системы ХВС в многоквартирном доме неустойки составляет: 345 040 руб. 02 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ)* 24 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 8 280 руб. 96 коп.

По претензии М 7/393 от 18.01.2021 i 29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 4 дня (с 26 декабря по 29 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 3 147 836 руб. 15 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 4 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 12 591 руб. 34 коп. По претензии № 7/634 от 21.01.2021

29 декабря 2020 года был составлен и подписан между сторонами Договора акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>

Нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 4 дня (с 26 декабря по 29 декабря 2020 года включительно).

Общая сумма начисленной в связи нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме неустойки составляет: 3 126 567 руб. 06 коп. (цена объекта по договору на выполнение работ) * 4 дня (количество дней просрочки) * 0,1% (размер неустойки) = 12 506 руб. 27 коп.

Таким образом, сумма неустойки по договору № РТС262А190245 от 27 января 2020г., подлежащая взысканию с Ответчика, составила 74 983 руб. 06 коп.

Общая сумма неустойки по договорам № РТС262А190245 от 27 января 2020, № РТС262А200010 от 04 марта 2019г., № РТС262А200018 от 16 марта 2020г. составила 395 453 руб. 72 коп.

Фондом в адрес Ответчика были направлены претензии, однако оставлены без удовлетворения и ответа.

 

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. В соответствии с ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу п. 4.2.2 Договора заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, направлять Подрядчику уведомления о нарушении сроков по Договору и предписаний по устранению недостатков и дефектов при производстве работ.

С учетом дополнительно представленных сторонами расчетов , исходя из дат  фактически представленных актов выполненных работ  (т.3л.д.93) сумма неустойки по договору №РТС262А200018 от 16.03.2020 в размере 127791 руб. 44 коп., по договору №РТС262А200010 от 04.03.2020 в размере 61636 руб. 50 коп., по договору №РТС262А190245 от 27.01.2020 в размере 8355 руб. 48 коп., всего 197783,42руб.

 

В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. Арбитражный суд, в частности, не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Согласно части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Таким образом, в случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд, рассматривая заявление о признании иска, должен проверить основания признания исковых требований и выяснить, не является ли признание исковых требованием следствием заблуждения ответчика относительно его прав на судебную защиту.

Признание иска (т.3л.д.60) подписано директором муниципального предприятия "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани ФИО4

Поскольку признание иска является добровольным волеизъявлением ответчика (статья 1 ГК РФ), не противоречит закону и не нарушает права других лиц, произведено полномочным представителем (в данном случае руководителем ответчика), у суда  не имеется оснований не принимать признание иска ответчиком на основании части 5 статьи 49 АПК РФ.

Поскольку ответчик признал иск в части, то госпошлина распределяется применительно к правилам статьи 110 АПК РФ (пропорциональное распределение судебных расходов) и 333.40 НК РФ (возврат пошлины при признании иска).

Согласно ст.333.40 НК РФ при признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска) до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит возврату 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Обоснованно заявленная сумма иска с учетом уточненных расчетов, признанная ответчиком  197783,42 - 50% суммы иска, госпошлина  5455руб., 30%  подлежит взысканию с ответчика 1636руб., возврату из бюджета  подлежит 3819руб. - 70%

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

                                                              РЕШИЛ:

1. Взыскать с муниципального предприятия "Ремонтно  строительное управление №1" города Рязани (ОГРН 

<

***>, 390026, 

<

...>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 390046, 

<

...>) неустойку в сумме 197783,42руб., госпошлину 1636руб.

В остальной части иска отказать.

2. Возвратить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 390046, 

<

...>) из дохода федерального бюджета госпошлину в сумме  3819руб., уплаченную платежным поручением от 14.10.2021 №10405.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

 

Судья                                                                                                             И.А. Ушакова