Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-12232/2019

12 мая 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению Муниципального дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 38 "Золотиночка" с. Иенгра, Нерюнгринского района (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического  лица 03.07.2003, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой  службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 678996, Республика Саха  (Якутия), г. Нерюнгри, 

<

...> Победы, д. 2, корп. 2) № б/н к обществу с  ограниченной ответственностью "Строительная компания Стройпрогресс" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица  01.04.2015, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы   № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677008, 

<

...> км, д. 33, корп.1) об обязании устранить  недостатки работ, выполненных по контракту от 10.08.2017 № 08163000170117000159-0187539- 01 до 30.04.2020, а также взыскании 6 000 рублей расходов по уплате государственной  пошлины.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Стройпрогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в  качестве юридического лица 01.04.2015, регистрирующий орган – межрайонная инспекция  Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения):  

677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе, 8 км, д. 33, корп.1)  произвести в месячный срок с момента вступления настоящего решения в силу,  невыполненные работы и устранить недостатки в следствие некачественно выполненных работ  по контракту № 0816300017017000159-0187539-01 от 10.08.2017 по капитальному ремонту  кровли в здании детского сада № 38 "Золотиночка" с.Иенгра, в следующем объеме:  

1. Выполнить разборку покрытий кровель из рулонных материалов, 100 кв.м. покрытия  в объеме - 7,50392.  

2. Выполнить устройство подстропильных рам из бруса, 1 куб.м. древесины в  конструкции в объеме 10,28, из них устранить некачественно выполненные объемы -5,14, не  выполненные объемы - 5,14.  

3. Устранить некачественно выполненные работы - Установка стропильных ног из  бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме -3,17.  

4. Устранить некачественно выполненные работы - Постановка болтов строительных с  гайками и шайбами, 100 шт. болтов в объеме - 2,92.  

5. Устранить некачественно выполненные работы - Установка стоек, прогонов из  бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 15,967.  

6. Выполнить установку мауэрлата, лежней, 1 куб.м. древесины в конструкции в  объеме - 7.03. из них устранить некачественно выполненные объемы - 0,96, не выполненные  объемы-6,07.  

7. Выполнить установку связей из бруска 50*150, 1 куб.м. древесины в конструкции в  объеме- 3,634.  

8. Выполнить устройство слуховых окон, 1 слуховое окно в количестве 4 штук. 

9. Устранить некачественно выполненные работы по улучшенной окраске масляными  составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 кв.м. окрашиваемой поверхности в  объеме - 0,0384.  

10. Устранить некачественно выполненные работы по устройству карнизов с  обшивкой доской толщиной 22 мм, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и  развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,6909.  

11. Устранить некачественно выполненные работы по устройству фронтонов, 100  кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме0,68.  

12. Выполнить устройство по фермам настила обрешетки толщиной 16 мм  сплошного. 100 кв.м. покрытия в объеме - 9,853024, из них устранить некачественно  выполненные объемы - 4.926512, не выполненные объемы - 4,926512.  

13. Произвести огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом  «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для  обеспечения показателей пожарной опасности древесины, 100 кв.м. обрабатываемой  поверхности в объеме-26,356.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Стройпрогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в  качестве юридического лица 01.04.2015, регистрирующий орган – межрайонная инспекция  Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения):  677008, 

<

...> км, д. 33, корп.1) в  доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана  посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в  информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о  времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого  арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н.