10410_10882794  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-32610/22

07 августа 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казенного  учреждения города Гуково "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства" муниципального образования "город Гуково" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Строй- стандарт 55" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третьи лица: ИП ФИО2 (ОГРНИП 313619334000083 ИНН  

<

***>); ООО «ГАРАНТ-С» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); ИП  

ФИО3 (ОГРНИП 318619600174786 ИНН 

<

***>)  об обязании (уточненные требования)  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Строй-Стандарт 55» выполнить гарантийные обязательства по  

муниципальному контракту № Ф.2019.0063 от 30.12.2019 в виде устранения значительных  

дефектов в течение месяца со дня вступления в законную силу решения, а именно:  

привести в соответствие с техническим паспортом изделия крепления детского  

игрового комплекса, артикул SL1302 («Домик»); 

восстановить работоспособность светильников, установленных при реализации  

проекта «Благоустройство улицы Комсомольская (между ул. Криничная и ул. Красная  

Горка) г. Гуково»: - светильник (LED 150 Вт) - 1 шт.; - светильник (LED 60 Вт на опоре h=3,0м) - 49 шт.; - светильник (LED 60 Вт на опоре h =2,5м) - 14 шт. 

восстановить покрытие велодорожек (бетонная стяжка c окраской) общей  

площадью не менее 215,8 кв.м; восстановить окрашивание велодорожек общей площадью 14 кв.м; восстановить отдельные элементы крепления арки «Версаль». 

восстановить бетонное основание крепления урн в ротонде с гамаками 1 шт;  восстановить бетонное основание крепления урн в ротондах с сидениями 2 шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй-стандарт 55"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 01.03.2023 9:08:00

Кому выдана Танова Диана Григорьевна