19190/2023-50533(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российс кой Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 Дело № А43-34903/2022 

г.Нижний Новгород «28» марта 2023 года  

Дата объявления резолютивной части решения «22» марта 2023 года  Дата изготовления решения в полном объеме «28» марта 2023 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр 28-906), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Караштиным Д.С.,  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ОГРН 1025200916795, ИНН 5203002203) 

к ответчику: Государственному энергетическому производственному предприятию «Нижегородоблкоммунэнерго»  (ОГРН 1025203040500, ИНН 5260004366),  

о взыскании задолженности, неустойки, 

при участии представителей (до перерыва)  от истца: Батуриной И.А. по доверенности,  от ответчика: не явился,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (далее – ООО «Строймонтаж») обратилось в  Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к Государственному энергетическому  производственному предприятию «Нижегородоблкоммунэнерго» (далее – ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго») о  взыскании 2273169 руб. задолженности по оплате выполненных работ по государственному контракту от 26.06.2020   № 6, 345332 руб. 26 коп. неустойки по 06.03.2023 (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке  статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Требование основано на статьях 309, 310, 330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано  ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по оплате выполненных работ.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом, явку в суд не обеспечил. 

Ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства рассмотрено судом в порядке статьи 158 АПК  РФ и отклонено ввиду отсутствия процессуальных оснований. Суд считает возможным разъяснить, что заключение  сторонами мирового соглашения возможно на любой стадии.  

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв. После перерыва рассмотрение дела  продолжено в отсутствие представителей сторон по правилам статьи 156 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Между ООО «Строймонтаж» (исполнитель) и ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» (заказчик) заключен  государственный контракт от 26.06.2020 № 6 (далее – контракт), по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель  принимает на себя обязательства по оказанию услуг по ремонту и техническому диагностированию газопровода-отвода  высокого давления от места врезки в газопровод Семенов – Красные Баки в районе д.Боковая Семеновского района и  газораспределительной станции (ГРС) к р.п. Воскресенское Нижегородской области согласно условиям контракта,  техническому заданию (приложение № 1 к контракту), сводным сметным, локальным сметным расчетам и локальным  сметам (приложение № 2 к контракту), а также иные работы, прямо не предусмотренные в техническом задании, но  необходимые для достижения целей настоящего контракта (пункт 1.1. контракта). Заказчик обязуется принять и  оплатить работы в порядке и на условиях настоящего контракта (пункт 2.2. договора).  

Согласно пункту 2.3. контракта виды и объем работ установлены в техническом задании (приложение № 1 к  контракту) и сводными сметными, локальными сметными расчетами и локальными сметами (приложение № 2 к  контракту). Все виды услуг (работ), предусмотренные контрактом, техническим заданием, сводным сметным,  локальным сметным расчетами и локальными сметами должны быть оказаны в строгом соответствии с ГОСТ, СНиП,  ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН и другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету закупки, в том  числе регулирующим обращение с отходами производства и охране окружающей среды, с соблюдением всех  технологических процессов и в полном объеме. Возможное поэтапное оказание услуг (выполнение работ). Частичное  выполнение работ не допускается.  

В силу пунктов 2.1.-2.3 цена контракта определена в соответствии с результатами проведенного электронного  аукциона и составляет 16065821 руб., в том числе НДС. Цена контракта включает все затраты исполнителя, связанные с  выполнением работ, в том числе затраты на устранение недостатков, уплату налогов, сборов, а также плату за  

негативное воздействие на окружающую среду, в расчет которой необходимо включить образующиеся в ходе  проведения работ отходы, и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой на протяжении всего срока  действия контракта и не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, установленную заказчиком, за  исключением случаев, предусмотренных п.2.6. контракта.  

Согласно пункту 2.7. контракта оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится заказчиком в  безналичной форме после их приемки, на основании выставленного исполнителем счета и/или счета-фактуры в течение  15 дней с даты подписания заказчиком документов, предусмотренных приложением №№ 3,4,5 к контракту (форма КС-2,  КС-3, КС-14) с учетом требований к результатам оказанных услуг (выполненных работ), предусмотренных техническим  заданием (приложение № 1 к контракту). Оплата оказанных поэтапно услуг (выполненных поэтапно работ) производится  заказчиком в безналичной форме после их приемки, на основании выставленного исполнителем счета и/или счета-фактуры в течение 15 дней с даты подписания заказчиком документов, предусмотренных приложением №№ 3,4,5 к  контракту (Форма КС-2, КС-3) с учетом требований к результатам оказанных услуг (выполненных работ),  предусмотренных техническим заданием (приложение № 1 к контракту). Оплата оказанных поэтапно услуг  (выполненных поэтапно работ) производится заказчиком в безналичной форме после их приемки, на основании  выставленного исполнителем счета и/или счета-фактуры в течение 15 дней с даты подписания заказчиком документов,  предусмотренных приложением №№ 3,4 к контракту (форма КС-2, КС-3, КС-14) с учетом требований к результатам  оказанных услуг (выполненных работ), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1 к контракту).  Выплата аванса не предусмотрена.  

Из пунктов 3.1-3.2. контракта (с учетом дополнительного соглашения от 15.08.2020) следует, что срок  выполнения работ: с момента подписания государственного контракта и до 15 ноября 2020 года. Место выполнения  работ: газопровод-отвод высокого давления, протяженностью 24138 п.м., инв. № 91300, лит.I, расположенный по адресу:  Нижегородская область, от места врезки в газопровод «Семенов-Красные Баки» в районе д.Боковая Семеновского  района к ГРС р.п. Воскресенское Воскресенского района (кадастровый номер объекта: 52:11:000000:0000:91300:1), и  газораспределительная станция (ГРС) к р.п. Воскресенское Нижегородской области» (адрес объекта: Нижегородская  область, Воскресенский район, 1,1 км юго-западнее р.п. Воскресенское (кадастровый номер: 52-52-17/022/2009-044).  

Согласно пункту 3.3. контракта прием-сдача оказанных услуг (выполненных работ) оформляется подписанием  сторонами документов по форме согласно приложению №№ 3,4,5 к контракту за исключением случаев,  предусмотренных абз.2 п.2.7. контракта.  

В соответствии с пункта 3.6. контракта по результатам приемки оказанных услуг (выполненных работ) заказчик  подписывает документы, направленные исполнителем согласно п.3.3.1. контракта либо направляет поставщику в  письменной форме мотивированный отказ от приемки с указанием перечня выявленных недостатков, а также  предложений экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для проведения экспертизы  

Из искового заявления следует, что работы по договору истцом выполнены, между сторонами подписаны акты о  приемке выполненных работ № 2 от 14.10.2020 на сумму 2000004 руб.; № 3.1 от 15.10.2020 на сумму 2500000 руб.; № 1.2  от 13.10.2020 на сумму 222203 руб. 54 коп.; № 1.1 от 13.10.2020 на сумму 2999826 руб. 04 коп.; № 3.2 от 15.10.2020 на  сумму 1200000 руб.; № 3.3 от 15.10.2020 на сумму 1000000 руб.; № 4.1 от 10.11.2020 на сумму 215282 руб. 19 коп.; № 4.2  от 10.11.2020 на сумму 10708 руб.; № 4.3 от 10.11.2020 на сумму 1977907 руб. 84 коп.; № 4.4 от 10.11.2020 на сумму  20148 руб. 97 коп.; № 5.1 от 13.11.2020 на сумму 137829 руб. 01 коп.; № 5.2 от 13.11.2020 на сумму 2091526 руб. 79 коп.;   № 5.4 от 13.11.2020 на сумму 40384 руб. 62 коп.; № 5.3 от 13.11.2020 на сумму 1650000.; справки о стоимости  выполненных работ № 1 от 15.09.2020, № 2 от 14.10.2020, № 3 от 15.10.2020, № 4 от 10.11.2020, № 5 от 13.11.2020 на  общую сумму 16065821 руб.  

В отношении узла учета природного газа ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» по адресу: Нижегородская  область, р.п. Воскресенское, ГРС Воскресенское, 26.07.2021 ФБУ «Нижегородский ЦСМ» составлен акт проверки  состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ Р 8.740-211, согласно которому узел учета  природного газа ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» соответствует ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ Р 8.741-2019 и может  использоваться для учета природного газа.  

Факт надлежащего исполнения договора подтверждается материалами дела. Согласно позиции истца, стоимость  выполненных работ по контракту оплачена ответчиком частично. Размер суммы задолженности составляет 2273169 руб.  

Ответчик в нарушение условий контракта принятое на себя обязательство по оплате выполненных работ  надлежащим образом не исполнило  

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена последним без удовлетворения, что послужило основанием  для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний  отказ от исполнения обязательств не допускается.  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

По правилу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

На основании пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены  договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  подрядчику.  

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Исковое требование в части взыскания долга в сумме 2273169 руб. основано на надлежащих доказательствах.  

Контрактные обязательства истец исполнил надлежащим образом, что подтверждается материалами дела -  актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными ответчиком  без разногласий. Возражения ответчика судом рассмотрены и отклонены как необоснованные.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65 и 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о выполнении истцом работ по контракту.  

Следовательно, требование о взыскании суммы долга в размере 2273169 руб. подлежит удовлетворению. Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 345332 руб. 26 коп. неустойки по 06.03.2023. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности  в случае просрочки исполнения (ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу пункта 5.2. контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, исполнитель вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5.2.1. контракта).  

Расчет судом проверен, признан неверным. 

Произведя перерасчет с учетом действующей ключевой ставки ЦБ РФ, суд удовлетворяет требование истца  частично в размере 308090 руб. 18 коп. (219436 руб. 59 коп. + 88653 руб. 59 коп.) за период по 06.03.2023. В остальной  части следует отказать.  

Возражения ответчика в части начисления пени судом рассмотрены и отклонены. Оснований для снижений пени  судом не установлено, в том числе не установлено оснований, согласно ст. 405, 406 ГК РФ. В данном случае  приведенные обстоятельства не изменяются сроки на оплату ( п. 1.3, 2.2, 2.7. контракта).  

Иные возражения и доводы судом рассмотрены и отклонены как необоснованные.  

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного энергетического производственного предприятия «Нижегородоблкоммунэнерго»  (ОГРН 1025203040500, ИНН 5260004366) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ОГРН  1025200916795, ИНН 5203002203) 2273169 руб. долга, 308090 руб. 18 коп. неустойки, а также 35579 руб. 66 коп.  расходов по государственной пошлине.  

В остальной части отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить на основании настоящего судебного акта обществу с ограниченной ответственностью  «Строймонтаж» (ОГРН 1025200916795, ИНН 5203002203) из федерального бюджета 383 руб. государственной  пошлины, оплаченной платежным поручением от 24.10.2022 № 808.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет  подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.  

Судья  С.Ю. Щукин