АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 23 декабря 2020 года Дело № А49-9393/2020 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н.Холькиной,  руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства г. Пензы» удовлетворить частично, расходы по  оплате государственной пошлины отнести на ответчика.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Клиотек» устранить,  в месячный срок со дня вступления решения в законную силу, недостатки,  выявленные в подрядных работах в рамках гарантийных обязательств,  выполненных на объекте по адресу: 

<

...> по  договору субподряда № Н 1-3/Зар-2015 от 01.10.2015, заключенному  правопредшественником – обществом с ограниченной ответственностью  «Сурский квартал» (Подрядчик), в настоящее время правопреемник -  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.  Пензы», и правопредшественником - обществом с ограниченной  ответственностью «СК ЗемСтройИнвест» (Субподрядчик), в настоящее время  правопреемник - общество с ограниченной ответственностью «Клиотек», с  выполнением технического решения, разработанного специализированной  организацией и способа, избранного обществом с ограниченной  ответственностью «Клиотек» поквартирно, а именно:  

кв. № 2. Устранить дефект окон, дверей. 

кв. № 6. Устранить трещины в несущих стенах, обеспечить  работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 9. Обеспечить работоспособность системы вентиляции в ванной  комнате.  

кв. 10. Устранить трещины в несущих стенах, обеспечить  работоспособность системы вентиляции, мерзнет угол около балкона.  

кв. № 11. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 12. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 13. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, устранить  трещину в плите перекрытия, линолеум уложен волнами.  

кв. № 15. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 16. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 20. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, образуется  

конденсат на окнах. кв. № 22. Устранить трещины в перегородках. кв. № 23. Устранить трещину в плите перекрытия. 

кв. № 24. Устранить трещины в несущих стенах, обеспечить  

работоспособность системы вентиляции, имеется плесень. кв. № 25. Устранить трещины в несущих стенах, протекает кровля. 

кв. № 29. Обеспечить работоспособность системы вентиляции в ванной  

комнате и на кухне, промерзают окна в зале, образуется конденсат на окнах,  

имеется плесень в ванной комнате. 

кв. № 32. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, холодные  

полы в квартире. 

кв. № 38. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 41. Устранить трещины в перегородках, трещины в несущих стенах,  

обеспечить работоспособность системы вентиляции. кв. № 42. Устранить трещины в несущих стенах. 

кв. № 43. Устранить трещины в несущих стенах, обеспечить  

работоспособность системы вентиляции, имеются замечания по кровле. кв. № 44. Устранить трещины в несущих стенах. 

кв. № 47. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 56. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 59. Обеспечить работоспособность системы вентиляции на кухне и  

ванной комнате, оконные стеклопакеты не соответствуют качеству, образуется  

конденсат на окнах в кухне, имеется плесень на кухне. кв. № 61. Устранить замечания по кровле. кв. № 64. Устранить замечания по линолеуму. 

кв. № 65. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, устранить  

замечания по линолеуму, устранить трещину в плите перекрытия. 

кв. № 67. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 68. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, разрушается  

фасад, плохо работает отопление. кв. № 70. Устранить трещины в несущих стенах. 

кв. № 71. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, имеются  

замечания по кровле. кв. № 86. Устранить щель у входной двери, желтые пятна на потолке. кв. № 91 Устранить трещины в перегородках. 

кв. № 92. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 93. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 94. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 97. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 98. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 99. Устранить трещины в перегородках, обеспечить  

работоспособность системы вентиляции, трещина в плите перекрытия.  

кв. № 104. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, трещина в  

плите перекрытия, дует в окна. 

кв. № 109. Устранить трещины в перегородках, обеспечить  

работоспособность системы вентиляции. 

кв. № 111. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, образуется  

конденсат на окнах. кв. № 120. Устранить трещины в несущих стенах, трещины в перегородках. 

кв. № 124. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, течет вода  

в туалете, трещина в стене в ванной комнате, трещина в плите перекрытия. 

кв. № 125. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 126. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  кв. № 127. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 128. Не работает вытяжка в ванной комнате, образуется конденсат на  

потолке. 

кв. № 132. Устранить трещину в плите перекрытия.  кв. № 136. Устранить трещину в плите перекрытия.  кв. № 140. Обеспечить работоспособность системы вентиляции.  

кв. № 143. Устранить трещину на плите перекрытия, образуется конденсат  

на окне в комнате, вышел из строя газовый счетчик. 

кв. № 144. Обеспечить работоспособность системы вентиляции, устранить  

протечку труб в сан/узле, устранить трещину в плите перекрытия. 

кв. № 148. Устранить трещины в несущих стенах, трещины в перегородках,  

обеспечить работоспособность системы вентиляции, имеется плесень.  

В случае неисполнения настоящего решения суда в течение одного месяца с  

момента вступления его в законную силу, взыскать с общества с ограниченной  

ответственностью «Клиотек» в пользу муниципального казенного учреждения  

«Управление капитального строительства г. Пензы» компенсацию в размере 5 000  

руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения настоящего решения до дня  

его фактического исполнения, но не более 1 000 000 руб. 00 коп. 

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Клиотек» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  

Пензенской области в течение одного месяца со дня его изготовления в полном  

объеме. 

 Судья М.Н. Холькина