﻿Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград

Дело №

А21-9260/2021

«18»

ноября

2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«15»

ноября

2021 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«18»

ноября

2021 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания Вердян Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ГРУППА С» к ООО «КД СТРОЙ» о взыскании 3 498 788,55 рублей, судебных расходов

при участии в судебном заседании:

от истца: Большешапов Ю.П. по выписке 

от ответчика: н/я  

установил.

 

            Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА С» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КД СТРОЙ» о взыскании основного долга в сумме 2 834 241,02 рублей, неустойки в сумме 664 547,53 рублей, судебных расходов на юридические услуги в сумме 50 000 рублей.

            Дело рассмотрено в  порядке статьи 156 АПК РФ.

            Судом установлено.

            Между сторонами был заключен договор подряда от 01.07.2019 года № 01/07-2019.

По условиям договора ООО «ГРУППА С» (подрядчик) обязалось выполнить работы по установке путей подвесного транспорта здания химводоочистки со складом реагентов на объекте «Строительство Приморской ТЭС», а ООО «КД СТРОЙ» (заказчик)  обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 4.1 договора стоимость работ согласована 1 037 833,51 рублей.

В соответствии с пунктом 4.3 договора окончательный расчет за выполненные работы производиться заказчиком на основании подписанных актов формы КС-2, справок формы КС-3 в течение 10 рабочих дней после их подписания.

В соответствии с пунктом 6.3 договора за нарушение сроков оплаты более чем на 10 рабочих дней заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.

В соответствии с пунктом 7.2 договора споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области.

Между сторонами в период с 12.08.2019 года по 02.11.2020 года  были подписаны дополнительные соглашения №№ 1-14 (в деле) к договору подряда  от 01.07.2019 года № 01/07-2019 на выполнение дополнительных работ.

Между сторонами с период с 25.12.2019 года по 30.11.2020 года были подписаны акты  формы КС-2 №№ 1-29 о выполнении работ на сумму 7 414 163,43 рублей. 

Между сторонами был подписан акт сверки по договору по состоянию на 30.11.2020 года. Согласно акту сверки задолженность заказчика по оплате работ по состоянию на 30.11.2020 года составила 2 446 583,03 рублей.  

По платежным поручениям от 17.02.2021 года № 497, от 09.04.2021 года № 628 заказчик оплатил работы в сумме 425 000 рублей.

25.06.2020 года подрядчик направил в адрес заказчика акты формы КС-2 от 25.06.2021 года №№ 30-32 о выполнении работ в соответствии с условиями дополнительных соглашений №№ 2, 7, 8 на общую сумму 379 417,34 рублей.

Акты получены заказчиком 02.07.2021 года. Мотивированных возражений по актам заказчик не представил.

С учетом условий договора от подряда  от 01.07.2019 года № 01/07-2019 истец просит взыскать основной долг в сумме 2 401 000,37 рублей (2 446 583,03 – 425 000 + 379 417,34).

По положениям пункта 6.3 договора истец просит взыскать неустойку за период с 15.12.2020 года по 18.08.2021 года в сумме 593 047,09 рублей.

Ответчиком не представлено возражений и доказательств оплаты долга.

Требования истца в части взыскания основного долга по договору подряда  от 01.07.2019 года № 01/07-2019 в сумме 2 401 000,37 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310 ГК РФ, положений договора.

Судом проверен расчет неустойки. Истцом в качестве базы для расчета неустойки за заявленный период указано 2 401 000,37 рублей.

Из материалов дела следует, что акты на сумму 379 417,34 рублей  были получены заказчиком 02.07.2021 года.

По условиям договора у заказчика имеется пять рабочих дней на приемку работ  (пункт 5.2) и  десять рабочих дней на оплату работ (пункт 4.3). Таким образом, за период с 15.12.2020 года по 23.07.2021 года подлежит уплате неустойка на сумму 2 021 583,03 рублей, а с 24.07.2021 года по 18.08.2021 года на сумму 2 401 000,37 рублей. Согласно расчету суда размер неустойки составляет 509 195,84 рублей, что не противоречит условиям договора об ограничении ее размера.

Между сторонами был заключен договор подряда от 09.07.2018 года № 01/07-2018.

По условиям договора ООО «ГРУППА С» (подрядчик) обязалось выполнить работы по сборке металлоконструкций опорных конструкций и площадок обслуживания здания НТД на объекте «Строительство Приморской ТЭС», а ООО «КД СТРОЙ» (заказчик)  обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 4.1 договора стоимость работ согласована 715 004,43 рублей.

В соответствии с пунктом 4.3 договора окончательный расчет за выполненные работы производиться заказчиком на основании подписанных актов формы КС-2, справок формы КС-3 в течение 10 рабочих дней после их подписания.

В соответствии с пунктом 6.3 договора за нарушение сроков оплаты более чем на 10 рабочих дней заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.

В соответствии с пунктом 7.2 договора споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области.

Между сторонами 20.09.2018 года был подписан акт № 1 о выполнении работ по договору  подряда от 09.07.2018 года № 01/07-2018 на сумму 715 004,43 рублей.

Согласно позиции истца задолженность по оплате работ составляет 715 004,43 рублей.

Между сторонами был заключен договор подряда от 09.07.2018 года № 02/07-2018.

По условиям договора ООО «ГРУППА С» (подрядчик) обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу перекрытий  металлических ПМ3 – ПМ5 в здании циркуляционной насосной на объекте «Строительство Приморской ТЭС», а ООО «КД СТРОЙ» (заказчик)  обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 4.1 договора стоимость работ согласована 391 492,89 рублей.

В соответствии с пунктом 4.3 договора окончательный расчет за выполненные работы производиться заказчиком на основании подписанных актов формы КС-2, справок формы КС-3 в течение 10 рабочих дней после их подписания.

В соответствии с пунктом 6.3 договора за нарушение сроков оплаты более чем на 10 рабочих дней заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.

В соответствии с пунктом 7.2 договора споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области.

Между сторонами 15.10.2018 года был подписан акт № 1 о выполнении работ по договору  подряда от 09.07.2018 года № 02/07-2018 на сумму 470 842,89 рублей, а 21.08.2019 года «минусовой» акт № 2 на сумму 79 350 рублей, итого стоимость работ составила 391 492,89 рублей.

С учетом оплаты работ по договору 19.07.2018 года на сумму 230 000 рублей, 12.11.2018 года на сумму 161 492 рублей задолженность по договору подряда от 09.07.2018 года № 02/07-2018 составила 0,89 рублей.

Между сторонами был заключен договор подряда от 06.09.2018 года № 01/09-2018.

По условиям договора ООО «ГРУППА С» (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству системы производственно-противопожарного водопровода здания ВПУ на объекте «Строительство Приморской ТЭС», а ООО «КД СТРОЙ» (заказчик)  обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 4.1 договора стоимость работ согласована 739172,92 рублей.

В соответствии с пунктом 4.3 договора окончательный расчет за выполненные работы производиться заказчиком на основании подписанных актов формы КС-2, справок формы КС-3 в течение 10 рабочих дней после их подписания.

В соответствии с пунктом 6.3 договора за нарушение сроков оплаты более чем на 10 рабочих дней заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.

В соответствии с пунктом 7.2 договора споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области.

Между сторонами в период с 17.09.2018 года по 01.08.2019 года  были подписаны дополнительные соглашения №№ 1-11 (в деле) к договору подряда  от 06.09.2018 года № 01/09-2019 на выполнение дополнительных работ.

Между сторонами с период с 26.11.2018 года по 09.08.2019 года были подписаны акты  формы КС-2 №№ 1-18 о выполнении работ на сумму 12 606 233,77 рублей. 

Оплата работ производилась в период с 07.09.2018 года по 03.06.2020 года.

Переплата по договору подряда от 06.09.2018 года № 01/09-2018 составила 281 764,67 рублей.

Общая задолженность по договорам подряда от 09.07.2018 года № 01/07-2018, от  09.07.2018 года № 02/07-2018 с учетом переплаты по договору подряда от 06.09.2018 года № 01/09-2018 составляет 433 240,65 рублей (715 004,43 + 0,89 – 281 764,67).

Подписанным актом сверки расчетов по состоянию на 30.06.2020 года заказчиком подтверждена задолженность по оплате выполненных работ в сумме 433 240,65 рублей.

Ответчиком не представлено возражений и доказательств оплаты долга.

Требования истца в части взыскания основного долга по  договорам подряда от 09.07.2018 года № 01/07-2018, от  09.07.2018 года № 02/07-2018 в сумме 433 249,65 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310 ГК РФ, положений договоров.

Согласно расчету истца за период с 05.10.2018 года по 18.08.2021 года неустойка составляет 433 469,44 рублей.

С учетом ограничения, установленного пунктом 6.3 договора подряда от 09.07.2018 года № 01/07-2018, истец заявил неустойку  в сумме 71 500,44 рублей.

С учетом положений статьи 330 ГК РФ, положений договоров требования истца в части неустойки по делу подлежат удовлетворению в сумме 580 696,28 рублей (509 195,84 + 71 500,44).

Материалами дела подтверждены расходы истца на оплату юридических услуг в сумме 50 000 рублей.

На основании положений статей 110, 112 АПК РФ требования истца в части взыскании судебных расходов подлежат удовлетворению с учетом пропорции удовлетворенных требований.  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КД СТРОЙ» (ОГРН 1162375061221) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА С» (ОГРН 1173926024535) основной долг в сумме 2 834 241,02 рублей, неустойку в сумме 580 696,28 рублей, судебные расходы в сумме 48 800 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 39 522  рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА С» в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 972 рубля.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко