Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-16783/2018

22 января 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

 

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Тихоненко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного  учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре (628012, Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, 

<

...>, ОГРН 

<

***> от  30.12.2002, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Югра- Проект-Строй» (628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты- Мансийск, улица Светлая, дом 40, ОГРН 

<

***> от 04.12.2002, ИНН 

<

***>)  об обязании устранить недостатки выполненных работ,  

с участием представителей: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 04.04.2018 № 1134/09, ФИО3 по  доверенности от 22.01.2018 № 202/09,  

от ответчика: не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

РЕШИЛ:

исковые требования Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда  Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Югра-Проект-Строй»  устранить недостатки выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока,  по государственному контракту № 2016.16537 от 22.04.2016 года, в объеме строительных  работ, а именно:  

1.1. Выполнить "Демонтаж и обратный монтаж на проектное место перегородки:  из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением" в количестве - 6,68142 м2  Согласно позиции № 130 локального сметного расчета приложение № 2 к  государственному контракту.  

1.2. Выполнить "Демонтаж и обратный монтаж наружной облицовки поверхности  стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):  металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ" в количестве - 4,1  м2. (Необходимо заменить поврежденные участки фасада). Согласно позиции № 34  локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

1.3. Выполнить "Изоляцию изделиями из волокнистых и зернистых материалов с  креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен" в количестве306,52 м2 (до проектной толщины в 200 мм (использовать мин. плиту в количестве 30,6  мЗ)). Устранить разрывы теплового контура. Согласно позиции № 35, 36 локального  сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

1.4. Выполнить "Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски,  балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  (Водосточная система dl50 мм)" в количестве - 101,4 м2. Водосточная система повреждена  и имеет контур уклон. Необходимо устранение повреждений путем полной замены  водосточной системы. Согласно позиции № 34 локального сметного расчета приложение   № 2 к государственному контракту.  

 1.5. Выполнить "Демонтаж и устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2" в  количестве - 56,38 м в помещениях первого этажа, а так же в помещениях 22 и 25  зафиксированы складки и наплывы линолеума. Согласно позиции № 70 локального  сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.6. Выполнить "Демонтаж и устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках" в количестве - 144,81 м2, не выполнена сварка стыков  линолеума в помещениях № 2,10,12,7,8,9,11, 18,19,21,25,27. Необходимо устранить  замечание путем сваривания полотнищ, или полной замены линолеума. Согласно позиции   № 99 локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.7. Выполнить "Устройство: подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из  

превышают 1 мм на 1 м длины и 7 мм на всю поверхность в помещениях № 21, 22, 25, 26,  27. Согласно позиции № 110 локального сметного расчета приложение № 2 к  государственному контракту.  

 1.8. Выполнить "Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами  улучшенная: по штукатурке стен в количестве - 654,18 м2, обнаружены трещины в  помещениях № 1. Необходимо выполнить расшивку швов и штукатурно-малярные работы,  предусмотренные технологической последовательностью. Согласно позиции № 117  локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

1.9. Выполнить "Демонтаж и установку металлических дверных блоков в готовые  проемы" в количестве - 3,99 м2, двери металлические, утепленные. Нормируемое значение  сопротивления теплопередаче входных дверей должно быть не менее 0,6 стен зданий.  Требуется замена, согласно ГОСТ 31173-2003 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита  зданий.» Согласно позиции № 126, 127, 128 локального сметного расчета приложение № 2  к государственному контракту.  

1.10. Выполнить "Демонтаж и устройство бетонной подготовки (крыльцо),  устройство ступеней", "Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами  вверх" в количестве - 2,39 м3 Показатели инструментального показали прочность  конструкций менее 9,63 МПа, составили от 3,2 МПа до 8,4 МПа. Необходима полная  замена слоя бетонной подготовки крыльца. Согласно позиции № 142, 143, 144 локального  сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.11. Выполнить "Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм" в количестве17,82 м2. Необходима полная замена слоя цементной стяжки. Согласно позиции № 146,  147 локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.12. Выполнить "Устройство основания под фундаменты: песчаного" в количестве5,92 м3, "щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм" в  количестве 5,92 м3, Выполнить "Установку пароизоляционного слоя из: пленки  полиэтиленовой" в количестве - 39,48 м , "пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм" в  количестве - 39,48 м2, выполнить "Армирование цементобетонных покрытий: сетками" в  количестве - 0,14 тн., "Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: A-I и A-II  диаметром 6 мм" в количестве - 0,14 тн., "бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40  мм, класс В7,5 (М 100)" в количестве - 3,16 м3, часть отмостки по оси 2 обвались под  внешним воздействием, основание отмостки вымывается поверхностными водами,  поверхность разрушается от воды с кровли в следствие повреждения и/или неправильного  устройства водосточной системы. Толщина отмостки 80 мм. Зафиксированы участки  отмостки с контр уклоном. Необходимо произвести полный демонтаж конструктива и  

выполнить устройство отмостки с подготовкой основания. Согласно позиции № 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32 локального сметного расчета приложение № 2 к государственному  контракту.  

 1.13. Выполнить "Лоток водоотводный пластиковый PolyMax Basic JIB-10.15.08" в  количестве - 32 метра, "Установку металлических решеток приямков" в количестве0,0806 тн., "Решетки для приямков стальные" в количестве - 0,0806 тн., часть лотка  вывалилась из бетонного основания. Решетки частично не закреплены. Требуется  переустройство разрушенной части бетонной подготовки под лоток, а так же  восстановление крепления металлических решеток необходимо произвести полное  переустройство водосточного лотка с бетонной подготовкой. Согласно позиции № 36, 37,  38 локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.14. Выполнить "Огрунтовку металлических поверхностей за один раз: грунтовкой:  ГФ-021" в количестве - 29,4464 м ., образование трещин, наплывов, отслоение покрытия.  Требуется восстановление защитного покрытия с полной зачисткой стальных  конструкции. Согласно позиции № 21 локального сметного расчета приложение № 2 к  государственному контракту.  

 1.15. Выполнить "Демонтаж и монтаж предохранительного клапана для бойлеров с  ручкой спуска ITAP Арт.367, 1/2" в количестве - 1 шт., клапан установлен не в  соответствии с проектом. Клапан необходимо установить по ходу движения воды.  Согласно позиции № 32 локального сметного расчета приложение № 2 к государственному  контракту.  

 1.16. Выполнить "Демонтаж и Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,  пожарных с ограждением" в количестве - 1,015616 тн., пожарная лестница выполнена с  отклонениями от требований проекта в части габаритных размеров лестницы. Проектная  документация разработана согласно пожарных норм и правил, следовательно пожарная  лестница смонтирована с нарушением норм и правил. Необходимо полное переустройство  пожарной лестницы. Согласно позиции № 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,  167 локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  Выполнить "Огрунтовку металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021" в  количестве - 40,76 м2. Согласно позиции № 168 локального сметного расчета приложение   № 2 к государственному контракту. Выполнить "Окраску металлических огрунтованных  поверхностей: эмалью ПФ-115" в количестве - 40,76 м2. Согласно позиции № 187  локального сметного расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.17. Выполнить "Установку гильз в местах прохода трубопроводов отопления при  коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм".  

Согласно СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с  использованием металлополимерных труб». Прокладка через ограждающие конструкции  осуществлена без применения гильз. Необходимо устранить замечание, путем установки  гильз в местах прохода трубопроводов. Согласно позиции № 5 локального сметного  расчета приложение № 2 к государственному контракту.  

 1.18. Выполнить "Демонтаж и монтаж умывальника Cersanit Etiuda (К11-0041) 66x55  см, белая керамическая" в количестве - 1 шт., установлен умывальник фирмы Santek, не  предназначенный для использования маломобильными группами населения. Требуется  замена. Согласно позиции № 44 локального сметного расчета приложение № 2 к  государственному контракту.  

 1.19. Выполнить "Демонтаж и монтаж унитаза с подлокотниками для людей с  ограниченными возможностями Gustavsberg Nordic" в количестве - 1 шт. Установлен  унитаз Santeri, не предназначенный для использования маломобильными группами  населения. Требуется замена. Согласно позиции № 65, 66 локального сметного расчета  приложение № 2 к государственному контракту.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Югра-Проект-Строй» в  пользу Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской  Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 6 000 рублей - расходов  по государственной пошлине.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья Т.В. Тихоненко