Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/                                            http://altai.arbitr.ru/

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-1525/2024

17 октября 2024 года

город Горно-Алтайск

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Амургушев С. В., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Красноармейский, д. 96, литер А, кв. 9, г. Барнаул, край. Алтайский) к Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Строителей, д. 3/1, г. Горно-Алтайск, Респ. Алтай) о взыскании 435480 руб. 04 коп.,

без вызова сторон.

Суд установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Точные проекты» (далее – истец, ООО «Точные проекты») обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее – ответчик, Управление) о взыскании 435480 рублей 04 копеек и судебных расходов.

Ответчик отзыв на иск в дело не представил, возражений против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства не заявил.

Из материалов дела следует, что между Обществом с ограниченной ответственностью «Точные проекты» (Подрядчик) и МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации г.Горно-Алтайска» (Заказчик) был заключен Муниципальный контракт №03773000287220003810001 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения и улично-дорожной сети микрорайона "Заимка" г. Горно-Алтайска площадью 25 га» (идентификационный код закупки 223041101458504110100100920017112414) (даже – Контракт).

По условиям Контракта общая стоимость работ составляет 12 386 976,80 рублей. В соответствии с требованиями п. 1.1. Контракта истец принял на себя обязательства на разработку проектно-сметной документации по объекту и обязуется сдать результаты выполненных Работ.

Ответчик принял на себя обязательства принять результаты, надлежаще выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

Обязательства по двум этапам контракта исполнены истцом в полном объеме, результаты работ переданы Заказчику, в ЕИС размещены и подписаны документы о приемке.

Оплата принятых работ должна быть осуществлена Ответчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ (п. 2.5.2 Контракта), однако фактически оплата осуществлена с просрочкой, а именно: 1 этап сдан 17.04.2024. оплата осуществлена в следующем порядке: - 14.04.2023. - аванс 1 477 408,50 руб.; - 20.07.2023г. - частичная оплата 1 583 837,69 руб.; - 31.08.2023.- частичная оплата двумя платежными поручениями 1 784 318,60 руб. и 5 654 435,21 руб.

Просрочка исполнения обязательств по 1 этапу Заказчиком составила 95 дней. 2 этап сдан 04.04.2024г. Оплата за выполненные работы осуществлена 08.05.2024г. Просрочка исполнения обязательств по 2 этапу Заказчиком составила 23 дня.

Согласно п. 7.2. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Учитывая, что ключевая ставка ЦБ РФ составляет 16% годовых, задолженность Заказчика по пене за просрочку оплаты работ составляет:

Истцом представлен в дело расчет неустойки:

Период 29.05.2023 – 20.07.2023, просрочка 53 дня, задолженность 9 022 591,50 рублей  (9 022 591,50 *1/300*16%*53) = неустойка 255 038,59 рубля;

Период: 21.07.2023 – 31.08.2023; просрочка 42 дня; задолженность 7 545 183,00 (7 545 183,00*1/300*16%*42) = неустойка 166 628,09;

Период 16.04.2024 – 08.05.2024; просрочка 23 дня; задолженность  1 126 088,80 рублей  (1 126 088,80*1/300*16%*23) = неустойка 13 813,36 рублей;

Итого: 435 480 рублей 04 копейки.

Расчет истца  судом проверен и признан правильным.

Таким образом, сумма неустойки составляет 435 480 рублей 04 копейки

21.05.2024 истец разместил в ЕИС претензию с требованием уплатить сумму неустойки, ответчик данную претензию добровольно не удовлетворил и на письмо не ответил.

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Пунктом 2.5.2 Контракта установлено, что оплата выполненных по Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемки выполненных работ.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом  1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В пункте 60 Постановления Пленума Верховного Cуда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Согласно пункту 68 Постановления Пленума Верховного Cуда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ)

С учётом изложенного, истцом заявлены обоснованные требования, которые подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьёй 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, на момент подачи иска уплате подлежала государственная пошлина в размере 11710 рублей. Государственная пошлина уплачена истцом при подаче иска.

Согласно статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Соответственно с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 11710 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ" удовлетворить.

Взыскать с Муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Строителей, д. 3/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Красноармейский, д. 96, литер А, кв. 9, г. Барнаул, край. Алтайский) неустойку по муниципальному контракту № 03773000287220003810001 за период с 29.05.2023 по 08.05.2024 в размере 435480 руб. 04 коп, расходы по оплате государственной пошлины в размере 11710 руб.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья

С.В. Амургушев