АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-7495/2019

г. Кострома

22 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.10.2019.  Решение в полном объеме изготовлено 22.10.2019.  

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Козлова Сергея  Венедиктовича при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

при участии в заседании: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности № 80 от 21.05.2019, от ответчика: ФИО3 – генеральный директор, 

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской  области» к обществу с ограниченной ответственностью «АКСУ-Строй» о  взыскании 81 571 рубля 20 копеек и   

УСТАНОВИЛ:

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Костромской области» (далее – истец, фонд) обратилась в  Арбитражный суд Костромской области с иском к обществу с ограниченной  ответственностью «АКСУ-Строй» (далее – ответчик, общество) о взыскании 81 571  рубля 20 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по договору  строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в  многоквартирном доме от 24.10.2016 № 216П.  

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал. 

Ответчик приобщил к материалам дела отзыв на иск, просит суд применить  статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшить размер  пени до 4 622 рублей 37 копеек, представив контррасчет (в деле).  

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил  следующие фактические обстоятельства.  

24.10.2016 фонд (заказчик) и общество (подрядчик) заключили договор  строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в  

многоквартирном доме № 216П (далее – договор), предметом которого являлось  выполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  (пункт 1.1 договора).  

В пунктах 2.1 и 2.2 договора (в редакции дополнительного соглашения № 11  от 20.12.2016) стороны согласовали сроки начала и окончания выполнения работ  на спорных объектах.  

Дата подписания акта приемки оказанных услуг (выполненных работ)  является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения  подрядчиком срока выполнения работ по договору (пункт 2.4.).  

В соответствии с пунктом 8.3 договора подрядчик в случае нарушений  условий договора о сроке окончания работ обязуется уплатить заказчику пени в  размере 0,5% от стоимости работ по договору, указанной в пункте 3.1 договора, за  каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за сроком,  указанным в пункте 2.2 договора.  

В нарушение условий договора подрядчик исполнил принятые на себя  обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов с просрочкой.  

Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении  капитального ремонта в многоквартирном доме подписан сторонами 04.10.2017  (л.д. 11).  

В связи с допущенной просрочкой фонд начислил неустойку в сумме 81 571  рубля 20 копеек и обратился к обществу с претензией, которая оставлена  последним без удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения истца с  настоящим иском в арбитражный суд.  

Оценив представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  приходит к следующим выводам.  

Так, согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу  и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее  этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий в силу статьи 310 ГК РФ не допускаются.  

Факт выполнения работ с просрочкой подтверждается материалами дела и  ответчиком не оспаривается.  

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации ответчик не представил доказательств, свидетельствующих  об оплате неустойки.  

В соответствии с пунктом 8.3 договора подрядчик в случае нарушений  условий договора о сроке окончания работ обязуется уплатить заказчику пени в  размере 0,5% от стоимости работ по договору, указанной в пункте 3.1 договора, за  каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за сроком,  указанным в пункте 2.2 договора.  

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ определено, что исполнение обязательств  может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

На основании статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об  уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков. Кредитор  не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

Факт просрочки выполнения работ доказан, расчет неустойки ответчиком  оспорен, представлен контррасчет, заявлено ходатайство об уменьшении размера  неустойки.  

Суд признает обоснованным заявление ответчика об уменьшении размера  пени на основании статьи 333 ГК РФ.  

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.  

Рассмотрев ходатайство ответчика, учитывая конкретные обстоятельства  дела (отсутствие доказательств наступления для истца значительных  неблагоприятных последствий вследствие просрочки), в целях сохранения баланса  интересов сторон, суд считает целесообразным снизить размер неустойки до 4 622  рублей 37 копеек, рассчитанных ответчиком.  

При указанных обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению  в части.  

При подаче иска истцу предоставлялась отсрочка по уплате государственной  пошлины до принятия решения по делу.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации уплата государственной пошлины относятся судом на  ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 168-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АКСУ-Строй», г.  Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской  области», г. Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 4 622 рубля 37  копеек пени, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  2 000 рублей.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, через Арбитражный суд Костромской области, при  условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья С.В. Козлов