5/2023-308664(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-228/2023

г. Владивосток

24 января 2024 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску управления культуры, физической  культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского  муниципального района (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "НТС Групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ДВСК Гарант", общества с  ограниченной ответственностью "Градостроительная мастерская", общество с  ограниченной ответственностью "Региональное предприятие механизации  строительного производства"  

об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "НТС Групп" в течение  трех месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийное  обязательство в рамках муниципального контракта № 0320300024916000004-017469702 от 05.12.2016 по объекту Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу:  

<

...>, путем проведения ремонтных работ, а именно:  

1. очистить все продольные и поперечные стыки кровельных панелей, а также  шляпки саморезов от ранее нанесенного герметика;  

 2. выполнить замену коньковых планок; 

 3. выполнить установку под коньковыми планками конькового самоклеящегося  уплотнителя ПКБ 40.  

 4. выполнить герметизацию всех продольных и поперечных стыков между  кровельными панелями с внешней стороны самоклеящейся лентой-герметиком на  битумно-полимерной основе NICOBAND компании «Технониколь».  

 5. в месте примыкания коньковой планки к стене по оси 3 выполнить  устройство фартука из листовой стали с полимерным покрытием.  

6. выполнить герметизацию вертикальных стыков между стеновыми панелями  наружной стены по оси 12, с использованием самоклеящейся бутилкаучуковой ленты и  устройством нащельников из листовой стали с полимерным покрытием.  

В случае неисполнения решения суда по настоящему делу взыскать с общества с  ограниченной ответственностью "НТС Групп" неустойку в размере 2 000 рублей за  каждый день неисполнения решения суда.  

Во взыскании остальной части неустойки отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НТС Групп" в пользу 

Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации Надеждинского муниципального района 449 248 рублей 80 копеек  убытков, 196 000 рублей расходов на оплату услуг эксперта.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НТС Групп" в доход  федерального бюджета 17 985 рублей государственной пошлины по иску.  

Исполнительные листы выдаются по заявлению взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А.