АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-30344/2023

г. Уфа

30 января 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрел в судебном заседании дело по иску  

 государственного казенного учреждения управление капитального строительства  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "А-строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

 третье лицо - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа успеха" с. Жуково муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  об обязании устранения выявленных недостатков выполненных работ в рамках 

государственного контракта № 04/2018-213 от 03.11.2018, о взыскании штрафа в размере 1  700 000 руб.  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «A-Строй» безвозмездно в течение 30 дней со дня вступления  решения в законную силу устранить выявленные недостатки выполненных работ по  государственному контракту № 04/2018-213 от 03.11.2018 в рамках исполнения  гарантийных обязательств, а именно:  

- ремонт отмостки по периметру здания по оси 1/А-Е, К/5-7, 9/Д-И, Е/9-11,  11/А-Е имеющиеся провалы разобрать засыпать щебнем в зависимости от глубины ямы,  утрамбовать и уложить слой асфальта не менее 5 см. По всему оставшемуся периметру  незначительные трещины ремонт произвести с укладкой демпферной ленты (на ширину  трещину) и промазыванием горячей битумной мастики;  

- места намокания стен в подвале в осях 1/А-Е, Е/1-2*, Г/2*-3, И/3-5, И/7-9  расчистить щетками от грибка и плесени, обработать специальными составами и окрасить  вновь.  

- в ступенях входной лестницы в осях А/5*-6* просверлить отверстия  вставить арматуру, привязать проволокой к существующей арматуре ступеней, выставить  опалубку и залить ступени бетонной смесью вновь. Новые ступени облицевать  керамогранитной плиткой общей площадью 24 кв. м.;  

- примыкание кровли входной группы к наружной стене в осях Б/5—7  изготовить новые доборные элементы из оцинкованной стали и произвести монтаж по  технологии;  

- провести раскопку и демонтаж противопожарных резервуаров на 150 куб  метров, произвести монтаж и засыпку новых резервуаров;  

- выкопать и произвести монтаж новой выгребной ямы объемом 6 куб метров;  

- установить новые оконные блоки в кабинетах № 203 и № 105; 

- в санузлах 1,2,3 этажей произвести укладку новой керамической плитки  общей площадью 84 кв.м, и помещений пищеблока в сумме 24 кв.м.;  

- произвести ремонт угла кровли здания в осях 11/Е, разобрать участок около  12 кв.м кровельного покрытия, установить новые Т-образные закладные держатели на  обрешётку, произвести монтаж кровельных листов из оцинкованной стали на место;  

- изготовить и установить новый защитный кожух (зонт) над вентиляционной  шахтой на кровле здания в осях 3-4/Б-В;  

- для устранения многочисленных протечек кровли из оцинкованной стали  необходим ремонт швов, где нарушена герметичность фальцевых швов и произошло  расхождение стыков между кровельными скатами и ендовами, производится лентой- герметиком, с просмотром и приклеиванием всех швов;  

- произвести демонтаж дверного блока запасного выхода, ремонт и рихтовку  дверного полотна относительно коробки, затем произвести монтаж блока на место;  

- в помещение кухни поврежденный участок стены площадью 3 кв.м, из-за  воздействия высоких температур обшить жаропрочным листом;  

- демонтировать напольное покрытие из плитки в помещениях  посудомоечной, варочного цеха, овощерезки залить новую стяжку с уклоном по СНиПу, с  укладкой напольного покрытия (общей площадью 52 кв.м.);  

- произвести демонтаж, рихтовку и ремонт дверного полотна; 

- покрытие крыльца из плитки демонтировать, произвести напольное  покрытие из керамогранита на клею для наружных работ;  

- устранить протечки кровли котельной; 

- заменить емкость аварийного топлива либо заделать трещину емкости аварийного  топлива.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "А-строй" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения  управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 1 700 000 руб. сумму штрафа.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "А-строй" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 36 000 руб.  

Исполнительный лист в доход федерального бюджета выдать после вступления  решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  

решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Р.Ф. Ганеев