АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Орел Дело № А48–12061/2023  28 июня 2024 года  

Резолютивная часть решения оглашена 26 июня 2024 года Полный текст решения изготовлен 28 июня 2024 года 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ветровой А.Н.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, 

<

...>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Газ Ресурс»: 394036, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> об обязании выполнить гарантийные  обязательства по муниципальному контракту от 12.08.2021 № 67, а именно выполнить  работы по посадке 22 деревьев породы клен остролистный глобозум вместо засохших 22  деревьев в течение 10 календарных дней с даты вступления решения суда в законную  силу,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, на стороне истца муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по  санитарной очистке г. Орла» (ИНН 

<

***>, 

<

...>),  

при участии в деле: от истца – представитель ФИО1 (доверенность от 29.12.2023, копия диплома), 

от ответчика – представитель ФИО2 (доверенность от 28.12.2023, копия  диплома);  

от третьего лица - представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

установил:

муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный  заказчик города Орла» (далее: истец, заказчик, МКУ «ОМЗ г. Орла») обратилось в  арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Газ Ресурс» (далее: ответчик, ООО «Газ Ресурс») об обязании выполнить гарантийные  обязательства по муниципальному контракту от 12.08.2021 № 67, а именно выполнить  работы по посадке 22 деревьев породы клен остролистный «Глобозум» вместо засохших  

22 деревьев в течение 10 календарных дней с даты вступления решения суда в законную  силу.  

 До принятия судебного акта истец в порядке ст. 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточнял исковые  требования и в окончательном варианте просил обязать ответчика в течение 10  календарных дней с даты вступления решения в законную силу выполнить гарантийные  обязательства по муниципальному контракту от 12.08.2021 № 67, а именно выполнить  работы по посадке 25 деревьев породы клен остролистный «Глобозум» вместо засохших  25 деревьев.  

 Ответчик исковые требования не признал по мотивам, изложенным в  письменных пояснениях и отзывах на иск. В письменном отзыве указал, что между ООО  «ГАЗ РЕСУРС» и ООО «ЭКОТОН+» был заключен договор подряда № 03-2022 от  26.05.2022, по которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный  договором срок выполнить следующие работы на Объекте Заказчика:  

- выравнивание территории объекта озеленения грунтом Заказчика; - подготовка посадочных ям согласно Проектной документации; 

 -закупка и доставка посадочного материала в количестве и качестве,  соответствующем Проектно-сметной документации;  

- посадка древесно-кустарниковых растений согласно Проектной документации; 

а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.  

Согласно акту об оказании услуг от 29.09.2022 ООО «ГАЗ РЕСУРС» принял  работы произведенные ООО «ЭКОТОН+» в полном объеме в соответствии с условиями  договора.  

ООО «ЭКОТОН+» является специализированной организацией, занимающейся  выращиванием в питомниках эндемичных и районированных многолетних травянистых  растений для нужд городского озеленения — устойчивых, малоуходных,  высокодекоративных злаков, декоративно-лиственных и цветущих многолетников.  

 Посадочный материал, используемый для озеленения территорий, не подлежит  обязательной сертификации по техническим регламентам Таможенного союза. Эта  продукция не подпадает под действие технических регламентов Евразийского  экономического союза (ЕАЭС) и не включена в перечень товаров, утверждённый  постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого  перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня  продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в  

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и  признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

Поэтому сертификация саженцев осуществляется исключительно на добровольной  основе.  

Так же согласно ответу ООО «ЭКОТОН+» на запрос ООО «ГАЗ РЕСУРС» за исх.   № 29-03/2024 от 29 марта 2024 о сведениях, доказательствах соблюдения  технологического процесса посадки растений до сдачи объекта в эксплуатацию (сведения  и копии путевых листов, универсально передаточных документов об осуществлении  полива клен остролистный «Глобозум» в количестве 102 шт., за период 2022г.,  произрастающих в полосе отвода автомобильной дороги по адресу: 

<

...>):  

«саженцы клёна остролистного «Глобозум», запроектированные к посадке, были приобретены в профессиональных питомниках с предварительным отбором. 

После прибытия на площадку ООО «ЭКОТОН+» растения были обработаны баковой  смесью препаратов от болезней и вредителей и помещены на притеночную площадку с  организованной системой полива, где и находились до момента посадки.  

Подготовка посадочных ям была проведена заранее в размерах, превышающих  объём контейнера растений в 2,5-3 раза, и в связи с повышенной сухостью грунта и  воздуха 28 августа был проведён предварительный пролив посадочных ям (Товарно-транспортная накладная № 1640 от 28.08.2023).  

Посадка началась 15 сентября 2022 года, когда началось естественное пожелтение  листвы у клёна, то есть наступило рекомендованное приказом Госстроя РФ от 15.12.1999   № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в  городах» «состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного  организма», при этом у клёна остролистного наступил период наиболее активного роста  корневой системы.  

Перед посадкой был проведён основной полив в объёме равном объёму посадочной  ямы после чего на дно посадочных ям был помещён растительный грунт, саженцы были  вынуты из контейнеров и посажены с соблюдением всех агротехнических требований.  Корневая шейка растений находилась на уровне окружающего грунта. Оставшееся  пространство было засыпано остатками растительной земли. После посадки всех саженцев  было произведено досыпание осевшего грунта и повторный полив высаженных растений.  

После чего была произведена подвязка саженцев к кольям и сформирована  прикорневая лунка (прикорневой круг).»  

Таким образом, в момент приемки работ 22.09.2022 все посаженные растения  соответствовали установленным требованиям к качеству и состоянию и не вызывали  споров ни у одной из сторон.  

 На основании акта о приемке выполненных работ № 5 от 22.09.2022 по  муниципальному контракту от 12.08.2021 № 67 Ответчиком были выполнены, а Истцом  приняты работы по посадке клена остролистного «Глобозум» в количестве 102 шт.  

Следовательно, на момент приемки результата работ все высаженные биологические  объекты отвечали требованиям о надлежащем качественном состоянии, что сторонами не  оспаривается.  

 Уход за высаженными деревьями и какие-либо другие работы по поддержанию их  жизнедеятельности после сдачи результата работ в обязанности ответчика не входили.  

 Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии  с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению  по следующим основаниям.  

12 августа 2021 года между МКУ «УКХ г. Орла» и ООО «Газ Ресурс» был заключен  муниципальный контракт № 67 по условиям которого, подрядчик обязался принять на  себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги (улично-дорожной сети) 

<

...> по адресу: 

<

...> а заказчик обязуется принять выполненные  работы на условиях контракта и оплатить их в размерах, установленных контрактом.  

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 25.08.2022 к муниципальному  контракту № 67 от 12.08.2021 года изменено наименование заказчика на МКУ «ОМЗ г.  Орла».  

В соответствии актом о приемке выполненных работ № 5 за период с 27.08.2023 по  22.09.2022, подписанного сторонами 22.09.2022, подрядчиком было высажено 102 дерева  породы клен остролистный «Глобозум».  

11 октября 2023 года комиссия с участием представителей истца произвела  технический осмотр результатов ремонта автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г.  Орле, выполненного в 2022 года по муниципальному контракту № 67 от 12.08.2021  подрядчиком ООО «ГазРесурс». В ходе визуального осмотра улицы, установлено, что на  дату 11.10.2023 года засохло 22 дерева породы клен остролистный «Глобозум», о чем был  составлен акт от 12.10.2023 года. По результатам осмотра комиссией было принято  решение о замене засохших деревьев на живые согласно гарантийных обязательств.  

17 апреля 2024 года комиссия с участием представителей истца произвела  технический осмотр результатов ремонта автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г.  Орле, выполненного в 2022 года по муниципальному контракту № 67 от 12.08.2021  подрядчиком ООО «ГазРесурс». В ходе визуального осмотра улицы, установлено, что на  дату 17.04.2024 года засохло 25 деревьев породы клен остролистный «Глобозум», о чем  был составлен акт от 17.04.2024 года. По результатам осмотра комиссией было принято  решение о замене засохших деревьев на живые согласно гарантийных обязательств.  

В силу п. 6.2 контракта срок предоставления подрядчиком гарантии качества  выполненных работ, используемых материалов при выполнении работ составляет 7 (семь)  лет с даты подписания сторонами акта приемки законченных работ по форме П-1.  

Акт о приемке законченных работ по форме А-1 подписан приемочной комиссией  20.10.2022 года. Исчисление срока гарантийных обязательств начинается с 21.10.2022  года.  

24 октября 2023 года истец разместил на официальном сайте zakupki.gov.ru  претензию (требование) о необходимости выполнить гарантийные обязательства исх. №  5363 от 24.10.2023г., а также указанная претензия была направлена ответчику по  электронной почте.  

Согласно письму ответчика от 26.10.2023 г. исх. № 26-10/33 досудебная претензия  ответчиком была получена, однако гарантийные обязательства до настоящего времени не  исполнены.  

В силу п. 1.4 контракта место выполнения работ: Орловская область,  Малоархангельский район.  

Не устранение ООО «Газ Ресурс» выявленных недостатков явилось основанием  для обращения истца в арбитражный суд с иском.  

Согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном  настоящим Кодексом.  

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные  строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре  подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.  

В соответствии с ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются. При этом, если обязательство предусматривает  или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого  оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот же день или  соответственно в любой момент в пределах такого периода (п. 1 ст. 314 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

В силу ст. 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда  законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота  предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в  течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1  статьи 721).  

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором  подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.  

Согласно п. 6.2 контракта подрядчик принял на себя гарантийные обязательства в  течение 7 лет с момента приемки заказчиком в целом выполненных работ.  

 Как следует из материалов дела вегетационный период — это этап развития  растения, во время которого возможны прорастание семени или споры, распускание  почек, рост корня, стебля, листьев формирование репродуктивных органов, образование  зрелых плодов и семян. В условиях умеренного климата для большинства растений он  соответствует отрезку времени между переходом среднесуточной температуры весной и  осенью через +5 °С (для более теплолюбивых - через +10°С).  

Согласно сведениям с официального сайта ФГБУ «Россельхозцентр» - полив  деревьев в начале весны важен потому, что в это время начинается вегетационный период,  деревья и кустарники просыпаются после зимы, активизируется корневая система, и  растения начинают впитывать питательные вещества из почвы. Если в земле не будет  влаги, растения не смогут получить полноценное питание, что нарушит все дальнейшие  процессы их развития и может привести к засыханию.  

Первый весенний полив проводится во время распускания почек. В этот период  деревьям и кустарникам особенно нужна влага, чтобы стимулировать прирост листвы и  цветение.  

П. 3.1.1.1. Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил  создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»  (далее - Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153) деревья в насаждениях и, особенно, на  городских улицах и магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен  обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы.  Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной  влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов  минерального питания.  

Согласно п. 3.1.1.2. Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 нормы и кратность  полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности,  степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания  корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв.  м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах  тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных  почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.  

В соответствии с п. 3.1.1.3. Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 сроки и  кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий.  Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10-15 раз в  вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4 - 6 раз, в  массивах - до 2 - 4 раз в сезон.  

Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих  корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы,  особенно в засушливые годы.  

В соответствии со справкой ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС» №  124-С от 16.04.2024 о температуре воздуха и количестве выпавших осадков с 01.03.2023  по 12.10.2023 в г. Орле, переход среднесуточной температуры весной через +5 °С, был  пройден.  

Однако Истцом первый полив был осуществлен 03.05.2023, то есть спустя 2 месяца  после необходимого срока начала полива.  

Также, согласно справке ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС» № 124-С  от 16.04.2024 о температуре воздуха и количестве выпавших осадков с 01.03.2023 по  12.10.2023 в г. Орле наблюдался продолжительный период отсутствия осадков: с  

02.04.2023 по 12.04.2023 (10 дней); с 14.04.2023 по 25.04.2023 (11 дней); с 07.05.2023 по  22.05.2023 (15 дней); с 30.08.2023 по 30.09.2023 (31 день).  

Истцом в период усиленного роста корневой системы, было произведено всего 10  поливов деревьев по ул. Ломоносова, что в свою очередь из-за недостаточного полива и  ухода могло привести к дальнейшему засыханию деревьев породы клен остролистный  «Глобозум».  

В целях установления причин засыханию деревьев арбитражный суд обязал  стороны совместно произвести осмотр засохших деревьев с привлечением специалиста с  агрономическими познаниями.  

03 июня 2024 года комиссия с участием представителей сторон и ФИО3 - профессора, заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры аграрного  университета им. Н.В. Парахина произвели осмотр спорных деревьев, высаженных в  рамках муниципального контракта № 67 по ремонту автомобильной дороги :»Ремонт  автомобильной дороги (улично-дорожной сети) 

<

...>».  

В ходе визуального осмотра засохших деревьев ФИО3 было  определено, что во время вегетационного периода 2023 года, мероприятия по поливу  зеленых насаждений производились несвоевременно и не в полном объеме (в зависимости  от температурного режима и влажности воздуха), а также не были проведены вовремя  работы по прополке приствольного круга, что явилось причиной засыхания части  деревьев.  

 Таким образом, руководствуясь материалами дела арбитражный суд пришел к  выводу о том, что предоставленные ответчиком саженцы деревьев породы клен  остролистый «Глоботум» отвечали требованиям контракта, работы по озеленению были  выполнены ответчиком надлежащим образом, тогда как ненадлежащий уход за деревьями  в вегетационный период 2023 года со стороны истца привел их к засыханию.  

 Требования истца не подтверждаются материалами дела и не подлежат  удовлетворению.  

Расходы по государственной пошлине относятся на истца в соответствии со статьей  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь cт. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца со дня его принятия.  

 Судья Г.Н. Родина