64_13139731 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А41-69659/21

15 ноября 2022 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ООО «ЕВРОПОЛ» (ИНН: 

<

***>) к ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН: 

<

***>) о  взыскании задолженности по договору субподряда № Ш1125-МЕР-ЕВРО от 04.06.2021 и  дополнительному соглашению № 1 от 07.07.2021 к договору в размере 539 496 руб. 40 коп.,  пени согласно п. 8.4 договора субподряда № Ш1125-МЕР-ЕВРО от 04.06.2021 за период с  10.07.2021 по 06.09.2021 в размере 24 129 руб. 96 коп.,  

и по встречному иску ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН: 

<

***>) к ООО «ЕВРОПОЛ» (ИНН:  

<

***>) о взыскании суммы задолженности по договору № Ш1125-МЕР-ЕВРО от  04.06.2021 за оплаченные, но не выполненные работы в размере 315 092 руб. 00 коп.,  стоимости материалов, необходимых для устранения недостатков работ в размере 610 707  руб. 00 коп., стоимости материалов, использованных свыше нормы расходов, в размере 5 184  558 руб. 50 коп., расходов на проведение строительно-технической экспертизы в размере 80  000 руб.,  

в заседании приняли участие: 

от ответчика – ФИО1 по дов. № 38 от 30.11.2021, паспорт, диплом, ФИО2 по дов.   № 37 от 01.10.2021, паспорт, диплом  

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с ООО «ЕВРОПОЛ» в пользу ООО «МЕРКУРИЙ» стоимость затрат на  устранение дефектов бетонных полов в размере 1 813 942 руб., стоимость материалов,  необходимых для устранения недостатков бетонных полов в размере 1 108 105 руб.,  стоимость материалов, использованных свыше нормы расходов, в размере 5 184 558,50 руб.,  расходы на проведение досудебной строительно-технической экспертизы в размере 80 000  руб., расходы на проведение судебной строительно-технической экспертизы в размере 84 000  руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 53 952 руб.  

Взыскать с ООО «ЕВРОПОЛ» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 9 581,03 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья И.Д. Арешкина