Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-19718/2019

г. Ставрополь

16 января 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление 

администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края, г. Буденновск,  ОГРН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент», г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

об обязании устранить недостатки работ, в отсутствие представителей сторон. 

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить. Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент», г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>, в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить  недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту от 23.01.2015  

 № 0121200000314001775_143836 на строительство объекта «Строительство дошкольного  образовательного учреждения на 160 мест в 

<

...> Буденновский  район», а именно:  

установить и устранить причину поступления воды в районе площадки входа ЛН-1 блока  Аивпомещении техподполья блока А в районе входа ЛН-1;  

устранить проседание грунта и нарушение асфальтового покрытия проездов перед блоком В  с центрального входа и со стороны входа с прогулочных площадок;  

выполнить закрепление металл фронтонов на блоках А и Б и устранить на этих блоках места  неплотного прилегания покрытия кровли;  

устранить недостатки в монтаже водосточного желоба в районе примыкания блока А и  блока В (со стороны прогулочных площадок), удлинить трубу водостока до водоотводного лотка;  

провести ремонт с устранением трещин в потолках в помещениях 10-14, 16-19, 21, 22, 29,  35, 39, 44-46, 51, 52, 56-62, 64-67, 70, 72, 73, 75-77, 82, 85, 89, 91, 94, 97, 100, 101, 103-105, 107- 109, 111, 112, 114-117, 121, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 134-141, 146, 151, 153, 157, 164, 165, 168- 170;  

провести ремонт с устранением трещин по стенам в помещениях 11, 17, 18, 21, 34, 39, 4346, 70, 77, 82, 85, 88-90, 103, 107, 109, 114, 115, 117, 124, 134, 135, 139, 141, 151, 153, 164;  

устранить места расхождения стен и потолка в помещениях 32, 33, 42, 44, 60, 62, 146, 148,  149, 155, 156, 158, 159;  

устранить трещины в местах примыканий стены к стене в помещениях 32, 33, 39, 41-47, 69,  

провести частичную замену облицовочной стеновой плитки в помещениях 17, 46, 57, 63, 70,  77, 88, 107, 114, 115, 139;  

устранить места нарушения (провалы), деформации стяжки полов, а также их покрытия в  помещениях 4, 45, 52, 68;  

обеспечить поступление холодной воды к сантехническим приборам в помещениях  санузлов 59 и 123;  

выполнить ремонт механической приточно-вытяжной вентиляции; заменить счетчик горячего водоснабжения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Девелопмент», г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, государственную пошлину в размере 6 000 руб. в доход федерального  бюджета.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Ващенко