ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-19440/2024

Дело № А40-151964/23

г. Москва

22 апреля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Новиковой Е.М.,  

судей Порывкина П.А., Фриева А.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Саидмурадовым А.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "СТАТУС-СТРОЙ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от «05» февраля  2024 года по делу № А40-151964/23,  

по иску ООО "СТАТУС-СТРОЙ" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) 

к ООО "БАЙЕР" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>)  о взыскании,  

по встречному иску о взыскании, при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 по доверенности от 08.07.2021, от ответчика: ФИО2 по доверенности от 09.01.2024, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Статус-строй» (истец) обратилось с первоначальным исковым заявлением  к ООО «Байер» (ответчик) о взыскании 1 150 000 руб. 00 коп. неосновательного  обогащения и 105 340 руб. 00 коп. неустойки по договору № 07/21/БАЙЕР от  07.07.2021.  

ООО «Байер» обратилось со встречным исковым заявлением о взыскании 

1 150 000 руб. 00 коп. штрафа по договору № 07/21/БАЙЕР от 07.07.2021.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2024 отказано в  удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований.  

Истец не согласился с выводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в  которой просит решение суда первой инстанции отменить в части отказа в  удовлетворении первоначальных исковых требований по мотивам, изложенным в  жалобе.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта  проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Учитывая, что лицами, участвующими в деле, до начала судебного  разбирательства возражения по проверке только части судебного акта не заявлены,  апелляционный суд, руководствуясь частью 5 статьи 268 АПК РФ, разъяснениями,  содержащимися в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции",  проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции только в  обжалуемой части.  

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной  жалобы, просил решение суда в обжалуемой части отменить.  

Представитель ответчика против доводов апелляционной жалобы возражал по  основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить  решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в  совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив  доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит  оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  07.07.2021 между истцом и ответчиком заключен договор № 07/21/БАЙЕР.  

В соответствии с вышеуказанным договором, ответчик обязался выполнять  работы, а истец принимать и оплачивать их.  

Так, истец свои обязательства по перечислению аванса в размере 1 150 000 руб.  исполнил надлежащим образом, что подтверждается платежным поручением № 206 от  07.07.2021.  

Согласно п. 1.3 договора ответчик обязался выполнить работы в сроки,  указанные в календарном плане.  

В соответствии с п. 8.2 договора истец имеет право в одностороннем порядке  расторгнуть договор.  

04.04.2023 истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении  договора № 07/21/БАЙЕР от 07.07.2021.  

Истец ссылается на то, что отсутствуют основания признать, что денежные  средства приобретены ответчиком на законных основаниях, следовательно,  

1 150 000руб. являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию в  судебном порядке.  

Поскольку в ответ на направленную претензию ответчик свои обязательства не  исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.  

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции  об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований по следующим  основаниям.  

Спорные отношения регулируются общими нормами Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также специальными нормами материального  права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами  в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов  работы (промежуточные сроки).  

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена  подлежащей выполнению работы или способы ее определения.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику  обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что  работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия  заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке,  которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и  принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от  договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно  заявить об этом подрядчику.  

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При  отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт  подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата  работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа  от подписания акта признаны им обоснованными.  

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года N 51 "Обзор  практики разрешения споров по договору строительного подряда" принятие работ  свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ и желании ими  воспользоваться, возврат выполненных работ и использованных при их исполнении  материалов невозможен, следовательно, заявленное исковое требование подлежит  удовлетворению, а понесенные подрядчиком затраты - компенсации. Обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).  

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законом (статья 310 ГК РФ)  

В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом,  другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний  отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной  стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения  договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если  иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми  актами или договором.  

Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего  отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ  допускается, договор считается расторгнутым или измененным.  

Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон  прекращаются.  

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения  того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или  расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В  случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от  другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое  обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к  отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие  неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или  договором либо не вытекает из существа обязательства.  

В сроки, установленные календарным планом, ответчик по первоначальному  иску исполнил обязательства по разработке изменений № 3 в специальные технические  условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной  безопасности.  

05.08.2021 ответчик направил на электронный адрес истца  infostatusstroy@gmail.com, selimov.rustam@bk.ru разработанную документацию – СТУ.  

В дальнейшем акт № 1 от 10.09.2021 направлен в адрес истца.  

Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,  подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.  

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными.  

Исходя из анализа вышеуказанных правовых норм, односторонний отказ от  подписания актов по форме № КС-2, № КС-3 при отсутствии выставленных в  установленном законом и договором порядке мотивированных отказов от такого  подписания, не является основанием для отказа от приемки, а, следовательно, и оплаты  выполненных Работ.  

По смыслу приведенных норм в предмет доказывания по данной категории дел  входит, в том числе, установление обоснованности причин отказа от подписания акта.  

При этом по смыслу п. 6 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  основанием для отказа в приемке выполненных работ является обнаружение  недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в  договоре подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.  

В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации именно заказчик должен представить доказательства обоснованного отказа  от подписания актов выполненных подрядчиком работ.  

Довод истца о том, что ответчиком работы не сданы, правомерно признан судом  первой инстанции несостоятельным, поскольку опровергается представленной в  материалы дела электронной перепиской, предусмотренной условиями договора.  

Как верно установлено судом первой инстанции, мотивированный отказ от  подписания актов истец ответчику не направил.  

С ходатайством о назначении экспертизы по качеству выполненных работ истец  ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции не обращался.  

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к верному  выводу об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований.  

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на  переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы  проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы  юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на  обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой  инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не  могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.  

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения  спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего  исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости,  допустимости и достаточности.  

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле  доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не  имеется.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для  отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не  установлено.  

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2024 по делу 

 № А40-151964/23 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу -  без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья Е.М. Новикова 

Судьи П.А. Порывкин 

 А.Л. Фриев