АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ

Дело № А29-13100/2018

26 ноября 2018 года

г. Сыктывкар

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Суслова М.О.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело 

по иску Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Воркутинское предприятие противопожарных работ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 14 920 руб. 04 коп. пеней и 6 376 руб. 09 коп. штрафа, за нарушение срока выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения по договору №47 от 12.10.2016,

без вызова сторон,

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 401, 702, 708, 716, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 3.1 статьи 70, статьями 110, 167-170, 180-181, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Воркутинское предприятие противопожарных работ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  в пользу Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 7 173 руб. 10 коп. пеней, начисленных за нарушение срока выполнения работ по договору №47 от 12.10.2016 за период с 08.11.2016 по 15.11.2016 и с 13.06.2017 по 24.07.2017 (50 календарных дней).

3. В удовлетворении требований о взыскании суммы пеней в размере 7 746 руб. 94 коп. отказать в виду применения при расчете срока выполнения работ статьи 193 Гражданского кодекса РФ, ставки рефинансирования Банка России в размере 7,5%, а также отсутствия доказательств вины подрядчика в нарушении срока выполнения работ в период с 16.11.2016 по 12.06.2017 в силу  пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ и статьи 716 Гражданского кодекса РФ.

4. В удовлетворении требований о взыскании штрафа в сумме 6 376 руб. 09 коп. отказать, поскольку в силу пункта 7.3 договора штрафы не подлежат начислению за просрочку исполнения обязательств.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Воркутинское предприятие противопожарных работ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 673 руб. 66 коп. государственной пошлины.

6. Выдать исполнительные листы.

7. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

8. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                            М.О. Суслов