АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел.: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-12730/2020

28 июня 2021 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 22 июня 2021 года

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2021 года

 Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Безрукова П.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального учреждения культуры «Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Красный Кут 

к обществу с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Балаково 

третьи лица: администрация Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области, с.Комсомольское

общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Базовый институт управляющих систем», г.Балаково 

об обязании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 15.01.2021;

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности 10.01.2019;

от администрации Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области: ФИО4 – глава администрации на основании решения от 14.09.2018,

от ООО «МЕБИУС»: - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального района Саратовской области (далее -  МУК СО Краснокутского муниципального района Саратовской области) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго» (далее – «Балаковоагропромэнерго») об обязании безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу.

Определением суда от 10.03.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Базовый институт управляющих систем» (далее – ООО «МЕБИУС»).

ООО «МЕБИУС» в судебное заседание не явилось, извещен надлежащим образом.

Согласно части 5 статьи 156 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ) при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие. 

Определениями суда от 28.09.2020 назначена судебная экспертиза, от 31.03.2021 дополнительная экспертиза, проведение которой было поручено обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория Независимой Судебной Экспертизы» эксперту ФИО5

Третье лицо заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии актов осмотра объекта, фотоматериалы.

Суд удовлетворил ходатайство третьего лица.

Представителем истца заявлено ходатайство о вызове и допросе эксперта ФИО5

Представитель ответчика поддержал ходатайство.

В судебном заседании в порядке от 15.06.2021 ст.163 АПК РФ был объявлен перерыв до 15 час. 10 мин. 16.06.2021, вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено.

В судебное заседание приглашен эксперт ФИО5

Судом, а также лицами, участвующими в деле, эксперту были заданы вопросы. Вопросы-ответы эксперта содержаться в аудиозаписи судебного заседания, приобщаемой к протоколу судебного заседания.

Кроме того, эксперт представил в материалы дела дополнительный локальный сметный расчет. 

Судом приобщен указанный документ.

В судебном заседании в порядке от 16.06.2021 ст.163 АПК РФ был объявлен перерыв до 15 час. 20 мин. 22.06.2021, вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено.

От ответчика через канцелярию суда поступила позиция по делу, согласно которой, устранить недостатки в течение одного месяца не представляется возможным, просит установить разумный срок устранения недостатков в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, кроме того, считает, что требования об установке контейнеров объемом 0,5 м3 является необоснованным, поскольку считает, что они установлены, а также считает необоснованным вывод эксперта о том, что ответчиком применена не соответствующая проектом тротуарная плитка.

Судом приобщена указанная позиция по делу.

Представитель истца и администрации Комсомольского МО исковые требования поддерживают.

Дело рассматривается в порядке статей 153-166 АПК РФ. 

Отводов составу суда не заявлено.

В соответствии со статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 АПК РФ.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Отводов суду не заявлено.

Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах, пояснениях, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 25.05.2019 между МУК СКО Краснокутского района Саратовской области (Заказчик) и ООО «Балаковоагропромэнерго» (Подрядчик) заключен контракт №0160300011619000043, согласно условиям которого Подрядчик в установленные сроки согласно контракту обязуется выполнить все предусмотренные проектной документацией строительно-монтажные работы и иные предусмотренные контрактом мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства. Указанного в пункте 1.2. Контракта и передать объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять объект и уплатить определенную контрактом цену.

Пункт 1.2. описание объекта: 1.2.1. государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской месности), реконструкция  Дома культуры по адресу: ул.Советская, д.47, с.Комсомольское, Краснокутский район, Саратовской области».

Объем и содержание работ определены проектной документацией Объекта (Приложение №1 к контракту) и контрактом (п.2.1.).

Согласно пункту 2.2. срок начала реконструкции объекта, срок окончания реконструкции объекта, промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2), а сроки и размеры оплаты выполненных строительно-монтажных работ и иных предусмотренных контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения контракта) – графиком оплаты выполненных работ (Приложение №3).

Полный объем работ по контракту должен быть выполнен не позднее 01.12.2019.

Пунктом 3.1. предусмотрено, что цена контракта (цена работ) составляет 42 661 592 руб. 34 коп., в том числе налог на добавленную стоимость по ставке 20% в размере 7 110 265 руб. 39 коп.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по контракту (п.3.3.).

Дополнительным соглашением от 01.10.2019 стороны пришли к соглашению об увеличении работ, стоимость которых составляет 46 927 751 руб. 57 коп., неотъемлемой частью соглашения является локальный сметный расчет и календарный график.

В соответствии с пунктом 8.2. при завершении выполнения работ по контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имена Заказчика, об их завершении с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ; исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов; счета на оплату работ и счета-фактуры.

Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 8.2. контракта: осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика; осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной документации; подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации (п.8.3.).

В соответствии с пунктом 9.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдение требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока установленного пунктом 9.3.

Согласно пункту 9.3. гарантий срок на объект устанавливается сроком на 60 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта приемки законченного реконструкцией объекта.

Подрядчик несет ответственностью за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами (п.9.5.)

В пункте 9.6. указано, что устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.3., будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

Пунктом 9.3. установлено, что не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика (9.9).

Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика (9.10).

Между сторонами заключен договор строительного подряда. Отношения сторон по договору подряда и строительного подряда регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (параграфы 1 и 3).

На основании статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 763 ГК РФ подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Работы сданы Заказчику без претензий и оплачены, что подтверждается платежными поручениями и актами о приемке выполненных работ, подписанным представителями обеих сторон без замечаний и возражений и скреплен печатями организаций.

В марте 2020 года, в пределах гарантийного срока, в процессе эксплуатации здания были выявлены недостатки проведенных работ, истец направил претензию с просьбой устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств.

Работы по устранению выявленных недостатков ответчиком не произведены.

Вследствие нарушения подрядчиком своих гарантийных обязательств истец обратился с настоящим иском в суд.

На основании пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу положений статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве; гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или по иным причинам, за которые подрядчик не отвечает.

В пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ.

Бремя представления доказательств того, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые подрядчик не отвечает, в данном случае относится на ответчика.

Соответственно, поскольку ответчик не представил доказательств того, что выявленные истцом недостатки образовались вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, истец в силу указанных выше норм закона и п. 9.6. Контракта имеет право требовать устранения недостатков выполненных работ.

В связи с тем, что в ходе судебного разбирательства возникли вопросы относительно качества выполненных работ и определения стоимости устранения некачественно выполненных работ, истцом было заявлено ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы.

Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Определением суда от 28.09.2020 по настоящему делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «НИЛСЭ» эксперту ФИО6 и ФИО7. На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:

 - Соответствует ли качество выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>, условиям контракта №0160300011619000043 от 25.05.2019, проектной документации а также требованиям норм и правил, установленными применительно к данным видам работ? 

- Если качество выполненных работ по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>, не соответствует условиям контракта №0160300011619000043 от 25.05.2019, а также требованиям норм и правил, определить объем и стоимость их устранения? 

- Являются ли выявленные недостатки следствием нарушения технологии выполнения работ в процессе реконструкции и отделки, либо вызваны другими причинами?

Из поступившего в материалы дела заключения эксперта №992 от 29.01.2021 усматриваются следующие выводы: 

По первому вопросу

Качество выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>, не соответствует:

Условиям контракта №0160300011619000043 от 25.05.2019 в части:

- Выполнения полного объема предусмотренных проектной документацией строительно-монтажных работ.

Проектной документации в части:

- Исключения из перечня работ позиции без корриктировки проектного решения (Таблица№№ 1-12).

- Замена материалов без согласования и составления Дополнительного согласшения (таблица № 14).

Требованиям норм и правил, установленным применительно к данным видам работ в части:

- Отсутствия классификации материалов, замененных в процессе выполнения работ по реконструкции, по требованиям пожарной безопасности (напольное покрытие танцевального зала, отделка фасада).

- Нарушения технологии произвоства строительных работ (отмостка, облицовка оконного блока санузла первого этажа).

По второму вопросу

Размер ущерба, причиненного в результате замены материалов, при реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, с.бКомсомольское, ул. Советская, 47, в ценах, действующих на дату проведения экспертизы, составляет: 4 654 279 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей.

Размер ущерба, причиненного в результате работ выполненных с нарушениемтехнологических требований, при реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>, в ценах, действующих на дату проведения экспертизы, составляет: 13 550 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Размер ущерба, причиненного в результате механических повреждений, выявленных на момент проведения экспертного исследования Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>, в ценах, действующих на дату проведения экспертизы, составляет: 83 727 (восемьдесят три тысячи семьсот двадцать семь) рублей.

По третьему вопросу

Исходя из этого, выявленные недостатки:

- замена материала, указанного в проектном решении;

- работы, выполненные с нарушение технологии производства работ, являютсяследствием, нарушения технологии выполнения работ в процессе реконструкции и отделки.

- наличие дефекта в идее вертикальной трещины на стене санузла в месте примыкания корипичной пристройки к стене Дома культуры, является следствием осадки фундаментов.

- наличие трещины вдоль дверного блока тамбура, является причиной отсутствия регулировки фурнитуры дверного блока.

- наличие технической ошибки в проектной документации, является следствием нарушения нормативно-технических требований при разработке проектного решения.

Виды, объемы работ, которые необходимо выполнить для устранения недостатков выполненных работ, указаны в Приложениях №2,3,4 (локальные сметные расчеты) экспертного заключения.

В связи с тем, что в экспертном заключении выявлены неполный объем некачественно выполненных работ по реконструкции, что влияет на расчет стоимости их устранения, определением суда от 31.03.2021 назначена дополнительная экспертиза, производство которой поручено ООО «НИЛСЭ» ФИО5

На разрешение дополнительной экспертизы поставить следующие вопросы: 

1. Определить объем и стоимость устранения недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту №0160300011619000043 от 25.05.2019 по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>. 

2. Являются ли выявленные недостатки следствием нарушения технологии выполнения работ в процессе реконструкции и отделки, либо вызваны другими причинами?

Из поступившего в материалы дела заключения эксперта №273 от  18.05.2021 усматриваются следующие выводы:

По первому вопросу

Объем работ по устранению недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту № 0160300011619000043 от 25.05.2019 года по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>. 47 представлен в таблице № 1 - 5 по тексту первого вопроса.

Стоимость устранения недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту № 0160300011619000043 от 25.05.2019 года по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...> связанных с некачественно выполненными работами, возможно, повлиявших на осадку фундаментов пристройки, в ценах, действующих на момент проведения экспертного исследования, составляет: 83 975 (восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят пять) рубля.

Стоимость устранения недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту № 0160300011619000043 от 25.05.2019 года по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...> связанных с некачественно выполненными в процессе реконструкции строительными работами, в ценах, действующих на момент проведения экспертного исследования, составляет: 433 583 (четыреста тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля.

Стоимость устранения недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту № 0160300011619000043 от 25.05.2019 года по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...> связанных с несоответствием применяемых строиетльных материалов проектному решению, в ценах, действующих на момент проведения экспертного исследования, составляет: 6 683 006 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи шесть) рублей.

Стоимость устранения недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту № 0160300011619000043 от 25.05.2019 года по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...> связанных с невыполнением строительных работ согласно проектному решению, в ценах, действующих на момент проведения экспертного исследования, составляет: 1 766 861 (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.

Стоимость устранения недостатков выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по контракту № 0160300011619000043 от 25.05.2019 года по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: Саратовская область. 

<

...> связанных с установкой внутренних элементов воздуховодов (скрытых работ), в ценах, действующих на момент проведения экспертного исследования, составляет: 513 297 (пятьсот тринадцать тысяч двести девяносто семь) тысяч.

По второму вопросу

Выявленные недостатки выполненных ООО «Балаковоагропромэнерго» работ по реконструкции Дома культуры, находящегося по адресу: 

<

...>, являются следствием нарушения технологических требований и несоответсвия проектному решению, а именно:

- некачественно выполненными работами, возможно, повлиявших на осадку фундаментов пристройки (трещина в месте примыкания пристройки);

- некачественно выполненными в процессе реконструкции строительными работами;

- несоответствия применяемых строиетльных материалов проектному решению;

- невыполнения строительных работ согласно проектному решению;

- отсутствия Актов на скрытые работы;

- отсутствие согласований по замене материалов с проектной организацией.

Виды, объемы работ, которые необходимо выполнить для устранения недостатков выполненных работ, указаны в Приложениях №2,3,4,5,6 (локальные сметные расчеты) экспертного заключения.

Суд, исследовав указанное заключение эксперта в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил, что оно соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об экспертной деятельности. 

Сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта судом не установлено, экспертное заключение соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ.

В связи с тем, что процедура назначения и проведения экспертизы соблюдена, заключение эксперта соответствует предъявляемым законом требованиям, является достаточно ясным и полным, не вызывает сомнений в его обоснованности, а противоречий, исключающих однозначное толкование выводов эксперта, судом не установлено, судебная экспертиза, результаты которой отражены в заключении эксперта является надлежащим доказательством по настоящему делу. 

Суд приходит к выводу, что заключение эксперта подтверждает факт некачественности выполнения работ, наличия необходимости устранения недостатков.

Доводы ответчика опровергаются представленным в материалы дела экспертным заключением, а также пояснениями эксперта.

Кроме того, возражая против срока устранения недостатков, ответчик просит установить срок в течение трех месяцев.

В порядке статьи 174 АПК РФ суд устанавливает срок, в течение которого ответчик обязан устранить недостатки работ, равным одному месяцу с момента вступления в силу судебного акта, считая такой срок разумным и достаточным.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно статье 168 АПК РФ при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При распределении расходов на проведении судебной экспертизы суд исходит из следующего.

По окончании проведения  судебной экспертизы ООО «НИЛСЭ» выставило счет на оплату в сумме 71 540 руб.

Истец перечислил на депозит суда денежные средства в размере 71 540 руб., по платежному поручению №12211 от 23.09.2020.

Учитывая то обстоятельство, что исковые требования удовлетворены, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца расходов за производство судебной экспертизы в размере 71 450 руб.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

При подаче иска по заявленным требованиям подлежало оплате 6 000 руб. государственной пошлины за неимущественные требования.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Балаково в месячный срок со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки выполненных работ по контракту №0160300011619000043 от 25.05.2019, а именно:

- Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

НР (104,4 руб.): 77% от ФОТ (135,58 руб.)

СП (67,79 руб.): 50% от ФОТ (135,58 руб.);

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная;

- Состав грунтовочный глубокого проникновения;

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

НР (28,57 руб.): 79% от ФОТ (36,16 руб.)

СП (18,08 руб.): 50% от ФОТ (36,16 руб.);

- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 

НР (372,49 руб.): 105% от ФОТ (354,75руб.)

СП (195,11 руб.): 55% от ФОТ (354,75 руб.);

- Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, белая и цветная, однотонная, толщина 9 мм;

- Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая;

- Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь);

- Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

HР (49,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (52,84 руб.)

СП (24,7 руб.): 55% *0,85 от ФОТ (52,84 руб.);

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная;

- Состав грунтовочный глубокого проникновения;

- Снятие дверных полотен 

НР (4,72 руб.): 82% от ФОТ (5,76 руб.) 

СП (3,57 руб.): 62% от ФОТ (5,76 руб.)

- Установка дверных полотен: наружных кроме балконных

НР (13,19 руб.): 82% от ФОТ (16,09 руб.)

СП (9,98 руб.): 62% от ФОТ (16,09 руб.);

- Дверное полотна ПВХ профиля;

- Очистка помещений от строительного мусора 

НР (11,69 руб.): 78% от ФОТ (14,99 руб.)

СП (7,5 руб.): 50% от ФОТ (14,99 руб.);

Оконный проем

- Снятие наличников (снятие уголков, прим.) 

НР (2,19 руб.); 82% от ФОТ (2,67 руб.)

СП (1,66 руб.): 62% от ФОТ (2,67 руб.);

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

НР (14,28 руб.): 79% от ФОТ (18, 08 руб.)

СП (9,04 руб.): 50% от ФОТ (18,08 руб.);

- Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (153,94 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (162,9 руб.)

СП (76,16 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (162,9 руб.);

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная;

- Состав грунтовочный глубокого проникновения;

- Установка уголков ПВХ на клее (наличников, прим.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1.25)

HP (5,69 руб.): 118% *0, 9 от ФОТ (5,26 руб.)

СП (2,82 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (5,26 руб.);

- Наличники из ПВХ, ширина 50 мм;

Помещение с левой стороны от входного тамбура

- Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм 

НР (36,36 руб.): 79%  от ФОТ (46,03 руб.)

СП (23,02 руб.): 50% от ФОТ (46,03 руб.);

Окраска фасада:

- Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗМП=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (860 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (910,05 руб.)

СП(425,45 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (910,05 руб.);

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (4928,11 руб.): 122%Ю,9 от ФОТ (4488,26 руб.)

СП (3052,02 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4488,26 руб.);

- Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные;

- Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород;

Окраска стены сцены:

- Окраска водно-дисперсионнными акриловыми составами улучшенная: по штукатурку стен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1;25 к расх.; ЗП=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (187,23 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (198,13 руб.)

СП (92,63 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (198,13 руб.);

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная;

- Состав грунтовочный глубокого проникновения;

Общестроительные работы:

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (прм. к бетон.)

HP (354,94 руб.): 104%от ФОТ (341,29 руб.)

СП (204,77 руб.): 60% от ФОТ (341,29 руб.);

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (514,5 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (402,58 руб.)

СП (325,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (402,58 руб.);

- Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1

НР 142% от ФОТ 

СП 95% от ФОТ;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (13,46 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (10,53 руб.)

СП (8,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (10,53руб.);

- Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 

НР 142% от ФОТ

СП 95% от ФОТ;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (11,49 руб.): 142%*0,9 от ФОТ(8,99 руб.)

СП (7,26 руб.): 95% *0,85 от ФОТ (8,99 руб.);

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (10,58 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (8,28 руб.)

СП (6,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (8,28 руб.);

- Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 

НР 142% от ФОТ

 СП 95% от ФОТ;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (20,19 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (15,8 руб.)

СП (12,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (15,8 руб.);

- Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1

НР 142% от ФОТ 

СП 95% от ФОТ;

- Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1;

Площадка:

- Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм 

НР (45130,36 руб.): 104% от ФОТ (43394,58 руб.)

СП (26036,75 руб.): 60% от ФОТ (43394,58 руб.);

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании (прим.)

НР (213,51 руб.): 104% от ФОТ (205,3 руб.)

СП (123,18 руб.); 60% от ФОТ (205,3 руб.);

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (308,34 руб.): 142% от ФОТ (217,14 руб.)

СП (206,28 руб.): 95% от ФОТ (217,14 руб.);

- Песок природный для строительных: работ средний;

- Портландцемент с минеральными добавками М300 Д20 (ЦЕМ II 22,5Н);

Розлив вяжущих материалов

(ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (5,02 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (3,93 руб.)

СП (3,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3,93 руб.);

- Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130;

- Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ= 1,25)

НР (4357,16 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (3409,36 руб.)

СП (2753,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3409,36 руб.);

- Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе;

- Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (264,53 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (206,99 руб.)

СП (167,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (206,99 руб.);

- Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3;

- Демонтаж наружной облицовки поверхности цоколя сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (прим.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТМЗ=1,25;

ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,64; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,64)

НР (2290,12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2423,41 руб.)

СП (1132,94 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2423,41 руб.);

Устройство теплоизоляции по профилированному настилу:

- Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм 

НР (480,97 руб.): 83% от ФОТ (579,48 руб.)

СП (376,66 руб.): 65% от ФОТ (579,48 руб.);

- Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12663,94 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (14071,04 руб.)

СП (8372,27 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (14071,04 руб.);

- Плиты минераловатные, на синтетическом связующем, теплоизоляционные, П-175;

- Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (774,26 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (860,29 руб.)

СП (511,87 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (860,29 руб.);

- Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (774,26 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (860,29 руб.)

СП (511,87 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (860,29 руб.);

- Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм;

- Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (1687,64 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1562,63 руб.)

СП (863,35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1562,63 руб.);

- Раствор готовый кладочный, цементный, М100;

- Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (65,11 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (60,29 руб.)

СП (33,31 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (60,29 руб.);

- Раствор готовый кладочный, цементный, М100;

Огнезащита перекрытий:

- Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (917,12 руб.): 100% *0,9 от ФОТ (1019,02 руб.)

СП (606,32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1019,02 руб.);

- Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из металла, толщина 20-200 мм;

- Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

НР 0% от ФОТ

 СП 0% от фот;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

НР 0% от ФОТ 

СП 0% от ФОТ;

Устройство верхней части монолитного пояса:

- Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок

НР (12,02 руб.): 77% от ФОТ (15,61 руб.)

СП (7,81 руб.): 50% от ФОТ (15,61 руб.);

- Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (1481,13 руб.): 122% *0,9 от ФОТ (1348,93 руб.)

СП (917,27руб.): 80%*0.85 от ФОТ(1348,93руб.);

- Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100;

- Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (32,72руб.): 100%*0,9 от ФОТ(36,36 руб.)

СП (21,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (36,36 руб.);

- Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм;

- Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (24,75 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (27,5 руб.)

СП (16,36 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (27,5 руб.);

- Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35x35 мм;

- Дюбель фасадный Sormat S-UF 10x115 мм;

- Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (165,91 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (175,57 руб.)

СП (82,08 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (175,57руб.);

Опорные стойки эстрады:

- Укладка лаг: по кирпичным столбикам

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (322,28 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (291,13 руб.) 

СП (185,6  руб.): 75%*0,85 от ФОТ (291,13 руб.);

- Раствор готовый кладочный, цементный, М75;

Заполнение дверных проемов:

- Снятие дверных полотен 

НР 82% от ФОТ

 СП 62% от ФОТ

- Снятие наличников

 НР 82% от ФОТ 

СП 62% от ФОТ;

- Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатура в откосах 

НР 82% от ФОТ 

СП 62% от ФОТ;

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (73,81 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (69,5 руб.)

СП (37,22 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (69,5 руб.);

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (852,28руб.): 118%*0,9 от ФОТ (802,52 руб.)

СП (429,75 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (802,52 руб.);

- Блоки дверные внутренние: двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные;

- Блоки дверные внутренние: однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные;

- Блоки дверные по старым образцам с криволинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, двупольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 4,5 м2;

- Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные;

- Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2, ДС 19- 9ГТ, площадь 1,67 м2;

- Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (208,59 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (196,41 руб.)

СП (105,18 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (196,41 руб.);

- Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм;

- Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм;

- Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм;

- Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм;

- Разборка облицовки из гипсокартонных листов (металлического профиля): стен и перегородок (прим.)

НР 77% от ФОТ 

СП 50% от ФОТ;

Цоколь:

- Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (99,41 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (110,46 руб.)

СП (65,72 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (110,46 руб.);

- Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм;

- Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (75,19 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (83,64 руб.)

СП (49,71 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (83,54 руб.);

- Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35x35 мм;

- Дюбель фасадный Sorrnat S-UF 10x115 мм;

- Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (478,1 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (505,93 руб.)

СП (236,52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (505,93 руб.);

Усиление верхней части стены танцевального зала:

- Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором

НР (142,17 руб.): 86% от ФОТ (165,31 руб.)

СП (115,72 руб.): 70% от ФОТ (165,31 руб.);

- Раствор готовый кладочный, цементный, М100;

- Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром; 25 мм

НР (22,01 руб.): 110% от ФОТ (20,01 руб.)

СП (14,01 руб.): 70% от ФОТ (20,01 руб.);

- На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-02

НР (0,76 руб.): 110% от ФОТ (0,69 руб.)

СП (0,48 руб.): 70% от ФОТ (0,69 руб.);

- Усиление конструктивных элементов; стен кирпичных стальными тяжами

НР (100,36 руб.): 110% от ФОТ (91,24 руб.)

СП (63,87 руб.): 70% от ФОТ (91,24 руб.);

Металлические конструкции:

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (964,39 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (1190,6 руб.)

СП (708,41 руб.): 70%*0,855 от ФОТ (1190,6 руб.);

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (332,24 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (410,17 руб.)

СП (244,05 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (410,17 руб.);

Люки металлические:

- Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (31,9 руб.): 118%*0,9 от ФОТ(30,04 руб.)

СП (16,09 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (30,04 руб.);

- Люки металлические противопожарные (Е160);

- Замки для запирания металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ;

Элементы кровли:

- Ограждение кровель перилами

 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (42,88 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (39,7 руб.)

СП (21,93 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (39,7 рб.);

- Ограждение кровельное (длиной 1860мм) Цена: 1950/1, 18/7,13;

- Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (8,82 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (10,89 руб.)

СП (7,87 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (10,89 руб.);

- Переходной мостик (длиной 1250 мм) 2660/1, 18/7, 13;

- Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

HP (108,06 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (133,41 руб.)

СП (96,39 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (133,41 руб.);

- Лестница кровельная стеновая Л-455х1860 Цена: 2550/1, 18/7, 13;

- Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО Цена: 190/1, 18/7,13;

- Кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР Цена: 220/1, 18/7,13;

- Кронштейн к стене для лестницы Л-КС Цена: 830/1, 18/7,13;

- Кронштейн подвесной для лестницы Л-КП Цена: 220/1, 18/7, 13;

- Поручень для лестницы Л-ПО Цена: 1220/1,18/7,13;

- Монтаж снегозадержателя: уголкового

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (16,04 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (14,85 руб.)

СП (8,2 руб.): 65%*0,85 от ФОТ(14,85руб.);

- Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150/3000 Цена: 1980/1,1 8/7, 13;

- Устройство желобов: подвесных 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (125,51 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (116,21 руб.) 

СП (64,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (116,21 руб.);

- Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Заглушка желоба MП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Устройство металлической водосточной системы: колен

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (11,4 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (10,56 руб.)

СП (5,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ(10,56 руб.);

- Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Устройство металлической водосточной системы: воронок

(ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (4,3 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (3,98 руб.)

СП (2,2 руб.): 65% *0,85 от ФО Г (3,98 руб.);

-Воронки выпускные МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб

(ОЗП=1,15: ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (8,55 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (7,92 руб.)

СП (4,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (7,92 руб.);

- Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет);

- Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

HP (389,73 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (455,83 руб.)

СП (251,85 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (455,83 руб.);

- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А- I, диаметр 12 мм;

- Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм;

- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм;

Водопровод:

- Установка смесителей 14 in 

(ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25) 

HP (17,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ(15,49 руб.)

СП (10,93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (15,49 руб.);

- Дюбели распорные с гайкой;

- Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой;

- Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм;

- Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (5,28 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (4,58 руб.)

СП (3,23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4,58 руб.);

- Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 25 мм;

- Установка фильтров диаметром: 25 мм 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1.25; T3M=1,25) 

HP (9,9 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (8,59 руб.)

СП (6,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (8,59 руб.);

- Фильтры для очистки воды, ФММ-25, муфтовые;

Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (9,56 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (13,28 руб.)

СП (6,77руб.): 60%*0,85 от ФОТ (13,28 руб.);

- Штуцеры, длина 200 мм;

- Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (11,47 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (9,96 руб.)

СП (7,03 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9,96 руб.);

- Установка кранов поливочных диаметром; 25 мм

(ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (3,82 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (3,32 руб.)

СП (2,34 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (3,32 руб.)

- Рукав поливочный, диаметр 25 мм;

- Рукав поливочный, диаметр 25 мм;

- Кран водоразборный для раковин и моек, латунный, настенный, полированный;

- Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный полированный КВ-20;

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; .ТЗМ=1,25)

НР (151,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (131,4 руб.)

СП (92,7 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (131,4 руб.);

- Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные о резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм;

- Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89x6-76x5 мм

- Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89x6,0 мм;

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром; 65 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=125 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,23)

НР (924,31 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (802,35руб.)

СП (566,06 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (802,35 руб.);

- Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой; обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм;

- Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65x50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76x6-57x5 мм;

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроаодных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

НР (392,08 руб.): 128% от ФОТ (306,31 руб.)

СП (254,24 руб.): 83% от ФОТ (306,31 руб.);

- Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой; обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм

НР 128% от ФОТ

СП 83% от фот;

- Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм;

- Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2); номинальный диаметр 15 мм;

- Установка кранов пожарных диаметром 50 мм 

(ОЗП=1,15)

НР (26,44 руб.): 128% от ФОТ (20,66 руб.)

СП (17,15 руб.): 83% от ФОТ (20,66 руб.);

- Установка моек: на одно отделение

(ОЗП=1.15: ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗМ=1,25) 

НР (20,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (17,68 руб.)

СП (12,47 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (17,68 руб.);

- Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800x600x222 мм;

- Шкаф-стол под мойку 5М1 "Афина” Цена:2360/7, 13/1, 18

НР 128% от ФОТ 

СП 83% от ФОТ;

- Установка писсуаров: настенных 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПM=1,25; T3M=1,125) 

НР (11,03 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (10,36 руб.)

СП (7, 31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (10,36 руб.);

- Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе;

- Установка трапов диаметром: 50 мм 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (36,53 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (31,71 руб.)

СП (22,37 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (31,11 руб.);

- Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-50, размер 260x140x110 мм (в экспортном исполнении);

- Установка трапов диаметром: 100 мм 

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (10,58 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (9,18 руб.)

СП (6,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9,18 руб.);

- Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-100М, размер 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые;

Низковольтное оборудование:

- Темнитель зрительного зола мощностью: 30 кВт

НР (130,38 руб.): 95% от ФОТ (137,24 руб.)

СП (89,21 руб.): 65% от ФОТ (137,24 руб.);

- Темнитель света ТСЗ-5DR

НР  95% от ФОТ 

СП 65% от ФОТ;

- Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт

HP (78,59 руб.): 95% от ФОТ (82,73руб.)

СП (53,77 руб.): 65% от ФОТ (82,73 руб.)

- Пульт управления ТС-1;

- Ящик с понижающим трансформатором

НР (10,99 руб.): 95% от ФОТ (11,67 руб.)

СП (7,52 руб.): 65% от ФОТ (11,67 руб.);

- Прожектор: мощностью до 3 кВт 

НР (793,61 руб.): 95% от ФОТ (835,38 руб.)

СП (543 руб.): 65% от ФОТ (835,38 руб.);

- Светофильтр стеклянный (красный, синий, зеленый)

НР 95% от ФОТ

 СП 85% от ФОТ

- Прожектор театральный Spot-1100 

HP 95% от фот

 СП 85% от ФОТ;

- Светильник театральный 4x150Вт СТ-4-500

НР 95% от ФОТ

СП 65% от ФОТ;

- Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ

НР (797,23 руб.): 95% от ФОТ (839.19 руб.)

СП (545,47 руб.): 65% от ФОТ (839,19 руб.);

- Светильник театральный 4x150Вт СТ-4-150 

НР 95% от ФОТ 

СП 65% от фот;

- Светильник театральный СВТГ-05 

НР 95% от ФОТ 

СП 65% от ФОТ;

- Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5;

- Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220- 230-500;

- Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-300;

Прочие изделия:

- Электрополотенце

НР (48,46 руб.): 95% от ФОТ(48,9 руб.)

СП (31,79руб.): 65% от ФОТ(48,9 руб.);

- Сушилка для рук: в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт;

- Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д, 

НР (17,24 руб.): 128% от ФОТ (13,47 руб.)

СП (11,18 руб.): 83% от ФОТ (13,47 руб.);

- Поручень для крепления ППС-3 (левый);

- Настенный поручень для раковины, верхний ПСС-2;

- Настенный поручень для сифона раковины, нижний ПСС-3;

- Откидной поручень для унитаза, ПОП-1;

- Зеркало поворотное, антивандальное;

Прочие работы:

- Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм

(ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (27,52 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (29,12 руб.)

СП (13,61 руб.): 55% *0,85 от ФОТ (29,12 руб.);

- Вазы цементные гладкие, высота до 500 мм;

- Установка контейнеров на готовое основание (прим.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭМ=1.25; ТЗМ=1,25)

НР (1372,14 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1073,66 руб.)

СП (866,98 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1073,66 руб.);

- Контейнер объемом 0,5 мЗ

НР 142% от ФОТ 

СП 95% от ФОТ

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Маm толщ. 60 мм. Применительно

(ОЗП=1,15, ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (363,98 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (404,42 руб.)

СП (240,63 руб.): 70% *0,85 от ФОТ (404,42 руб.);

- Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, гидрофобизированные, фольгированные, толщина 60 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Tex Mam толщ. 60мм . Применительно

НР (275,97 руб.): 100% от ФОТ (275,97 руб.)

СП (193,18 руб.): 70% от ФОТ (275,97 руб.);

- Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, гидрофобизированные, фольгированные, толщина 60 мм;

- Проволока стальная низкоуглёродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

- Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных с пределом огнестойкости 2,0 часа. Применительно (комплексная огнезащита "МБф-60" с пределом огнестойкости El 30)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25)

HP (718,24 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (798,04 руб.)

СП (474,83 руб.): 70%*0,65 от ФОТ(798.04руб.)

- базальтовый рулонный фольгированный материал МБФ-7 толщ. 7 мм и жаропрочная мастика) Цена: 336/7,13 

НР 100% от ФОТ

СП 70% от фот;

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Мam толщ. 60 мм

139,87=165,88 -0,05x519,80

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (308,64 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (342,93 руб.)

СП (204,04 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (342,93 руб.);

- Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, гидрофобизированные, фольгированные, толщина 60 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

- Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных с пределом огнестойкости 2,0 часа. Применительно (комплексная огнезащита "МБФ-60" с пределом огнестойкости EI 30)

НР (674 руб.); 100%*0,9 от ФОТ

2 868,75=9992,61-121х26,10-0,064х7590,00-6х580,00

НР (585,71 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (650,79 руб.)

СП (397,22руб.): 70%*0,85 от ФОТ(650,79 руб.);

- базальтовый рулонный фольгированный материал МБФ-7 толщ. 7мм и жаропрочная мастика) Цена: 336/7,13 

НР 100% от ФОТ

СП 70% от ФОТ;

- Детали к асбестоцементным листам волнистым: обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2;

- Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т

НР (85,96 руб.): 128% от ФОТ (67,16 руб.)

СП (55,74 руб.): 83% от ФОТ (67,16 руб.);

- Агрегат воздушный отопительный (охладительный) с водяным теплообменником серия AOВ 45, расход воздуха 3850 м3/ч, мощностью 255 Вт;

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами RОCRWOLL Тех Маm толщ. 80мм .Применительно

139,87=185,86-0,05х519,80

(ОЗП=1,15: ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (161,77руб.): 100%*0,9 от ФОТ(179,74 руб.)

СП (106,95 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (179,74 руб.);

- Маты минераловатные кэшированные фольгой; марка 'Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 80 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Tex Mam толщ. 80мм. Применительно

139,87 = 165.86 - 0.05 х 519,80

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,77руб.): 100%*0,9 от ФОТ (14,19 руб.)

СП (8,44 руб.): 70% *0,85 от ФОТ (14,19 руб.);

- Маты минераловатные кэшированные фольгой; марка "Тех мат» ROCKWOOL, толщиной: 80 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая розного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Мат толщ. 80 мм. Применительно.

139,87=165,86-0,05х519,80

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ХПМ=1,25, ТЗМ=1,25)

HP (6,38 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (7,09 руб.)

CП (4,22 руб.): 70%*0,85 от  ФОТ (7,09 руб.);

- Маты минераловатные кэшированные фольгой, марка «Тех мат»  ROCKWOOL, толщиной: 80 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм

НР 100% от фот 

СП 70% от фот;

- Маты минераловатные кэшированные фольгой; марка 'Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 80 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

- Устройство теплоизоляции воздуховодов до кондиционера матами ROCRWOLL Тех Маm толщ. 80мм. Применительно.

139,87= 185.86 - 0,05 х 519,80

 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (21.29 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (23,65 руб.)

СП (14,07 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (23,65 руб.);

- Маты минераловатные кэшированные фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 80 мм;

- Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм;

Теплоснабжение:

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм

 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (425,3 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (369,18 руб.)

СП (260,46 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (369,18 руб.);

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм;

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм 

НР 128% от ФОТ

СП 83% от ФОТ;

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм;

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм 

HP 128% от ФОТ 

СП 83% от ФОТ;

- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм;

- Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2";

- Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 3/4";

- Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм;

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; T3M=1,25)

HP (80,66 руб.): 128%*0.9 от ФОТ(70,02 руб.)

СП (49,4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (70,02 руб.);

- Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм;

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

HP (212,90руб.): 128%*0,6 pm ФОТ(184,86 руб.)

СП (130,42 руб.): 83%0,85 от ФОТ (184,86 руб.);

- Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами дли отопления и водоснабжения г наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм;

- Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

 (ОЗП=1,15;ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (107,87 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (93,72 руб.)

СП (66,12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (93,72руб.)

- Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами;

- Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами;

- Установка вентилей, задвижек; затворов, клапанов обратных, кранов проходных йа трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх,; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (63,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (55,52 руб.)

СП (39,17 руб.): 83%‘0,05 от ФОТ (55,52 руб.);

- Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами;

- Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты);

- Анкер-шпилька М12x115/20;

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

(ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (13,23 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (16,33 руб.)

СП (9,72 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (16,33руб.);

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раскх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (13,71 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (16,93 руб.)

СП (10,07 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (16,93 руб.);

- Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (22,52 руб.):100%*0,9 от ФОТ (25,02 руб.)

СП (14,89 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (25,02 руб.);

- Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; T3M=1,25)

HP (164,81 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (205,34 руб.)

СП (122,18 руб.):. 70%*0,85 от ФОТ (205,34 руб.);

- Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 18 мм, толщина 30 мм;

- Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 30 мм;

- Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 30 мм;

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кешированные алюминиевой фольгой, диаметр 45 мм, толщина 30 мм;

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 30 мм

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, Hi синтетическом связующем, кэшированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 30 мм;

- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25)

HP (528,87 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (587,63 руб.)

СП (349,64 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (567,63руб.);

- Фольга алюминиевая для тепло-и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм;

Система вентиляции:

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм

(ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ= 1,25)

HP (48,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (42, 08 руб.)

СП (29,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (42,08 руб.);

- Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (90), размер 400x400 мм;

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали, размер 800x600 мм;

- Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг 

(ОЗП= 1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ= 1,25; ТЗМ= 1,25) 

НР (57,97 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (50,32 руб.)

СП (35,5 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (50,32 руб.);

Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического; 

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (48,48 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (42,08 руб.)

СП (29,69 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (42,08 руб.);

- Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (90), размер 400x400 мм;

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали размер 800х600 мм;

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (48,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (42,08 руб.)

СП (29,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (42,08 руб.);

- Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (90), размер 300x300 мм;

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

(ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали, размер 600x600 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ= 1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 100x200 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)

СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (22,38 руб.);

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым;

- Установка клапанов: огнезадерживающих с ручкой регулировкой периметром до 1600 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (48,48 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (42,08 руб.)

СП (29,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (42,08 руб.);

- Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (90), размер 400x400 мм;

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки вентиляционные наружные PH, из оцинкованной стали, размер 700x400 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200x400 мм

НР (49,77руб.): 128% от ФОТ(38,88 руб.)

СП (32,27 руб.): 83% от ФОТ (38,88 руб.);

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым;

- Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; T3M=1,25)

 HP (68,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (59.19 руб.)

СП (41,76 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (59,19 руб.)

- Вентиляторы центробежные: Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт;

- Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР(47,38 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (41,13 руб.)

СП (29,02 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (41,13 руб.);

- Вентиляторы канальные ВКП 40 20 4Е, мощность 0,33 кВт;

- Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм

(ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (15,19 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (13,19 руб.)

СП (9,31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (13,19 руб.);

- Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000;

- Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размер 400x200 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 200x100 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1.25)

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)

СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (22,38руб.);

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, PB-I, размер 100x100 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100x400 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ= 1,25; ТЗМ=1,25)

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)

СП (15,79 руб.): 83% *0,85 от ФОТ (22,38 руб.)

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым;

- Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т

НР (45,71 руб.): 128%"(0б9) от ФОТ (35,71 руб.)

СП (29,64 руб.): 83%*(0б85) от ФОТ (35,71 руб.);

- Вентиляторы канальные: ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт;

- Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм

НР (11,84 руб.): 128%*(0б9) от ФОТ (9,25 руб.)

СП (7.68 руб.): 83%*(0б85) от ФОТ (9,25 руб.);

- Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 160М, диаметром 160 мм;

- Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР(51,56 руб.): 128%*0,9 от ФОТ(44,76 руб.)

СП (31,58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (44,76 руб.);

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 150x100 мм;

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (225,18 руб.): 128%*(0б9) от ФОТ (175,92 руб.) 

СП (146,01 руб.): 83%*(0б85) от ФОТ (175,92 руб.);

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 500 мм;

- Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (144,41 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (125,36 руб.)

СП (88,44 руб.): 83%90,85 от ФОТ (125,36 руб.);

- Клапаны воздушные К-1 (1003 мм), производительность до 40 тыс. мЗ/час;

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1.25красх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (30,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (26,14 руб.)

СП (18,44 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (26,14 руб.);

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 160 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25  красх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки жалюзийные из алюминиевого профиля с порошковым;

Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм

(ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (30,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (26,14 руб.)

СП (18,44 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (26,14 руб.);

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 160 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12.89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.);

- Решетки жалюзийные из алюминиевого профиля с порошковым;

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗМ=1,25)

НР (35,65 руб.): 128%*0,09 от ФОТ (30,95 руб.)

СП (21,84 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (30,95 руб.);

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой фунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 315 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200x400 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11.19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.)

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 250x200 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200x600 мм

(ОЗЛ=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)

СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ(22,38 руб.);

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВИ, размер 300x200 мм;

- Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200x600 мм;

(ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11.19 руб.);

- Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм

(ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (30,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (26,14руб.)

СП (18,44 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (26,14 руб.);

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой фунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 160 мм;

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

(ОЗП=1,15; эм=1,25 к расх: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (12,89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (11,19 руб.)

СП (7,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11,19 руб.)

Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым

- Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 

НР (60,23 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (52,28 руб.)

СП (36,88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (52,28 руб.);

- Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 160 мм;

- Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

НР (25,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (22,38 руб.)

СП (15,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (22,38 руб.);

- Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 250x600 мм;

- Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)

 HP (194,16 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (176,83 руб.) 

СП (120,24 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (176,83 руб.);

- Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

- Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Балаково в пользу муниципального учреждения культуры «Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Красный Кут судебные расходы за проведение экспертизы в размере 71 540 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балаковоагропромэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Балаково в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья арбитражного суда

Саратовской области                                                                                            П.М. Безруков