Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-313707/19

102-2579 

29 июля 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2020 г.

Полный текст решения изготовлен 29 июля 2020 года 

Арбитражный суд в составе судьи Козловский В. Э., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривушиной Е.Е., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) АО "РЖДСТРОЙ" к ООО "ГЛАВДОРПРОЕКТ", ООО "ПРОЕКТ № 7", ООО "СПЕЦПОЖАВТОМАТИКА"

о взыскании 2 673 759 руб. 27 коп.

при участии представителей 

от истца: ФИО1 по дов. от 18.12.2019 г. №19/467 и диплом рег. номер 24924.

от ответчиков: ООО «ПРОЕКТ № 7» - ФИО2 по дов. от 23.03.2020 

<

...>) ООО «ГЛАВДОРПРОЕКТ» - не явился, извещен, 3) ООО «СПЕЦПОЖАВТОМАТИКА» - ФИО3 решение от 26.02.2020 г. и приказ №3 от 03.03.2020 г.

УСТАНОВИЛ:

АО "РЖДСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском солидарно к ООО "ГЛАВДОРПРОЕКТ", ООО "ПРОЕКТ № 7", ООО "СПЕЦПОЖАВТОМАТИКА" о взыскании 7 537 777  руб. 03 коп. (с учетом увеличения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец на иске настаивает по доводам, приведенным в исковом заявлении, ссылается на представленные доказательства. Ответчики с заявленными требованиями не согласны. Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 23.05.2019 г. между ООО «ПРОЕКТ № 7» (Ответчиком), на стороне которого выступает несколько юридических лиц, а именно: ООО «ПРОЕКТ № 7», ООО «ГЛАВДОРПРОЕКТ» и ООО «СПЕЦПОЖАВТОМАТЖА» на основании Договора простого товарищества от 11.02.2019 г. № ПТ-01-2019-КО, и АО «РЖДстрой» (Истцом) заключен договор № 20-19-01-3029 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по предупреждению травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

30.05.2019 г. сторонами были подписаны дополнительные соглашения № 20-19-01-3029-035 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Ростов-Товарный 1215 км пк 2»), № 20-19-01-3029-036 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Каменоломни 1142 км пк 4»), № 20-19-01-3029-033 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Краснодар 1 - Лорис 670 км пк 9»), № 20-19-01-3029-031 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Лорис 659 км пк 8»), № 20-19-01-3029-032 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Зоологический Сад - Ростов-Товарный 1221 км пк 3»), № 20-19-01-3029-030 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Краснодар - 1 - Краснодар - 2 1623 км пк 9») (далее -«Дополнительные соглашения»).

П. 1 ст. 420 ГК РФ предусмотрено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Условия договора определяются по усмотрению сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Согласно п. 4.2.1 Договоров Подрядчик (Ответчик) обязан своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договоров.

П. 17.3 Договора предусмотрено, что при нарушении Подрядчиком сроков поставки Оборудования, предусмотренных в соответствующем графике поставки оборудования, выполнения отдельных этапов (видов) работ, несоблюдения промежуточных сроков выполнения работ (отдельных этапов, видов работ), предусмотренных в соответствующих Календарных планах работ, в том числе невыполнения объемов работ, запланированных на календарные периоды (месяц, квартал и пр.) по отдельным этапам, видам Работ (срыв Календарного плана Работ), Генподрядчик потребовать уплаты штрафа в размере 0,11% от стоимости данных этапов (видов, объемов) Работ за каждый календарный день просрочки.

Таким образом, размер штрафных санкций за нарушение Календарных планов выполнения Работ по Дополнительным соглашениям составляет 680 520 (шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать) руб. 36 коп., а именно: 

по Календарному плану, согласованному Дополнительным соглашением № 20-19-01-3029-035 от 30.05.2019 г., в размере 84 014 (восемьдесят четыре тысячи четырнадцать) руб. 01 коп. (622 327,36 руб. х 31 дн. (01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.) х 0,11% / 100) + (1 841 426,79 руб. х 31 дн. (01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.) х 0,11% / 100); 

по Календарному плану, согласованному Дополнительным соглашением № 20-19-01-3029-036 от 30.05.2019 г., в размере 74 922 (семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать два) руб. 15 коп. (709 407,72 руб. х 31 дн. (01.07.2019 г. -31.07.2019 г.) х 0,11% / 100) + (1 487 722,86 руб. х 31 дн. (01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.) х 0,11%/ 100); 

по Календарному плану, согласованному Дополнительным соглашением № 20-19-01-3029-033 от 30.05.2019 г., в размере 278 046 (двести семьдесят восемь тысяч сорок шесть) руб. 64 коп. (1 434 596,80 руб. х 31 дн. (01.07.2019 г. -31.07.2019 г.) х 0,11% / 100) + (2 438 996,80 руб. х 31 дн. (01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.) х 0,11% / 100) + (4 422 942,36 руб. х 30 дн. (01.09.2019 г. - 30.09.2019 г.) х 0,11% /100); 

по Календарному плану, согласованному Дополнительным соглашением № 20-19-01-3029-031 от 30.05.2019 г., в размере 168 329 (сто шестьдесят восемь тысяч триста двадцать девять) руб. 84 коп. (1 176 752,81 руб. х 31 дн. (01.07.2019 г. -31.07.2019 г.) х 0,11% / 100) + (2 013 752,81 руб. х 31 дн. (01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.) х 0,11% / 100) + (1 804 048,39 руб. х 30 дн. (01.09.2019 г. - 30.09.2019 г.) х 0,11 % /100); 

по Календарному плану, согласованному Дополнительным соглашением № 20-19-01-3029-032 от 30.05.2019 г., в размере 75 207 (семьдесят пять тысяч двести семь) руб. 72 коп. (647 793,360 руб. х 31 дн. (01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.) х 0,11% / 100) + (1 557 711,68 руб. х 31 дн. (01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.) х 0,11% /100).

Кроме того, Дополнительными соглашениями предусмотрен срок окончания работ. Согласно п. 6.4 Договора датой фактического окончания работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недоделок, а в случае необходимости - замены оборудования.

Тем не менее, по состоянию на 15.11.2019 г., Акты приемки законченного строительством объектов не подписаны, хотя Дополнительными соглашениями предусмотрен срок окончания работ, а именно: по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-035 от 30.05.2019 г. срок окончания работ август 2019 г., по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-036 от 30.05.2019 г. -август 2019 г., по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-033 от 30.05.2019 г. -сентябрь 2019 г., по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-031 от 30.05.2019 г. - сентябрь 2019 г., по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-032 от 30.05.2019 г. -август 2019 г., по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-030 о 30.05.2019 г. -июнь 2019 г.

Согласно п. 17.4 Договора при нарушении сроков окончания строительства (реконструкции, ремонта) Объекта по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе потребовав уплаты штрафа в размере 0,11% от цены договора за каждый календарный день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,22% цены договора за каждый последующий календарный день до фактического исполнения обязательства.

В результате неисполнения Ответчиком договорных обязательств в рамках дополнительных соглашений № 20-19-01-3029-035 от 30.05.2019 г., № 20-19-01-3029-036 от 30.05.2019 г., № 20-19-01-3029-033 от 30.05.2019 г., № 20-19-01-3029-031 от 30.05.2019 г., № 20-19-01-3029-032 от 30.05.2019 г., Истцом была проведена конкурсная процедура на заключение договоров подряда неоконченных Ответчиком. В результате чего, между Истцом и Ответчиком 27.03.2020 г. были подписаны договора подряда на выполнение работ № 06-20-01-4695 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Ростов-Товарный 1215 км пк 2»), № 06-20-01-4696 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Каменоломни 1142 км пк 4»), № 06-20-01-4694 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Краснодар 1 - Лорис 670 км пк 9»), № 06-20-01-4697 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Лорис 659 км пк 8»), № 06-20-01-4693 («Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Зоологический Сад - Ростов-Товарный 1221 км пк 3»).

На основании чего, штрафы за нарушение сроков окончания реконструкции Объектов (п. 17.4 Договора) следует рассчитывать до 27.03.2020 г., которые составляют:

- по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-035 от 30.05.2019 г. -1 131 746 (один миллион сто тридцать одна тысяча семьсот сорок шесть) руб. 04 коп. ((2 906 384,29 руб. х 30 дн. (01.09.2019 г. - 30.09.2019 г.) х 0,11% / 100) + (2 906 384,29\руб. х 178 дн. (01.10.2019 г. - 26.03.2020 г.) х 0,22% /100)),

- по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-036 от 30.05.2019 г. -910 870 (девятьсот десять тысяч восемьсот семьдесят) руб. 86 коп. ((2 339 165,02 руб. х 30 дн. (01.09.2019 г. - 30.09.2019 г.) х 0,11% / 100) + (2 339 165,02 руб. х 178 дн. (01.10.2019 г. - 26.03.2020 г.) х 0,22% /100)),

- по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-033 от 30.05.2019 г. -1 623 124 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи сто двадцать четыре) руб. 09 коп. ((5 018 936,58 руб. х 30 дн. (01.10.2019 г. - 30.10.2019 г.) х 0,11% / 100) + (5 018 936,58 руб. х 148 дн. (31.10.2019 г. - 26.03.2020 г.) х 0,22% /100)),

- по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-031 от 30.05.2019 г. -1 369 430 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать) руб. 14 коп. ((4 234 477,86 руб. х 30 дн. (01.10.2019 г. - 30.10.2019 г.) х 0,11% / 100) + (4 234 477,8 руб. х 148 дн. (31.10.2019 г. по 26.03.2020 г.) х 0,22% /100)),

- по Дополнительному соглашению № 20-19-01-3029-032 от 30.05.2019 г. -933 371 (девятьсот тридцать три тысячи триста семьдесят один) руб. 61 коп. ((2 396 948,15 руб. х 30 дн. (01.09.2019 г. - 30.09.2019 г.) х 0,11% / 100) + (2 396 948,15 руб. х 178 дн. (01.10.2019 г. - 26.03.2020 г.) х 0,22% /100)).

Истец направлял в адрес Ответчика требования оплатить штрафные санкции за нарушение договорных обязательств и незамедлительно выполнить работы по окончанию реконструкции Объекта, однако Ответчиком штрафы оплачены не были, работы не выполнены (исх. № СМТ1.0/4694 от 05.11.2019 г., № СМТ-10/4020 от 17.10.2019 г., № СМТ-10/3671 от 24.09.2019 г., № СМТ-10/3190 от 23.08.2019 г.).

В силу статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. 

Согласно пункту 1 статьи 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников (пункт 2 статьи 323 ГК РФ).

Доказательств погашения задолженности перед АО "РЖДСТРОЙ" кем-либо из солидарных ответчиков должник не представил. Таким образом, требования подлежат удовлетворению в заявленном размере солидарно с ООО "ГЛАВДОРПРОЕКТ", ООО "ПРОЕКТ № 7", ООО "СПЕЦПОЖАВТОМАТИКА".

Судебные расходы, согласно ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309-310, 330, 1041, 1047 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167 - 171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с ООО "ГЛАВДОРПРОЕКТ", ООО "ПРОЕКТ № 7", ООО "СПЕЦПОЖАВТОМАТИКА" в пользу АО "РЖДСТРОЙ" 7 537 777 руб.03 коп. неустойки, а также взыскать 36 369 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяВ. ФИО4