АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Октябрьский проспект, дом 19, 

<

...> тел. 

<

***>, факс 

<

***> http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А11-11043/2024

28 октября 2025 года

город Владимир

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой – Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Морозовой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯПРОЕКТ» (600029, Владимирская область, г.о. город Владимир, 

<

...>, помещ. 432, 433, 434, этаж 4, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Объединение «ИНЖСТРОЙ» (600001, 

<

...>, этаж 3, помещ. 83, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 1 666 500 руб., при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 06.09.2024 сроком на 3 года; 

от ответчика – не явились, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет,  

установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯПРОЕКТ» (далее – истец, ООО «ЭТИ») обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНЖСТРОЙ» (далее – ответчик, ООО «Объединение «ИНЖСТРОЙ» ) о взыскании 1 666 500 руб. 00 коп., неосновательное обогащение в сумме 102 829 руб. 72 коп. за период с 23.04.2024 по 06.09.2024 с последующим начислением по день фактического исполнения обязательств.  

Ответчик отзыв на иск не представил. Лица, участвующие в деле, в судебное заседание 12.08.2025 не явились. 

Спор рассматривается в отсутствие представителей истца, ответчика и третьих лиц на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

24.02.2022 ООО «Объединение «Инжстрой» (заказчик) и ООО «ЭТИ» (исполнитель) заключили договор № 2022-02-04 на выполнение проектных работ,  

согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить, согласно Технического Задания на разработку документации, являющегося Приложением № 1 к Договору, следующие работы (далее - «Работы»):  

- Разработать рабочую документацию в рамках проекта реконструкции здания «Строение 4 (Главный корпус завода и корпус покрытий)» для Калужского завода телеграфной аппаратуры, расположенного по адресу: 

<

...>- ФИО2, д. 141 (далее - «Объект») в составе следующих разделов:  

-Архитектурные решения (АР), 

-Архитектурно-строительные решения (полы, мезонин, площадки, перегородки и т.д.);  

-Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ); -Внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК);  

-Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ).  

В соответствии с пунктом 1.2 договора работы по Договору выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием на разработку документации, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Договору).  

Исполнитель передает Заказчику право на использование разработанной по настоящему Договору документации с целью строительства Объекта (пункт 1.3 договора).  

Пунктом 1.5. договора Технические, экономические и другие требования к результатам Работ по настоящему Договору должны соответствовать требованиям СниП, ГОСТ и других действующих нормативных/ненормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления документации.  

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 9 475 000 (девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

В соответствии с пунктом 2.1 договора общая стоимость Работ по Договору оплачивается Заказчиком в следующем порядке:  

-Заказчик в порядке предварительной оплаты (авансом) перечисляет Исполнителю сумму в размере 30% от стоимости договора, а именно 2 842 500 (два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами Договора (подпункт 2.3.1 договора);  

-Заказчик перечисляет Исполнителю сумму в размере 30% от стоимости Договора, а именно 2 842 500 (два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в течение 5 рабочих дней с момента передачи Заказчику на согласование в электронном виде разработанной по Договору Рабочей документации на участок ПМИ и Основного корпуса расположенных в осях 2-46/Г-Я  

(корпус 4Б) и подписания Сторонами промежуточного Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) (подпункт 2.3.2 договора);  

-Заказчик перечисляет Исполнителю сумму в размере 20% от стоимости Договора, а именно 1 895 ООО (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику на согласование в электронном виде разработанной по Договору Рабочей документации на административно-бытовой корпус расположенного в осях 2-46/А-Г (корпус 4А) и подписания Сторонами промежуточного Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) (подпункт 2.3.3 договора);  

-Заказчик перечисляет Исполнителю сумму в размере 20% от стоимости Договора, а именно 1 895 000 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) (подпункт 2.3.4 договора).  

Согласно пункту 3.1 договора срок выполнения Работ по Договору, указанных в п. 1.1. Договора, и передачи Заказчику Рабочей документации - 95 (девяносто пять) рабочих дней с момента перечисления Заказчиком Исполнителю аванса согласно п. 2.3.1. Договора и передачи исходной документации, согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к Договору (последнего по времени из указанных событий).  

В соответствии с пунктом 3.3 договора Порядок сдачи-приемки Работ по Договору:  

- В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения разработки Рабочей документации на участок ПМИ и Основного корпуса расположенных в осях 2-46/Г-Я, Исполнитель передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика 1 (один) экземпляр разработанной Рабочей документации в электронном виде. Одновременно с Рабочей документацией Исполнитель передает Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем промежуточного Акта сдачи - приемки работ (Рабочей документации). Указанные в настоящем пункте документы передаются Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом (подпункт 3.5.1 договора);  

-В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Рабочей участок ПМИ и Основного корпуса расположенных в осях 2-46/Г-Я, в надлежащих объеме, а также двух экземпляров подписанного Исполнителем промежуточного/Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) обязан принять Рабочую документацию, подписать промежуточный Акт сдачи-приемки работ (Рабочей документации) и направить Исполнителю один его экземпляр, либо, в этот же срок, Заказчик обязан направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки данных работ (подпункт 3.5.2 договора);  

-В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения разработки Рабочей документации на административно-бытовой корпус расположенного в осях 2-46/А-Г. Исполнитель передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика 1  

(один) экземпляр разработанной Рабочей документации в электронном виде. Одновременно с Рабочей документацией Исполнитель передает Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем промежуточного Акта сдачи - приемки работ (Рабочей документации). Указанные в настоящем пункте документы передаются Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом (подпункт 3.5.3 договора);  

-Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Рабочей документации на административно-бытовой корпус расположенного в осях 2-46/А-Г, в надлежащих составе и объеме, а также двух экземпляров подписанного Исполнителем промежуточного Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) обязан принять Рабочую документацию, подписать промежуточный Акт сдачи-приемки работ (Рабочей документации) и направить Исполнителю один его экземпляр, либо, в этот же срок, Заказчик обязан направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки данных работ (подпункт 3.5.4 договора);  

-В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования Заказчиком Рабочей документации, уполномоченным представителем Заказчика, в виде письма по электронной почте Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика 1 (один) экземпляр разработанной Рабочей документации в печатном (бумажном) виде. Одновременно с Рабочей документацией Исполнитель передает Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи - приемки работ (Рабочей документации). Указанные в настоящем пункте документы передаются Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом (подпукнт 3.5.5 договора);  

-Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Рабочей документации в надлежащих составе и объеме, а также двух экземпляров подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки работ обязан принять Рабочую документацию, подписать Акт сдачи-приемки работ и направить Исполнителю один его экземпляр, либо, в этот же срок, Заказчик обязан направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ.  

Указанные в настоящем пункте документы передаются Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом (подпункта 3.5.6 договора);  

-В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного мотивированного отказа Исполнителем, составляют акт с перечнем необходимых доработок. Соответствующие доработки должны быть произведены Исполнителем в согласованные сторонами сроки (подпункта 3.5.7 договора).  

Согласно пункту 5.3 договора в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ (разработанной документации) по Договору, Заказчик по письменному требованию Исполнителя, выплачивает последнему пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы соответствующего просроченного по оплате платежа по Договору за каждый день просрочки до даты исполнения просроченного обязательства по оплате, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору. Претензия предъявляется в письменном виде и содержит расчет суммы пени. При не выставлении  

претензии данный пункт Договора считается не действующим, т.е. пеня не начисляется и не уплачивается.  

01.11.2022 ООО «Объединение «Инжстрой» (заказчик) и ООО «ЭТП» (исполнитель) заключили договор № 2022-11-02 на выполнение проектных работ, согласно пункту 1.1 которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить, согласно Технического Задания на разработку документации, являющегося Приложением № 1 к Договору, следующие работы (далее - «Работы»):  

- Откорректировать объемно-планировочные решения Калужского завода телеграфной аппаратуры, расположенного по адресу: 

<

...>- ФИО2, д. 141 (далее - «Объект»).  

В соответствии с пунктом 1.2 договора после разработки документации, Исполнитель передает ее Заказчику на электронном носителе в формате «pdf» и «dwg», в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.  

Работы по Договору выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием на разработку документации, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Договору) (пункт 1.3 договора).  

Исполнитель передает Заказчику право на использование разработанной по настоящему Договору документации с целью строительства Объекта (пункт 1.4 договора).  

Согласно пункту 1.5 договора Технические, экономические и другие требования к результатам Работ по настоящему Договору должны соответствовать требованиям СниП, ГОСТ и других действующих нормативных/ненормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления документации.  

В соответствии с пунктом 2.1 договора Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость Работ по Договору оплачивается Заказчиком в следующем порядке:  

-Заказчик в порядке предварительной оплаты (авансом) перечисляет Исполнителю сумму в размере 50% от стоимости договора, а именно 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами Договора (подпункт 2.3.1 договора);  

-Заказчик не позднее 31.01.2023г. перечисляет Исполнителю сумму в размере 50% от стоимости договора, а именно 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (подпункта 2.3.2 договора).  

В соответствии с пунктом 2.4 договора оплата осуществляется Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.  

Обязательство Заказчика по оплате по настоящему Договору считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (пункт 2.5 договора).  

Пунктом 2.6 договора в стоимость работ не входит стоимость согласования документации с уполномоченными согласующими организациями и экспертными органами и организациями.  

Согласно пункту 3.1 договора срок начала выполнения Работ по Договору 01.11.2022.  

Срок окончания выполнения работ по Договору 31.03.2023 (пункт 3.2 договора).  

Пунктом 3.5. договора установлен порядок сдачи-приемки Работ по Договору: 

-В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения разработки Рабочей документации Исполнитель передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика 1 (один) экземпляр разработанной Рабочей документации. Одновременно с Рабочей документацией Исполнитель передает Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи - приемки работ (Рабочей документации). Указанные в настоящем пункте документы передаются Исполнителем Заказчику с сопроводительным письмом (подпункт 3.5.1 договора);  

-Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Рабочей документации в надлежащих составе и объеме, а также двух экземпляров подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) обязан принять Рабочую документацию, подписать Акт сдачи-приемки работ (Рабочей документации) и направить Исполнителю один его экземпляр, либо, в этот же срок, Заказчик обязан направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки данных работ. По истечении указанного срока, при отсутствии письменного мотивированного отказа, разработанная Рабочая документация считается принятой Заказчиком без замечаний, данные работы считаются выполненными в срок, с надлежащим качеством и подлежат оплате на основании одностороннего Акта сдачи-приемки работ (Рабочей документации) Исполнителя (подпункт 3.5.2 договора);  

-В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного мотивированного отказа Исполнителем, составляют акт с перечнем необходимых доработок. Соответствующие доработки должны быть произведены Исполнителем в согласованные сторонами сроки (подпункт 3.5.3 договора).  

В соответствии с пунктом 5.3 договора в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты платежей, установленных п.п. 2.3.1. - 2.3.3. Договора, Заказчик по письменному требованию Исполнителя, выплачивает последнему пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы соответствующего просроченного по оплате платежа по Договору за каждый день просрочки до даты исполнения просроченного обязательства по оплате, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору.  

02.11.2022 ООО «Объединение «Инжстрой» и ООО «ЭТП» (исполнитель) заключили договор № 2022-11-01 на выполнение работ по авторскому надзору,  

согласно пункту 1.1 которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги авторского надзора (далее - «Работы») в рамках проекта реконструкции здания «Строение 4 (Главный корпус завода и корпус покрытий)» для Калужского завода телеграфной аппаратуры, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - «Объект»).  

В соответствии с пунктом 1.2 договора авторский надзор осуществляется в следующие сроки с 10.11.2022 по 01.03.2023.  

Согласно пункту 1.3 договора авторский надзор осуществляется Лицами, которые являются разработчиками предоставленной рабочей документации. Лиц, осуществляющих авторский надзор, на каждый выезд, назначает Исполнитель из состава сотрудников, указанных в п. 2.1.  

Пунктом 2.1 договора установлено, что стоимость услуг одного выезда группы авторского надзора, в течении одного рабочего дня, по настоящему Договору составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. В группу авторского надзора входят:  

Технический директор - 1 чел.; Главный архитектор проекта - 1 чел.; Главный инженер проекта - 2 чел. 

Согласно пункту 2.2. договора Общая стоимость Работ по Договору оплачивается Заказчиком в следующем порядке:  

-Оплата работ производиться ежемесячно, сумма оплаты за каждый месяц формируется на основании фактических выездов группы авторского надзора на Объект (подпункт 2.2.1 договора);  

-Заказчик производит оплату услуг Исполнителю, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ за предыдущий месяц (подпункт 2.2.2 договора).  

В соответствии с пунктом 3.1 договора авторский надзор осуществляется в период с 10.11.2022 - 01.03.2023.  

Пунктом 3.2 договора установлено, что окончание срока действия Договора наступает по исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, либо при достижении обоюдного согласия о нецелесообразности его дальнейшего исполнения.  

В соответствии с пунктом 5.3 договора в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ (разработанной документации) по Договору, Заказчик по письменному требованию Исполнителя, выплачивает последнему пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы соответствующего просроченного по оплате платежа по Договору за каждый день просрочки до даты исполнения просроченного обязательства по оплате, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору. Претензия предъявляется в письменном виде и содержит расчет суммы пени. При не выставлении претензии данный пункт Договора считается не действующим, т.е. пеня не начисляется и не уплачивается.  

ООО «ЭТП» в полном объеме выполнило обязательства, принятые на себя по Договору № 2022-02-04, что подтверждается подписанным обеими сторонами актом от 27.09.2023 № 42. Общая стоимость выполненных и принятых составила 4 175 000 руб.  

В нарушение условий Договора № 2022-02-04 оплата выполненных работ произведена частично, в сумме 2 842 500 руб.  

Задолженность по Договору № 2022-02-04, составляет 1 322 500 руб. 

Также ООО «ЭТП» в полном объеме выполнены обязательства, по Договору № 2022-11-02, что подтверждается подписанным обеими сторонами Актом от 09.01.2023 № 1.  

Стоимость выполненных и принятых работ составила 250 000 руб. 

В нарушение условий Договора № 2022-11-02 оплата выполненных работ до настоящего времени не произведена.  

Задолженность по оплате работ, выполненных по Договору № 2022-11-02, составляет 250 000 руб.  

ООО «ЭТП» в полном объеме выполнило обязательства, по Договору № 2022-11-01, что подтверждается подписанными сторонами Актом от 01.12.2022 № 31 и от 30.12.2022 № 32. Общая стоимость выполненных и принятых работ составила 84 000 руб.  

В нарушение условий Договора № 2022-11-01 оплата выполненных работ до настоящего времени не произведена.  

Задолженность по оплате работ, выполненных по Договору № 2022-11-01, составляет 84 000 руб.  

Общая сумма задолженности по всем договорам составляет 1 666 500 руб. 

Претензией от 23.04.2024 № 67 истец предложил ответчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии в полном объеме погасить имеющуюся задолженность, перечислив денежные средства в размере 1 666 500 руб. по реквизитам ООО «ЭТП», указанным в письме или по реквизитам, указанным в любом из перечисленных выше Договоров.  

Однако, ответчик требования истца не исполнил, денежные средства своевременно не перечислил.  

Данные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его  

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.  

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 702 и статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации начальный и конечный срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Как установлено в пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.  

В порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

В статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Истцом в качестве подтверждения выполнения работ по договору представлены акты от 27.09.2023 № 42, 09.01.2023 № 1, от 01.12.2022 № 31, от 30.12.2022 № 32.  

Отказ от приемки выполненных работ в адрес истца не поступал, обязанности по своевременной оплате в полном объеме выполненных работ ответчиком не выполнены.  

За ответчиком образовалась задолженность в размере 1 666 500 руб.  

Каких-либо доказательств, подтверждающих оплату ответчиком выполненных работ в полном объеме или прекращения обязательств иным способом, в материалы дела не представлено.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

При указанных обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу, что требование о взыскании задолженности обоснованно и подлежит удовлетворению в сумме 1 666 500 руб., в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию указанная сумма долга.  

Истцом также заявлено требование о взыскании с процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 102 829 руб. 72 коп. за период с 23.04.2024 по 06.09.2024.  

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).  

Поскольку в материалы дела ответчиком не представлены доказательства своевременного исполнения обязательств, арбитражный суд пришел к выводу, что требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами предъявлено истцом правомерно.  

Представленный истцом расчет проверен и признан судом верным. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами 102 829 руб. 72 коп. за период с 23.04.2024 по 06.09.2024.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика и подлежат взысканию пользу истца.  

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНЖСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 1 666 500 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.04.2024 по  

06.09.2024 в сумме 102 829 руб. 72 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 665 руб. 00 коп.  

Выдача исполнительного листа производится в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.В. Бондарева-Битяй