45/2021-3523(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-13374/2020

город Вологда

18 января 2021 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессу- ального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской  области  

р е ш и л :

внести изменения в условия договора № 21х/20 от 16.03.2020 Ремонтно- реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального  значения «Комплекс Дворянского собрания, XIX в.», расположенного по ад- ресу: 

<

...>, изложив пункт 3.1 договора в следу- ющей редакции: «Сроки выполнения работ: Полный перечень работ должен  быть выполнен в срок не позднее 15 апреля 2021 года».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи  (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Н.А. Колтакова   

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:37:31

 Кому выдана Колтакова Наталия Александровна