ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                             

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-2755/23-34-16

г. Москва

29 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2023 г.

Решение изготовлено в полном объеме 29 мая 2023 г.

 

Арбитражный суд в составе судьи Кравчик  О. А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мкоян Н.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

119526, Г МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 101, К. 3, ЭТ/КАБ 20/2017, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 

<

***>

к ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

<

...> И ОТДЫХА "БАБУШКИНСКИЙ"

127642, 

<

...> ВЛД 8СТР1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2002, ИНН: 

<

***>

о расторжении договоров,

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности от 16.12.2022;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 29.03.2023; 

 

УСТАНОВИЛ:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 

<

...> И ОТДЫХА "БАБУШКИНСКИЙ" о расторжении договоров о подключении к системам теплоснабжения № 10-11/20-227 от 04.06.2020, № 10-11/20-385 от 02.07.2020.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик возражал относительно заявленных требований по доводам отзыва на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, предмет и основания заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности требований, которые подлежат удовлетворению, установив следующее.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключены договоры о подключении к системам теплоснабжения № 10-11/20-227 от 04.06.2020, № 10-11/20-385 от 02.07.2020.

В соответствии с вышеуказанными договорами истец обязался осуществить подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: 

<

...> и стр. 4.

В соответствии с пунктом 2.3.6 договоров ответчик обязан предоставить истцу утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения условий подключения; предоставить истцу исполнительную документацию в объеме, необходимом для подтверждения выполнения условий подключения и выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ Мосгоргеотрест.

Согласно пункту 3.1 договоров в редакции дополнительных соглашений № 1 от 18.10.2021 к договору № 10-11/20-385 от 02.07.2020, № 2 от 18.10.2021 к договору № 10-11/20-227 от 04.06.2020, срок подключения по договору - 01.10.2022.

Поскольку по вине заказчика подключение к системе теплоснабжения объектов не представляется возможным, данные обстоятельства, по мнению истца, являются основанием для расторжения договоров в связи с существенным нарушением обязательств его стороной.

Пунктами 26, 27, 37 Правил подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 было предусмотрено, что договор о подключении содержит следующие существенные условия, в том числе: перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению; срок подключения; размер платы за подключение; порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение; условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения; обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя; ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении; право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре; мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, содержат: разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение; выполнение условий подключения; при исполнении договора о подключении заявитель обязан, в том числе: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению; представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий; обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах; внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении. Обязанности заявителя также установлены Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, в пункте 44 которых предусмотрено и право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении.

В силу пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Во исполнение положений пункта 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации истцом в адрес ответчика направлены соглашения о расторжении договоров, которые не подписаны ответчиком (претензии от 18.10.2022 № ЦТП/ТП/07-21009/22, № ЦТП/ТП/07-21010/22).

Ответчик не выполнил предусмотренные разделом 6.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 работы по гидравлическому испытанию на прочность и плотность тепловой сети и гидропневматической проверки тепловой сети. Также ответчиком не представлены доказательства строительства тепловой сети, ее принятие службами технического надзора и выполнение ответчиком мероприятий в рамках технологического присоединения объекта. Ответчик не получал в МТУ Ростехнадзора ни временное разрешение для проведения пусконаладочных работ, ни постоянный допуск энергоустановки в эксплуатацию. Ответчик не выполнил необходимые мероприятия по созданию, испытанию, допуску в эксплуатацию необходимого теплоэнергетического оборудования. Ответчиком также не представлена проектная документация.

Довод ответчика со ссылкой на дополнительное соглашение от 01.11.2022 относительно того, что заказчик заинтересован в продолжении договорных отношений, судом отклоняются, поскольку дополнительное соглашение заключено к контракту теплоснабжения № 03.207045кТЭ от 04.02.2021, учитывая, что ответчиком не представлено доказательств реальной возможности по завершению работ, необходимых для технологического присоединения объектов к инженерным сетям теплоснабжения.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований о расторжении договоров.

Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика в порядке статей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Расторгнуть договоры о подключении к системам теплоснабжения № 10-11/20-227 от 04.06.2020, № 10-11/20-385 от 02.07.2020 между ПАО "МОЭК" и ГАУК Г. МОСКВЫ "ПКИО "БАБУШКИНСКИЙ".

Взыскать с ГАУК Г. МОСКВЫ "ПКИО "БАБУШКИНСКИЙ" в пользу ПАО "МОЭК" 12 000 (двенадцать тысяч) руб. расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                      Кравчик О.А.