РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   13 мая 2024 года    по делу А33-24470/2021 Красноярск  

13 мая 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КрасСтройКомплекс» (ИНН  

<

***>) по предварительно разработанной проектно-сметной документации в течение  

12 месяцев устранить выявленные в результате экспертизы дефекты и недостатки, а именно: - установить физкультурную площадку А, площадью 226м2; - установить площадку для прыжков в длину II площадью 16,м2; 

- разделить площадки: V -для подвижных игра (1-е кл.), VI- для подвижных игр 2-4 кл),  

VII- для подвижных игр (5-9 кл/); 

-покрытие групповых площадок для дошкольных групп из мелкого щебня заменить на  

газон; 

-установить ограждение групповой площадки для детей в возрасте 5-7 лет высотой 2,0  

метра; 

- устранить трещину сквозного характера, выявленную в районе дверного проема в  

стене помещения 1.56 (универсальный зал для занятий музыкой и физкультурой); 

- устранить имеющиеся дефекты (многочисленные вмятины и деформации) в обшивке  

цоколя металлическим сайдингом; 

- заменить в спортивном зале витражи на витражи, предусматривающие открывание  

всех створок; 

- установить в спортивном зале вентиляцию воздуха в соответствии с действующими  

нормами и правилами; 

- устранить деформацию ограждения кровли, установленной слева от центрального  

входа, по оси 3; 

- устранить в зале для занятий физкультурой вертикальную трещину в наружной стене  

под оконным проемом; 

- привести в соответствие высоту лестничных маршей ЛВ1 и ЛВ2, устранив  

переменные значения ширины и высоты ступеней; - установить пожарную лестницу на чердак из помещения 2.1.; 

- обеспечить заполнение деформационного шва, расположенного в осях 7/И, со  

стороны помещения 1.39 (горячий цех), со стороны улицы, в зоне ревизионного люка; 

- устранить в помещении 1.39 (горячий цех) помещениях 1.19-1.22 (уборных и душевых  

при спортивном зале) трещины в керамических плитках отделки стен; швов 

- устранить дефект фрагмента стены в осях 7/И помещения 1.39 (горячий цех), который  

имеет значительную нагрузку в виде опирания монолитной ж\б балки Бм-1; опирания на  

балку наружной стены второго этажа; опирания на стену пустотных плит покрытия;  

конструкции кровли; представив схемы армирования стены в осях 7\И в районе  

деформационного шва. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КрасСтройКомплекс» (ИНН  

<

***>) в пользу администрации Емельяновского района (ИНН 

<

***>)  364 800 руб. судебных расходов по оплате экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КрасСтройКомплекс» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Д.С. Куликова