34/2023-77791(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 13 марта 2023 года 

по делу А33-24008/2022 Красноярск

«13» марта 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в течение пяти месяцев с момента вступления настоящего  решения в законную силу осуществить технологическое присоединение  энергопринимающих устройств ООО «СТС-Красноярск» (ОГРН 

<

***>, ИНН:  

<

***>), расположенных на объекте ООО «СТС-Красноярск»: «складское  здание/помещение», расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,  Емельяновский район, Сельское поселение Солонцовский сельсовет, 

<

...> земельный участок № 29, кадастровый номер земельного участка  24:11:0290109:3060, а именно выполнить следующие мероприятия:  

Организационные мероприятия: - проверка выполнения технических условий со стороны заявителя; 

фактические действия по присоединению и обеспечению работы  энергопринимающих устройств заявителя;  

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции  существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»  для электроснабжения объектов заявителя:  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- от ВЛ 10 кВ ф. 

<

***> до границ, установленных правоустанавливающими  документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ; способ прокладки, марку и  сечение провода определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя  на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 

<

***>; тип и место установки разъединителя определить  проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442);  

 Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СТС-Красноярск» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.  Красноярск) судебную неустойку в размере 6 000 рублей за каждый день просрочки  исполнения решения суда по настоящему делу по истечении пяти месяцев с момента  

вступления решения в законную силу и до дня фактического его исполнения, а также 6 000  руб. судебных расходов по оплате госпошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Т.В. Шевцова