Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-114926/2024

18 декабря 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев 19.11.2025 в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2010, ИНН: 

<

***>)

по встречному иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2010, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, ИНН: 

<

***>)

при участии

от истца: не явился (извещен под роспись представителя в протоколе судебного заседания от 01.10.2025)

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 09.01.2025)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» (далее – ООО «ЛенТехСтрой», ООО «ЛТС», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» (далее – ООО «ЧЗСЭ Электросила», Завод, ответчик) со следующими требованиями:

1. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» сумму штрафной неустойки в размере 2063000 рублей 00 копеек неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023.

2. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» сумму штрафной неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору № 289/ЛТС- 23 от 07.11.2023 размере 726930 рублей 00 копеек за период с 22.11.2023 по 05.08.2024.

3. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» неустойку в размере 162525 рублей 00 копеек за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №289/ЛТС-23 от 07.11.2023 за период с 01.06.2024 по 05.08.2024.

4. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» за нарушение обязанности, предусмотренной п. 6.17 Договора №289/ЛТС-23 от 07.11.2023 в размере 162525 рублей 00 копеек за период с 01.06.2024 по 05.08.2024

5. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» сумму штрафной неустойки в размере 295500 рублей 00 копеек за нарушение конечного срока выполнения работ по договору № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023

6. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» сумму штрафной неустойки в размере 2063000 рублей 00 копеек неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023

7. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» сумму штрафной неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по договору № 288/ЛТС- 23 от 07.11.2023 размере 726930 рублей 00 копеек за период с 22.11.2023 по 05.08.2024

8. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» неустойку в размере 162525 рублей 00 копеек за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №288/ЛТС-23 от 07.11.2023 за период с 01.06.2024 по 05.08.2024

9. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» за нарушение обязанности, предусмотренной п. 6.17 Договора №288/ЛТС-23 от 07.11.2023 в размере 162525 рублей 00 копеек за период с 01.06.2024 по 05.08.2024

10. Взыскать с ООО «ЧЗСЭ Электросила» в пользу ООО «ЛенТехСтрой» сумму штрафной неустойки в размере 295500 рублей 00 копеек за нарушение конечного срока выполнения работ по договору № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023.

Ответчик требования не признавал в полном объеме, предъявил встречный иск о взыскании 932000 руб. задолженности и 11184 руб. неустойки за период с 28.03.2025 по 08.04.2025 по договору № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023 с дальнейшим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства по погашению долга, а также 932000 руб. задолженности и 11184 руб. неустойки за период с 28.03.2025 по 08.04.2025 по договору № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023 с дальнейшим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства по погашению долга.

От ответчика поступали дополнительные пояснения по делу.

В соответствии с окончательной позицией по делу ООО «ЧЗСЭ Электросила» представило расчет неустойки по состоянию на 17.11.2025.

С учетом ограничения ответственности, установленной договором, в рамках встречного иска неустойка за нарушение оплаты составила 93200 руб. по каждому из договоров.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Между ООО «ЛТС» (генподрядчик) и ООО «ЧЗСЭ Электросила» (субподрядчик) заключен договор № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023, согласно которомусубподрядчик в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором, на строительном объекте: «Надземная автостоянка. Корпус № 13.2» расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», кадастровый номер 47:07:0713003:907, 2 этап строительства, обязуется выполнить комплекс строительных работ по поставке, монтажу, пуско-наладке лифтов, строительно-отделочным работам в лифтовых шахтах, предъявлению лифтов инженерному центру, оформлению Деклараций соответствия лифтов ТР ТС по проекту шифр: 5/03/22-18/06/07/03-02-13.2-АР1; 5/03/22-18/06/07/03-02-АР1, разработанному ООО «ЦДС Арх» и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Между ООО «ЛТС» (генподрядчик) и ООО «ЧЗСЭ Электросила (субподрядчик) заключен договор № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023, согласно которому Субподрядчик в сроки и на условиях, определенных настоящим договором, на строительномобъекте: «Надземная автостоянка. Корпус № 13.1» расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», кадастровый номер 47:07:0713003:907, 2 этап строительства, обязуется выполнить комплекс строительных работ по поставке, монтажу, пуско-наладке лифтов, строительно-отделочным работам в лифтовых шахтах, предъявлению лифтов инженерному центру, оформлению Деклараций соответствия лифтов ТР ТС по проекту шифр: 5/03/22-18/06/07/03-02-13.2-АР1; 5/03/22-18/06/07/03-02-АР1, разработанному ООО «ЦДС Арх» и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Поставка лифтового оборудования в количестве 2 шт. по указанным договорам подтверждается: товарно-транспортной накладной № 234 от 17.04.2024 (товар доставлен транспортной компанией ООО «Исток Авто» по маршруту Чебоксары Чувашия – Бугры, Ленинградская область (согласно пункту 1.1 договора строительный объект расположен в поселке Бугры) и товарно-транспортной накладной № 234 от 17.04.2024, актом № 266 оказания услуг перевозчиком по маршруту нахождения объекта (приобщены к материалам дела со встречным иском), актами о выявленных несоответствиях оборудования в результате затопа от 06.02.2025, подписанными ответчиком, подрядной организацией ответчика, а также обслуживающей компанией ООО «УК «Горизонты-сервис». Акты приобщены к материалам дела с дополнениями к отзыву.

Согласно абзацу 1 пункта 9.2 договора № 288/ЛТС-23 за нарушение начального и промежуточных сроков выполнения Работ/этапа работ, предусмотренных договором, субподрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ/этапа работ за каждый день просрочки.

Согласно абзацу 4 пункта 9.2 договора №288/ЛТС-23 за нарушение конечного срока выполнения работ субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 10% от цены договора.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 19.01.2024 к договору № 288/ЛТС-23: начальный срок выполнения работ: 08 ноября 2023 года, конечный срок выполнения Работ: 31 мая 2024 года.

Согласно пункту 1.1 договора в комплекс строительных работ входит: поставка, монтаж, пуско-наладка лифтов, строительно-отделочные работы в лифтовых шахтах, предъявление лифтов инженерному центру, оформление Деклараций соответствия лифтов ТР ТС.

Согласно товарно-транспортной накладной № 234 от 17.04.2024 лифтовое оборудование стоимостью 2 063 000 руб. поставлено 17.04.2024, в связи с чем расчет неустойки с 01.06.2024 должен проводиться от стоимости работ, а именно от суммы 932 000 руб.

Завершающий этап работ - декларирование лифтового оборудования выполнено 21.05.2024, что подтверждается декларацией о соответствии лифтового оборудования от 21.05.2024.

Таким образом, работы по договору № 288/ЛТС-23 выполнены в сроки, предусмотренные пунктом 2 дополнительного соглашения № 1.

При таких обстоятельствах, предусмотренные абзацами 1, 4 пункта 9.2 договора № 288/ЛТС-23 неустойки за нарушение начального, промежуточного, конечного сроков выполнения работ не могут быть начислены ответчику.

Согласно пункту 9.2 договора № 289/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023 за нарушение начального и промежуточных сроков выполнения работ/этапа работ, предусмотренных договором, субподрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ/этапа работ за каждый день просрочки.

Согласно абзацу 4 пункта 9.2 договора №289/ЛТС-23 за нарушение конечного срока выполнения работ субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 10% от цены договора.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 19.01.2024 к договору №288/ЛТС-23: начальный срок выполнения Работ - 08 ноября 2023 года, конечный срок выполнения работ - 31 мая 2024 года.

Согласно пункту 1.1 договора в комплекс строительных работ входит: поставка, монтаж, пуско-наладка лифтов, строительно-отделочные работы в лифтовых шахтах, предъявление лифтов инженерному центру, оформление Деклараций соответствия лифтов ТР ТС.

Согласно товарно-транспортной накладной № 234 от 17.04.2024 лифтовое оборудование стоимостью 2063000 руб. поставлено 17.04.2024, в связи с чем расчет неустойки с 01.06.2024 должен проводиться от стоимости работ, а именно от суммы 932 000 руб.

Завершающий этап работ - декларирование лифтового оборудования выполнено 03.07.2024, что подтверждается декларацией о соответствии лифтового оборудования от 03.07.2024.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Ответчик ссылался на наличие неравной ответственности сторон договора по начислению неустойки, так как пунктом 9.3 договора № 289/ЛТС-23 предусмотрена ограниченная неустойка в части начисления пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ - до 10% от стоимости просроченного платежа, что, по мнению ответчика, создает неравную ответственность сторон договора. С учетом изложенного ответчик просил снизить неустойку равнозначно пункту 9.3 договора № 289/ЛТС-23 - до 10% от стоимости невыполненных в срок работ исходя из стоимости невыполненных в срок работ (932000 руб.) за период с 01.06.2024 по 02.07.2024 по ставке 0,1%.

Оценив материалы дела, условия пункта 9.2 договора, на основании которого истец просил взыскать неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ, суд посчитал взыскать с ответчика в пользу истца 93200 руб. неустойки за нарушение конечного срока на основании пункта 9.2 договора № 289/ЛТС-23 (932000 руб. х 10%). Основания для снижения неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усмотрел.

Остальные требования ООО «ЛенТехСтрой» суд признал необоснованными.

По требованию ООО «ЛенТехСтрой» к ООО «ЧЗСЭ Электросила» о взыскании неустойки за нарушение обязанности, предусмотренной п. 6.17 договора № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023 в размере 162525 руб., договора № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023 в размере 162525 руб. ответчик суду доказал, что исполнительная документация передавалась ООО «Лентехстрой» вместе с лифтовым оборудованием.

Согласно п. 4.1 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» монтаж лифта в здании (сооружении) осуществляется специализированной организацией (далее - организация), обладающей квалифицированным персоналом по монтажу лифтов.

Для выполнения монтажных работ на объекте ООО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА» 26.03.2024 заключило договора подряда с ООО «КАРМАЛ» (копия договора приобщена к материалам дела).

Согласно п. 4.2 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» до ввода лифта в эксплуатацию организация, выполнившая работы по монтажу лифта, осуществляет оценку соответствия лифта требованиям в форме декларирования.

Согласно п. 4.8 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» на основании положительных собственных доказательственных материалов и положительных результатах полного технического освидетельствования организация, выполнившая монтаж лифта, оформляет декларацию соответствия.

Организация, выполнившая работы по монтажу лифтов – ООО «КАРМАЛ» осуществила оценку соответствия лифта требованиям в форме декларирования, что подтверждается декларацией о соответствии лифтового оборудования от 21.05.2024 (по договору № 288/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023), декларацией о соответствии лифтового оборудования от 24.06.2024 (по договору № 289/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023). Декларации приобщены к материалам дела.

Согласно п. 4.3 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» декларирование соответствия лифта осуществляется на основании собственных доказательств организацией, выполнившей монтаж лифта, и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). В качестве доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), используют акт технического освидетельствования лифта.

Согласно п. 4.5 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит полное техническое освидетельствование смонтированного лифта.

Полное техническое освидетельствование лифта проводят специалисты (эксперты) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53782 или ГОСТ 34582.

При полном техническом освидетельствовании лифта осуществляют:

- проверку комплектности технической документации, поставляемой с лифтом;

- идентификацию нового лифта сертификату соответствия;

- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- визуальный контроль, испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

- технический контроль установки оборудования нового лифта в соответствии с документацией по монтажу и проектной документацией по установке лифта в здание (сооружение);

- технический контроль установки оборудования модернизированного лифта в соответствии с проектной документацией на модернизацию (в случае модернизации лифта);

- проверку выполнения рекомендаций по модернизации лифта, указанных в заключении по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (в случае модернизации лифта);

- технический контроль лифта в соответствии с требованиями безопасности, установленными положениями взаимосвязанных с стандартов;

- испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески или опоры кабины, элементов их крепления.

Согласно п. 4.6 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» при положительных результатах полного технического освидетельствования специалист (эксперт) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) делает запись в паспорте лифта о результатах проверок, испытаний, измерений и оформляет акт технического освидетельствования лифта.

Аккредитованной испытательной лабораторией выданы акты технического освидетельствования лифта от 20.05.2024 (по договору № 288/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023), 24.06.2024 (по договору № 289/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023). Акты технического освидетельствования приобщены к материалам дела.

Согласно п. 4.4 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» в качестве собственных доказательств используется протокол проверки функционирования лифта, проведенной монтажной организацией после окончания монтажа (модернизации) лифта, а также паспорт, монтажный чертеж смонтированного (модернизированного) лифта, руководство (инструкцию) по эксплуатации лифта, проектная документация на установку (модернизацию) лифта.

20.05.2024 ООО «ИЦ «Молот Т» выдан протокол №10-1/П-05/24 проверок, испытаний и измерений при проведении технического освидетельствования лифта с электрическим приводом (по договору №288/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023), 24.06.2024 ООО «ИЦ «Молот Т» выдан протокол №18-1/П-06/24 проверок, испытаний и измерений при проведении технического освидетельствования лифта с электрическим приводом (по договору № 289/ЛТС-23 строительного субподряда от 07.11.2023).

Согласно п. 4.14 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» решение о вводе лифта в эксплуатацию принимается владельцем лифта.

Согласно п. 3.2 ГОСТ Р 55969-2023 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» владелец лифта: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие лифтом на праве собственности либо ином законном основании и осуществляющие использование и содержание лифта, то есть в данном случае ООО «ЛТС».

Из вышеизложенного следует, что ООО «ЧЗСЭ Электросила» приобщены к материалам дела доказательства, подтверждающие выполнение монтажных работ по договору № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023, по договору № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023.

Материалами дела подтверждается, что во исполнение условий договора № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023 ООО «ЧЗСЭ Электросила» поставило Лифт стоимостью 2 063 000 руб., что подтверждается товарно-транспортной накладной № 234 от 17.04.2024. Товар доставлен транспортной компанией ООО «Исток Авто» по маршруту Чебоксары Чувашия – Бугры, Ленинградская область (согласно п. 1.1 договора строительный объект расположен в поселке Бугры); выполнило монтаж Лифта, что подтверждается актом технического освидетельствования лифта от 20.05.2024, в котором указано, что установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение), лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации; выполнило пусконаладочные работы Лифта, что подтверждается протоколом № 10-1/П-05/24 проверок, испытаний и измерений при проведении технического освидетельствования лифта с электрическим приводом от 20.05.2024; выполнило техническое освидетельствование Лифта, что подтверждается актом технического освидетельствования лифта от 20.05.2024; выполнило декларирование лифтового оборудования, что подтверждается декларацией о соответствии лифтового оборудования от 21.05.2024.

Таким образом, обязательства, предусмотренные договором № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023 ООО «ЧЗСЭ Электросила» выполнило в полном объеме.

05.02.2025 в адрес истца направлены акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки стоимости выполненных работ формы № КС-3.

Истец частично оплатил цену работ по договору в размере 2063000 руб.

Задолженность ООО «ЛТС» перед ООО «ЧЗСЭ Электросила» составляет 932000 руб.

В соответствии с пунктами 3.5, 3.6 договора генподрядчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания форм № КС-2 и № КС-3 за вычетом удержания в размере 5%.

Формы № КС-2 и № КС-3 получены ООО «ЛТС» 13.02.2025. Следовательно, срок оплаты выполненных работ истек 27.03.2025.

В соответствии с пунктом 9.3 договора в случае невыполнения обязанностей по оплате выполненных надлежащим образом и принятых работ генподрядчик уплачивает субподрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, не более 10% от стоимости просроченного платежа.

В связи с нарушением сроков оплаты, ООО «ЛТС» подлежит начислению неустойка, размер которой по состоянию на 17.11.2025 составляет 219020 руб., а с учетом ограничения в 10% составляет 93200 руб.

07.11.2023 между ООО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА» (субподрядчик) и ООО «ЛТС» (генподрядчик) заключен договор № 289/ЛТС-23 строительного субподряда.

В соответствии с пунктом 1.1 договора Субподрядчик в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором, на строительном объекте: «Надземная автостоянка. Корпус № 13.2» расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив «Центральное», кадастровый номер 47:07:0713003:907, 2 этап строительства, обязуется выполнить комплекс строительных работ по поставке, монтажу, пуско-наладке лифтов, строительно-отделочным работам в лифтовых шахтах, предъявлению лифтов инженерному центру, оформлению Деклараций соответствия лифтов ТР ТС по проекту шифр: 5/03/22-18/06/07/03-02-13.2-АР1; 5/03/22-18/06/07/03-02-АР1 разработанному ООО «ЦДС Арх» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена работ по договору составляет 2 995 000 руб., в т.ч. стоимость оборудования 2 063 000 руб., стоимость работ 932 000 руб.

Во исполнение условий договора № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023 ООО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА» поставило Лифт стоимостью 2 063 000 руб., что подтверждается товарно-транспортной накладной № 234 от 17.04.2024. Товар доставлен транспортной компанией ООО «Исток Авто» по маршруту Чебоксары Чувашия – Бугры, Ленинградская область (согласно п. 1.1 договора строительный объект расположен в поселке Бугры); выполнило, монтаж Лифта, что подтверждается актом технического освидетельствования лифта от 24.06.2024, в котором указано, что установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение), лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации; выполнило пусконаладочные работы Лифта, что подтверждается протоколом № 18-1/П-06/24 проверок, испытаний и измерений при проведении технического освидетельствования лифта с электрическим приводом от 24.06.2024; выполнило техническое освидетельствование Лифта, что подтверждается актом технического освидетельствования лифта от 24.06.2024; выполнило декларирование лифтового оборудования, что подтверждается декларацией о соответствии лифтового оборудования от 03.07.2024.

Таким образом, обязательства, предусмотренные договором № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023 ООО «ЧЗСЭ Электросила» выполнило в полном объеме.

05.02.2025 в адрес ООО «ЛТС» направлены акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки стоимости выполненных работ формы № КС-3.

ООО «ЛТС» частично оплатило цену работ по договору в размере 2063000 руб.

Задолженность ООО «ЛТС» перед ООО «ЧЗСЭ Электросила» составляет 932000 руб.

В соответствии с пунктами 3.5, 3.6 договора генподрядчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания форм №КС-2 и №КС-3 за вычетом удержания в размере 5%.

Формы № КС-2 и № КС-3 получены ООО «ЛТС» 13.02.2025. Следовательно, срок оплаты выполненных работ истек 27.03.2025.

В соответствии с пунктом 9.3 договора в случае невыполнения обязанностей по оплате выполненных надлежащим образом и принятых Работ Генподрядчик уплачивает Субподрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, не более 10% от стоимости просроченного платежа.

В связи с нарушением сроков оплаты, подлежит начислению неустойка, размер которой по состоянию на 17.11.2025 составляет 219020 руб., а с учетом ограничения в 10% составляет 93200 руб.

Требования истца по первоначальному иску суд удовлетворяет частично, встречный иск подлежит удовлетворению в полном размере.

По первоначальному иску в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

По встречному иску по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ООО «ЛТС» и взыскиваются в пользу истца по встречному иску.

Также суд учитывает, что в соответствии со статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

С учетом уточненных расчетов цена встречного иска составила 2050400 руб., по которому размер государственной пошлины составляет 86512 руб.

При таком положении по встречному иску с ООО «ЛТС» надлежало взыскать в федеральный бюджет 4921 руб. Однако при подаче первоначального иска ООО «ЛТС» уплатило государственную пошлину в большем размере, переплата составила 5371 руб.

Поэтому ООО «ЛТС» надлежит возвратить из федерального бюджета 450 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2010, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, ИНН: 

<

***>) 93200 руб. неустойки и 3138 руб. судебных расходов по государственной пошлине по иску.

В остальной части иска общества с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2010, ИНН: 

<

***>) 932000 руб. задолженности и 93200 руб. неустойки по договору № 288/ЛТС-23 от 07.11.2023, а также 932000 руб. задолженности и 93200 руб. неустойки по договору № 289/ЛТС-23 от 07.11.2023, а также 81591 руб. судебных расходов по государственной пошлине по встречному иску.

Путем зачета первоначальных и встречных требований после вступления судебного акта в законную силу выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2010, ИНН: 

<

***>) 2035653 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЛенТехСтрой» из федерального бюджета 450 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 30.10.2024 № 3557.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Рагузина П.Н.