АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

11 августа 2025 года Дело № А33-11610/2025 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28 июля 2025 года. В полном объёме решение изготовлено 11 августа 2025 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Кошеваровой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки, в присутствии: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 01.07.2025, личность удостоверена паспортом, наличие высшего юридического образования подтверждено дипломом; ФИО2, представитель по доверенности от 23.05.2025, личность удостоверена паспортом, наличие высшего юридического образования подтверждено дипломом,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Огнёвой А.С.,  

установил:

акционерное общество «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» (далее – ответчик) о взыскании  

неустойки (пени) за нарушение срока поставки в размере 282 002,93 руб.  

Определением от 29.04.2025 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.   

Определением от 25.06.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.  

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем размещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.  

Истец заявленные требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил.  

В соответствии с частью 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем Код доступа к материалам дела -  

направления копии судебного акта в порядке, установленном АПК РФ, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.  

В силу части 4 статьи 121 Кодекса судебные извещения, адресованные юридическому лицу, направляются арбитражным судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.  

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в качестве юридического адреса ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) указан следующий адрес: 428028, Россия, 

<

...>.  

Иные адреса ответчика истцу и суду не известны. 

Определение суда от 25.06.2025 направлено по адресу истца: 428028, Россия, 

<

...>, почтовому отправлению присвоен идентификационный номер 80407110902655, которое, согласно отчету об отслеживании отправления АО «Почта России», получено ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» 03.07.2025.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  

Согласно части 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.  

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие ответчика.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.  

12.10.2022 между истцом (далее - покупатель) и ответчиком (далее - поставщик) заключен договор поставки материально-технических ресурсов № 3176722/1706Д (далее – договор), по условиям пункта 1.1 которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям настоящего договора, приложений, отгрузочных разнарядок, а покупатель принять и оплатить товар.  

Покупатель нарочным или заказным письмом направляет поставщику отгрузочную разнарядку. Покупатель вправе направить отгрузочную разнарядку по электронной почте на адрес, указанный в разделе 20 договора, при этом оригинал вышеуказанной отгрузочной разнарядки должен быть направлен нарочным или заказным письмом не позднее 5 дней с даты направления отгрузочной разнарядки по электронной почте. Отгрузочная разнарядка, направленная по электронной почте, имеет полную юридическую силу как указано в пункте 18.4. договора и считается полученной поставщиком в дату, указанную в подтверждении о доставке, позволяющем достоверно установить, что документ был доставлен адресату (пункт 3.4.1 договора).  

Согласно пункту 4.1 договора график и сроки поставки, отгрузочные реквизиты, а также иные условия поставки определяются покупателем в отгрузочных разнарядках, направляемых в адрес поставщика.  

Пунктом 4.1.1 договора установлено, что срок поставки товара является существенным условием настоящего договора. Поставщик, помимо уплаты пени за просрочку поставки, предусмотренной договором, обязуется возместить все убытки покупателя, вызванные просрочкой поставки (включая, но не ограничиваясь: разницу между стоимостью транспортировки автомобильным/речным транспортом и стоимостью транспортировки воздушным транспортом и/или иными видами транспорта по более высокой цене).  

Согласно пункту 4.2 договора при поставке на условиях «базис поставки - пункт назначения», датой поставки товара является дата, проставленная в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии товара в пункт назначения.  

Обязанность поставщика по поставке товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии товара в пункт назначения.  

Право собственности и риск случайной гибели переходит к покупателю с даты поставки на указанных условиях. Поставщик несет все расходы по транспортировке товара до пункта назначения. В цену товара включены расходы по перевозке товара; по погрузке товара на транспортное средство перевозчика; по перегрузке товара в пути следования до пункта назначения; по креплению товара на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет поставщик до момента поставки товара и которые не подлежат возмещению Покупателем. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке товара с прибывшего транспортного средства.  

В соответствии с пунктом 6.1 договора оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.  

Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 60 календарных, но не ранее 45 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1. и 7.2 настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры и товарной накладной не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десять) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату (пункт 6.2 договора).  

Пунктом 8.1.1 договора установлено, что в случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных в договоре и отгрузочных разнарядках к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного товара сопроводительным документам, поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости непоставленного в срок товара. При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения поставщиком обязательств по поставке.  

Согласно пункту 8.1.2, в случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки, установленных пунктом 5.3 настоящего договора поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости указанного товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанного товара. При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки Товара до даты исполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков и/или доукомплектованию и/или сборке Товара.  

В пункте 11.1 договора закреплено, что все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в:  

- в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя (если Поставщик – резидент);  

- в Международном Коммерческом Арбитражном суде при Торгово-промышленной Палате Российской Федерации (МКАС) в соответствии с его Регламентом в составе трех арбитров или в Арбитражном суде города Москвы (если Поставщик - нерезидент). Ответчик соглашается, что в таком случае право выбора подсудности принадлежит истцу. Решение МКАС будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. Языком арбитражного разбирательства будет являться русский язык.  

Досудебный порядок разрешения споров является обязательным: для этого сторона, у которой возникли требования к другой стороне, обязана направить ей письменную претензию с приложением всех подтверждающих документов, изложенных в претензии требований и материалов.  

Договора вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 12.10.2023 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств (а в части начисления предусмотренных Договором неустоек до даты фактической поставки товара) (пункт 13.1 договора).  

На основании пункта 4.1, 3.4.1 договора 10.10.2023 истцом была направлена в адрес ответчика по электронной почте отгрузочная разнарядка № 1016383547, в соответствии с которой АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» уведомило ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» о товаре, подлежащего поставке, а именно: устройство комплектное низковольтное НКУ-В-УХЛ4-0,40-250-1С0 в количестве 1 шт. на сумму 2 157 120 руб., в том числе НДС 20%. В соответствии с данной отгрузочной разнарядкой срок поставки составляет в течение 100 календарных дней с даты направления отгрузочной разнарядки.  

Товар должен быть поставлен в срок до 18.01.2024. 

Во исполнение условий договора поставки от 12.10.2022 № 3176722/1706Д, ответчиком поставлен товар на сумму 2 157 120 руб. по отгрузочной разнарядке № 1016383547.  

26.02.2024 истец получил товар по отгрузочной разнарядке № 1016383547, что подтверждается подписанной обеими сторонами счетом-фактурой от 05.02.2024 № 61.  

При поставке товара поставщиком допущено нарушение срока поставки на 39 календарных дней (период просрочки с 19.01.2024 по 26.02.2024), что подтверждается отметками о передаче товара грузополучателю в счете-фактуре от 05.02.2024 № 61.  

В связи с нарушением срока поставки товар, истец обратился к ответчику с претензией от 16.10.2024 № 6-6/12-4744 об оплате неустойки, размер которой составил 84 127,68 руб. (2 157 120 руб.*0,1%*39 дней просрочки).  

Кроме этого, 04.07.2022 между сторонами заключен договор поставки материально-технических ресурсов № 3176722/1041Д, в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям договора и приложений (спецификаций), а покупатель принять и оплатить товар.  

Цена и стоимость товара определяются приложениями (спецификациями) к договору (пункт 2.1 договора).  

Согласно пункту 4.1 договора базис поставки товара, график и сроки поставки, а также иные условия поставки оговариваются по каждой партии товара отдельно и отражаются в приложении (спецификации).  

В пункте 4.1.1 стороны оговорили, что срок поставки товара является существенным условием договора  

Как установлено в пункте 4.2.3 договора при условии «базис поставки - пункт назначения» датой поставки товара является дата подписания товарной накладной или акта  

приема-передачи товара, составляемых при передаче товара покупателю (грузополучателю/получателю) в месте нахождения склада или на территории покупателя (грузополучателя/получателя). Под пунктом назначения понимается: - при поставке товара железнодорожным транспортом – станция назначения по реквизитам трузополучателя/получателя товара, указанным в приложениях (спецификациях);  

- при поставке товара автомобильным транспортом – склад грузополучателя/получателя по реквизитам, указанным в приложениях;  

- при поставке товара авиатранспортом – аэропорт места назначения по реквизитам Грузополучателя/получателя товара, указанным в приложениях (спецификациях).  

Право собственности переходит к покупателю с даты поставки на указанных условиях. Риск случайной гибели переходит к покупателю с момента передачи перевозчиком товара грузополучателю/получателю покупателя в пункте назначения.  

поставщик несет все расходы по транспортировке товара до пункта назначения. В цену товара включены расходы по перевозке товара; по погрузке товара на транспортное средство перевозчика; по перегрузке товара в пути следования до пункта назначения; по креплению товара на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет поставщик до момента поставки товара и которые не подлежат возмещению покупателем. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке товара с прибывшего транспортного средства.  

В соответствии с пунктом 6.1 договора оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по реквизитам, указанным в разделе 21 договора.  

Как установлено в пункте 8.1.1. договора, в случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных в договоре и приложениях (спецификациях) к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного товара сопроводительным документам, поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости непоставленного в срок товара. При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения поставщиком обязательств по поставке. В случае просрочки поставки товара покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по соответствующему приложению (спецификации) товар у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.  

Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для сторон. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней с даты ее получения (пункт 12.1 договора).  

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 10.01.2025г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств, что установлено в пункте 14.1 договора.  

По договору поставки материально-технических ресурсов от 04.07.2022 № 3176722/1041Д сторону подписали спецификацию от 04.07.2022 № 1016243582, согласовав поставку устройства комплектного низковольтного НКУБ-Х4-0,4-250-А-3-О-2-2-0-А-2-С0-Н-0 в количестве 1 шт. на сумму 3 566 960,82 руб., в том числе НДС 20%.  

В спецификации от 04.07.2022 № 1016243582 установлен срок поставки - 70 календарных дней с даты подписания спецификации.  

Товар должен быть поставлен в срок до 07.10.2022. 

27.10.2022 ответчик выполнил обязательства по поставке товара, согласованного в спецификации от 04.07.2022 № 1016243582, что следует из счета-фактуры от 17.10.2022 № 670.  

Следовательно, ответчиком допущена просрочка поставки товара, которая составляет 20 календарных дней, размер неустойки составил 197 875,25 руб. (3 297 920,82 руб.*0,3%*20 дней просрочки).  

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате стоимости поставленного товара, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Заключенные между сторонами договоры от 12.10.2022 № 3176722/1706Д, от 04.07.2022 № 3176722/1041Д являются договорами поставки, отношения по которым регулируются параграфами 1, 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

Согласно статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Материалами дела подтверждается факт заключения сторонами двух договоров поставки на указанных в них условиях.  

В качестве доказательств, подтверждающих поставку товара, истец представил в материалы дела передаточные документы (счет-фактура от 05.02.2024 № 61 по договору от 12.10.2022 № 3176722/1706Д и счет-фактура от 17.10.2022 № 670 по договору от 04.07.2022 № 3176722/1041Д), подтверждающие поставку ответчиком и принятие истцом части товара по договору поставки. Данные передаточные документы подписаны через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур».  

По договору от 12.10.2022 № 3176722/1706Д товар должен быть поставлен до 18.01.2024, однако, товар получен истцом 26.02.2024. Просрочка поставки товара составляет 39 дней. Данные подтверждаются счетом-фактурой от 05.02.2024 № 61.  

По договору от 04.07.2022 № 3176722/1041Д товар должен быть поставлен до 07.10.2022, однако, товар передан ответчиком истцу 27.10.2022. Просрочка поставки товара составляет 20 дней. Данные подтверждаются счетом-фактурой от 17.10.2022 № 670.  

С учетом изложенного, суд признает доказанным факт нарушения ответчиком срока поставки товара.  

Таким образом, факт нарушения ответчиком срока поставки товара установлен судом на основании материалов дела, ответчиком по существу не оспорен.  

Проверив расчет истца, суд находит его арифметически верным. Расчет неустойки не противоречит фактическим обстоятельствам дела, условиям договора.  

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

За рассмотрение искового заявления платежным поручением № 381 от 10.04.2025 истцом уплачена государственная пошлина в сумме 19 100 руб.  

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 282 002,93 руб. неустойки, а также 19 100 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.А. Кошеварова