100195_2605532  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-2654/2023

12 июля 2023 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить условия договора   № 20.1900.374.22 технологического присоединения к электрическим сетям  энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Аскизский  район, Бирикчульское лесничество, Базинское участковое лесничество, квартал 8, ч. выд. 18,  кадастровый номер земельного участка 19:05:020601:187, взыскании судебной неустойки в  размере 5000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда с момента  вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения решения суда,  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, на стороне истца, Уполномоченного по защите  прав предпринимателей в Республике Хакасия.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить  условия договора № 20.1900.374.22 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: Республика Хакасия,  Аскизский район, Бирикчульское лесничество, Базинское участковое лесничество, квартал 8,  ч. выд. 18, кадастровый номер земельного участка 19:05:020601:187, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012  

 № 442, - выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ10 кВ ф. 

<

***> с. У-Камышта до места установки новой ТП-10/0,4 кВ, - выполнить установку новой ТП-10/0,4 кВ, 

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ, до точки  присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,  установленной правоустанавливающими документами истца.  

2. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного  общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) руб. за каждый  календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении двух  

месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического  исполнения.  

3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2 6 000 (шесть тысяч)  руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Чумаченко Т.В.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.11.2022 3:11:00Кому выдана Чумаченко Татьяна Владимировна