АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-15552/2018

г.Тверь

14 ноября 2018 года

(резолютивная часть принята 08 ноября 2018 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Борцовой Н.А., при ведении аудиозаписи, протокола судебного заседания помощником судьи Ужко А.В., с участием представителя истца – ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожная строительная компания», пгт Кесова Гора, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику акционерному обществу «Альфа Дорстрой», г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

о взыскании 6 295 312 рублей

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная строительная компания», пгт Кесова Гора, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Альфа Дорстрой», г. Москва, о взыскании 6 295 312 рублей, в том числе 5 141 112 рублей задолженности по договору № 15031035549170000720/3/181 от 19.03.2018 г., 1 000 000 рублей задолженности по договору № У/34/17 от 03.08.2017 г., 125 400 рублей штрафа по договору № 15031035549170000720/3/181 от 19.03.2018 г., 28 800 рублей неустойки по договору № У/34/17 от 03.08.2017 г.

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку представителей не обеспечил. Судебное заседание проводится без участия представителей ответчика по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец требования поддержал, ходатайствовал об уточнении периода начисления неустойки в рамках договора № У/34/17 от 03.08.2017 г.: с 20.10.2017 г. по 03.08.2018 г., размер требования остается неизменным.

Данное уточнение судом принято как не противоречащее ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания» (Подрядчик) и акционерное общество «Альфа ДорСтрой» (Субподрядчик) заключили договор капитального ремонта автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов км 24+121 - 32+000 в Нижегородской области № 15031035549170000720/3/181 от 19 марта 2018 года, в соответствии с предметом которого Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по укреплению откосов земляного полотна решетчатыми конструкциями на Объекте: Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород -Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов км 24+121-32+000 в Нижегородской области, в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Проект-Строй» и рассмотренной Казанским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» (положительное заключение от 27.07.2015 №0364-15/ТСГЭ-1037/02) и филиалом ФАУ «ФЦЦС» по Ростовской области (положительное заключение от 18.12.2015 №61-7-2-1-0878-15) (далее - Проект), а Подрядчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

Субподрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 5.1. Договора. Существенными условиями Договора для Сторон являются условия, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору.

Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 25 080 000 рублей 00 копеек, включая НДС: 3 825 762 рубля 71 копейку. Цена Договора является ориентировочной и может корректироваться в соответствии с фактически выполненными объемами работ и изменениями рабочей документации, при наличии таковых, на основании единичных расценок, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ.

Подрядчик осуществляет оплату работ по Договору из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится ежемесячно (промежуточный платеж), после выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Договору), по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств федерального бюджета. Оплата работ производится на основании представленных Субподрядчиком и подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100, в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ, а также предоставления Подрядчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подрядчик производит авансирование в размере 30 (тридцать) процентов суммы настоящего Договора.

Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора осуществляются Подрядчиком ежемесячно на основании предъявленных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Подрядчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется, как сумма произведений принятых Подрядчиком объемов работ на соответствующие расценки, установленные в ведомости объемов и стоимости работ (приложение №5 к Договору), за вычетом удержаний, соответствующих величине возвратных сумм, а также за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик осуществляет текущий платеж в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2 и Справки о выполненных работах по форме КС-3.

Окончательный расчет по последнему представленному Субподрядчиком акту выполненных работ по форме КС-2 и справки о выполненных работах по форме КС-3 производится после подписания Заказчиком Подрядчику акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и перечисления денежных средств за выполненные работы на расчетный счет Подрядчика.

В случае досрочного расторжения Договора Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику неиспользованный аванс - в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения Договора. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработаниого аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Начало выполнения работ: 15.05.2018г. Окончание выполнения работ: не позднее 01.10.2018г.

Подрядчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Субподрядчика, направленному в срок, установленный п. 8.16 настоящего Договора) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Субподрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими правилами СП78.13330.2012, ВСН 19-89 приемки работ с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3 и счета фактуры, в том числе на электронных носителях, с составлением Акта скрытых работ.

Совместно с актом приемки выполненных работ Субподрядчик передает Подрядчику всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с перечнем, приведенным в приложении №2 к Договору, а также заверенный Субподрядчиком Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а согласно Постановлению Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в том числе в электронном виде.

Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Подрядчиком.

В случае расторжения Договора по вине Субподрядчика, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 0,5% от цены Договора, что составляет 125 400 рублей 00 копеек (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063).

Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении (два и более раза) Субподрядчиком начальных сроков выполнения отдельных видов работ более чем на 10 календарных дней;

- при нарушении (два и более раза) Субподрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ более чем на 10 календарных дней;

- при нарушении Субподрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

- при необеспечении требуемого качества работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных дефектах по качеству работ или 5 и более предписания Подрядчика (представителей Подрядчика) либо инженерной организации или предписание контрольно-надзорных органов.

- при отклонении предложения Подрядчика о заключении дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 17.2 настоящего Договора;

- установления факта проведения ликвидации Субподрядчика - юридического лица или наличия решений арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и заключенным Договором.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Приложением №1 к Договору согласован календарный график производства работ с указанием промежуточных этапов производства работ.

Авансовый платеж в размере 7 500 000 рублей был перечислен 25 апреля 2018 года платежным поручением № 10977. 

Материалами дела подтверждается сдача-приемка работ за периоды 15.05.2018 г. – 24.06.2018 г., 25.06.2018 г. – 05.07.2018 г, а также проведение промежуточных оплат по договору 27.06.2018 г., 29.06.2018 г., 06.07.2018 г.

Поскольку промежуточный этап работ в установленный срок по 25 число текущего месяца 25 июля 2018 года произведен не был, Субподрядчик производство работ прекратил, участок покинул Подрядчик направил в адрес Субподрядчика уведомление от 31.07.2018 г. о расторжении договора субподряда.

На дату подачи искового заявления размер неотработанного аванса по данным истца составил 5 141 112 рублей.

03 августа 2018 года, общество с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания» (Исполнитель) и акционерное общество «Альфа ДорСтрой» (Заказчик) заключили договор оказания услуг № У/34/17, предметом которого является оказание Исполнителем Заказчику услуг по предоставлению Заказчику обозначенной в Приложении № 1 к настоящему Договору дорожно-строительной и иной спецтехники (далее - «механизмы») с персоналом для ее управления, услуг перевозки в соответствии с условиями настоящего Договора и заявками Заказчика.

Заявки на оказание услуг направляются Исполнителю в письменном или устном виде не позднее чем до 18 часов дня, предшествующего установленной Заявкой дате начала оказания услуг. При направлении заявки Исполнителем после указанного срока техника предоставляется Заказчику при наличии технической возможности. В Заявке указываются вид оказываемых услуг, вид механизмов из числа перечисленных в Приложении № 1, адрес объекта Заказчика (места производства работ), дата и ожидаемое время прибытия механизмов, а при оказании услуг перевозки также указываются вид, количество груза, место отправления (мест погрузки) и место назначения (разгрузки).

Исполнитель предоставляет механизмы, указанные в Приложении № 1 к настоящему-Договору, по заявкам Заказчика, предоставленным в порядке согласно п.2.1. Договора.

Заказчик обеспечивает подписание документов, фиксирующих оказание услуг по настоящему Договору (в т.ч.: сменных рапортов и нарядов на работу механизмов, актов об оказании услуг), с указанием в этих документах всего фактического объема работы механизмов на объектах Заказчика. Оказание услуг по настоящему Договору фиксируется подписываемыми сторонами ежемесячно либо в иные согласованные сроки Актами об оказании услуг по Договору, которые оформляются на основании данных рапортов на работу предоставленных Исполнителем механизмов, подписанных Заказчиком.

Оплата оказываемых по настоящему Договору услуг по предоставлению механизмов Исполнителя производится Заказчиком на основании Актов оказанных услуг, подписываемых Сторонами, за фактический объем работы на объекте Заказчика механизмов, предоставленных Исполнителем согласно заявки Заказчика, а также за время их простоя по вине Заказчика при нахождении механизмов в месте производства работ Заказчиком (на объектах Заказчика), подтвержденных первичными документами (рапортами, заверенными Заказчиком) исходя из договорных расценок, обозначенных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Акт оказанных услуг по предоставлению механизмов с указанием сведений о времени работы механизма Исполнителя составляется Исполнителем на основании первичных учетных документов по формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России №78 от 28.11.97г. (если иное не будет согласовано сторонами дополнительно), в том числе рапортов, путевых листов, подписанных машинистом Исполнителя и уполномоченным представителем Заказчика, и направляется Заказчику для подписания с приложением соответствующих первичных документов, заверенных печатью Исполнителя. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется предоставить для сверки оригиналы рапортов (если рапорта составлялись в одном экземпляре для Исполнителя). Заказчик рассматривает документы, предоставленные Исполнителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Исполнителя и либо подписывает их либо в этот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанных документов. Отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих объем услуг, оказанных Исполнителем, не является самостоятельным основанием для отказа Заказчика в подписании Акта оказанных услуг и оплате таких услуг.

Оплата услуг производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Актов об оказании услуг и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих оказание этих услуг (п.п. 3.1.9.9., 4.1., 4.2. Договора), а также счета-фактуры. Заказчик вправе перечислить Исполнителю аванс в согласованном сторонами размере.

В случае нарушения сроков оплаты услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, Исполнитель имеет право на выставление неустойки в размере 0,01 % от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки платежа.

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

В рамках договора Исполнителем были оказаны услуги на общую сумму 1 358 000 рублей (акт № 1358 от 12.10.2017 г., акт № 884 от 09.08.2017 г.). Данные услуги Заказчиком оплачены не были.

Поскольку в досудебном порядке ответчик образовавшуюся задолженность в общей сумме 6 141 112 рублей не оплатил, истец обратился в суд за взысканием долга, штрафных санкций в судебном порядке.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или не совершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли. 

Пунктом  2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем кодексе.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Требования по иску основаны на ненадлежащем выполнении ответчиком своих обязательств по договору № 15031035549170000720/3/181 от 19.03.2018 г., который по своей правовой природе является договором субподряда, правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по договору оказания услуг № У/34/17 от 03.08.2017 г., правоотношения сторон регулируются нормами гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств того, что ответчик в согласованный сторонами срок в соответствии с условиями Договора сдал промежуточный результат работ, либо такие работы согласно графика производства работ были выполнены, но истец необоснованно уклонился от их принятия, в материалы дела не представлено.

Подрядчик отказался от договора №15031035549170000720/3/181 от 19.03.2018 г. в связи с нарушением сроков выполнения работ, направив в адрес ответчика соглашение от 31.07.2018 г, что соответствует положениям пункта 18.2 Договора субподряда, пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор согласно пункту 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации считается расторгнутым.

В Информационном письме № 49 от 11.01.2000 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что в случае прекращения действия договора (расторжения, истечения срока действия) основания для удержания перечисленных заказчиком денежных средств отпали, так как прекратилась обязанность подрядчика по выполнению работ. Получатель средств, уклоняясь от их возврата заказчику, осуществившему предварительную оплату, несмотря на отпадение основания для удержания, должен рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее средства.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1).

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Поскольку Договор № 15031035549170000720/3/181 от 19.03.2018 г. расторгнут, встречное удовлетворение по Договору субподряда ответчиком на сумму 4 141 112 рублей не предоставлено и обязанность по его предоставлению отпала, суд приходит к выводу о том, что сумма уплаченного аванса являются неосновательным обогащением ответчика, правовые основания для удержания которого у ответчика отсутствуют.

С учетом изложенного, 4 141 112 рублей неотработанного аванса подлежат взысканию с ответчика как неосновательное обогащение.

Также истцом заявлено требование о взыскании штрафа в соответствии с п. 11.4.4 Договора субподряда в размере 125 400 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 18.2 Договора субподряда Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении (два и более раза) Субподрядчиком начальных сроков выполнения отдельных видов работ более чем на 10 календарных дней;

- при нарушении (два и более раза) Субподрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ более чем на 10 календарных дней;

- при нарушении Субподрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

- при необеспечении требуемого качества работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных дефектах по качеству работ или 5 и более предписания Подрядчика (представителей Подрядчика) либо инженерной организации или предписание контрольно-надзорных органов.

- при отклонении предложения Подрядчика о заключении дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 17.2 настоящего Договора;

- установления факта проведения ликвидации Субподрядчика - юридического лица или наличия решений арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

Пунктом 11.4.4 Договора субподряда установлено, что в случае расторжения Договора по вине Субподрядчика, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 0,5% от цены Договора, что составляет 125 400 рублей 00 копеек (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063).

Поскольку материалами дела установлено, что Договор субподряда был расторгнут Подрядчиком по вине Субподрядчика, истец правомерно заявил требование о взыскании штрафа, данное требование подлежит удовлетворению в полном объеме.

Также истец взыскивает 1 000 000 рублей задолженности по договору № У/34/17 от 03.08.2017 г.. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729 Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта сдачи выполненных работ.

Факт оказания услуг на сумму 1 000 000 рублей (с учетом проведения сторонами зачета встречных обязательств на сумму 358 000 рублей) подтверждается двухсторонними актами № 1358 от 12.10.2017 г., № 884 от 09.08.2017 г.

Ответчиком в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств оплаты оказанных по вышеуказанным актам услуг.

С учетом изложенного, 1 000 000 рублей задолженности по договору № У/34/17 от 03.08.2017 г. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 28 800 рублей по договору № У/34/17 от 03.08.2017 г. за период 20.10.2017 г. – 03.08.2018 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 5.3 Договора оказания услуг в случае нарушения сроков оплаты услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, Исполнитель имеет право на выставление неустойки в размере 0,01 % от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки платежа.

Учитывая, что ответчиком не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих оплату услуг за спорный период, истец правомерно требует взыскания с ответчика договорной неустойки, со ссылкой на статью 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия договора.

Период взыскания неустойки с 20.10.2017 года по 03.08.2018 года полностью корреспондируется с условиями пункта 5.3 договора, правилами статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Размер неустойки, взыскиваемой истцом, составляет 28 800 рублей.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Альфа Дорстрой», г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожная строительная компания», пгт Кесова Гора, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 5 141 112 рублей задолженности по договору №15031035549170000720/3/181 от 19 марта 2018 года, 125 400 рублей штрафа по договору №15031035549170000720/3/181 от 19 марта 2018 года,  1 000 000 рублей задолженности по договору № У/34/17 от 3 августа 2017 года,  28 800 рублей неустойки по договору № У/34/17 от 3 августа 2017 года, всего: 6 295 312 рублей, а также 54 477 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскателю выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                         Н.А. Борцова