АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Воронеж 

«20» сентября 2022г. Дело № А14-5335/2022  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть-Воронеж», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «Россети Центр», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала ПАО «Россети Центр»«Воронежэнерго», г. Воронеж  

о понуждении к исполнению договора на технологическое присоединение, о взыскании  неустойки  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество «Россети Центр», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала ПАО «Россети Центр»«Воронежэнерго»:  

 в течение двух недель с момента вступления в законную силу решения суда  выполнить п. 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям ПАО  «МРСК Центра» к договору № 3600/05837/19/(41789930) от 20.05.2019 об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, именно:  проектирование и строительство KB Л 10 кВ от опоры № 50 В Л 10 кВ № 14 ПС 110 кВ  Студенческая, протяженностью 0,055 км (в том числе ВЛ 10 кВ - 0,005 км, КЛ 10 кВ  методом ГНБ (для перехода под железной дорогой) - 0,05 км). Предусмотреть  реконструкцию отпаечной опоры в части монтажа устройства ответвления. Трассу,  марку и сечение провода определить при проектировании; реконструкцию ВЛ 10 кВ №  14 ПС ПО кВ Студенческая (инв. № 12020438-00, диспетчерское наименование: ВЛ 10  кВ № 14 ПС Студенческая) с заменой провода АС-50 в пролетах опор № 1 - № 50 В Л  10 кВ № 14 на провод СИП большего сечения, протяженностью 3 км и с заменой  существующих опор в пролете № 20-50. Тип опор, марку и сечение провода определить  при проектировании;  

в течение 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения  объектов электроэнергетики заявителя к электрическим сетям и фактического приема  (подачи) напряжения и мощности выдать акт об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям;  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр», г. Москва  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала ПАО «Россети Центр»«Воронежэнерго» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Горэлектросеть-Воронеж», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  19 139,83руб. неустойки, 8 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд  Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова