71/2022-18312(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-159/2022

город Вологда

17 февраля 2022 года

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 110, статьями 167-171, 176, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный  суд Вологодской области  

р е ш и л:

внести в Контракт от 29.03.2021 «Выполнение работ по сохранению  

объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX  

в.», расположенного по адресу: Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Кадников,  

ул. Розы Люксембург, 20» (Капитальный ремонт)» следующие изменения: 

пункт 1.2. Контракта изложить в следующей редакции:  «1.2. Сроки выполнения работ:  

- начало выполнения работ: С момента заключения Контракта; 

- окончание выполнения работ: 01 июля 2022 г».  Пункт 13.1 Контракта изложить в следующей редакции:  

«13.1 – начало действия Контракта: с момента заключения Контракта.  - окончание действия Контракта: 14 августа 2022 г.».  

Строку «Срок выполнения работ» в таблице Раздела 1 Приложения № 1 к  

Контракту (Техническое задание) изложить в следующей редакции: « 

Срок выполнения работ  

Начало: с момента заключения Контракта.  Окончание: 01 июля 2022 г.  

». 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Ю.В. Гуляева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2021 7:10:48

код для идентификации: 

Кому выдана Гуляева Юлия Валентиновна