Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-38017/2018  «27» февраля 2019 года  

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Бударина Е.С.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Межрайонная управляющая компания»  (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Стройдеталь» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 10.01.2019, от ответчика – не явился, извещен 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» в течение двух  месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки,  допущенные при строительстве многоквартирного жилого дома № 13 по ул. пос.  Стройдеталь Советского района г. Волгограда:  

- произвести работы по отбортовке кафельной плиткой пола первого и второго  подъездов с 1-го по 18-й этаж (коридоры, лифтовые холлы, колясочные, пожарные  переходы);  

- произвести устройство теплоизоляции на системе отопления и горячего  водоснабжения в подвале дома;  

- обустроить контейнерную площадку для сбора мусора, а также установить  емкости для сбора мусора;  

- выполнить отделку откосов и примыкания к стене подоконника второго подъезда  (пожарный переход 1 и 2 этаж);  

- передать управляющей компании по акту пожарные рукава, пожарный ствол,  ключи от пожарных ящиков;  

- опробовать работоспособность пожарной сигнализации; 

- установить на 18-ом этаже сбросники воздуха на системе отопления, системе  

холодного водоснабжения, системе горячего водоснабжения; 

- восстановить межэтажные двери в количестве 18 штук, и привести их в  

работоспособное состояние, а также выполнить отделку откосов; 

- отрегулировать противопожарные металлические двери в лифтовых холлах  

первого и второго подъезда, обустроить их замками; 

- устранить протечки с кровли (18-ый этаж первого и второго подъезда),  

восстановив герметичность примыкания ливневой канализации; - установить в придомовых приямках решетки, лестницы для спуска; 

- установить в первом и втором подъезде съемные короба в местах прохода стояков  

отопления; 

- заменить светодиодные светильники в первом и втором подъездах в количестве 5  

штук, неисправность которых выявлена при подписании акта приема- передачи; - восстановить крыльцо входа в первый подъезд со стороны двора; - восстановить фундамент; 

- произвести отделку стен и полов технических помещений (мусорные камеры)  

первого и второго подъезда; 

- закрыть ревизионные отверстия ливневой канализации в первом подъезде со 2-го  

по 18-ый этаж; 

- восстановить, соединительную головку диаметром 80 мм на наружных пожарных  

патрубках (для присоединения рукавов пожарных машин); 

- передать тепловой пункт управляющей компании по акту приемки-передачи;  

- восстановить штукатурный слой площадью 127 м² в первом во втором подъезде с  

1-го по 18 этаж в коридорах; - установить на крыше многоэтажного дома светосигнальные светильники; 

- выполнить работы по укладке асфальтового покрытия (на выезде с обеих сторон  

двора) на прилегающей территории; 

- восстановить асфальтобетонное покрытие (36 м²) на пешеходных дорожках  

прилегающей территории; 

- на детской площадке: выполнить работу по устройству подхода и подъезда на  

колясках к детскому городку; выполнить работы по устройству отвода ливневых, талых  

вод; установить скамейки и урны; восстановить покрытие площадки (мягкая плитка),  

устранив участки деформации. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Бударина