АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6788/2024

г. Чебоксары

25 ноября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2024 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михайловой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики, ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 429430, г. Козловка, м.о.Козловский, Чувашская Республика, ул. Ленина д. 55

к обществу с ограниченной ответственностью "Дорстрой12", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 425353, г. Козьмодемьянск, 

<

...>

об обязании произвести ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги,

при участии

от истца ФИО1 по дов. от 10.04.2023 (сроком на 3 года),

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 03.10.2024 (сроком на один год),

установил:

Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дорстрой12" об обязании произвести ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги пересечения ул. Егорова с ул. Береговая в деревне Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики путем устранения повреждений в виде выбоин, просадок, проломов, разрушений в местах примыкания нового асфальтобетонного покрытия к старому в рамках гарантийных обязательств муниципального контракта № 32 от 26 июня 2023 года в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала.

Представитель ответчика иск признал. Просил установить срок для устранения недостатков до 01.06.2025.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил.

26.06.2023 Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой12" (подрядчик) заключили муниципальный контракт №32, по условиям которого Подрядчик принимает па себя обязательства на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги пересечения ул. Егорова с ул. Береговая в деревне Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Работы) в соответствии с условиями Контракта и Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), локальной сметой (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена контракта (цена работ) составляет 1818664 руб. (пункт 2.1 контракта).

Календарные сроки выполнения работ по Контракту: с 01.07.2023 по 31.08.2023 (пункт 3.1 контракта).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.12.2023 №1 работы выполнены подрядчиком и приняты заказчиком на сумму 1818664 руб.

Распоряжением администрации Козловского муниципального округа от 02.05.2024 №144 создана Комиссия по обследованию автомобильной дороги пересечения ул. Егорова с ул. Береговая в деревне Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Согласно акту обследования улично-дорожной сети автомобильной дороги пересечения ул. Егорова с ул. Береговая в деревне Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 20.05.2024 выявлены недостатки работ: на протяжении всей дороги выбоины, ямы, просадки, отсутствует примыкание к старой асфальтобетонной дороге. Комиссией принято решение выявленные недостатки устранить подрядчику до 20.06.2024.

В связи с тем, что к 20.06.2024 ООО «Дорстрой12» недостатки не были устранены, администрация направила подрядчику претензионное письмо от 03.07.2024 о проведении работ в рамках гарантийных обязательств в срок до 15.07.2024.

Неисполнение данного требования явилось причиной для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 722 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В пункте 2 статьи 755 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Пунктом 6.1 контракта установлено, что подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 6 (шесть) лет (в соответствии с типовыми условиями контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»). Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке (пункт 6.2 контракта).

Наличие недостатков (дефектов), обнаруженных в пределах гарантийного срока, подтверждено материалами дела и ответчиком не опровергнуто.

Ответчик не представил суду доказательств, что недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Учитывая изложенное, суд удовлетворяет требование истца об обязании произвести ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги пересечения ул. Егорова с ул. Береговая в деревне Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики путем устранения повреждений в виде выбоин, просадок, проломов, разрушений в местах примыкания нового асфальтобетонного покрытия к старому в рамках гарантийных обязательств муниципального контракта № 32 от 26 июня 2023 года в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» в срок до 01.06.2025.

Государственную пошлину арбитражный суд относит на ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в размере 30% в связи с признанием иска). 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой12" произвести ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги пересечения ул. Егорова с ул. Береговая в деревне Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики путем устранения повреждений в виде выбоин, просадок, проломов, разрушений в местах примыкания нового асфальтобетонного покрытия к старому в рамках гарантийных обязательств муниципального контракта № 32 от 26 июня 2023 года в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» в срок до 01.06.2025.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорстрой12" в доход федерального бюджета 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова