АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 19, город Владимир, 600005

тел. (4922) 47-23-41, факс (4922) 47-23-98

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Владимир                                                          

«11» ноября 2022 года                                                  Дело № А11- 13134/2021

Резолютивная часть решения объявлена 03.11.2022.

Полный текст решения изготовлен 11.11.2022.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой - ФИО1, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: ул. Горького, д. 95А, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: ул. Большие Ременники, д. 4, 

<

...>)

о взыскании 1 463 221  рублей 17 копейки (с учетом уточнений от 29.04.2022),

при участии:

от истца – ФИО3, по доверенности от 10.01.2022 №36-01/12 сроком действия до 31.12.2022, диплом;

от ответчика – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет;

установил следующее.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира  обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ» о взыскании штрафа в сумме 1 251 790 рублей 69 копеек, неустойки в сумме 59 668 рублей 70 копеек.

Истец ходатайствовал об уточнении исковых требований, просил взыскать с ответчика штраф в сумме 1 251 790 рублей 69 копеек, неустойку в сумме 184 430  рублей 48 копеек.

Суд, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнения к рассмотрению. Спор подлежит рассмотрению с учетом уточненных требований.

Ответчик отзыв, каких-либо заявлений и/или ходатайств, на исковое заявление не представил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Стороны, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, явку представителя в судебные заседания не обеспечили.

Спор рассматривается в отсутствие представителей ответчика и третьего лица на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы арбитражного дела, суд установил следующее.

29.12.2020 между УЖКХ администрации г. Владимира (заказчик) и ООО СК «АСТ» (подрядчик), заключен контракта № 69Э, согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Егорова (от ул. Добросельская до ул. Растопчина) в городе Владимире.

Согласно пункту 1.2 договора подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги в сроки, предусмотренные контрактом, с четом графика выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обеспечивает выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильной дороги.

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена настоящего контракта является твёрдой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. Цена контракта (цена работ) составляет 25 035 813 рублей 72 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость – 4 172 635 рублей 62 копейки по налоговой ставке 20%, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена НДС не облагается.

Согласно пункту 3.7 контракта расчет по контракту за выполненные работы осуществляется после выполнения всего объема работ, в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ») и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»).

Согласно пункту 3.10 контракта в случае просрочки подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести расчет за выполненные работы за вычетом пеней, штрафов, подлежащих взысканию в соответствии с п. 8.3. настоящего контракта. В случае осуществления расчетов за выполненные работы за вычетом штрафов, пеней, в акте о приемке выполненных работ указываются сумма подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер пени, штрафа, подлежащих взысканию на основании требования, направленного подрядчику; итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

Пунктом 4.1 контракта установлено, что срок выполнения работ по настоящему контракту определяется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Согласно приложению № 2 к контракту срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта до 10.07.2021.

Согласно пункту 5.2 контракта приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в сроки, определенны в п. 5.8. настоящего контракта. При приемке работ заказчик:

-проверяет соответствие выполненных работ по объему и качеству требованиям, установленным Контрактом (пункт 5.4.1 контракта);

-проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных подрядчиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта, проверяет комплектное п. и количество экземпляров представленной документации. (пункт 5.4.2 контракта);

-при необходимости запрашивает от подрядчика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам (пункт 5.4.3 контракта);

-осуществляет иные действия для всесторонней опенки (проверки) соответствия работ условиям контракта и требованиям законодательства Российской Федерации (пункт 5.4.4 контракта).

В соответствии с пунктом 5.5 контракта по исполнении обязательств по контракту осуществляется сдача отчетной документации. Отчетная документация сдается подрядчиком с сопроводительным письмом с описью приложений и количества экземпляров. Сопроводительное письмо регистрируется датой фактического предоставления отчетной документации заказчику, в случае наличия замечаний по отчетной документации стороны руководствуются п.п. 5.10. и 5.11. настоящею контракта.

Согласно пункту 5.6 контракта подрядчик представляет отчетную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней по окончанию ремонтных работ, в следующем количестве:

- акт по форме ГОСТ 32755-2014 (приложение А.2 с приложениями) - 5 экз.;

-акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», подписанный Подрядчиком к организацией, осуществляющей строительный контроль - в 5 экз.;

-справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанная подрядчиком - в 5 экз.;

-исполнительная документация - в 2 экз.;

-общий журнал работ - в 1 экз.;

- счет, подписанный Подрядчиком - 2 экз.;

-счет-фактура, подписанная подрядчиком - 2 экз. (если подрядчик является плательщиком НДС).

До передачи заказчику отчетная документация должна быть проверена и подписана организацией, осуществляющей строительный контроль на объекте объекте.

Замечания по отчетной документации оформляются в виде письма па официальном бланке заказчика (пункт 5.7 контракта).

Заказчик проводит приемку выполненных работ в течение 10 рабочих дней, со дня следующего за днем подачи отчетной документации, и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ») и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»), а при обнаружении отступлений m Контракта, ухудшающих результаты выполненных работ, или иных недостатков выдаст замечания в виде официального письма или акта с перечнем выявленных недостатков Подрядчику в порядке, установленном п. 5.10. контракта (пункт 5.8 контракта).

Согласно пункту 6.2 контракта подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после промежуточной приемки выполненных работ по акту (ГОСТ 32756-2014, Приложение Д) организацией, осуществляющей строительный контроль.

В соответствии с пунктом 8.3 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнении обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на уплаты пени ключевой стайки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 5 процентов цены контракта (этапа) 1 251 790 рублей 69 копеек.

За каждый факт неисполнения или не надлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 5000 рублей 00 копеек. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (пли с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта 1 827 431 рубль 70 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Пунктом 8.4 контракта установлено, что подрядчик осуществляет уплату неустоек (пеней, штрафов) в сроки, установленные требованием об уплате неустоек (штрафов, пеней), по реквизитам, указанным заказчиком. В случае нарушения подрядчиком сроков, установленных требованием об уплате неустоек (штрафов, пеней), заказчик вправе осуществить расчет за выполненные работы за вычетом штрафов, пеней согласно п. 3.10 настоящего контракта.

В соответствии с пунктом 10.6 контракта расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случаях одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 11.1 контракта настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Работы по контракту в соответствии с его условиями ответчиком не выполнены и не сданы, ответчик к работам не приступал.

В связи с тем, что ООО «Строительная компания АСТ» в установленный контрактом срок работы не выполнило (подрядчик к работам не приступал), 12.07.2021 управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира приняло решение об отказе от исполнения контракта от 29.12.2020 № 69Э. 

Решение управления от 12.07.2021 об одностороннем отказе исполнения контракта от 29.12.2020 № 69Э вступило в силу 23.07.2021.

Владимирское управление ФАС РФ своим решением от 30.07.2021 по делу № РНП 33-1522 включило ООО «Строительная компания АСТ» в реестр недобросовестных поставщиков.

В связи с неисполнением ответчиком своих контрактных обязательств, послуживших основанием для его расторжения со стороны истца, допущенной просрочкой исполнения обязательства, управлением обществу было направлено требование об оплате штрафа в размере 1 251 790 рублей 69 копеек и неустойки в размере 59 668 рублей 70 копеек согласно расчету:

25 035 813,72*(5,5%/300)* 13 = 59668 рублей 70 копеек.

25 035 813 рублей 72 копейки - стоимость неисполненного в установленный срок обязательства по контракту;

5,5/300 % - размер ставки;

13 - количество дней просрочки с 10.07.2021 по 22.07.2021

Общая сумма требований истца составляет 1 311 459 рублей 39 копеек (1251790,69+59668,70).

С учетом уточнений:

25 035 813,72*(17%/300)* 13 = 184430 рублей 48 копеек.

25 035 813 рублей 72 копейки - стоимость неисполненного в установленный срок обязательства по контракту;

17/300 % - размер ставки;

13 - количество дней просрочки с 10.07.2021 по 22.07.2021

Общая сумма требований истца составляет 1 436 221 рублей 17 копеек.

Пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

Требование об оплате штрафа и неустойки ответчик не исполнил.

Неисполнение ответчиком обязательств по контракту послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьями 702, 711 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Возникшие между сторонами спора отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, регулируются также положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору подряда предусмотрены статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими общие положения об обязательствах, а также специальными нормами, регулирующими подрядные отношения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 6 названной статьи в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В силу части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии с пунктом 8.3 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнении обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на уплаты пени ключевой стайки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

Пунктом 4.1 контракта установлено, что срок выполнения работ по настоящему контракту определяется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Согласно приложению № 2 к контракту срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта до 10.07.2021.

В соответствии с пунктом 11.1 контракта настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Акт сдачи-приемки выполненных работ сторонами на момент рассмотрения настоящего спора в суде первой инстанции не подписан, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В обоснование требования истец ссылается на невыполнение работ со стороны ответчика, в срок, предусмотренный контрактом, в связи с чем, начислена неустойка на основании пункта 8.3 контракта.

Доказательства существования обстоятельств, являющихся в силу статей 401, 405, 406 ГК РФ основанием для освобождения ответчика от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств, ответчиком вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, ответчик нарушил предусмотренные контрактом сроки выполнения работ. 

Каких-либо дополнительных соглашений о продлении срока выполнения работ между заказчиком и подрядчиком не заключалось.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 10.6 контракта расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случаях одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

В силу пункта 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В силу пункта 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (пункт 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

Подрядчик работы, предусмотренные контрактом, в установленный срок не выполнил, в результате чего, истец решением от 12.07.2021 отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке. Указанное решение вступило в законную силу 23.07.2021. Таким образом, обязательства по спорному контракту прекращены в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

Доказательств отсутствия вины ответчика в просрочке исполнения обязательств по контракту последним в нарушение требований частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено.

Проверив расчет неустойки, представленный истцом, суд приходит к выводу, что он составлен неверно, поскольку истцом применена неверная ключевая ставка.

Согласно расчету суда неустойка за период с 10.07.2021 по 22.07.2021 составит 81 366 рублей 39 копеек.

Истцом также предъявлен ко взысканию штраф в размере 1 251 790 рублей 69 копеек.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 8.3 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 5 процентов цены контракта (этапа) 1 251 790 рублей 69 копеек.

За каждый факт неисполнения или не надлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 5000 рублей 00 копеек. 

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком договорных обязательств, истец на основании пункта 8.3 контракта начислил ответчику штраф в размере 1 251 790 рублей 69 копеек.

В связи с тем, что ответчик существенно нарушил условия выполнения обязательств по контракту (работы не выполнены), что послужило истцу основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения спорного контракта, суд приходит к выводу о правомерности начисления штрафа за ненадлежащее исполнение контракта.

Оснований для снижения размера штрафа на основании статьи 333 ГК РФ суд первой инстанции не находит, поскольку ответчик соответствующего ходатайства не заявил, доказательств явной несоразмерности суммы штрафа последствиям нарушения обязательства не представил.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, суд первой инстанции приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию неустойка в размере 81 366 рублей 39 копеек и штраф в сумме 1 251 790 рублей 69 копеек по контракту от 29.12.2020 № № 69Э.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами с учетом положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 121, 123, 150, 156, 167-170, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени по контракту от 29.12.2020 № № 69Э в сумме 81 366 рублей 39 копеек, штраф по контракту от 29.12.2020 № № 69Э в сумме 1 251 790  рублей 69 копеек.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 25 398 рублей 49 копеек.

Выдача исполнительного листа производится в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                           Ю.В. Бондарева-Битяй