АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, 

<

...>, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-39427/24

г. Уфа

11 июля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 01.07.2025

Полный текст решения изготовлен 11.07.2025

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хаматнуровой Р.Р., рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик УАМ-СТС" (ИНН 0275086370, ОГРН 1140280062713)

к Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о внесении изменений в договор № 50-РТ от 16.01.2015 г.

при участии в судебном заседании:

От истца - ФИО1 по доверенности № 03 от 25.10.2024., паспорт, диплом.

От ответчика – ФИО2 по доверенности № 01-05-01075/13от 26.03.2024 паспорт, диплом.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик УАМ-СТС» /далее – ООО «СЗ УАМ-СТС», истец/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан /далее – Администрация, ответчик/ о внесении изменений  

в п.2. 5 договора №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республика Башкортостан, заменив слова «№5 по улице Судоремонтная» на слова «№5а по улице Судоремонтная»,

в п.3.1.5 договора №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, изложив его в следующей редакции: Сторона 2 обязуется создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в течении 24 )двадцати четырех) месяцев с момента принятия Стороной 1 решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными. Приобретенная или построенная целевым назначением и передаваемая жилая площадь для переселения нанимателей должна быть равнозначной по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, а также соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование»,

в п.3.1.6 договора №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, изложив его в следующей редакции: «Оплатить в течении 24 (двадцати четырех) месяцев с момента принятия Стороной 1 решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности РФ, субъекта РФ, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с предыдущим пунктом 3.1.5 договора РТ»,

в п .3.1.16 договора №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, изложив его в следующей редакции: «Осуществить строительство на земельном участке, образованном в соответствии с проектом межевания в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в течении 10 лет с момента принятия Стороной 1 решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»,

В п.3.1.17 договора №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, изложив его в следующей редакции: «Осуществить строительство и (или) реконструкцию на земельном участке, образованном в соответствии с проектом межевания в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в течении 10 лет с момента принятия Стороной 1 решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей, проживающих в многоквартирных жилых дома, признанных аварийными, определенных соглашением сторон объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии»,

В п. 5.4. договора №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, изложив его в следующей редакции: «Настоящий договор заключается сроком на 20 лет».

Определением суда от 31.01.2025 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. 

От ответчика поступил отзыв. Просит в удовлетворении исковых требований отказать, указав, что спорный договор был заключен в соответствии с условиями аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, утвержденными постановлениями Администрации городского округа город Уфа РБ от 27.11.2013 г. № 5997, от 16.06.2014 г. № 2540, от 24.11.2014 № 5198 и на основании протокола заседания аукционной комиссии от 29.12.2014 г. №3, в связи с чем изменение условий на основании соглашения сторон договора, либо по требованию одной из его сторон не допускается. 

По мнению ответчика, согласно правовому регулированию вопроса внесения изменения изменений в договор, заключенный на аукционе, в том числе в договор о развитии застроенной территории в части продления его сроков, с учетом сложившейся судебной практики, следует, что указанный договор может быть изменен в части продления его сроков только, во-первых, при установлении виновного неисполнения публичным органом обязательств, предусмотренных договором и, во-вторых, не более, чем на период, на который публичный орган допускал действия (бездействие), препятствующее исполнению обязательства.

В порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Согласно уточненным исковым требованиям, истец просит:

 1. Внести изменения в договор №50-РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан и изложить пункт 2.5 в следующей редакции:

«2.5 на территории, указанной в пункте 1.1 договора расположены следующие здания, строения, сооружения, подлежащие сносу или реконструкции при развитии Территории: жилые дома, подлежащие сносу и реконструкции:

№№233, 239, 247 по улице Ахметова;

№№40, 235, 237, 243, 249, 251, 253, 257, 263, 265, 267, 273, 279, 299а, 299б по улице Пожарского;

№5а по улице Судоремонтная;

Жилые дома не соответствующие градостроительному регламенту:

№№308, 310, 312, 314, 316, 318, 320 по улице Пожарского;

№№16, 1г, 2, 2б, 2г, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Судоремонтная;

№№16, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8 по улице Союзная;

№№4, 6, 8, 8а по переулку Запорожскому».

Изложить пункт 3.1.5 в следующей редакции:

«3.1.5 Сторона 2 обязуется создать либо приобрести, а так же передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными. Приобретенная или построенная целевым назначением и передаваемая жилая площадь для переселения нанимателей должна быть равнозначной по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, а также соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь отделку, сантехническое и другое оборудование».

Изложить пункт 3.1.6. договора в следующей редакции:

«3.1.6 Оплатить в течении 36 (тридцати шести) месяцев с момента принятия Стороной 1 решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности в том числе в общей долевой собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с предыдущим пунктом 3.1.5 Договора РТ».

Изложить пункт 3.1.16 договора в следующей редакции:

«3.1.16 Осуществить строительство на земельном участке, образованном в соответствии проектом межевания в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в сроки, установленные проектной и разрешительной документацией»

Изложить пункт 3.1.17 договора в следующей редакции: 

«3.1.17 Осуществить строительство и (или) реконструкцию на земельном участке, образованном в соответствии с проектом межевания в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в сроки, установленные проектной и разрешительной документацией, определенных соглашением сторон объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии».

Изложить пункт 5.4 договора в следующей редакции:

«5.4 Настоящий договор действует 7 лет с момента заключения дополнительного соглашения».

Обязать ответчика подготовить и направить истцу на подписание проект дополнительного соглашения к договору №50-РТ от 16.01.2015 г., отражающий изменения, указанные в пунктах 1-6 настоящей просительной части, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено по уточненным исковым требованиям.

Представитель истца уточненные исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика представил отзыв на уточненные исковые требования.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 1 июля 2025 года исковые требования об изменении условий договора №50-РТ от 16 января 2015 года пунктов 3.1.5, 3.1.6, 3.1.16,3.1.17.5.4 оставлены без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка разрешения спора.

Рассмотрев заявленные требования, изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между Администрацией и ООО «СЗ УАМ-СТС» был заключен договор № 50- РТ от 16.01.2015 г. о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, утвержденными постановлениями Администрации городского округа город Уфа РБ от 27.11.2013 г. № 5997, от 16.06.2014 г. № 2540, от 24.11.2014 № 5198 и на основании протокола заседания аукционной комиссии от 29.12.2014 г. №3.

В соответствии с п.1.1. договора от 16.01.2015 г. № 50-РТ, по настоящему договору Сторона 2 обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и пунктами 3.1.1. - 3.1.19. настоящего Договора, связанные с развитием застроенной территории общей площадью ориентировочно 10,1 га, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Территория), а Сторона 1 обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и пунктами 3.3.1. - 3.3.4. настоящего Договора. Схема расположения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, прилагается к договору (приложение №2).

Согласно п. 1.2 договора от 16.01.2015 г. № 50-РТ, основанием для заключения настоящего договора является:

- решение о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, принятое постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24.02.2012 №437 «О развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14.10.2013 № 5250 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24.02.2012 №437 «О развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.11.2013 №5997 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 16.06.2014 №2540 «О повторном проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внесении изменений в условия аукциона»;

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24.11.2014 №5198 «О повторном проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внесении изменений в условия аукциона»;

- протокол о подведении итогов аукциона от «29» декабря 2014 г. № 3.

В соответствии с п. 2.5 договора от 16.01.2015 г. № 50-РТ на территории, указанной в пункте 1.1. договора расположены следующие здания, строения, сооружения, подлежащие сносу или реконструкции при развитии Территории:

жилые дома, подлежащие сносу и реконструкции:

- №№ 233, 239, 247 по улице Ахметова;

- №№ 40, 235, 237, 243, 249, 251, 253, 257, 263, 265, 267, 273, 279, 299а, 2996 по улице Пожарского;

- № 5 по улице Судоремонтная;

жилые дома не соответствующие градостроительному регламенту:

- №№ 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320 по улице Пожарского;

- №№ 16, 1г, 2, 26, 2г, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Судоремонтная;

- №№ 16, 1в, 1г, 2, 2а, 26, 26, 2в, 4, 6, 8 по улице Союзная;

- №№ 4, 6, 8, 8а по переулку Запорожскому.

Согласно п.п. 3.1.16 договора от 16.01.2015 г. № 50-РТ, срок осуществления строительства на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, установлен в течении 7-ми лет с момента заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 5.2. договора от 16.01.2015 г. № 50-РТ правоотношения, возникающие из настоящего договора, регулируются действующим законодательством. Споры, возникающие по вопросам исполнения, изменения, дополнения настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Урегулирование вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора по обязательствам, осуществляется сторонами с обязательным соблюдением процедуры претензионного порядка разрешения споров.

Пунктом 5.4 договора от 16.01.2015 г. 50-РТ установлен срок действия договора - 7 лет..

Срок действия спорного договора в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от 6 июля 2023 года к нему продлен до 16.11.2026 г., срок исполнения обязательств по выплате выкупной цены за изымаемые па основании решения Администрации жилые помещения в аварийных домах (п.3.1.6.) был установлен до 16.01.2025 г.. то есть изменены сроки выполнения обязательств по пунктам 3.1.5, 3.1.6., 3.1.10, 3.1.16 и 3.1.17 договора.

Письмом от 11 июля 2024 года исх№275 истец обратился к ответчику о внесении изменений в спорный договор в части исключения из пункта 2.5 дома № 5 по улице судоремонтная в связи с технической ошибкой в части включения этого дома в условия договора, поскольку обозначенный дом согласно карте находится за территорией развития.

Письмом от 16 сентября 2024 года Администрация ГО г.Уфа отказалась внести изменения в спорный договор. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством 

На основании пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 названной статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. В пункте 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. Существенные условия договора о развитии застроенной территории определялись в части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно разъяснениям Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 60 постановления от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о развитии застроенной территории заключается органом местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

 ООО «СЗ УАМ-СТС» исковые требования о внесении изменений в пункт 2.5 договора №50-РТ от 16 января 2015 года обоснованы технической ошибкой сторон при заключении договора и включении в спорный пункт дома №5 по улице Судоремонтной. вместо дома 5а.

 Правовая конструкция иска об изменений условий договора, которые были согласованы сторонами при его заключении противоречит требованиям ст.450, 451 Гражданского кодекса РФ.

 Если условия договора / как указано истцом / противоречат положениям ст.ст.46.1, 46.2 Градостроительного кодекса РФ, то истцом избран ненадлежащий способ защиты его нарушенных прав. 

Пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

 В случае, когда положения договора частично противоречат закону, договор в этой части может быть признан недействительным.

С учетом вышеизложенного, судом установлено, что оснований для удовлетворения исковых требований ООО «СЗ УАМ-СТС» к Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан не имеется. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Понесенные истцом при подаче иска расходы по уплате государственной пошлины с учетом результатов рассмотрения спора подлежат отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева