АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел.(8422)33-46-09 Факс (8422)32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru 

 Сайт суда: www.ulyanovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть)

Дело № А72-8538/2019

г. Ульяновск

29 января 2020 года

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Котельникова А.Г.,  Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  

кодекса РФ, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Принять от истца заявление об уточнении исковых требований.   Исковые требования удовлетворить частично.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Атлант» в срок 2 месяца с  даты вступления в силу настоящего решения суда устранить недостатки выполненных  работ по договору подряда на проведение капитального ремонта № 11/15-3 от 20.05.2015 в  многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, а именно:  

- осуществить демонтаж снегозадерживающих устройств; 

- осуществить разборку покрытий кровель: из листовой стали;  

- осуществить разборку деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из  брусков с прозорами;  

- осуществить ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление  стропильных ног расшивкой досками с двух сторон;  

- осуществить установку стропил; 

- осуществить сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром  до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича;  

- осуществить постановку болтов: строительных с гайками и шайбами;  - осуществить устройство обрешетки сплошной из досок;  

- осуществить устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из  листовой стали;  

- осуществить устройство пароизоляции: прокладочной в один слой; - осуществить устройство контробрешетки; 

- осуществить устройство кровли из металочерепицы по готовым прогонам: средней  сложности;  

- осуществить резку стального профилироанного настила; - осуществить монтаж снегозадерживающих устройств. 

 В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлант» в пользу  Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области расходы  по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

 Перечислить с депозита Арбитражного суда Ульяновской области на счет общества с  ограниченной ответственностью «Независимость» 19 950 (девятнадцать тысяч девятьсот  пятьдесят) руб. за проведение судебной экспертизы.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлант» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Независимость» 23 100 (двадцать три тысячи сто) руб.  за проведение судебной экспертизы.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  порядке и сроки, установленные статьями 257-260 АПК РФ.  

 Судья А.Г. Котельников