РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 07 апреля 2025 года  

по делу № А33-3844/2024 Красноярск  

«7» апреля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Магистраль» в пользу Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства» 2 670 396,30 руб. неустойки за просрочку выполнения работ.  

В удовлетворении первоначального иска Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства» в остальной части отказать.  

Возвратить Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства» из федерального бюджета 35 617 руб. государственной пошлины, оплаченной платежным поручением № 1389 от 1.02.2024.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «СК Магистраль» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Магистраль» в доход федерального бюджета 21 832,25 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Р. Смольникова