АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А08-7674/2021

г. Белгород

15 октября 2021 года

Резолютивная часть решения принята 11 октября 2021 года

Мотивированное решение изготовлено 15 октября 2021 года

           Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Кощина В. Ф. рассмотрев    в порядке  упрощенного    производства  иск  АО "Лебединский ГОК" (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914) к ООО "МурманХимПром" (ИНН 3662116965, ОГРН 1063667292028) о взыскании задолженности, без вызова сторон, извещенных о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Белгородской области: http://belgorod.arbitr.ru

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 13.08.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов, в случае оплаты - доказательства оплаты задолженности. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

В соответствии со ст. 228 АПК РФ исковое заявление и приложенные к нему документы размещены в электронном виде на официальном сайте Арбитражного суда Белгородской области в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Ответчик направил в суд ходатайство о снижении размера неустойки по ст. 333 ГК РФ.

Суд рассмотрел дело по имеющимся доказательствам и 11.10.2021 принял резолютивную часть решения суда. 

14.10.2021 от истца через канцелярию суда поступило заявление о составлении мотивированного решения.

В соответствии с п.2 ст.229 АПК РФ мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Изучив собранные по делу доказательства, арбитражный суд приходит к следующему.

Между АО "Лебедиский ГОК" ( истец, покупатель) и ООО "МурманХимПром" (ответчик, поставщик) был заключен договор поставки №172102 от 21.09.2017г., в соответствии с которым поставщик обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить товар, согласно приложениям к договору.

Согласно Приложению №1 от 21.09.2017 г. к Договору (далее - Приложение № 1), поставщик обязался поставить Товар (ванна вакуум-фильтра УОП, 9 шт.) на общую сумму 7 392 757,23 руб. с НДС.

В соответствии с п. 3 Приложения № 1, Товар поставляется в адрес Покупателя. Поставщик своими силами и за счет собственных средств осуществляет доставку Товара на склад Покупателя в срок, указанный в п. 1 Приложения № 1.

Фактически, поставка Товара на Комбинат была произведена с нарушением срока:

- 1 шт. 12.12.2017 г. (товарная накладная № 193 от 11.12.2017 г.) на сумму 821 417,47 руб.;

- 1шт. 26.02.2018 г.(товарная накладная №19 от 26.02.2018 г.) на сумму821 417,47руб.;

- 1шт. 07.05.2018 г.(товарная накладная №45 от 04.05.2018 г.) на сумму821 417,47руб.;

- 1шт. 24.05.2018 г.(товарная накладная №57 от 23.05.2018 г.) на сумму821 417,47руб.;

- 1шт. 15.08.2018 г.(товарная накладная №99 от 15.08.2018г.) на сумму821 417,47руб.;

- 1 шт. 23.11.2018 г. (товарная накладная № 141от 22.11.2018 г.) на сумму 821 417,47 руб.

Согласно Приложению №7 от 08.06.2018 г. к Договору (далее - Приложение №7), Поставщик обязался поставить Товар на общую сумму 3 947 970,16 руб. с НДС.

В соответствии с п. 3 Приложения № 7, Товар поставляется в адрес Покупателя. Поставщик своими силами и за счет собственных средств осуществляет доставку Товара на склад Покупателя в срок, указанный в п. 1 Приложения № 7.

Фактически, поставка Товара на Комбинат была произведена с нарушением срока: Позиция № 1

- 2 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 37 778,40 руб.;

- 1 шт. 05.07.2019 г. (товарная накладная № 103 от 05.07.2019 г.) на сумму 18 889,20 руб.

Позиция № 2

- 1 шт. 08.05.2019 г. (товарная накладная № 60 от 08.05.2019 г.) на сумму 18 889,20 руб.

Позиция № 3

- 6 шт. 21.09.2018 г. (товарная накладная № 111 от 21.09.2018 г.) на сумму 16 822,08 руб.

Позиция № 4

- 4 шт. 21.09.2018 г. (товарная накладная № 111 от 21.09.2018 г.) на сумму 16 977,84 руб.

Позиция № 5

4 шт. 16.01.2019 г. (товарная накладная № 3 от 16.01.2019 г.) на сумму 10 553,92 руб.

Позиция № 7

6 шт. 13.11.2019 г. (товарная накладная № 136 от 13.11.2018 г.) на сумму 15 833,00 руб.;

3 шт. 18.07.2019 г. (товарная накладная № 97 от 26.06.2019 г.) на сумму 8 050,68 руб.

Позиция № 8

5 шт. 13.11.2018 г. (товарная накладная № 136 от 13.11.2018 г.) на сумму 12 947,55 руб.;

5 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 13 167,00 руб.

Позиция № 9

13 шт. 13.11.2018 г. (товарная накладная № 135 от 13.11.2018 г.) на сумму 51 971,92 руб. 5 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 15 от 06.02.2019 г.) на сумму 20 328,00 руб. Позиция № 10

7 шт. 12.12.2018 г. (товарная накладная № 159 от 11.12.2018 г.) на сумму 34 663,09 руб.;

5 шт. 21.11.2018 г. (товарная накладная № 140 от 20.11.2018 г.) на сумму 24 759,35 руб.

Позиция № 11

4 шт. 13.11.2018 г. (товарная накладная № 135 от 13.11.2018 г.) на сумму 15 960,21 руб.

10 шт. 21.11.2018 г. (товарная накладная № 140 от 20.11.2018 г.) на сумму 39 900,52 руб. 1 шт. 17.05.2019 г. (товарная накладная № 65 от 17.05.2019 г.) на сумму 4 057,68 руб.;

1 шт. 09.10.2018г. (товарная накладная № 123 от 08.10.2018 г.) на сумму 3 990,05 руб.;

8 шт. 15.02.2019г. (товарная накладная № 21от14.02.2019 г.) на сумму 32 461,44 руб.

Позиция № 12

5 шт. 05.12.2018 г. (товарная накладная № 154 от 05.12.2018 г.) на сумму 22 221,76 руб.

7 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 31 637,76 руб.

Позиция №  13

5 шт. 04.04.2019г. (товарная накладная № 47 от 04.04.2019 г.) на сумму 31 752,00 руб.

8 шт. 08.05.2019 г. (товарная накладная № 60 от 08.05.2019 г.) на сумму 50 803,20 руб.;

2 шт. 17.05.2019 г. (товарная накладная № 65 от 17.05.2019 г.) на сумму 12 700,00 руб.;

Позиция № 14

6 шт. 23.11.2018 г. (товарная накладная № 143 от 23.11.2018 г.) на сумму 23 714,46 руб.;

5 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 20 097,00 руб.;

1 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 15 от 06.02.2019 г.) на сумму 4 019,40 руб.

Позиция № 15

1 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 6 468,00 руб.;

1 шт. 08.05.2019 г. (товарная накладная № 60 от 08.05.2019 г.) на сумму 6 468,00 руб.

Позиция № 16

9 шт. 05.12.2018 г. (товарная накладная № 154 от 05.12.2018 г.) на сумму 39 625,34 руб.;

3 шт. 25.02.2019 г. (товарная накладная № 27 от 22.02.2019 г.) на сумму 13 432,32 руб.

Позиция № 17

5 шт. 21.11.2018 г. (товарная накладная № 140 от 20.11.2018 г.) на сумму 21 027,60 руб.; 13 шт. 24.01.2019 г. (товарная накладная № 5 от 23.01.2019 г.) на сумму 55 598,40 руб.

Позиция № 18

4 шт. 21.12.2018 г. (товарная накладная № 162 от 21.12.2018 г.) на сумму 31 920,42 руб.

Позиция № 19

шт. 04.04.2019 г. (товарная накладная № 47от04.04.2019 г.) на сумму 74 844,00 руб.;

5 шт. 07.06.2019 г. (товарная накладная № 83от07.06.2019 г.) на сумму 62 370,00 руб.

Позиция № 20

шт. 07.06.2019 г. (товарная накладная № 83от07.06.2019 г.) на сумму 104 744,11 руб.;

4 шт. 04.04.2019 г. (товарная накладная № 47от04.04.2019 г.) на сумму 209 488,22 руб.

Позиция № 21

5 шт. 16.01.2019 г. (товарная накладная № 3 от 16.01.2019 г.) на сумму 163 500,00 руб.

Позиция № 22

10 шт. 12.12.2018 г. (товарная накладная № 159 от 11.12.2018 г.) на сумму 26 762,40 руб.

шт. 06.12.2019 г. (товарная накладная № 155 от 06.12.2018 г.) на сумму 13 381,20 руб.

Позиция № 23

15 шт. 12.12.2018 г. (товарная накладная № 159 от 11.12.2018 г.) на сумму 44 157,96 руб.

Позиция № 24

- 10 шт. 12.12.2018 г. (товарная накладная № 159 от 11.12.2018 г.) на сумму 24 999,48 руб.;

- 5 шт. 07.06.2019 г. (товарная накладная № 83 от 07.06.2019 г.) на сумму 12 711,60 руб.

Позиция № 25

- 8 шт. 24.01.2019 г. (товарная накладная № 5 от 23.01.2019 г.) на сумму 19 588,80 руб.;

- 8 шт. 08.05.2019 г. (товарная накладная № 60 от 08.05.2019 г.) на сумму 19 588,80 руб.;

- 5 шт. 25.02.2019 г. (товарная накладная № 27 от 22.02.2019 г.) на сумму 12 243,00 руб.

Позиция № 26

- 14 шт. 13.11.2018 г. (товарная накладная № 136 от 13.11.2018 г.) на сумму 160 574,40 руб.;

- 4 шт. 16.01.2019 г. (товарная накладная № 3 от 16.01.2019 г.) на сумму 186 624,00 руб.;

- 3 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 11 от 31.01.2019 г.) на сумму 34 992,00 руб.

Позиция № 27

- 5 шт. 13.11.2018 г. (товарная накладная № 136 от 13.11.2018 г.) на сумму 41 418,00 руб.;

- 11шт.21.09.2018 г. (товарная накладная № 111 от 21.09.2018 г.) насумму91 119,60руб.;

- 10шт.23.11.2018 г. (товарная накладная № 143 от 23.11.2018 г.) насумму82 836,00руб.;

- 3 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 25 272,00 руб.;

- 5 шт. 24.01.2019 г. (товарная накладная № 5 от 23.01.2019 г.) на сумму 42 120,00 руб.;

- 7 шт. 16.04.2019 г. (товарная накладная № 52 от 15.04.2019 г.) на сумму 58 968,00 руб.;

- 2 шт. 17.07.2019 г. (товарная накладная № 103 от 05.07.2019 г.) на сумму 16 848,00 руб.;

- 7 шт. 21.12.2018 г. (товарная накладная № 162 от 21.12.2018 г.) на сумму 57 985,20 руб.

Позиция № 28

- 3 шт. 23.11.2018 г. (товарная накладная № 143 от 23.11.2018 г.) на сумму 26 643,00 руб.;

- 5 шт. 24.01.2019 г. (товарная накладная № 5 от 23.01.2019 г.) на сумму 47 700,00 руб.;

- 4 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 8 от 31.01.2019 г.) на сумму 38 160,00 руб.;

- 4 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 15 от 06.02.2019 г.) на сумму 38 160,00 руб.;

- 3 шт. 25.02.2019 г. (товарная накладная № 27 от 22.02.2019 г.) на сумму 28 620,00 руб.;

- 1 шт. 04.04.2019 г. (товарная накладная № 47 от 04.04.2019 г.) на сумму 9 540,00 руб.;

- 3 шт. 16.04.2019 г. (товарная накладная № 52 от 15.04.2019 г.) на сумму 28 620,00 руб.;

- 1 шт. 19.04.2019 г. (товарная накладная № 53 от 19.04.2019 г.) на сумму 9 540,00 руб.;

- 2 шт. 30.05.2019 г. (товарная накладная № 79 от 30.05.2019 г.) на сумму 19 080,00 руб.;

- 3 шт. 05.07.2019 г. (товарная накладная № 103 от 05.07.2019 г.) на сумму 28 620,00 руб.;

- 3 шт. 16.07.2019 г. (товарная накладная № 104 от 16.07.2019 г.) на сумму 28 620,00 руб.

Согласно Приложению № 8 от 08.06.2018 г. к Договору (далее - Приложение № 8), с учетом дополнительного соглашения №1 от 26.08.2019 г. к Приложению №8 Поставщик обязался поставить Товар на общую сумму 1 454 887,82 руб. с НДС.

Всоответствии с п. 3 Приложения № 8, Товар поставляется в адрес Покупателя.

Поставщик своими силами и за счет собственных средств осуществляет доставку Товара на склад Покупателя в срок, указанный в п. 1 Приложения № 8.

Фактически, поставка Товара на Комбинат была произведена с нарушением срока: Позиция № 2

- 2 шт. 21.09.2018 г. (товарная накладная № 111 от 21.09.2018 г.) на сумму 5 659,28 руб.

Позиция № 3

- 3 шт. 16.01.2019 г. (товарная накладная № 3 от 16.01.2019 г.) на сумму 7 915,44 руб.

Позиция № 5

- 4 шт. 18.07.2019 г. (товарная накладная № 97 от 26.06.2019 г.) на сумму 10 734,24 руб.

Позиция № 6

- 3 шт. 15.04.2019 г. (товарная накладная № 52 от 15.04.2019 г.) на сумму 19 051,20 руб.

Позиция № 7

- 6 шт. 06.02.2019 г. (товарная накладная № 15 от 06.02.2019 г.) на сумму 23 714,46 руб.

Позиция № 9

- 8 шт. 25.02.2019 г. (товарная накладная № 27 от 22.02.2019 г.) на сумму 35 222,53 руб.

Позиция № 10

- 9 шт. 04.04.2019 г. (товарная накладная № 47 от 04.04.2019 г.) на сумму 110 394,90 руб.

Позиция № 11

- 1 шт. 04.04.2019 г. (товарная накладная № 47 от 04.04.2019 г.) на сумму 51 499,19 руб.

Позиция № 12

- 1шт. 16.01.2019 г. (товарная накладная№3 от 16.01.2019 г.) на сумму 32 700,00 руб.

Позиция № 14

- 5шт. 12.12.2018 г. (товарная накладная№159 от 11.12.2018 г.) на сумму 14 719,32 руб.

Позиция № 15

8 шт. 04.04.2019 г. (товарнаянакладная№47 от 04.04.2019г.) на сумму 20 338,56 руб.;

2 шт. 07.06.2019 г. (товарнаянакладная№ 83 от 07.06.2019г.) насумму 5 084,64 руб.

Позиция № 16

8 шт. 25.02.2019 г. (товарнаянакладная№27 от 22.02.2019г.) насумму 12 038,95 руб.

Позиция № 17

2 шт. 25.02.2019 г. (товарнаянакладная№27 от 22.02.2019г.) насумму 23 328,00 руб.;

3 шт. 06.02.2019 г. (товарнаянакладная№11 от 31.01.2019г.) насумму 34 992,00 руб.

Позиция № 18

9 шт. 17.07.2019 г. (товарнаянакладная№104 от 16.07.2019 г.) на сумму 92 045,59 руб.;

4 шт. 22.02.2019 г. (товарнаянакладная№27 от 22.02.2019г.) насумму 33 696,00 руб.;

6 шт. 04.04.2019 г. (товарнаянакладная№47 от 04.04.2019г.) насумму 55 544,00 руб.;

5 шт. 16.04.2019 г. (товарнаянакладная№52 от 15.04.2019г.) насумму 42 120,00 руб.

В силу пункта 5.1. Договора, за нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере двойной ставки рефинансирования Банка России (годовых), существующей в период такого нарушения, от суммы неисполненного обязательства по поставке за каждый день просрочки.

Учитывая изложенное, Комбинат применил к ООО «МурманХимПром», ответственность, предусмотренную пунктом 5.1. Договора. Расчеит неусточки, представленной истцом выглядит следующим образом.

Приложение № 1

(1 шт. срок поставки октябрь 2017 г.)

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 42 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2017 г. по 12.12.2017 г.)/100 х 16,5/365 = 15 595,67 руб.;

(1 шт. срок поставки январь 2018 г.)

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 11 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.02.2018 г. по 11.02.2018 г.)/100 х 15,5/365 = 3 837,03 руб.;

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 15 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 12.02.2018 г. по 26.02.2018 г.)/100 х 15/365 = 5 063,53 руб.;

(1 шт. срок поставки апрель 2018 г.)

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 7 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.05.2018 г. по 07.05.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 2 284,21 руб.;

(1 шт. срок поставки апрель 2018 г.)

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 24 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.05.2018 г. по 24.05.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 7 831,59 руб.;

(1 шт. срок поставки июль 2018 г.)

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 15 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 4 894,74 руб.;

(1 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

821 417,47 (сумма неисполненного обязательства) х 23 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 23.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 7 764,08 руб.;

Приложение № 7

Позиция № 1 (8 шт. срок поставки - август 2018 г.)

37 778,40 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 240,13 руб.;

37 778,40 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 412,81 руб.;

37 778,40 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 834,23 руб.

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 120,06 руб.

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 706,40 руб.;

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 459,90 руб.

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 19 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 05.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 147,49 руб.

Позиция № 2 (3 шт. срок поставки - август 2018 г.)

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 120,06 руб.

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 706,40 руб.;

18 889,20 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 143 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2019 г. по 08.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 147,07 руб.

Позиция № 3 (6 шт. срок поставки - июль 2018 г.)

16 822,08 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 314,09 руб.

16 822,08 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.09.2018 г.)/100 х 15/365 = 34,57 руб.

Позиция № 4 (2 шт. срок поставки июль 2018 г.)

8 488,92 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 158,50 руб.

8 488,92 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.09.2018 г.)/100 х 15/365 = 17,44 руб.

Позиция № 4 (2 шт. срок поставки август 2018 г.)

8 488,92 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 53,96 руб.

8 488,92 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.09.2018 г.)/100 х 15/365 = 17,44 руб.

Позиция № 5 (4 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

10 553,92 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 333,97 руб.

10 553,92 (сумма неисполненного обязательства) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 138,94 руб.

Позиция № 7 (9 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

15 833,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 13 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 84,59 руб.

8 050,68 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 152,19 руб.

8 050,68 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 622,22 руб.050,68 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 32 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 18.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 105,87 руб.

Позиция № 8 (5 шт. срок поставки июль 2018 г.)

12 947,55 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 241,75 руб.

12 947,55 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 58 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 308,61 руб.

Позиция № 8 (5 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

13 167,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 416,65 руб.

13 167,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 290,76 руб.

Позиция № 9 (4 шт. срок поставки июль 2018 г.)

15 991,36 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 298,58 руб.

15 991,36 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 58 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 381,16 руб.

Позиция № 9 (9 шт. срок поставки август 2018 г.)

35 980,56 (сумма неисполненного обязательства 9 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 228,70 руб.

35 980,56 (сумма неисполненного обязательства 9 шт.) х 58 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 857,62 руб.

Позиция № 9 (5 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

20 328,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 643,26 руб.

20 328,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 448,89 руб.

Позиция № 10 (6 шт. срок поставки август 2018 г.)

24 759,35 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 157,37 руб.

24 759,35 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 66 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.11.2018 г.)/100 х 15,5/365 = 671,55 руб.

4 951,87 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 31,47 руб.

4 951,87 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 87 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 177,05 руб.

Позиция № 10 (6 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

29 711,22 (сумма неисполненного обязательства) х 42 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 512,82 руб.

Позиция № 11 (10 шт. срок поставки июль 2018 г.)

15 960,21 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 298,00 руб.

15 960,21 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 58 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 380,42 руб.

23 940,31 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 447,00 руб.

23 940,31 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 66 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 649,34 руб.

Позиция № 11 (5 шт. срок поставки август 2018 г.)

15 960,21 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 101,45 руб.

15 960,21 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 66 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 432,89 руб.

2 990,05 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 25,79 руб.

3 057,68 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 151,75 руб.

4 057,68 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 152 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 17.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 261,75 руб.

Позиция № 11 (9 шт. плановая поставка сентябрь 2018 г.)

3 990,05 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 9 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 09.10.2018 г.)/100 х 15/365 = 14,76 руб.

32 461,44 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 027,20 руб.

32 461,44 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 61 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 15.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 840,88 руб.

Позиция № 12 (12 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

22 221,76 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 35 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 05.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 319,63 руб.

31 637,76 (сумма неисполненного обязательства 7 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 598,08 руб.

31 637,76 (сумма неисполненного обязательства 7 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 698,63 руб.

Позиция № 13 (9 шт. срок поставки август 2018 г.)

31 752,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 201,82 руб.

31 752,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 187,44 руб.

31 752,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 469,73 руб.

25 401,60 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 161,46 руб.

25 401,60 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 949,95 руб.

25 401,60 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 143 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 08.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 542,54 руб.

Позиция № 13 (6 шт. срок поставка сентябрь 2018 г.)

25 401,60 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 803,80 руб.

25 401,60 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 143 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 08.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 542,54 руб.

12 700,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 401,88 руб.

12 700,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 152 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 17.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 819,76 руб.

Позиция № 14 (6 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

23 714,46 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 54 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 23.11.2019 г.)/100 х 15/365 = 526,27 руб.Позиция № 14 (6 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

20 097,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 635,95 руб.

20 097,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 443,79 руб.

4 019,40 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 127,19 руб.

4 019,40 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 88,76 руб.

Позиция № 15 (2 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

5 468,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 204,67 руб.

6 468,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 142,82 руб.

6 468,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 204,67 руб.

6 468,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 143 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 08.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 392,78 руб.

Позиция № 16 (5 шт. срок поставки август 2018 г.)

22 014,07 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 139,93 руб.

22 014,07 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 80 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 05.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 723,75 руб.

Позиция № 16 (7 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

17 611,26 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 66 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 05.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 477,68 руб.

13 432,32 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 425,05 руб.

13 432,32 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 71 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 404,99 руб.

Позиция № 17 (18 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

21 027,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 21.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 449,36 руб.

55 598,40 (сумма неисполненного обязательства 13 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 759,35 руб.

55 598,40 (сумма неисполненного обязательства 13 шт.) х 39 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 24.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 920,80 руб.

Позиция № 18 (4 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

31 920,42 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 193,74 руб.

31 920,42 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 21.12.2018 г.)/100 х 15,5/365 = 67,78 руб.

Позиция № 19 (6 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

74 844,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 414,86 руб.

74 844,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 3 464,35 руб.

Позиция № 19 (5 шт. срок поставки декабрь 2018 г.)

62 370,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 158 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.01.2019 г. по 07.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 4 184,77 руб.

Позиция № 20 (2 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

104 744,11 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 980,09 руб.

104 744,11 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 173 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 7 695,10 руб.

Позиция № 20 (4 шт. срок поставки ноябрь 2018 г.)

104 744,11 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.12.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 688,73 руб.

104 744,11 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 4 848,36 руб.

104 744,11 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.12.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 688,73 руб.

104 744,11 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 173 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 7 695,10 руб.

Позиция № 21 (5 шт. срок поставки декабрь 2018 г.)

163 500,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.01.2019 г. по 16.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 110,90 руб.

Позиция № 22 (15 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

26 762,40 (сумма неисполненного обязательства 10 шт.) х 42 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 461,93 руб.

13 381,20 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 36 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 06.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 197,97 руб.

Позиция № 23 (15 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

44 157,96 (сумма неисполненного обязательства 15 шт.) х 42 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 762,18 руб.

Позиция № 24 (5 шт. срок поставки июль 2018 г.)

12 499,74 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 233,39 руб.

12 499,74 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 87 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 446,91 руб.

Позиция № 24 (5 шт. срок поставки август 2018 г.)

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 79,45 руб.

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 87 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 446,91 руб.

Позиция № 24 (5 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 402,24 руб.

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 173 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 07.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 933,87 руб.

Позиция № 25 (5 шт. срок поставки август 2018 г.)

12 243,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 77,82 руб.

12 243,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 457,85 руб.

12 243,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 39 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 24.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 202,76 руб.

Позиция № 25 (5 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

7 345,80 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 232,45 руб.

7 345,80 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 39 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 24.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 121,66 руб.

4 897,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 154,97 руб.

4 897,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 71 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 147,65 руб.

Позиция № 25 (11 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

7 345,80 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 138,87 руб.

7 345,80 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 221,48 руб.

19 588,80 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 370,31 руб.

19 588,80 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 143 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 08.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 189,55 руб.

Позиция № 26 (10 шт. срок поставки август 2018 г.)

114 696,00 (сумма неисполненного обязательства 10 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 729,03 руб.

114 696,00 (сумма неисполненного обязательства 10 шт.) х 58 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 2 733,85 руб.

Позиция № 26 (11 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

45 878,40 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 13 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 245,10 руб.

186 624,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 3 527,96 руб.

186 624,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 456,79 руб.

34 992,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 661,49 руб.

34 992,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 772,70 руб.

Позиция № 27 (9 шт. срок поставки июль 2018 г.)

74 552,40 (сумма неисполненного обязательства 9 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 1 391,99 руб.

74 552,40 (сумма неисполненного обязательства 9 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.09.2018 г.)/100 х 15/365 = 153,19 руб.

Позиция № 27 (9 шт. срок поставки август 2018 г.)

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 105,30 руб.

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 21.09.2018 г.)/100 х 15/365 = 34,04 руб.

41 418,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 263,26 руб.

41 418,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 58 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 13.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 987,22 руб.

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 105,30 руб.

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 68 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 23.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 462,97 руб.

Позиция № 27 (10 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

66 268,80 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 54 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 23.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 470,62 руб.

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 524,25 руб.

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 21.12.2018 г.)/100 х 15,5/365 = 35,18 руб.

Позиция № 27 (14 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

41 418,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 782,97 руб.

16 567,20 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 5 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 21.12.2018 г.)/100 х 15,5/365 = 87,94 руб.

42 120,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 796,24 руб.

42 120,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 39 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 24.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 697,58 руб.

25 272,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 477,74 руб.

25 272,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 558,06 руб.

8 424,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 159,25 руб.

8 424,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 121 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 432,86 руб.

Позиция № 27 (14 шт. срок поставки ноябрь 2018 г.)

50 544,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.12.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 332,34 руб.

50 544,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 121 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 597,13 руб.

16 848,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.12.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 110,78 руб.

16 848,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 302,14 руб.

16 848,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 17.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 214,64 руб.

Позиция № 28 (12 шт. срок поставки август 2018 г.)

26 643,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 169,35 руб.

26 643,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 68 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 23.11.2018 г.)/100 х 15/365 = 744,54 руб.

47 700,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 303,19 руб.

47 700,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 783,85 руб.

47 700,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 39 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 24.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 789,99 руб.

38 160,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 242,55 руб.

38 160,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 427,08 руб.

38 160,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 842,66 руб.

Позиция № 28 (12 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

38 160,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 207,53 руб.

38 160,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 842,66 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 905,65 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 71 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 842,66 руб.

9 540,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 301,88 руб.

9 540,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 441,58 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 905,65 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 121 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 470,60 руб.

9 540,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 301,88 руб.

8 540,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 124 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 19.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 502,35 руб.

Позиция № 28 (12 шт. срок поставки октябрь 2018 г.)

19 080,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 360,69 руб.

19 080,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 165 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 30.05.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 336,91 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 541,04 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 211,97 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 19 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 05.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 223,47 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 46 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.11.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 541,04 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 211,97 руб.

28 620,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 30 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 16.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 352,85 руб.

Приложение № 8

Позиция № 2 (2 шт. срок поставки июль 2018 г.)

5 659,28 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 105,67 руб.

5 659,28 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 211,64 руб.

5 659,28 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 437,39 руб.

5 659,28 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 42 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 28.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 97,68 руб.

5 659,28 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 42 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 29.07.2019 г. по 08.09.2019 г.)/100 х 14,5/365 = 94,42 руб.

4 659,28 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 13 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 09.09.2019 г. по 21.09.2019 г.)/100 х 14/365 = 28,22 руб.

Позиция № 3 (3 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

7 915,44 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 250,47 руб.

7 915^4 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 104,20 руб.

Позиция № 5 (6 шт. срок поставки август 2018 г.)

10 734,24 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 68,23 руб.

10 734,24 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 401,43 руб.

10 734,24 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 829,62 руб.

9 734,24 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 32 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15/365 = 141,16 руб.

Позиция № 6 (9 шт. срок поставки июль 2018 г.)

19 051,20 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 355,71 руб.

19 051,20 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 712,46 руб.

19 051,20 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 120 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 15.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 970,83 руб.

Позиция № 7 (6 шт. срок поставки август 2018 г.)

23 714,46 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 150,73 руб.

23 714,46 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 =886,86 руб.

23 714,46 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 832,84 руб.

23 714,46 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 20 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2019 г. по 06.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 194,91 руб.

Позиция № 9 (8 шт. срок поставки август 2018 г.)

35 222,53 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 223,88 руб.

35 222,53 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 317,23 руб.

35 222,53 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 71 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 1 061,98 руб.

Позиция № 10 (9 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

110 394,90 (сумма неисполненного обязательства 9 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 3 493,32 руб.

110 394,90 (сумма неисполненного обязательства 9 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 5 109,92 руб.

Позиция № 11 (1 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

51 499,19 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 629,63 руб.

51 499,19 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 383,78 руб.

Позиция № 12 (16 шт. срок поставки сентябрь 2018 г.)

32 700,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 77 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.10.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 034,75 руб.

32 700,00 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.01.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 430,48 руб.

Позиция № 14 (5 шт. срок поставки июль 2018 г.)

14 719,32 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 274,83 руб.

14 719,32 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 87 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 12.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 526,27 руб.

Позиция № 15 (5 шт. срок поставки июль 2018 г.)

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 237,34 руб.

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 475,38 руб.

12 711,60 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 588,39 руб.

Позиция № 15 (5 шт. срок поставки август 2018 г.)

7 626,96 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 48,48 руб.

7 626,96 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 285,23 руб.

6 626,96 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 353,03 руб.

5 084,64 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 32,32 руб.

5 084,64 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 190,15 руб.

5 084,64 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 235,36 руб.

Позиция № 16 (5 шт. срок поставки август 2018 г.)

6 524,34 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 47,83 руб.

7 524,34 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 281,39 руб.

7 524,34 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 71 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 235,36 руб.

Позиция № 17 (10 шт. срок поставки август 2018 г.)

34 992,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 222,41 руб.

34 992,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 308,60 руб.

34 992,00 (сумма неисполненного обязательства 3 шт.) х 52 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 772,70 руб.

23 328,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 148,28 руб.

23 328,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 872,40 руб.

23 328,00 (сумма неисполненного обязательства 2 шт.) х 71 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 25.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 703,36 руб.

Позиция № 18 (16 шт. срок поставки июль 2018 г.)

33 696,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 629,15 руб.

33 696,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 206,14 руб.

33 696,00 (сумма неисполненного обязательства 4 шт.) х 68 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 22.02.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 772,70 руб.

55 544,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 1 037,07 руб.

55 544,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 2 077,19 руб.

55 544,00 (сумма неисполненного обязательства 6 шт.) х 109 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 04.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 571,00 руб.

42 120,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 786,43 руб.

42 120,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 1 575,17 руб.

42 120,00 (сумма неисполненного обязательства 5 шт.) х 121 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.04.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 2 164,28 руб.

10 227,28 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 47 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.08.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 190,96 руб.

10 227,28 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 382,47 руб.

10 227,28 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 790,44 руб.

10 227,28 (сумма неисполненного обязательства 1 шт.) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2018 г. по 17.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 130,29 руб.

Позиция № 18 (8 шт. срок поставки август 2018 г.)

81 818,30 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 16 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)/100 х 14,5/365 = 520,05 руб.

81 818,30 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 91 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.)/100 х 15/365 = 3 059,78 руб.

81 818,30 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 182 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.12.2018 г. по 16.06.2019 г.)/100 х 15,5/365 = 6 323,55 руб.

81 818,30 (сумма неисполненного обязательства 8 шт.) х 31 (кол-во дней просрочки поставки Товара в период с 17.06.2018 г. по 17.07.2019 г.)/100 х 15/365 = 1 042,34 руб.

Общая сумма неустойки, по мнению истца, составляет 232 247, 51 руб.

Истец направил в адрес ответчика претензии от 28.08.2019 и  от16.01.2021г. с требованием оплаты неустойки за нарушение сроков оплаты. Однако претензии истца оставлена без удовлетворения.

В связи с чем, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обстоятельства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удерживанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

На основании пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статьи 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Ответчика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Истец начислил ответчику неустойку в силу пункта 5.1 Договора: за нарушение сроков поставки товара поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России (годовых), существующей в период такого нарушения, от суммы неисполненного обязательства по поставке за каждый день просрочки.

Истцом представлен расчет суммы неустойки за каждую партию поставленного товара, который составил 232 247, 51 руб., расчет судом проверен, признан правильным.

Досудебный порядок предъявления требования о взыскании неустойки истцом соблюден.

Приведенный истцом расчет неустойки соответствует условиям договора и не нарушает прав ответчика. Учитывая, что ответчик надлежащим образом не исполнил обязанность по оплате товара, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за неисполнение договорных обязательств является обоснованным.

При решении вопроса о взыскании неустойки, суд обязан исследовать соразмерность подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства                (ст.333 ГК РФ). В силу  положений ст.330 ГК РФ неустойка носит компенсационный характер и должна быть соразмерна последствиям нарушения обязательств.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24 марта 2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон, ответчик в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса РФ, осуществляя предпринимательскую деятельность на свой риск, должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий, связанных с ненадлежащим исполнением принятых по договору поставки обязательств. Уплата неустойки  обусловлена исключительно с несвоевременной оплатой принятого по договору товара. Риск наступления данной ответственности напрямую зависит от действий самого ответчика. При этом ответчик, действуя как профессиональный участник гражданского оборота, мог и должен был при заключении договора разумно рассчитать срок, необходимый для оплаты по договору во избежание применения к нему штрафных санкций.

Ответчик, добровольно приняв на себя соответствующие обязательства, несет риск несения ответственности за их ненадлежащее исполнение в соответствии с условиями заключенного с истцом договора.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Ответчик ходатайствовал об уменьшении размера неустойки, ввиду несоразмерности. 

В своих возражениях на ходатайство о снижении размера неустойки истец аргументировал соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства условиями договора. 

Суд учитывает, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны предусмотрели размер неустойки в договоре. В соответствии с названной нормой юридические лица и свободны в заключении договора.

Исходя из обычаев делового оборота, стороны устанавливают в договоре повышенную по сравнению с предусмотренной законом ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Ответчик, добровольно приняв на себя соответствующие обязательства, несет риск несения ответственности за их ненадлежащее исполнение в соответствии с условиями заключенного с истцом договора.

Согласно пункту 77 названного Постановления снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, нарушившей обязательство, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 73 Постановления, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. В данном случае ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

В данном случае ответчик в силу положений пункта 1 статьи 66, пункта 1 статьи 87 Гражданского кодекса Российской Федерации является коммерческой организацией, и принимая во внимание компенсационный характер неустойки, согласованной в договоре неустойку, продолжительность допущенной ответчиком просрочки оплаты товара, непредставление ответчиком доказательств несоразмерности заявленной к взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства со стороны ответчика, суд первой инстанции не усматривает правовых оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о применении статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

Доказательств опровергающих доводы истца ответчик суду не представил. 

Суд также учитывает длительный период просрочки исполнения обязательства по поставке некоторых позиций товара, а также значительную стоимость товара.

При таких обстоятельствах, суд считает обоснованным исходить из имеющихся в деле доказательств, взыскать с ответчика 232 247, 51 руб. неустойки.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, исходя из части 1 статьи 110 АПК РФ, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями  167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с ООО "МурманХимПром" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу АО "Лебединский ГОК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму неустойки по договору поставки №172102 от 21.09.2014 в сумме 232 247,51 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 7 645 руб.

  Мотивированное решение может быть изготовлено в течение пяти дней со дня поступления соответствующего заявления от лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия.

Исполнительный лист на основании судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, выдается по заявлению взыскателя. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме

Судья               

                                                    Кощин В. Ф.