15/2022-128934(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ 

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации)  

(резолютивная часть)

Дело № А66-10998/2022

г.Тверь

27 октября 2022 года

 

Руководствуясь статьями 49, 110, 151, 151, 156, 167-171, 176,  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от исковых требований в части взыскания  238 655,50 руб. неустойки.  

Производство по делу в указанной части прекратить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Спецдорстрой», Московская область, г.Раменское, ул.Москворецкая,  д.45, офис1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации - 23.03.2017, в течение двух недель,  начиная с 01 мая 2023 года устранить выявленные в пределах  гарантийного срока недостатки работ, выполненных по муниципальному  контракту от 16 августа 2021 года № 0136300051121000029, а именно:  

 просадку полотна у подъездов 4 и 5 площадью 10 кв.м, отставание  кромки асфальтобетонного покрытия тротуара от бордюрного камня,  просадку асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках и  подъездных путях от д.7 и д.11 площадью 20 кв.м, и на тротуаре  площадью 1 кв.м, на протяжении всей дворовой территории - келейность  130 м вследствие выпучивания основания на дорожном покрытии.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Спецдорстрой», Московская область, г.Раменское, ул.Москворецкая,  д.45, офис1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации - 23.03.2017, в доход федерального  бюджета в установленном законом порядке 6 000 руб. государственной  пошлины  

 На случай неисполнения обществом с ограниченной  ответственностью «Спецдорстрой», Московская область, г.Раменское,  решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Спецдорстрой», Московская область, г.Раменское, ул.Москворецкая,  д.45, офис1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации - 23.03.2017, в пользу администрации  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации - 22.10.1996, денежную сумму в размере  2 500 руб. за каждый из пяти первых дней неисполнения обязательства, в  размере 3 000 руб. за каждый из следующих пяти дней неисполнения  обязательства, в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки  исполнения обязательства, начиная с 11 дня просрочки и по день  фактического исполнения обязательства.  

 В удовлетворении оставшейся части требований отказать. 

 Исполнительные листы выдать взыскателю в порядке статьи 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после  вступления решения в законную силу.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд, город Вологда, в течение месяца со  дня его принятия.  

Судья И.В.Калита