АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-6823/21

24 февраля 2022 года.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   16 февраля 2022 г.

Полный текст решения изготовлен            24 февраля 2022 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительные решения" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к государственному бюджетному учреждению Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании задолженности,

при участии:

от истца:  представитель не явился, 

от ответчика: представитель не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строительные решения" обратилось в суд с иском к государственному бюджетному учреждению Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом" о взыскании 2 451 277 руб. задолженности по контракту №0358200011820000011 от 29.05.2020, 1 870 393,38 руб. задолженности по контракту №0358200011820000010 от 29.05.2020.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены.

Судом в порядке ч.1 ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уменьшении цены иска до 3 361 084,21 руб. задолженности.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом правил статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Определения суда, выносимые по рассматриваемому делу, опубликованы на официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующее.

29 мая 2020 года между ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» (заказчик) и ООО «Строительные решения» (подрядчик) заключен контракт № 0358200011820000011 от 29.05.2020 на капитальный ремонт здания ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО», расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Железнодорожная, 5.

Указанный контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме, ИКЗ 202616707758761670100100270014120000 (протокол от 12.05.2020 № 0358200011820000011) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта подрядчик обязуется в соответствии с требованиями проектно-сметной документацией в установленный настоящим контрактом срок в пределах установленной настоящим контрактом цены с использованием своих материалов выполнить, а заказчик - принять и оплатить работы по Капитальному ремонту здания ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Железнодорожная, 5.

Сроки выполнения работ (промежуточные сроки): с даты заключения контракта в течение 120 календарных дней и определяются графиком выполнения строительно-монтажных работ согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью контракта (пункт 1.2).

В силу пункта 2.1 контракта в соответствии с результатами аукциона в электронной форме цена контракта (цена работ) составляет: 24 885 545,10 руб.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

Согласно пункту 2.5 контракта изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.5.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работ и иных условий контракта; 

2.5.2. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

2.5.3 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

Пунктом 2.6.контракта установлено, что оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе капитального ремонта, осуществляется заказчиком на основании акта (протокола совещания) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, согласованных подрядчиком, проектной организацией (разработчиком проекта) и утвержденных заказчиком.

Стороны определили, что срок действия контракта:

с даты заключения контракта по 15.12.2020, а в части обязательств, не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту (пункт 4.2). 

При выполнении работ по контракту выявлены дополнительные работы, не учтенные в технической документации и смете, влекущие увеличение сметной стоимости строительства. Перечень работ был согласован с представителем заказчика по вопросам строительного контроля ИП ФИО2

При отсутствии возражений со стороны ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» и представителя заказчика по вопросам строительного контроля АНО «НИИ ЭКОПРОЕКТ» указанные работы выполнены ООО «Строительные решения» в целях обеспечения завершения технологических процессов и соблюдения сроков исполнения контракта. Общая стоимость таких работ составляет 2 451 277 руб., перечень выполненных работ подтверждается сметными расчетами и актами выполненных работ, направленными в адрес заказчика. От ответчика каких-либо возражений по производству работ и их качеству не поступило, однако указанные работы не были приняты и оплачены.

В соответствии с условиями контракта (пункт 9.1) в адрес ответчика 15.01.2021 направлена претензия, ответ на которую в установленный договором 30-дневный срок не поступил.

29 мая 2020 года между заказчиком ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» и подрядчиком ООО «Строительные решения» заключен контракт № 0358200011820000010 от 29.05.2020 на капитальный ремонт здания ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" по адресу: 

<

...>, 18а г. Ростов-на-Дону (далее – Контракт № 0358200011820000010).  

В силу пункта 1.1. контракта подрядчик обязуется в соответствии с требованиями проектно-сметной документацией в установленный настоящим контрактом срок в пределах установленной настоящим контрактом цены с использованием своих материалов выполнить, а заказчик - принять и оплатить работы по Капитальному ремонту здания ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" по адресу: 

<

...>, 18а, г. Ростов-на-Дону.

Сроки выполнения работ (промежуточные сроки): с даты заключения контракта в течение 120 календарных дней и определяются графиком выполнения строительно-монтажных работ согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью контракта (пункт 1.2).

В соответствии с результатами аукциона в электронной форме цена контракта (цена работ) составляет: 18 703 933,80 (восемнадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот тридцать три) рублей 80 копеек, НДС не облагается.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

Согласно пункту 2.5 контракта изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.5.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работ и иных условий контракта; 

2.5.2. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

2.5.3 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

Пунктом 2.6. данного контракта предусмотрено, что оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе капитального ремонта, осуществляется заказчиком на основании акта (протокола совещания) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, согласованных подрядчиком, проектной организацией (разработчиком проекта) и утвержденных заказчиком.

Стороны определили, что срок действия контракта: с даты заключения контракта по 15.12.2020, а в части обязательств, не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

При выполнении работ по контракту были выявлены дополнительные работы, не учтенные в технической документации и смете, влекущие увеличение сметной стоимости строительства. Перечень работ был согласован с представителем заказчика по вопросам строительного контроля ИП ФИО2

При отсутствии возражений со стороны ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» и представителя заказчика по вопросам строительного контроля АНО «НИИ ЭКОПРОЕКТ» указанные работы были выполнены ООО «Строительные решения» в целях обеспечения завершения технологических процессов и соблюдения сроков исполнения контракта. Общая стоимость таких работ составляет 1 870 393,38 руб., перечень выполненных работ подтверждается сметными расчетами и актами выполненных работ, направленными в адрес заказчика. От ответчика каких-либо возражений по производству работ и их качеству не поступило, однако указанные работы не были приняты и оплачены.

В соответствии с условиями контракта (пункт 9.1) в адрес ответчика 15.01.2021 направлена претензия, ответ на которую в установленный договором 30-дневный срок не поступил. 

Общая сумма выполненных и неоплаченных заказчиком работ составила 4 321 670,38 руб.

15.01.2021 истец направил претензии ответчику с просьбой платы 4 311 670,38 руб. по контрактам.

Претензии ответчиком оставлены без финансового удовлетворения.

Изложенные обстоятельства явились основанием для подачи для искового заявления в суд.

Спорные правоотношения по своей правовой природе возникают из договора на выполнение подрядных работ, в силу чего подпадают под правовое регулирование общих норм обязательственного права части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также подлежат специальному регулированию нормами главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Нормы законодательства о подряде подлежат применению к отношениям сторон с учетом особенностей, уставленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"; далее - информационное письмо №51).

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

 

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, указал, что дополнительные работы, оплату которых требует истец не были учтены в технической документации и не согласованы с ответчиком. Ответчик своего согласия на эти работы не давал. В то же время ответчиком заключены договоры с ООО «НЭОО «Эксперт» №44 от 18.02.2021 и №28 от 17.02.2021, предметом которых являлось проведение строительно-технического исследования объектов, указанных в исковом заявлении. На разрешение специалиста были поставлены вопросы: определить необходимость выполнения дополнительных работ на объектах, на которых проводились подрядные работы. Из заключений №117 от 20.02.2021, №49 от 07.04.2021 следует, что выполнение дополнительных видов работ специалист считает необходимым, без их выполнения  невозможно ввести объекты в эксплуатацию.

Письмом от 21.07.2021 № 41.04.13/1891 ответчиком заявлено о готовности оплатить стоимость материалов, указанных в уточненных исковых требованиях истца.

По ходатайству истца определением суда от 17.09.2021 по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза. 

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1) Являлось ли выполнение дополнительных работ, указанных в локальных сметах: № 02-01-01 (доп. работы), № 02-02-01 (доп. работы), № 02-02-04 (доп. работы), № 04-01 (доп. работы) необходимым для достижения результатов работ, предусмотренных заключенным государственным контрактом №0358200011820000010 от 29.05.2020 и государственным контрактом №0358200011820000011 от 29.05.2020, в целях эксплуатации объектов строительства?

2) Какова стоимость дополнительных работ с учетом стоимости материалов, указанных в локальных сметах: № 02-01-01 (доп. работы), № 02-02-01 (доп. работы), № 02-02-04 (доп. работы), № 04-01 (доп. работы) для достижения результатов работ, предусмотренных заключенным государственным контрактом №0358200011820000010 от 29.05.2020 и государственным контрактом №0358200011820000011 от 29.05.2020?

В материалы дела 14.01.2021 поступило заключение экспертов № 206/09/2021 от 12.01.2022.

Эксперты пришли к следующим выводам.

По первому вопросу:

«Экспертом в ходе проведенного исследования выявлено, что выполнение дополнительных работ, указанных в локальных сметах «02-01-01 (доп. Работы) необходимо для достижения результата работ, предусмотренных государственными контрактами № 0358200011820000010 от 29.05.2020 и № 0358200011820000011 от 29.05.2020, в целях эксплуатации объектов строительства в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации в области строительства».

По второму вопросу:

«Экспертом определена стоимость фактически качественно выполненных ООО «Строительные решения» дополнительных работ и примененных материалов по государственному контракту № 0358200011820000011 от 29.05.2020 в размере 2 172 994 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 03 (Три) копейки, в том числе:

№

Номер локальной сметы

Стоимость фактически выполненных работ, руб.

1

1

81 837,36

2

02-01-01

1 712 038,10

3

02-02-01

114 877,07

4

2

62 793,32

5

07-01-01

201 448,18

Экспертами определена стоимость фактически качественно выполненных ООО «Строительные решения» дополнительных работ и примененных материалов по государственному контракту № 0358200011820000010 от 29.05.2020 в размере 1 188 090 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч девяносто) рублей 18 (восемнадцать) копеек, в том числе:

№

Номер локальной сметы

Стоимость фактически выполненных работ, руб.

1

02-01-01

696 478,54

2

02-02-04

383 131,95

3

04-01

108 479,69

 

Согласно статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио - и видеозаписи, иные документы и материалы. Все доказательства должны быть получены и исследованы в соответствии с требованиями федерального законодательства. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом в совокупности с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Заключение эксперта признается одним из доказательств по делу наравне со всеми иными видами доказательств. 

Оценивая указанные доказательства, суд исходит из того, что заключение эксперта является одним из видов доказательств по делу, исследуется и оценивается наряду с другими доказательствами, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оценке наравне с другими представленными доказательствами (определение ВАС РФ от 17.02.2012 № ВАС-649/12). 

Исходя из содержания статей 86 и 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта должно быть ясным для понимания и не должно допускать неоднозначного толкования или вводить в заблуждение. 

Статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. 

Оценив в порядке статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертное заключение и дополнение к экспертному судебному заключению, суд находит его надлежащим и достоверным, экспертное исследование проведено в соответствии с требованиями законодательства, статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в заключении эксперта отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», статьей 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» сведения. 

Процедура назначения и проведения судебной экспертизы соблюдена. Привлеченные к исследованию эксперты обладали необходимым образованием и стажем работы в экспертной сфере и исследуемой области, необходимых для проведения подобных исследований, о чем свидетельствуют представленные документы, подтверждающие квалификацию данных экспертов. 

Кроме того, эксперты перед проведением экспертного исследования предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Экспертное заключение ООО «Экспертное учреждение «Ростовский экспертно-правовой центр «Дон» суд находит мотивированным, выводы экспертов являются полными, не содержат неясностей, основаны на исследованных ими обстоятельствах, представленных для производства экспертизы документах, содержат ссылки на указанные документы. Противоречия в выводах экспертов отсутствуют, оснований сомневаться в обоснованности заключения не имеется, в связи с чем, суд принял во внимание заключение судебных экспертов как надлежащее доказательство по делу и оценивается наряду с иными доказательствами.

Как следует из материалов дела, между сторонами дела возникли отношения из договора подряда. Оценив существо договоров № 0358200011820000010 от 29.05.2020 и № 0358200011820000011 от 29.05.2020 суд приходит к выводу, что договоры соответствуют требованиям закона по форме и содержанию, что позволяет сделать выводы об их заключенности. Материалы дела не содержат доказательства о том, что договоры оспорены либо признаны в установленном порядке недействительными.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ (пункт 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу положений статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимость выполнения дополнительных работ должна быть направлена на достижение результата по основному договору.

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

«1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.»

В пункте 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 июня 2017 г.) разъяснено, что следует учитывать специфику отношений, складывающихся в сфере строительства, которая уже в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства дополнительных работ и в связи с этим обусловливает приоритетную необходимость применения норм ст. 743 ГК РФ наряду с положениями Закона о контрактной системе.

В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

В силу п. 5 ст. 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по независящим от него причинам.

С учетом положений ст. 8, ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе, увеличение объема работ по государственному (муниципальному) контракту, в том числе, когда такое увеличение превышает 10% от цены или объема, предусмотренных контрактом, допустимо исключительно в случае, если их невыполнение грозит годности и прочности результата выполняемой работы. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта, объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

По смыслу приведенных норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит п. 4 ст. 1 ГК РФ.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, относятся работы, которые не были учтены в технической документации, но должны были быть учтены, поскольку без их выполнения подрядчик не мог приступить к другим работам или продолжать уже начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного договором результата.

Исходя из приведенных норм, в предмет доказывания по настоящему делу входят следующие обстоятельства:

- имелась ли необходимость в проведении дополнительных работ;

- исполнена ли подрядчиком обязанность по уведомлению заказчика о необходимости проведения дополнительных работ и совершены ли им действия, предусмотренные частью 3 статьи 743 ГК РФ;

- получено ли согласие заказчика на проведение дополнительных работ;

- выполнены ли фактически дополнительные работы, их объем и стоимость.

В обоснование своей позиции истец представляет сметные расчеты, акты выполненных работ, переписку между сторонами, из которой следует, что работы выполнялись подрядчиком с уведомлением заказчика при отсутствии возражений последнего.

По делу собраны доказательства, подтверждающие факты выполнения работ, которые носят необходимый характер. Эти факты не опровергнуты ответчиком.

Стоимость дополнительных работ подтверждается: справками о стоимости выполненных работ; актом № 1 на дополнительные работы при производстве работ по объекту: Капитальный ремонт здания ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО», расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Железнодорожная, 5; актом № 1 на дополнительные работы при производстве работ по объекту: Капитальный ремонт здания ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО», расположенного по адресу: г. Ростов- на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, 18а; локальными сметными расчетами по государственному контракту № 0358200011820000011 от 29.05.2020 года № 02-01-01 (доп. работы), № 02-02-01 (доп. работы), №2; локальными сметными расчетами по государственному контракту № 0358200011820000010 от 29.05.2020 года № 07-01-01, № 02-02-04 (доп. работы), №04-01 (доп. работы); часть выполненных работ; являющихся скрытыми, представлена в акте освидетельствования скрытых работ № 1-А от 20 ноября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 11/Э/А от 30 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 10/Э/А от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 9/Э/А от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 8/Э/А от 27 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 7/Э/А от 24 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 6/Э/А от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 5/Э/А от 27 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 4/Э/А от 25 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 3/Э/А от 22 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 2/Э/А от 8 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1 /Э/А от 3 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 8/Э/Б от 30 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 7/Э/Б от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 6/Э/Б от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 5/Э/Б от 27 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 4/Э/Б от 24 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 3/Э/Б от 22 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 2/Э/Б от 21 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1/Э/Б от 16 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 13-Вот21 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 12-В от 16 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 11 -В от 14 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ№ 10-В от 10 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 9-В от 08 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 8-В от 04 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 7-В от 02 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 6-В от 31 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 5-В от 28 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 4-В от 18 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 3-В от 17 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 2-В от 14 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1 -В от 13 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1/АПС/А от 15 октября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 4/Э/АА1 от 09 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № З/Э/AAl от 09 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 2/Э/АА1 от 09 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1/Э/АА1 от 09 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 8/Э/ВВ1 от 30 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 7/Э/ВВ1 от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 6/Э/ВВ1 от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 5/Э/ВВ1 от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 4/Э/ВВ1 от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 3/Э/ВВ1 от 14 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 5/Э/АА1 от 09 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 6/Э/АА1 от 23 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 7/Э/АА1 от 23 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 8/Э/АА1 от 23 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 9/Э/АА1 от 23 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 10/Э/АА1 от 24 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 11/Э/АА1 от 24 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 12/Э/АА1 от 24 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 13/Э/АА1 от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 14/Э/АА1 от 28 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 15/Э/АА1 от 30 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1/Э/ВВ1 от 03 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 2/Э/ВВ1 от 13 июля 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1 -К от 31 августа 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 2-К от 02 ноября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1/АПС/В от 25 сентября 2020 года, акте освидетельствования скрытых работ № 1/КР/ОГ от 20 июня 2020 года; проектной документацией: техническое заключение о состоянии строительных конструкций № 16/20- ОБ по объекту «Капитальный ремонт здания ГБУРО «Ростовская областная СББЖ с ПО» по адресу: 

<

...> Литер А, А1», конструктивные и объемно-планировочные решения Конструктивные решения 16/20- КР Капитальный ремонт здания ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с ПО» по адресу: 

<

...> Литер А, А1; экспертным заключением №206/09/2021 от 12.01.2022; перепиской между сторонами: письма №4 от 18.01.2021, №5 от 18.01.2021.

Также суд принимает во внимание позицию ответчика по делу, в которой он не возражает против оплаты стоимости материалов по дополнительным работам.

Совокупность собранных по делу доказательств позволяет сделать вывод о том, что выполненные истцом дополнительные работы являются необходимыми для достижения целей, установленных государственными контрактами, необходимыми для эксплуатации объектов капитального ремонта по государственным контрактам, стоимость дополнительных работ не превышает 10% от цены государственных контрактов, а результат работ имеет потребительскую ценность и используется заказчиком.

При указанных обстоятельствах, с учетом выводов судебной экспертизы подлежит взысканию с ответчика в пользу истца 3 361 084,21 руб. (уточненные требования) задолженности.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом, с другой стороны, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Истцом оплачена госпошлина в размере 44 608 руб. платежным поручением №51 от 24.02.2021.

Государственная пошлина по делу составляет 39 805 руб.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом удовлетворения заявленных исковых требований, расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в размере 39 805 руб., а излишне уплаченная государственная пошлина возврату истцу.

Так же, истцом понесены расходы по оплате судебной экспертизы в размере 20 000 руб., что подтверждается платежным поручением №351 от 06.09.2021, которые так же подлежат возмещением ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительные решения" 3 420 889,21 руб., из них 3 361 084,21 руб. – задолженность, 20 000 руб. – судебные расходы по оплате судебной экспертизы, 39 805 руб. – судебные расходы по оплате госпошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительные решения" из федерального бюджета 4 803 руб. госпошлины, уплаченной платежным поручением №51 от 24.02.2021.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья          Меленчук И. С.