Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-105793/23

03 апреля 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АО «Стройтрансгаз»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ГКУ МО «Дирекция дорожного  строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об изменении  государственного контракта № 1/2019-14 от 29.05.2019,о взыскании судебных расходов по  оплате государственной пошлины,  

при участии в судебном заседании лиц, согласно протоколу 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести в государственный контракт № 1/2019-14 от 29.05.2019 следующие  

изменения: 

1. Пункт 3.4. Контракта изложить в следующей редакции:  

«3.4. Срок выполнения работ по Контракту 63 месяцев с даты начала выполнения  

работ, в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 6)». 

2. Пункт 18.1 Контракта изложить в следующей редакции:  

«18.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами, и  

действует до 30 апреля 2025 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не  

освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств». 

3.Приложение № 6 «График производства работ» к Контракту изложить в редакции  

Приложения № 1 «График производства работ» к настоящему Соглашению.  

4. Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» к  

Контракту изложить в редакции Приложения № 2 «Сведения об обязательствах сторон и  

порядке оплаты» к настоящему Соглашению. 

Взыскать с ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» в пользу АО  

«Стройтрансгаз» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000,00 руб. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  

Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  

(изготовления в полном объеме). 

Судья Т.Ю. Цыганкова