Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело  № А64-4199/2023

28 декабря 2023 года

г. Тамбов

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2023 года.

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яковлевой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», Знаменский район, Тамбовская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 

обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-Т», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

 о взыскании задолженности

 

при участии в судебном заседании

от истца: не явился, извещен (до перерыва – ФИО1, представитель по доверенности № 2023-27 от 02.10.2023),

от ответчика: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-Т» с требованием о взыскании задолженности по договору на строительство телятника на 500 голов (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.10.2020 к вышеуказанному договору: здание по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области) от 20.01.2020, по договору подряда №5 от 16.11.2020 в размере 476 500 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами – 108 473,48 руб.

            Определением суда от 13.06.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Определением от 11.08.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебное заседание 19.12.2023 представитель ответчика не явился, о дате, месте, времени его проведения извещен надлежащим образом. 

В порядке ст. 123,156 АПК РФ суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившегося представителя, извещенного надлежащим образом.

Истец в порядке статьи 49 АПК РФ направил в материалы дела заявление от 12.12.2023 об уточнении исковых требований, просит взыскать задолженность по договору на строительство телятника на 500 голов (в редакции дополнительного соглашения – на 511 голов) от 20.01.2020 в сумме 226 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58 094,13 руб., задолженность по договору подряда №5 от 16.10.2020 в размере 250 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58 003,42 руб.

Согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Уточнение иска принято судом.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 21 декабря 2023 года до 15 часов 00 минут.

На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание после перерыва продолжено в отсутствие не явившихся представителей сторон.

Дело рассматривается по имеющимся доказательствам.

Как следует из материалов дела, 20 января 2020 года между ООО «Золотая Нива» (Заказчик) и ООО «Строймонтаж - Т» (Подрядчик) был заключен Договор на строительство телятника на 500 голов  (Далее по тексту - Договор), по условиям которого (в редакции дополнительного соглашения №1 от 13.10.2020 г. к вышеуказанному договору) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству Здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области, в соответствии с требованиями Заказчика в объеме и сроки, установленные Договором в соответствии с проектом.

Согласно п. 1.2. договора Подрядчик обязуется сдать выполненные работу по акту приёмки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их в соответствии с Договором.

В соответствии с п. 2.1. договора (в редакции дополнительного соглашения от 12.03.2020) стоимость выполняемых работ по Договору составляет 9 100 440 (Девять миллионов сто тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп., в т.ч. НДС».

Как следует из п. 2.2. договора, оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке: 

2.2.1. Авансовый платёж в размере 20 (Двадцати) % от суммы Договора выплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) дней после подписания Договора; 

2.2.2. Стороны каждые 15 (Пятнадцать) дней проводят замер выполненных объёмов работ и подписывают акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); 

2.2.3. Акты выполненных работ и справки по стоимости выполненных работ и затрат рассматриваются Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения; 

2.2.4. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания актов выполненных работ (по форме КС-2) и справок по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по причине неполного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и/или выявления Заказчиком недостатков качества выполненных Подрядчиком Работ, Работы считаются не принятыми Заказчиком и оформляются актом о выявленных недостатках; 

2.2.5. Заказчик каждые 15 (Пятнадцать) дней проводит оплату Подрядчику стоимости фактически выполненных работ в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания актов выполненных работ на основании актов выполненных работ (по форме КС-2), справок по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счетов-фактур; 

2.2.6. Окончательный расчёт за выполненные работы по Договору производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после полного завершения работ по Договору (включая устранение выявленных недостатков) на основании актов выполненных работ (по форме КС-2), справок по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счетов-фактур.

Срок выполнения работ по Договору установлен п. 3.1. договора: 

3.1.1. Начало - 22 января 2020 года; 

3.1.2. Окончание - 30 августа 2020 года.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (п. 7.1. договора).

На момент подписания Договора у Истца имелась задолженность перед Ответчиком в размере 900 (Девятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019 - 19.12.2019 между ООО «Строймонтаж-Т» и ООО «Золотая Нива».

Ответчик выполнил работы по строительству здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области в полном объеме и в установленные Договором сроки, что подтверждается следующими документами:

- счет - фактура №1, КС-2 №1, КС-3 №1 от 30.03.2020 года на сумму 2 197 730,00 (два миллиона сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №2, КС-2 №2, КС-3 №2 от 30.04.2020 года на сумму 1 572 200,00 (Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №4, КС-2 №4, КС-3 №4 от 29.05.2020 года на сумму 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №6, КС-2 №3 от 29.05.2020 года на сумму 336 000,00 (Триста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №7, КС-2 №5, КС-3 №5 от 30.06.2020 года на сумму 1 772 000,00 (Один миллион семьсот семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №10, КС-2 №6, КС-3 №6 от 29.07.2020 года на сумму 1 338 150,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №13 от 02.09.2020 года на сумму 516 000,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч 00 рублей) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №13 от 02.09.2020 года на сумму 50 070,00 (Пятьдесят тысяч семьдесят рублей 00 копеек, 

всего по данным актам и справкам выполнено работ на общую сумму 9 282 150,00 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

С учетом ранее образовавшейся задолженности Истца перед Ответчиком в сумме 900 (Девятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек, общая сумма к выплате Ответчику составила 9 283 050,00 (Девять миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей.

Свои обязательства по оплате выполненных Ответчиком работ по строительству здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области истец исполнил в полном объеме, в установленные Договором сроки, что подтверждается платежными поручениями:

- №217 от 29.01.2020 года на общую сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №496 от 21.02.2020 года на общую сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 579 от 03.03.2020 года на общую сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 888 от 31.03.2020 года на общую сумму 700 000,00 (Семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1043 от 15.04.2020 года на общую сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1202 от 30.04.2020 года на общую сумму 800 000,00 (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1582 от 02.06.2020 года на общую сумму 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1628 от 05.06.2020 года на общую сумму 336 000,00 (триста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1931 от 02.07.2020 года на общую сумму 1 772 000,00 (один миллион семьсот семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек;

- № 2311 от 31.07.2020 года на общую сумму 1 338 150,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 2407 от 07.08.2020 года на общую сумму 120 000,00 (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 2718 от 03.09.2020 года на общую сумму 516 000,00 (пятьсот шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 3222 от 15.10.2020 года на общую сумму 227 400,00 (Двести двадцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек.

Итого Истец оплатил Ответчику за выполненные работы по строительству здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области деньги в сумме 9 509 550,00 (Девять миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность в сумме 226 500 (Двести двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

Кроме этого, 16.11.2020 между ООО «Золотая Нива» (Заказчик) и ООО «Строймонтаж - Т» (Подрядчик) был заключен Договор подряда № 5 (далее – договор № 5), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству объекта «Здание литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области» под ключ, в соответствии с требованиями Заказчика в объёме и сроки, установленные Договором в соответствии с проектом.

Согласно п. 1.2. договора № 5 Подрядчик обязуется сдать выполненные работу по акту приёмки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их в соответствии с Договором и калькуляцией (Приложение № 1).

В соответствии с п. 2.1. договора № 5 (в редакции дополнительного соглашения от 24.05.2021) стоимость выполняемых работ по Договору составляет 13 777 516 (Тринадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 50 коп., в тч. НДС.

Как следует из п. 2.2. договора № 5, оплата работ по Договору осуществляется в следующем порядке: 

2.2.1. Авансовый платёж в размере 15 (Пятнадцати) % от суммы Договора выплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) дней после подписания Договора; 

2.2.2. Стороны каждые 15 (Пятнадцать) дней проводят замер выполненных объёмов работ и подписывают акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); 

2.2.3. Акты выполненных работ и справки по стоимости выполненных работ и затрат рассматриваются Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения; 

2.2.4. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания актов выполненных работ (по форме КС-2) и справок по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по причине неполного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и/или выявления Заказчиком недостатков качества выполненных Подрядчиком Работ, Работы считаются не принятыми Заказчиком и оформляются актом о выявленных недостатках; 

2.2.5. Заказчик каждые 15 (Пятнадцать) дней проводит оплату Подрядчику стоимости фактически выполненных работ в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания актов выполненных работ на основании актов выполненных работ (по форме КС-2), справок по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счетов-фактур; 

2.2.6. Окончательный расчёт за выполненные работы по Договору производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после полного завершения работ по Договору (включая устранение выявленных недостатков) на основании актов выполненных работ (по форме КС-2), справок по стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счетов-фактур.

Срок выполнения работ по Договору установлен п. 3.1. договора № 5: 

3.1.1. Начало - 01 декабря 2020 года; 

3.1.2. Окончание - 25 августа 2021 года.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (п. 7.1. договора № 5).

Ответчик выполнил работы по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области в полном объеме и в установленные Договором сроки, что подтверждается следующими документами:

- счет-фактура №3 от 03.03.2021 года, КС-2 и КС-3 от 02.03.2021 года, на общую сумму 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №4 от 03.03.2021 года, КС-2 и КС-3 от 02.03.2021 года, на общую сумму 800 000,00 (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №5, КС-2-№3 и КС-3№3 от 11.03.2021 года, на общую сумму 1 171 200,00 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №8, КС-2-№2 и КС-3-№2 от 06.04.2021 года, на общую сумму 870 840,00 (Восемьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №9 от 27.04.2021 года, КС-2-№4 и КС-3-№4 от 28.04.2021 года, на общую сумму 1 130 500,00 (Один миллион сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №10, КС-2-№5 и КС-3-№5 от 18.05.2021 года, на общую сумму 596 000,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №12, КС-2-№6 и КС-3-№6 от 01.06.2021 года, на общую сумму 1 607 000,00 (Один миллион шестьсот семь тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №13, КС-2-№7 и КС-3-№7 от 01.06.2021 года, на общую сумму 231 120,00 (Двести тридцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №14, КС-2№8 и КС-3№8 от 17.06.2021 года, на общую сумму 306 476,5 (Триста шесть тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек; 

- счет-фактура №15, КС-2№9 и КС-3№9 от 17.06.2021 года, на общую сумму 315 000,00 (триста пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №16, КС-2№10 и КС-3№10 от 01.07.2021 года, на общую сумму 322 000,00 (Триста двадцать две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №17, КС-2№11 и КС-3№11 от 01.07.2021 года, на общую сумму 1 220 000,00 (Один миллион двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №17, КС-2№12 и КС-3№12 от 19.07.2021 года, на общую сумму 3 949 500,00 (Три миллиона девятьсот сорок девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №19, КС-2№13 и КС-3№13 от 19.07.2021 года, на общую сумму 422 400,00 (Четыреста двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек) рублей 00 копеек;

- счет-фактура №20, КС-2№14 и КС-3№14 от 19.07.2021 года, на общую сумму 493 500,00 (Четыреста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек.

Всего стоимость выполненных работ по договору №5 от 16 ноября 2020 года по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято- Маслово Знаменского района Тамбовской области составила 14 635 536,5 (Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек.

Свои обязательства по оплате выполненных Ответчиком работ по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области в полном объеме, в установленные Договором сроки, что подтверждается платежными поручениями:

- №3929 от 16.12.2020 года на общую сумму 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №564 от 03.03.2021 года на общую сумму 2 000 000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №684 от 11.03.2021 года на общую сумму 1 171 200,00 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек; 

- №1017 от 06.04.2021 года на общую сумму 870 840,00 (Восемьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1350 от 28.04.2021 года на общую сумму 1 130 500,00 (Один миллион сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1530 от 18.05.2021 года на общую сумму 596 000,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1697 от 01.06.2021 года на общую сумму 1 838 120,00 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1974 от 18.06.2021 года на общую сумму 621 476,50 (Шестьсот двадцать одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек; 

- №2307 от 13.07.2021 года на общую сумму 1 542 000,00 (один миллион пятьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №2391 от 19.07.2021 года на общую сумму 4 865 400,00 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

Итого Истец оплатил Ответчику за выполненные работы по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области деньги в сумме 14 885 536,50 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

На основании того, что аванс превышает фактически выполненные работы, ООО «Золотая Нива» 11.04.2023 направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием о возврате неотработанной части аванса в установленный в претензии срок. Однако указанные требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на то, что ответчиком возврат денежных средств в добровольном порядке не произведен, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, в котором полагает требования не подлежащими удовлетворению, указывает на разрешение спора между сторонами в рамках дела № А64-6937/2022. 

Исследовав материалы дела, изучив представленные по делу доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в части. При этом суд руководствовался следующим.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса РФ  в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли в результате  заключения договора на строительство телятника на 500 голов от 20.01.2020 и договора подряда № 5 от 16.11.2020 и должны исполняться надлежащим образом.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Частями 1, 2 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, определено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

 Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача ему подрядчиком результата работ. Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который оплачивается заказчиком. Таким образом, в данном случае подлежит разрешению вопрос о взаимном предоставлении сторон по договорам.

В соответствии с п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Ответчик выполнил работы по строительству здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области в рамках договора от 20.01.2020 в полном объеме и в установленные Договором сроки, что подтверждается следующими документами:

- счет - фактура №1, КС-2 №1, КС-3 №1 от 30.03.2020 года на сумму 2 197 730,00 (два миллиона сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №2, КС-2 №2, КС-3 №2 от 30.04.2020 года на сумму 1 572 200,00 (Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №4, КС-2 №4, КС-3 №4 от 29.05.2020 года на сумму 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №6, КС-2 №3 от 29.05.2020 года на сумму 336 000,00 (Триста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №7, КС-2 №5, КС-3 №5 от 30.06.2020 года на сумму 1 772 000,00 (Один миллион семьсот семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №10, КС-2 №6, КС-3 №6 от 29.07.2020 года на сумму 1 338 150,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет - фактура №13 от 02.09.2020 года на сумму 516 000,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч 00 рублей) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №13 от 02.09.2020 года на сумму 50 070,00 (Пятьдесят тысяч семьдесят рублей 00 копеек, 

всего по данным актам и справкам выполнено работ на общую сумму 9 282 150,00 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

С учетом ранее образовавшейся задолженности Истца перед Ответчиком в сумме 900 (Девятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек, общая сумма к выплате Ответчику составила 9 283 050,00 (Девять миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей.

Свои обязательства по оплате выполненных Ответчиком работ по строительству здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области истец исполнил в полном объеме, в установленные Договором сроки, что подтверждается платежными поручениями:

- №217 от 29.01.2020 года на общую сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №496 от 21.02.2020 года на общую сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 579 от 03.03.2020 года на общую сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 888 от 31.03.2020 года на общую сумму 700 000,00 (Семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1043 от 15.04.2020 года на общую сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1202 от 30.04.2020 года на общую сумму 800 000,00 (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1582 от 02.06.2020 года на общую сумму 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1628 от 05.06.2020 года на общую сумму 336 000,00 (триста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 1931 от 02.07.2020 года на общую сумму 1 772 000,00 (один миллион семьсот семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек;

- № 2311 от 31.07.2020 года на общую сумму 1 338 150,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 2407 от 07.08.2020 года на общую сумму 120 000,00 (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 2718 от 03.09.2020 года на общую сумму 516 000,00 (пятьсот шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- № 3222 от 15.10.2020 года на общую сумму 227 400,00 (Двести двадцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек.

Итого Истец оплатил Ответчику за выполненные работы по строительству здания по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области деньги в сумме 9 509 550,00 (Девять миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность в сумме 226 500 (Двести двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

Ответчик выполнил работы по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области в рамках договора от 16.11.2020 в полном объеме и в установленные Договором сроки, что подтверждается следующими документами:

- счет-фактура №3 от 03.03.2021 года, КС-2 и КС-3 от 02.03.2021 года, на общую сумму 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №4 от 03.03.2021 года, КС-2 и КС-3 от 02.03.2021 года, на общую сумму 800 000,00 (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №5, КС-2-№3 и КС-3№3 от 11.03.2021 года, на общую сумму 1 171 200,00 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №8, КС-2-№2 и КС-3-№2 от 06.04.2021 года, на общую сумму 870 840,00 (Восемьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №9 от 27.04.2021 года, КС-2-№4 и КС-3-№4 от 28.04.2021 года, на общую сумму 1 130 500,00 (Один миллион сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №10, КС-2-№5 и КС-3-№5 от 18.05.2021 года, на общую сумму 596 000,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №12, КС-2-№6 и КС-3-№6 от 01.06.2021 года, на общую сумму 1 607 000,00 (Один миллион шестьсот семь тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №13, КС-2-№7 и КС-3-№7 от 01.06.2021 года, на общую сумму 231 120,00 (Двести тридцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №14, КС-2№8 и КС-3№8 от 17.06.2021 года, на общую сумму 306 476,5 (Триста шесть тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек; 

- счет-фактура №15, КС-2№9 и КС-3№9 от 17.06.2021 года, на общую сумму 315 000,00 (триста пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №16, КС-2№10 и КС-3№10 от 01.07.2021 года, на общую сумму 322 000,00 (Триста двадцать две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №17, КС-2№11 и КС-3№11 от 01.07.2021 года, на общую сумму 1 220 000,00 (Один миллион двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №17, КС-2№12 и КС-3№12 от 19.07.2021 года, на общую сумму 3 949 500,00 (Три миллиона девятьсот сорок девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- счет-фактура №19, КС-2№13 и КС-3№13 от 19.07.2021 года, на общую сумму 422 400,00 (Четыреста двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек) рублей 00 копеек;

- счет-фактура №20, КС-2№14 и КС-3№14 от 19.07.2021 года, на общую сумму 493 500,00 (Четыреста девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек.

Всего стоимость выполненных работ по договору №5 от 16 ноября 2020 года по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято- Маслово Знаменского района Тамбовской области составила 14 635 536,5 (Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек.

Свои обязательства по оплате выполненных Ответчиком работ по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области истец исполнил в полном объеме, в установленные Договором сроки, что подтверждается платежными поручениями:

- №3929 от 16.12.2020 года на общую сумму 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №564 от 03.03.2021 года на общую сумму 2 000 000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №684 от 11.03.2021 года на общую сумму 1 171 200,00 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек; 

- №1017 от 06.04.2021 года на общую сумму 870 840,00 (Восемьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1350 от 28.04.2021 года на общую сумму 1 130 500,00 (Один миллион сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1530 от 18.05.2021 года на общую сумму 596 000,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1697 от 01.06.2021 года на общую сумму 1 838 120,00 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №1974 от 18.06.2021 года на общую сумму 621 476,50 (Шестьсот двадцать одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек; 

- №2307 от 13.07.2021 года на общую сумму 1 542 000,00 (один миллион пятьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

- №2391 от 19.07.2021 года на общую сумму 4 865 400,00 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

Итого Истец оплатил Ответчику за выполненные работы по строительству здания литер А по содержанию молодняка КРС на 511 скотомест в с. Дуплято-Маслово Знаменского района Тамбовской области деньги в сумме 14 885 536,50 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 50 копеек) рублей 50 копеек, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что положения п. 4 ст. 453 ГК РФ позволяют истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

На основании п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы ответчика относительно рассмотрения заявленных требований в рамках судебного дела № А64-6937/2022 суд находит несостоятельными.

В настоящем деле рассмотрению подлежат требования относительно возврата излишне уплаченных денежных средств по договорам от 20.01.2020 и от 16.11.2020. В рамках дела № А64-6937/2022 судом рассмотрены требования сторон относительно взаимоотношений по договору подряда №1 от 14.01.2022.

Доказательств выполнения ответчиком работ на спорную сумму либо возврата суммы предоплаты суду не представлено, в силу чего суд полагает заявленные требования о взыскании основного долга подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 58 094,13 руб. по договору от 20.01.2020, в размере 58 003,42 руб. по договору от 16.11.2020.

Согласно ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Ответчик сумму начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами не оспорил, доказательства ее погашения и контррасчет не представил.

Судом установлено, что при расчете подлежащих взысканию процентов истцом не учтены положения Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», согласно которому с 01.04.2022 на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Согласно положениям пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

В силу пункта 3 статьи 9.1. и пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом действия моратория размер подлежащих взысканию процентов за периоды с 12.01.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 19.12.2023 составляет 89 413,59 руб., из них – по договору от 20.01.2020 в сумме 45 410,16 руб., по договору от 16.11.2020 в сумме 44 003,43 руб.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Исследовав обстоятельства дела, оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования  подлежат удовлетворению в части.

В соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу ч.1 ст. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-Т», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», Знаменский район, Тамбовская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 476 500 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 89 413,59 руб., начисленные за периоды с 12.01.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 19.12.2023, всего – 565 913,59 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 220 руб.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.   

2. Истцу выдать исполнительный лист по заявлению после вступления решения в законную силу.

3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

Судья                                                                                                    А.В. Истомин