Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-91603/2024

05 ноября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  05 ноября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аслановой А.Т.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ОПОРА-СЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АТМАИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) 

при участии

- от истца:  ФИО1 

- от ответчика: не яв., изв. 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ОПОРА-СЕРВИС" (далее – ООО "ОПОРА-СЕРВИС") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АТМАИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО "АТМАИНЖИНИРИНГ") о взыскании 28 613 377,80 руб. задолженности по договору от 20.04.2022 № 20/04-2022 (далее – Договор).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ОПОРА-СЕРВИС" (субсубподрядчиком) и ООО "АТМАИНЖИНИРИНГ" (субподрядчиком) заключен Договор на выполнение  работ, предусмотренных приложением № 1 к Договору, проектной, рабочей документацией. 

В силу п. 1 дополнительного соглашения от 14.05.2024 № 2 к Договору (далее – ДС № 2) цена Договора составляет 32 819 310,50 руб. 

Согласно п. 2 ДС № 2 оплата по настоящему соглашению производится после выполнения субсубподрядчиком работ в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ путем перечисления на расчетный счет субсубподрядчика. Оплата выполненных работ производится на основании представленных субподрядчиком и подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры.

В силу п. 3 ДС № 2 субподрядчик осуществляет платежи в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 2 настоящего Соглашения проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их.  

Стороны подписали акт о приемки выполненных работ от 22.05.2024 № 1 на сумму 28 613 377,80 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат. 

ООО "ОПОРА-СЕРВИС" направило ООО "АТМАИНЖИНИРИНГ" претензию от 02.09.2024 с требованием оплаты задолженности.

Отказ ООО "АТМАИНЖИНИРИНГ" удовлетворить требование послужил основанием для обращения ООО "ОПОРА-СЕРВИС" в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Генеральный директор ООО "АТМАИНЖИНИРИНГ" в письме от 06.09.2024 № 203/24 указал, что денежные средства в размере 28 613 377,80 руб. по Договору будут перечислены до 28.12.2024. 

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление не поступил.

В связи с отсутствием доказательств оплаты исковые требование  подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АТМАИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОПОРА-СЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) 28613377,80 руб. задолженности, 166067 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.