Арбитражный суд Республики Алтай 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-2102/2019

город Горно-Алтайск

05 марта 2020 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Якшимаевой Ф. Ю., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "ДОВЕРИЕ ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  пр-кт Коммунистический, д. 178, пом. 1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к  Закрытому акционерному обществу "Строительное управление № 3" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 109/1, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) при участии в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации  города Горно-Алтайска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-т  Коммунистический, д. 18, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о понуждении к  устранению строительных недостатков и продлении гарантийного срока,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

1. исковые требования общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания "ДОВЕРИЕ ПЛЮС" удовлетворить в полном объем:  

Обязать Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 3" в  устранение недостатков выполненных строительных работ на объекте  «Многоквартирный жилой дом» по ул.Заринская, 25 в г.Горно-Алтайске в течение 3-х  месяцев со дня вступления решения в законную силу произвести следующие виды  

строительных работ в соответствии с положениями проектной документации объекта  строительства:  

- заменить поврежденные бетонные блоки стен подвала на монолитные участки с  техническими отверстиями для прокладки инженерных сетей;  

- осуществить монтаж водоотводных сооружений для защиты от вод  поверхностного стока с южной стороны многоквартирного дома по ул.Заринская, 25;  

- осуществить заделку технических зазоров между бетонными блоками стен  подвала кирпичом;  

- установить для входов в подвал из второго, третьего и четвертого подъезда  железобетонные лестницы;  

- осуществить укладку плит перекрытия первого этажа на пояс полнотелого  керамического кирпича толщиной 30мм;  

- осуществить бетонную стяжку пола в подвальном помещении под четвертым  подъездом.  

2. На период устранения вышеуказанных недостатков выполненных  строительных работ продлить гарантийные обязательства Закрытого акционерного  общества "Строительное управление № 3" как застройщика объекта недвижимости.  

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества "Строительное управление № 3"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 109/1, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "ДОВЕРИЕ ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  пр-кт Коммунистический, д. 178, пом. 1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) 31000  рублей в возмещение убытков.  

4. Взыскать с Закрытого акционерного общества "Строительное управление № 3"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 109/1, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "ДОВЕРИЕ ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  пр-кт Коммунистический, д. 178, пом. 1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) 6000  рублей в возмещение судебных расходов.  

4. Взыскать с Закрытого акционерного общества "Строительное управление № 3"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 109/1, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) в доход федерального бюджета 2000 рублей в уплату  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через  Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья Ф.Ю. Якшимаева