АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул Дело № А03-3254/2022  

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2023 года  В полном объеме решение изготовлено 14 июня 2023 года  

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску акционерного общества Специализированный  застройщик «Барнаулкапстрой», г.Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Сибресурс», г.Барнаул (ИНН 

<

***>) о  взыскании 25 953 034 руб. 10 коп., с привлечением к участию в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  спора, строительно-проектно-промышленного открытого акционерного общества  «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>),  

при участии: от истца: не явился; от ответчика: не явился; от третьего лица: не явился, 

установил:

акционерное общество СЗ «Барнаулкапстрой» (далее – истец, заказчик,  застройщик, АО СЗ «Барнаулкапстрой») обратилось в Арбитражный суд Алтайского  края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибресурс» (далее –  ответчик, новый подрядчик, ООО «Сибресурс») о взыскании 50 000 руб. убытков.  Определением от 17.03.2022 данный иск принят к производству, делу присвоен номер  А03-3254/2022.  

Кроме того, АО СЗ «Барнаулкапстрой» обратилось в Арбитражный суд  Алтайского края с иском к ООО «Сибресурс» о взыскании 50 000 руб. убытков.  Определением от 01.07.2022 данный иск принят к производству, делу присвоен номер  А03-9547/2022.  

Определением от 09.09.2022 дело № А03-3254/22 объединено с делом 

 № А03-9547/22 в одно производство с присвоением объединенному делу единого  номера А03-3254/2022.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено строительно-проектно-промышленное открытое акционерное общество «Стройгаз» (далее - третье лицо).  

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком несвоевременно и  некачественно выполнены работы по строительству многоквартирного жилого дома, в  результате чего с истца, как с застройщика, были взысканы в пользу дольщиков  денежные средства.  

Ответчик, возражая по иску, сослался на недоказанность нарушения сроков  выполнения работ. Указывая на то, что ответчик признан несостоятельным  (банкротом), полагает, что требование о возмещении убытков в размере сумм,  взысканных с истца в пользу дольщиков, подлежит рассмотрению в деле о банкротстве  ответчика. По мнению ответчика, единственные требования, которые могут быть  признаны обоснованными в рамках настоящего дела, при условии доказанности вины  ответчика, это судебные расходы по искам участников строительства, решения по  которым были вынесены после даты принятия судом к рассмотрению заявления о  признании ООО «Сибресурс» банкротом (05.03.2021).  

В ходе судебного разбирательства истец неоднократно, в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ),  уточнял исковые требования, в конечном итоге просит взыскать с ответчика  

25 953 034 руб. 10 коп. убытков. 

Стороны и третье лицо, в порядке статьи 123 АПК РФ извещенные надлежащим  образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили; истец  представил заявление о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.  

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие  представителей сторон и третьего лица.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

27.12.2013 между истцом (заказчик) и СПП ОАО «Стройгаз» (подрядчик)  заключен договор подряда на строительство № 141 (далее - договор), по условиям  которого подрядчик в счет оговоренной в ст. 3 настоящего договора стоимости  выполнит за свой риск, собственными или привлеченными силами и средствами  работы по строительству разноэтажного жилого дома со встроено-пристроенными  объектами общественного назначения по Павловскому тракту, 291 в г. Барнауле (стр.   № 2 в квартале 2008), в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и  проектной документацией (пункт 2.1 договора).  

23.04.2016 между истцом (заказчик), СПП ОАО «Стройгаз» (подрядчик) и ООО  «Сибресурс» (новый подрядчик) было заключено соглашение о перемене лиц в  обязательстве, согласно которому стороны договорились о том, что подрядчик  передает, а новый подрядчик принимает в полном объеме права и обязанности  

подрядчика и становится стороной по договору подряда от 27.12.2013 № 141 на  строительство разноэтажного жилого дома со встроено-пристроенными объектами  общественного назначения по Павловскому тракту, 291 в г. Барнауле (стр. № 2 в  квартале 2008).  

Пунктом 2 указанного соглашения сторонами установлено, что права и  обязанности по договору передаются подрядчиком новому подрядчику на тех условиях  и в том объеме, которые существуют к моменту заключения настоящего соглашения, а  также гарантийные обязательства на работы, выполненные подрядчиком на момент  подписания настоящего соглашения.  

В соответствии с пунктом 6.1 договора, в редакции дополнительного  соглашения № 7 от 25.07.2017, работы по настоящему договору должны быть начаты в  первом квартале 2014 г., закончены до 01.02.2018 и производиться в соответствии с  графиком производства работ (Приложение № 2).  

Согласно пункту 17.6 договора, подрядчик возмещает заказчику суммы,  присужденные третьим лицам по судебному решению, вступившему в законную силу,  либо в соответствии с мировым соглашением, если основанием для их взыскания стало  нарушение подрядчиком требований к качеству объекта и сроку ввода объекта в  эксплуатацию (в случае, если нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию связано с  нарушением подрядчиком срока выполнения работ), а также все судебные издержки в  течение 30 дней с даты получения соответствующего требования от заказчика.  

13.02.2020 и 13.08.2020 АО СЗ «Барнаулкапстрой» получены разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию.  

В связи с нарушением сроков передачи квартир, а также недостатками,  допущенными при строительстве объектов долевого строительства, участники долевого  строительства обращались в суд с иском к застройщику.  

1.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение срока передачи квартиры № 73 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле за период с 02.10.2019 по 20.01.2019 в размере  58 090 руб. и компенсации морального вреда в размере 15 000 руб.  

Поскольку претензия оставлена без удовлетворения, потребитель обратился с  исковым заявлением в судебный участок № 2 Железнодорожного района г. Барнаула с  требованием о взыскании неустойки за период с 02.10.2019 по 07.02.2020 в размере 84  780 руб. за нарушение сроков передачи квартиры № 73 по ул. Павловский тракт, 291 в  г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.  Барнаула по делу № 2-263/2020 исковые требования удовлетворены частично, с  застройщика взыскано 70 000 руб. неустойки, компенсация морального вреда 10 000  руб., штрафа в пользу истцов 40 000 руб., на оплату услуг представителя 4 000 руб.,  почтовые расходы 605 руб., всего взыскано 127 328 руб. 61 коп. (л.д. 1-11 т.4).  

2.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 84 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 05.04.2021 по делу 

 № 2-1523/2021 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскана  неустойка в размере 100 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000  рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в  размере 30 000 рублей, всего 135 000 рублей, 3 500 руб. государственной пошлины,  всего взыскано 138 500 руб. (т. 3 л.д.19-26).  

3.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 93 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 25.12.2020 по делу   № 2-3939/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  40 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 1 700 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего 66 700 руб. (т.4 л.д.  21-24).  

4.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 113 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 18.11.2020 по делу   № 2-3636/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  230 000 руб. неустойки, компенсация морального вреда 10 000 руб., штрафа 35 000  руб., в пользу МОО «Робин Гуд» штраф 35 000 руб., госпошлина 5 800 руб., всего  взыскано 315 800 руб. (т.3 л.д. 117-123).  

5.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 119 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 12.05.2021 по делу   № 2-1297/2021 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскана  неустойка за просрочку передачи квартиры по договору от 01.12.2016 № в размере 120  000 рублей, денежная компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за  отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя 40 000 рублей,  400 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 165 400 руб. (т.3  л.д. 86-92).  

6.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 122 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 20.05.2021 по делу   № 2-1677/2021 исковые требования удовлетворены частично. С АО СЗ «БКС» взыскано  

105 000 руб. неустойки, 5 000 руб. компенсации морального вреда, 45 000 руб. штрафа,  3 700 госпошлины, всего взыскано 158 700 руб. (т.3 л.д. 140-145).  

7.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 148 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 08.06.2021 по делу   № 2-1758/2021 исковые требования удовлетворены частично. С АО СЗ «БКС» взыскано  26 400 руб. в счет уменьшения цены договора участия в долевом строительстве, 55 000  руб. неустойки за просрочку передачи квартиры, 2 000 руб. компенсации морального  вреда, 15 000 руб. штрафа, 7 500 руб. расходов на оплату услуг представителя, 450,99  руб. почтовых расходов, 4 756 руб. госпошлины, всего взыскано 217 457 руб. 98 коп.  (т.3 л.д. 34-43).  

8.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 173 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 03.09.2020 по делу №  2-2954/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано 125  000 руб. неустойки, 35 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 000 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 169 000  руб. (т.3 л.д. 1-8).  

9.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 176 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда. г. Барнаула от 20.04.2021 по делу   № 2-1323/2021 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, 27 000 руб. штрафа, 5 000 руб. компенсации морального вреда,  12 000 руб. на оплату услуг представителя, 436,08 руб. почтовых расходов, 3 200 руб.  государственной пошлины, всего взыскано 137 636 руб. 08 коп. (т. 3 л.д. 131-139).  

10.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 215 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.04.2021 по делу №  2-1528/2021 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано в  пользу первого потребителя неустойка в размере 50 000 рублей 00 копеек, компенсация  морального вреда в размере 3 000 рублей 00 копеек, убытки в размере 110 000 рублей  00 копеек, штраф в размере 25 000 рублей 00 копеек, в пользу второго потребителя  неустойка в размере 50 000 рублей 00 копеек, компенсация морального вреда в размере  3 000 рублей 00 копеек, штраф в размере 10 000 рублей 00 копеек, 7 094,58 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 273 094 руб. 58 коп. (т. 7  л.д. 6-9).  

11.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 220 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 04.03.2021 по делу № 2-59/2021 исковые требования удовлетворены  частично, с застройщика взыскано 54 400 руб. в связи с разницей в площади квартиры,  20 000 руб. неустойки, 2 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 10 000 руб.  штрафа, 8 000 руб. судебных расходов, 2732 руб. госпошлины, всего взыскано 97 132  руб. (т. 3 л.д.9).  

12.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате компенсации стоимости устранения недостатков в квартире   № 28 в размере 475 514 рублей, 25 000 рублей - морального вреда, штрафа, 13 000  рублей на досудебную экспертизу, 20 000 рублей - на оплату услуг представителя.  

Решением суда Индустриального районного суда г.Барнаула Алтайского края от  11.06.2021 по делу № 2-302/2021 исковые требования удовлетворены частично, с  застройщика взыскано 322 232,40 руб. для устранения недостатков в квартире, 322  232,40 руб. неустойки, 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 100 000 руб.  штрафа, 20 000 руб. судебных расходов, 13 000 руб. досудебных расходов, всего 787  464,80 руб. (т.3 л.д. 51-62).  

Кроме того, с АО СЗ «Барнаулкапстрой» в доход муниципального образования  взыскано 9 644 руб. 65 коп. государственной пошлины. А также с АО СЗ  «Барнаулкапстрой» в пользу ООО «Центр Кадастра, Оценки и Экспертизы  Недвижимости» взыскано 18 700 руб.  

Апелляционным определением от 28.09.2021 решение изменено: неустойка  уменьшена до 100 000 рублей. Всего взыскано 593 577,05 руб.  

13.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 222 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда. г. Барнаула от 19.05.2021 по делу   № 2-1630/2021 исковые требования удовлетворены частично. С застройщика взыскано  150 000 руб. неустойки, 5 000 руб. компенсации морального вреда, 20 000 руб. штрафа,  20 000 руб. штрафа в пользу Межрегиональной общественной организации по защите  прав потребителей «Робин гуд», 4 500 руб. госпошлины, всего взыскано 199 500 руб.  (т.3 л.д. 124-130).  

14.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 227 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 09.06.2021 по делу   № 2- 1986/2021 исковые требования удовлетворены частично. С АО СЗ «БКС»  взыскано 50 000 руб. неустойки, 10 000 руб. компенсации морального вреда, 20 000  руб. штрафа, 2 000 руб. госпошлины, всего взыскано 82 000 руб. (т.3 л.д. 44-50).  

15.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 229 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 27.01.2021 по делу   № 2-532/2021 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 3 500 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 133 500 руб. (т.4 л.д. 43-46).  

16.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 251 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 22.03.2021 по делу   № 2-1146/2021 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  110 000 руб. неустойки, 25 000 руб. штрафа, 7 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 700 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 145 700  руб. (т.3 л.д. 147-152).  

17.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 251 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 27.08.2020 по делу   № 2-2341/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  180 000 руб. неустойки, компенсация морального вреда 5 000 руб., штраф 92 500 руб.,  государственная пошлина 5 100 руб., всего взыскано 282 600 руб. (т.4 л.д. 53-60).  

18.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 261 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 06.05.2020 по делу №  2-1148/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано 120  000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа, 10 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 231,94 руб. почтовые расходы, всего 175 287 руб. 62 коп. (т.3 л.д. 27-33).  

19.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 275 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 21.10.2020 по делу № 2-2038/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с застройщика взыскано 100 000 руб. неустойки, 27 000 руб. штрафа, 8 000  руб. в счет компенсации морального вреда, в пользу МОО «Робин Гуд» штраф в  размере 27 000 руб., 3 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 165 500 руб. (т.3 л.д. 146).  

20.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 278 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 29.12.2020 по делу   № 2-3773/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  160 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 700 руб. государственной пошлины в доход бюджета, в пользу АРО ЗПП  взыскано 20 000 руб. штрафа, всего взыскано 206 700 руб. (т.4 л.д. 91-98).  

21.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 280 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 25.03.2021 по делу   № 2-4370/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано в  пользу истца 80 000 руб. неустойки, 41 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 2 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 125 900 руб. (т.4 л.д. 12-20).  

22.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 281 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Ленинского районного суда г. Барнаула от 12.02.2021 по делу № 22348/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано 100  000 руб. неустойки, 26 500 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 26 500 руб. штрафа в пользу ООЗПП «Робин Гуд», всего взыскано 159 000 руб.  (т.3 л.д. 63-72).  

23.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 286 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 12.05.2021 по делу   № 2- 533/2021 исковые требования удовлетворены частично, с АО СЗ «БКС» взысканы  неустойка в размере 40 000 руб., компенсация морального вреда в размере 2 000 руб.,  штраф 10 500 руб., штраф в пользу ООЗПП "Робин Гуд" 10 500 руб., госпошлина 1 700  руб., всего взыскано 64 700 руб. (т.3 л.д. 85).  

24.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 288 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.11.2020 по делу   № 2-2819/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскано  190 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, всего взыскано 221 300 руб. (т.4 л.д. 69-70).  

25.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 294 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 16.11.2020 по делу   № 2-3241/2020 исковые требования удовлетворены частично, с застройщика взыскана  

неустойка в размере 200 000 руб., 80 000 руб. штрафа, 20 000 руб. компенсации  морального вреда, 6 300 руб. государственной пошлины, всего взыскано 306 300 руб.  (т.3 л.д. 109-116).  

26.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 302 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 26.11.2020 по делу   № 2-3561/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 125 500  руб. (т.4 л.д. 34-42).  

27.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 304 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 16.02.2021 по делу №  2-931/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  

90 000 руб. неустойки, 25 000 руб. штрафа, 2 900 руб. государственной пошлины, всего  взыскано 117 900 руб. (т.3 л.д. 93-100).  

28.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 310 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 02.06.2021 по делу   № 2-1730/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взысканы  неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 90  000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 30  000 рублей., 3 200 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  128 200 руб. (т.1 л.д. 129-136).  

29.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 4 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 30.06.2020 по делу №  2-1572/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 140  000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 6 985,41 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  191 985 руб. 41 коп. (т.4 л.д. 105-112).  

30.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 7 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 24.08.2020 по делу   № 2-1488/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскана  неустойка в размере 200 000 руб., 10 000 руб. компенсации морального вреда, 285 000  

руб. убытков по найму, 71 250 руб. штрафа, в пользу общественной организации 71 250  руб. штрафа, 8 350 руб. государственной пошлины (т.4 л.д. 2-11).  

Не согласившись с решением суда первой инстанции, АО СЗ «Барнаулкапстрой»  обратилось с апелляционной жалобой в Алтайский краевой суд, в связи с чем была  оплачена государственная пошлина в размере 3 000 руб.  

Апелляционным определением Алтайского краевого суда от 29.12.2020 решение  Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от 24 августа 2020 года  отменено в части удовлетворения требований о взыскании убытков в размере 285 000  рублей, в указанной части принято новое решение. В удовлетворении исковых  требований о взыскании убытков в размере 285 000 рублей отказано. Изменено  решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 24 августа  2020 года в части размера штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить  требования потребителя, взысканного в пользу потребителя и Алтайской региональной  общественной организации «Единая служба защиты потребителей». С акционерного  общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой» взыскан штраф за отказ  в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя 26 250 рублей; с  акционерного общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой» в пользу  Алтайской региональной общественной организации «Единая служба защиты  потребителей» взыскан штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить  требования потребителя в размере 52 500 рублей. Решение Железнодорожного  районного суда г.Барнаула Алтайского края от 24 августа 2020 года отменено в части  отказа предоставления отсрочки исполнения решения суда о взыскании компенсации  морального вреда и штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить  требования потребителя. Акционерному обществу специализированный застройщик  «Барнаулкапстрой» предоставлена отсрочка исполнения решения Железнодорожного  районного суда города Барнаула Алтайского края от 24.08.2020 в части взыскания  компенсации морального вреда в сумме 10 000 рублей, штрафа за отказ в добровольном  порядке удовлетворить требования потребителя, Решение Железнодорожного  районного суда города Барнаула Алтайского края от 24 августа 2020 года в части  взысканного размера государственной пошлины изменено, с акционерного общества  специализированный застройщик «Барнаулкапстрой» в доход бюджета городского  округа города Барнаула взыскана государственная пошлина в размере 7 613 рубля. В  остальной части решение Железнодорожного районного суда города Барнаула  Алтайского края от 24 августа 2020 года оставлено без изменения.  

31.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 34 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 12.05.2020 по делу №  2-1455/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 100  000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, всего взыскано 141 312 руб. 40 коп. (т.3 л.д. 79-84).  

32.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 34 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.06.2020 по делу   № 2-1234/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  200 000 руб. неустойки, 50 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 5 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 260 500  руб. (т.1 л.д. 144-151).  

33.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 48 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 01.06.2020 по делу №  2-1443/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 100  000 руб. неустойки, 25 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 5 742,66 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 136  742 руб. 66 коп. (т.2 л.д. 121-128).  

34.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 54 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 26.02.2020 по делу   № 2-655/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  200 000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа, 40 000 руб. штрафа в пользу организации,  5 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 152 943,53 руб. убытков, 7 029,43 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 444 972 руб. 96 коп. (т. 4  л.д. 25-33).  

35.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 97 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 31.07.2020 по делу   № 2-2133/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскана  неустойка в размере 100 000 руб., 52 500 руб. штрафа, 10 000 руб. компенсации  морального вреда, 3 200 руб. государственной пошлины, всего взыскано 165 700 руб.  (т. 4 л.д. 113-120).  

36.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 100 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 30.06.2020 по делу   № 2-1768/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  202 950 руб. неустойки, 101 475 руб. штрафа, 5 000 руб. компенсации морального  вреда, 5 529,50 руб. государственной пошлины, всего взыскано 314 954 руб. 50 коп. (т.4  л.д. 99-104).  

37.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 131 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального района г. Барнаула от 29.06.2020 по делу № 21991/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 230  000 руб. неустойки, 60 000 руб. штрафа, 6 000 руб. 13 компенсации морального вреда, 8  000 руб. расходы на оплату услуг представителя, 7 643,45 государственной пошлины  (т.4 л.д. 85-90).  

38.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 151 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 27.01.2021 по делу №  2-653/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 140  000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа в пользу истца, 2 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 4 300 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 176 300 руб. (т. 4 л.д. 47-52).  

39.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 27 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Бийского городского суда от 03.06.2020 по делу № 2-2136/2020  исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 70 000 руб.  неустойки, 40 000 руб. штрафа в пользу истца, 6 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 4 269 руб. государственной пошлины в доход бюджета (т.2 л.д. 137- 143).  

40.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 41 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 04.06.2020 по делу   № 2-1134/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  200 000 руб. неустойки, 60 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 20 000 руб. государственной пошлины в доход бюджета (т. 5 л.д. 46-47).  

Определением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 04.06.2020 по  делу № 2-1134/2019 с Застройщика взыскано 16 000 руб. расходов на оплату услуг  представителя.  

Всего взыскано 286 500 руб. 

41.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 44 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 28.07.2020 по делу №  2-2248/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 100  000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа в пользу истца, 5 000 руб. в счет компенсации  

морального вреда, 5 548 руб. государственной пошлины, 10 000 руб. судебных  расходов, всего взыскано 150 548 руб. (т.4 л.д. 61-68)  

42.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 47 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 16.07.2020 исковые  требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 300 000 руб. неустойки,  

5 000 руб. компенсации морального вреда, 50 000 руб. штрафа, 4 500 руб. госпошлины,  всего взыскано 409 500 руб. (т. 3 л.д. 101-108).  

43.) Участники долевого строительства обратились в застройщика истца с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 63 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 12.04.2021 по делу № 2-495/2021 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика в пользу первого потребителя взыскано 30 000 руб. неустойки  за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого  строительства за период с 02.10.2019 по 28.02.2020, 2 000 руб. компенсации морального  вреда, 8 000 рублей штрафа, в пользу второго потребителя взыскано 30 000 руб.  неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта  долевого строительства за период с 02.10.2019 по 28.02.2020, 2 000 руб. компенсацию  морального вреда, 8 000 рублей штрафа, в пользу Межрегиональной общественной  организации по защите прав потребителей «Робин Гуд» штраф за неудовлетворение в  добровольном порядке требований потребителя 16 000 руб., всего взыскано 98 300 руб.  (т.3 л.д. 73-78).  

44.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 72 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 22.03.2021 по делу   № 2-1053/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, компенсация морального вреда 5 000 руб., штрафа в пользу  истца 30 000 руб., 3 200 руб. государственно пошлины, всего взыскано 128 000 руб.  

45.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 210 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 26.10.2020 по делу   № 2-3224/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в пользу 60 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 2 000 руб. государственная  пошлина, всего взыскано 82 000 руб. (т.9 л.д. 118-120).  

46.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 231 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.  Барнаула от 03.11.2020 по делу № 2-1748/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 44 000 руб. неустойки, 17 000 руб. штрафа, 3 017,65  госпошлина, всего взыскано 64 017 руб. 65 коп. (т.11 л.д. 140)  

47.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 176 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда. г. Барнаула от 20.04.2021 по делу   № 2-1323/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, 27 000 руб. штрафа, 5 000 руб. компенсации морального вреда,  12 000 руб. на оплату услуг представителя, 436,08 руб. почтовых расходов, 3 200 руб.  государственной пошлины, всего взыскано 137 636 руб. 08 коп. (т. 6 л.д. 40-44).  

48.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 1 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда. г. Барнаула от 17.06.2020 по делу   № 2-1467/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  70 000 руб. неустойки, 10 000 руб. штрафа в пользу истца, 10 000 руб. штраф в пользу  организации, 2 000 руб. компенсации морального вреда, 2 600 руб. государственной  пошлины, всего взыскано 94 600 руб. (т. 6 л.д. 36-39).  

49.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 97 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 31.07.2020 по делу   № 2-2133/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскана  неустойка в размере 100 000 руб., 52 500 руб. штрафа, 10 000 руб. компенсации  морального вреда, 3 200 руб. государственной пошлины, всего взыскано 165 700 руб.  (т.4 л.д. 113-120).  

50.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 215 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.04.2021 по делу №  2-1528/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика в пользу  первого потребителя взысканы неустойка в размере 50 000 рублей 00 копеек,  компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей 00 копеек, убытки в размере 110  000 рублей 00 копеек, штраф в размере 25 000 рублей 00 копеек, в пользу второго  потребителя взысканы неустойка в размере 50 000 рублей 00 копеек, компенсация  морального вреда в размере 3 000 рублей 00 копеек, штраф в размере 10 000 рублей 00  копеек, 7 094,58 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  273 094 руб. 58 коп. (т. 4 л.д. 77-84).  

51.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 111 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда. г. Барнаула от 16.10.2019 по делу   № 2-1472/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, 23 000 руб. штрафа в пользу истца, 23 000 руб. штрафа в пользу  организации, 2 000 руб. компенсации морального вреда, 3 200 руб. государственной  пошлины, всего взыскано 141 200 руб.  

52.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 2 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 30.09.2019 по делу №  2-3828/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано в  пользу истцов по 60 000 руб. неустойки за период с 02.11.2018 по 30.09.2019, по 20 000  руб. штрафа, по 7 000 руб. в счет компенсации морального вреда. Также взыскана  неустойка в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ равной 7,5% годовых,  действующей на последний день срока исполнения застройщиком обязательства по  передаче указанного объекта, начисленной на стоимость объекта долевого  строительства в размере 1 650 000руб., за каждый день нарушения обязательства,  начиная с 01.10.2019 и по дату фактического исполнения обязательств, 6 064,10 руб.  государственной пошлины в доход бюджета (т. 11 л.д. 81-85).  

Определением Индустриального районного суда г. Барнаула от 24.12.2019 по  делу № 2-3828/2019 взыскано 15 000 руб. судебных расходов.  

53.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 259 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 27.08.2020 по делу   № 2-2341/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  180 000 руб. неустойки, компенсация морального вреда 5 000 руб., штраф 92 500 руб.,  государственная пошлина 5 100 руб., всего взыскано 282 600 руб. (т. 4 л.д. 53).  

54.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 352 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 13.04.2021 по делу   № 2-1483/20121 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в пользу истцов неустойка за просрочку передачи квартиры 70 000 рублей,  компенсация морального вреда 14 000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке  удовлетворить требования потребителя 20 000 рублей, а всего 104000 рублей по 52000  рублей в пользу каждого, в пользу Межрегиональной общественной организации по  защите прав потребителей «Робин Гуд» штраф за отказ в добровольном порядке  

удовлетворить требования потребителя 20000 рублей, 2 600 руб. государственной  пошлины в доход бюджета, всего взыскано 126 600 руб. (т.11 л.д. 64-66).  

55.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 272 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 23.07.2019 по делу   № 2-2458/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 10 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 144 200  руб.  

56.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 334 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 11.02.2021 по делу   № 2-738/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  130 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа в пользу истца, 2 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 4 100 руб. государственной пошлины, всего взыскано  166 100 руб. (т.11 л.д. 51-54).  

57.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 239 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 07.09.2020 по делу   № 2-2710/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  60 000 руб. неустойки, 16 250 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 16 250 руб. штрафа в пользу АРОО ЗПП, 2 300 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 99 800 руб. (т.11 л.д. 44-47).  

58.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 283 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.06.2020 по делу №  2-1212/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 300  000 руб. неустойки, 50 000 руб. штрафа в пользу истца, 10 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 9 000 руб. судебных расходов, 7 895,55 руб. государственной  пошлины в доход бюджета, всего взыскано 376 895 руб. 55 коп. (т.11 л.д. 35-38).  

59.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 310 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 02.06.2021 по делу   № 2-1730/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взысканы  неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 90  000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 30  

000 рублей., 3 200 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  128 200 руб. (т.2 л.д. 129-136).  

60.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 164 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Центрального районного суда г. Барнаула от 09.09.2020 по делу № 23669/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 100  000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 425,12 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  140 425 руб. 12 коп. (т. 11 л.д. 21-24).  

61.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 329 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 01.10.2020 по делу   № 2-2915/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 16 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета. Определением от  30.11.2020 взыскано 12 000 руб. судебных расходов, всего взыскано 137 500 руб. (т.11  л.д. 12-15).  

62.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 177 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула по делу № 21623/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано по 40  000 руб. неустойки в пользу каждого, по 20 500 руб. штрафа в пользу каждого, по 1 000  руб. в счет компенсации морального вреда, 3 200 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, судебные расходы 7 000 руб., всего взыскано 133 200 руб. (т.11 л.д. 1- 3).  

63.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 212 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 18.06.2020 по делу   № 2-1373/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, 46 000 руб. штрафа, 4 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 674,19 руб. государственной пошлины в доход бюджета, 68 709,68 руб.  убытки, всего взыскано 213 383 руб. 87 коп. (т.10 л.д. 149-152).  

64.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 337 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 24.11.2020 по делу   № 23447/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  

110 000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 15 000 руб. судебных расходов, 4 200 руб. государственной пошлины в доход  бюджета, всего взыскано 174 200 руб. (т.10 л.д. 143-145).  

65.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 286 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула по делу № 21556/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 120  000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа, 4 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 167 900  руб. (т.10 л.д. 138-140).  

66.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 205 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 04.09.2020 по делу №  2-2386/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 150  000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа, 6 000 руб. компенсации морального вреда, 7  588,29 руб. государственной пошлины, всего взыскано203 588 руб. 29 коп. (т.10 л.д.  126-135).  

67.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 292 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 02.11.2020 по делу   № 2-3353/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  80 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 3 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 12 000 руб. услуги представителя, 4 524,87 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 107 524 руб. 87 коп. (т.10 л.д. 120-123).  

68.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 315 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 22.10.2020 по делу №  2-3464/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 150  000 руб. неустойки, 45 000 руб. штрафа, 5 000 руб. компенсации морального вреда, 7  652,21 руб. государственной пошлины, всего взыскано 207 652 руб. 21 коп. (т.10 л.д.  113-117).  

69.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 312 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 28.09.2020 по делу №  2-3044/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  230 000 руб. неустойки, 60 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  

вреда, 9 607,84 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  305 607 руб. 84 коп. (т.10 л.д. 106-108).  

70.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 308 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 17.12.2020 по делу № 2-2351/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 30 000 руб. неустойки, 16 000 руб. штрафа, 2 000  руб. в счет компенсации морального вреда, 1 400 руб. государственной пошлины, всего  взыскано 49 400 руб. (т. 10 л.д. 101).  

71.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 333 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Ленинского районного суда. г. Барнаула от 23.04.2019 по делу № 21028/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 110  000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 5 000 руб. компенсации морального вреда, 3  700 руб. госпошлины, всего взыскано 107 900 руб.  

72.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 288 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.11.2020 по делу   № 2-2819/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  190 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа в пользу истца, 6 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, всего взыскано 222 300 руб. (т.10 л.д. 89-92).  

73.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 190 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 15.07.2020 по делу №  2-2346/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 80  000 руб. неустойки, 5 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 2 900 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, 6 000 руб. судебных расходов, всего  взыскано 87 900 руб. (т.10 л.д. 82-83).  

74.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 229 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 27.01.2021 по делу   № 2-532/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 3 500 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 133 500 руб. (т.10 л.д. 77-78).  

75.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 278 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 29.12.2020 по делу   № 2-3773/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  160 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 700 руб. государственной пошлины в доход бюджета, в пользу АРО ЗПП  взыскано 20 000 руб. штрафа, всего взыскано 206 700 руб. (т.10 л.д. 69-72).  

76.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 373 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 29.03.2021 по делу   № 2-1724/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в пользу первого потребителя 40 000 руб. неустойки, 22 000 руб. штрафа, 4 000 руб. в  счет компенсации морального вреда, в пользу второго потребителя 40 000 руб.  неустойки, 22 000 руб. штрафа, 4 000 руб. компенсации морального вреда, 2 900 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 134 900 руб. (т.10 л.д. 61- 63).  

77.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 134 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 15.11.2019 по делу № 2-1446/2019 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 40 000 руб. неустойки, 10 500 руб. штрафа в пользу  истца, 10 500 штрафа в пользу МОО «Робин Гуд», 2 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 1 700 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 64 700 руб. (т.10 л.д. 54-56).  

78.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 196 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.  Барнаула от 03.03.2020 по делу № 2-4022/2019 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 70 000 руб. неустойки, 42 500 руб. штрафа, 15 000  руб. компенсации морального вреда, 4 095,78 государственной пошлины, всего  взыскано 154 277 руб. 91 коп. (т.10 л.д. 46).  

79.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 319 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Калининского районного суда г. Новосибирска от 27.02.2020 по делу   № 2-342/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  335 000 руб. неустойки, 177 500 руб. штрафа, 20 000 руб. в счет компенсации  

морального вреда, 8 625 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 541 125 руб. (т.10 л.д. 37-39).  

80.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 135 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.12.2020 по делу   № 2-3660/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  50 000 руб. неустойки, 12 000 руб. штрафа, 4 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 8 000 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 76 000  руб. (т.10 л.д. 29-32).  

81.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 83 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Ленинского районного суда г. Барнаула от 22.12.2020 по делу № 22222/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 50  000 руб. неустойки, 27 000 руб. штрафа, 4 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 2 000 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 83 000  руб. (т. 10 л.д. 23-26).  

82.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 218 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 22.07.2020 по делу   № 2-2438/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  170 000 руб. неустойки, 86 000 руб. штрафа в пользу истца, 2 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 4 900 руб. государственная пошлина, всего взыскано  262 900 руб. (т. 10 л.д. 17-20).  

83.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 26 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 09.06.2020 по делу №  2-2006/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  120 000 руб. неустойки, 35 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, государственная пошлина 5 908 руб. 45 коп., всего взыскано 166 908 руб. 45 коп.  (т.10 л.д. 11-13)  

84.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 252 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 23.07.2020 по делу   № 2-2439/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 51 000 руб. штрафа в пользу истца, 2 000 руб. в счет  

компенсации морального вреда, 3 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета,  всего взыскано 156 500 руб. (т.10 л.д. 1-4).  

85.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 188 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда. г. Барнаула от 18.07.2019 по делу   № 2-2909/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  по 65 000 руб. неустойки, по 20 000 руб. штрафа, по 3 000 руб. компенсации  морального вреда, 6 295,62 руб. государственной пошлины, 16 000 руб. судебные  расходы, всего взыскано 182 295 руб. 62 коп. (т.9 л.д. 144-147).  

86.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи офиса № 2 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 15.06.2020 по делу   № 2-1422/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  115 000 руб. неустойки, 15 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 800 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 138 800  руб. (т.9 л.д. 138-141).  

87.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 39 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 04.06.2020 по делу   № 2-1185/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 138 500  руб. (т.9 л.д. 132-135).  

88.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 327 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 13.05.2020 по делу   № 2-1224/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  120 000 руб. неустойки, 45 000 руб. штрафа в пользу истца, 5 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 3 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета,  всего взыскано 173 900 руб. (т. 9 л.д. 125-129).  

89.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 92 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 15.02.2020 по делу   № 2-451/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  

вреда, 6 000 руб. услуги представителя, 3 200 руб. государственной пошлины в доход  бюджета, всего взыскано 131 200 руб. (т.9 л.д. 112-115).  

90.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 109 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Центрального районного суда г. Барнаула от 09.06.2020 по делу № 21517/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 140  000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа в пользу истца, 5 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 20 000 руб. штрафа в пользу АРОО «ЕСЗП», 6 669,09 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 191 669 руб. 09 коп. (т.9  л.д. 105-108).  

91.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 219 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 18.12.2020 по делу   № 2-3764/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  70 000 руб. неустойки, 35 000 руб. штрафа, 3 300 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 108 300 руб. (т.9 л.д. 93-95).  

92.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 215 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.04.2021 по делу №  2-1528/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика в пользу  каждого из истцов взыскано по 50 000 руб. неустойки, по 25 000 руб. штрафа, по 3 000  руб. компенсации морального вреда, убытки в размере 110 000 руб., 25 000 руб.  штрафа, 7 904 руб. 58 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета,  всего взыскано 258 094 руб. 58 коп. (т.9 л.д. 86-89).  

93.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 362 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 8 Индустриального района г.  Барнаула от 01.03.2021 по делу № 2-120/2021 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика в пользу первого потребителя взыскано 50 000 руб.  неустойки, 5 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 27 500 руб. штрафа; в  пользу второго потребителя взыскано 50 000 руб. неустойки, 5 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 27 500 руб. штрафа, в доход бюджета 3 500 руб.  государственной пошлины, всего 173 500 руб. (т.9 л.д. 81-82).  

94.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 236 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 05.08.2020 по делу №  2-2386/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 140  000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа в пользу истца, 5 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 6 809,24 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 191 809 руб. 24 коп. (т.9 л.д. 73-75).  

Определением от 30.11.2020 взыскано 10 000 руб. судебных расходов.  

95.) Участники долевого строительства. обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 290 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 29.01.2020 по делу   № 2-537/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  200 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 10 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, в пользу АРОО «Единая служба защиты потребителей» штраф в  размере 30 000 руб., 5 500 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  275 500 руб. (т.7 л.д. 32-35).  

96.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 330 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 22.12.2020 по делу   № 2-3750/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  90 000 руб. неустойки, 40 000 руб. штрафа в пользу истцов, 8 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 3 200 руб. государственной пошлины в доход бюджета,  всего взыскано 141 200 руб. (т.9 л.д. 65-68).  

97.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 3 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 26.05.2021 по делу   № 2-1249/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  96 000 руб. неустойки, 35 000 руб. штрафа в пользу истцов, 5 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 3 080 руб. государственной пошлины в доход бюджета  города, всего взыскано 139 080 руб. (т.9 л.д. 52-55).  

98.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 297 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 05.06.2020 по делу   № 2-1148/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  120 000 руб. неустойки, по 45 000 руб. штрафа, по 5 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 3 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета.  Определением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 11.11.2020 с АО СЗ  «БКС» взыскано 12 000 руб. судебных расходов, всего взыскано 173 900 руб. (т. 9 л.д.  44-47).  

99.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 166 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 15.06.2020 по делу   № 2-1599/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в пользу первого потребителя 70 000 руб. неустойки, компенсация морального вреда 5  000 руб., штрафа 10 000 руб., в пользу второго потребителя 5 000 руб. морального  вреда, 2 500 руб. штрафа, в пользу АРОО ЗПП штраф 10 000 руб., государственная  пошлина 2 500 руб., всего 105 000 руб. (т. 9 л.д. 34-38).  

100.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 166 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 22.10.2019 по делу   № 2-3138/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в пользу первого потребителя 120 000 руб. неустойки за период с 02.11.18 по 01.08.19,  компенсация морального вреда 5 000 руб., штраф 12 500 руб., в пользу второго  потребителя взыскано 5 000 руб. компенсации морального вреда, 2 500 руб. штрафа, в  пользу АРОО ЗПП штраф 15 000 руб., госпошлина 4 200 руб., всего взыскано 164 200  руб. (т.9 л.д. 26-29).  

101.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 55 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.  Барнаула от 27.02.2020 по делу № 2-21/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 23 000 руб. неустойки, 15 000 руб. штрафа, 5 000  руб. в счет компенсации морального вреда, 2 845,39 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, 20 000 руб. убытки, всего взыскано 65 845 руб. 39 коп. (т.9 л.д. 23).  

102.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 55 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.  Барнаула от 19.01.2021 по делу № 2-24/2021 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 40 000 руб. неустойки, 14 000 руб. штрафа, 5 000  руб. в счет компенсации морального вреда, 3 220,44 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 62 220 руб. 44 коп. (т.9 л.д. 18-20).  

103.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 20 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 15.06.2020 по делу   № 2-1468/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  100 000 руб. неустойки, 20 00 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  

вреда, 3 000 руб. оплата услуг представителя, 3 500 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 128 500 руб. (т.9 л.д. 12-15).  

104.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 71 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 04.02.2020 по делу   № 2-815/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  130 000 руб. неустойки, 66 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, всего взыскано 198 000 руб. (т. 9 л.д. 7-9).  

105.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 71 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 28.12.2020 по делу   № 2-2302/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в пользу первого потребителя в счет соразмерного уменьшения стоимости цены  договора денежные средства в сумме 21 264 рублей; неустойку за неудовлетворение  требований в размере 10 000 рублей; неустойку за нарушение срока передачи квартиры  в размере 20 000 рублей; штраф в сумме 15 000 рублей; компенсацию морального вреда  в сумме 3 000 рублей, в пользу второго потребителя в счет соразмерного уменьшения  стоимости цены договора денежные средства в сумме 21 264 рублей; неустойку за  неудовлетворение требований в размере 10 000 рублей; неустойку за нарушение срока  передачи квартиры в размере 20 000 рублей; штраф в сумме 15 000 рублей;  компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей. Взыскано с АО СЗ  «Барнаулкапстрой» в пользу ООО «Центр независимой профессиональной экспертизы  «Алтай-Эксперт» расходы за проведение судебной строительно-технической  экспертизы в сумме 19 800 рублей, в доход местного бюджета государственную  пошлину в сумме 3 250,56 рублей (т. 9 л.д. 1-4).  

Всего взыскано 161 578 руб. 56 коп. 

106.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 51 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 30.09.2020 по делу   № 2-3266/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  50 000 руб. неустойки, 15 000 руб. штрафа в пользу истца, 5 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 2 000 руб. государственной пошлины в доход бюджета,  всего взыскано 72 000 руб. (т. 8 л.д. 148-150).  

107.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 249 по  ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного районного  суда г. Барнаула от 05.11.2020 по делу № 2-1794/2020 исковые требования  

удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 12 000 руб. неустойки, 6 000 руб.  штрафа, 5 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 259,84 руб. почтовых  расходов, 5 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 1 135 руб. государственной  пошлины в доход бюджета, всего взыскано 29 394 руб. 88 коп. (т.8 л.д. 144).  

108.) Участники долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи помещения А по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.03.2020 по делу   № 2-399/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскана  неустойка в размере 950 000 руб., 12 700 руб. госпошлины, всего взыскано 1 909 074  руб. (т.8 л.д. 138-141).  

109.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 216 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 13.10.2020 по делу №  2-3318/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 65  000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 3 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 2 450 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 90 450  руб. (т.8 л.д. 130-133).  

110.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 247 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 13.10.2020 по делу   № 2-2480/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  210 000 руб. неустойки, 80 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 5 600 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 300 600  руб. (т. 8 л.д. 123-126).  

111.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 18 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 10.11.2021 по делу   № 2-3467/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  140 000 руб. неустойки, 6 000 руб. компенсации морального вреда, 50 000 руб. штрафа,  8 000 руб. судебных расходов, 4 300 руб. госпошлины, всего взыскано 208 300 руб. (т.8  л.д. 116-118).  

112.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 291 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 24.12.2019 по делу №  2-4543/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано в  пользу каждого истца по 100 000 руб. неустойки, по 20 000 руб. штрафа, по 7 500 руб. в  

счет компенсации морального вреда, 8 112,11 руб. государственной пошлины в доход  бюджета, всего взыскано 263 112 руб. 11 коп. (т.8 л.д. 104-108).  

113.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 317 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 20.07.2020 по делу №  2-2153/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано в  равных долях 200 000 руб. неустойки, 60 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 5 785,56 руб. государственной пошлины в доход  бюджета (т.8 л.д. 91-96).  

Определением Индустриального районного суда г Барнаула от 24.12.2020  взыскано 10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 460,58 руб. почтовых  расходов.  

Всего взыскано 284 794 руб. 53 коп. 

114.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 185 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 06.07.2020 по делу   № 2-1888/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  385 579,44 руб. неустойки, 195 289,72 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 7 355,79 руб. государственной пошлины в доход бюджета, 10 000  руб. судебные расходы, всего взыскано 603 224 руб. 95 коп. (т.8 л.д. 82-85).  

115.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 321 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 14.10.2020 по делу № 2-1957/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 40 000 руб. неустойки, 12 000 руб. штрафа, 8 000  руб. в счет компенсации морального вреда, в пользу МОО «Робин Гуд» штраф в  размере 12 000 руб., 1 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 249 900 руб. (т.8 л.д. 66-70).  

116.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 156 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 30.09.2020 по делу №  2-2959/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 170  000 руб. неустойки, 70 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 249 000  руб. (т.8 л.д. 66-70).  

117.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи помещения № 4 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 28.07.2020 по делу   № 2-2487/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  36 000 руб. неустойки, 19 000 руб. штрафа в пользу истца, 2 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 1 580 руб. государственной пошлины в доход бюджета,  всего взыскано 58 580 руб. (т.8 л.д. 60-63).  

118.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи помещения № 4 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 20.09.2021 по делу   № 2-2984/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  15 000 руб. неустойки, 6 000 руб. штрафа в пользу истца, 2 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего  взыскано 23 900 руб. (т.8 л.д. 54-57).  

119.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 191 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Индустриального района г.  Барнаула от 11.09.2020 по делу № 2-1562/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 25 000 руб. неустойки, 13 500 руб. штрафа, 2 000  руб. в счет компенсации морального вреда, 1 250 руб. государственной пошлины в  доход бюджета, всего взыскано 41 750 руб. (т.8 л.д. 48-51).  

120.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 28 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 18.03.2020 по делу №  2-1243/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 80  000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 20 000 руб. штрафа в пользу МОО «Робин  Гуд», 5 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 2 900 руб. государственной  пошлины в доход бюджета, всего взыскано 127 900 руб. (т.8 л.д. 41-44).  

121.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 353 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 29.06.2020 по делу   № 2-2160/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  95 000 руб. неустойки, 10 000 руб. штрафа, 1 000 руб. компенсации морального вреда,  192,04 руб. почтовых расходов, 3 350 руб. государственной пошлины, всего взыскано  114 542 руб. 04 коп. (т. 8 л.д. 33-36).  

122.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 353 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 10.12.2019 по делу   № 2-4133/2019 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  60 000 руб. неустойки, 30 500 руб. штрафа, 1 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 2 300 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 93 300  руб. (т. 8 л.д. 27-29).  

123.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 293 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 06.07.2020 по делу   № 2-2016/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  85 000 руб. неустойки, 10 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, в пользу МОО «Робин Гуд» взыскано 10 000 руб. штрафа, 3 050 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 113 050 руб. (т. 8 л.д. 15- 17).  

124.) Участники долевого строительства обратилась в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 186 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 09.07.2020 по делу   № 2-1638/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  88 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 10 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 3 140 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 121 140  руб. (т.8 л.д. 9-11).  

125.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 78 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Чарышского районного суда г. Барнаула от 06.03.2020 по делу № 225/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 76 000  руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 7 000 руб. в счет компенсации 24 морального  вреда, 2 000 руб. расходы на юридические услуги, 2 780 руб. государственной пошлины  в доход бюджета, всего взыскано 107 780 руб. (т.8 л.д. 1-5).  

126.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 78 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 09.09.2021 по делу   № 2-2299/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  30 000 руб. неустойки, 14 064,13 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации  морального вреда, 24 256,53 руб. в счет возмещения излишне уплаченных средств, 2  

780 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 86 512 руб. 47  коп. (т. 7 л.д. 149-153).  

127.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 311 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 23.07.2020 по делу №  2-2226/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 90  000 руб. неустойки, 25 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 635,82 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  124 635 руб. 82 коп. (т. 7 л.д. 141-144).  

128.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 170 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.11.2020 по делу   № 2-3283/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  60 000 руб. неустойки, 20 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 213,04 руб. почтовых расходов, 2 300 руб. государственной пошлины в доход  бюджета, всего взыскано 87 513 руб. 04 коп. (т. 7 л.д. 136-138).  

129.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 175 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 26.06.2020 по делу   № 2-1879/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  в равных долях 47 000 руб. неустойки, 10 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 1 100 руб. государственной пошлины в доход бюджета,  всего взыскано 73 100 руб. (т. 7 л.д. 130-132).  

130.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 260 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 03.02.2020 по делу   № 2-426/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано в  пользу первого потребителя 80 000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 4 000 руб.  компенсации морального вреда, 5 000 руб. в счет возмещения расходов на оплату услуг  представителя, в пользу второго потребителя 80 000 руб. неустойки, 30 000 руб.  штрафа, 4 000 руб. компенсации морального вреда, 4 700 руб. государственной  пошлины, всего взыскано 237 700 руб. (т. 7 л.д. 122-125).  

131.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 64 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 08.09.2020 по делу №  

000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 5 000 руб. компенсации морального вреда, 228  руб. 54 коп. почтовых расходов, 5 640,51 госпошлина, всего взыскано 130 640 руб. 51  коп. (т.7 л.д. 116-119).  

132.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 35 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 09.06.2020 по делу №  2-1005/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 60  000 руб. неустойки, 30 000 руб. штрафа, 6 000 руб. компенсации морального вреда, 3  383 руб. государственной пошлины, всего взыскано 99 383 руб. (т. 7 л.д. 102-109).  

133.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 217 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 26.02.2020 по делу   № 2-427/2021 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  180 000 руб. неустойки, 92 000 руб. штрафа в пользу истца, 4 000 руб. в счет  компенсации морального вреда, 8 000 руб. на оплату услуг представителя, 5 100 руб.  государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 289 100 руб. (т.7 л.д. 97- 99).  

134.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 338 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 15.06.2020 по делу   № 2-1965/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  150 000 руб. неустойки, 39 000 руб. штрафа, 6 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, в пользу МОО «Робин Гуд» 39 000 руб. штрафа, 4 800 руб. государственной  пошлины в доход бюджета, 7 200 руб. судебные расходы, всего взыскано 238 800 руб.  (т.7 л.д. 89-91).  

135.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 157 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 20.07.2020 по делу   № 2-1972/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано  70 000 руб. неустойки, 15 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 15 000 руб. штрафа в пользу МОО «Робин Гуд», 2 600 руб. государственной  пошлины в доход бюджета, всего взыскано 107 600 руб. (т. 7 л.д. 79-83).  

136.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 367 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 06.07.2020 по делу  

110 000 руб. неустойки, 56 000 руб. штрафа, 2 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 4 000 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано 172 000  руб. (т. 7 л.д. 71-73).  

137.) Участники долевого строительства обратились в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 89 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.  Барнаула от 27.02.2020 по делу № 2-26/2020 исковые требования удовлетворены  частично, с Застройщика взыскано 80 000 руб. неустойки, 21 000 руб. штрафа, 21 000  руб. штрафа в пользу МОО «Робин Гуд», 4 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 2 900 руб. государственной пошлины в доход бюджета,12 000 руб. судебные  расходы, всего взыскано 140 900 руб. (т.7 л.д. 60-63).  

138.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 364 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Индустриального районного суда г. Барнаула от 26.10.2020 по делу №  2-3387/2020 исковые требования удовлетворены частично, с Застройщика взыскано 100  000 руб. неустойки, 25 000 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет компенсации морального  вреда, 5 693,93 руб. государственной пошлины в доход бюджета, всего взыскано  135 693 руб. 93 коп. (т. 7 л.д. 52-55).  

139.) Участник долевого строительства обратился в адрес застройщика с  требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры № 41 по ул.  Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, штрафа, компенсации морального вреда.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 24.03.2020  взысканы проценты 300 000 руб., период с 21.12.2019 по 17.01.2020 по оплате  процентов за пользование денежными средствами по кредитному договору в размере  1669,16 руб., компенсация морального вреда - 5 000, штраф -100 000 руб., госпошлина6516,69 руб., всего взыскано 413 185 руб. 85 коп. (т.7 л.д. 43-47).  

По расчету истца, общая сумма убытков, причиненных ненадлежащим  исполнением ответчиком обязательств по договору, составила 25 953 034 руб. 10 коп.,  

Ссылаясь на то, что в результате несвоевременного выполнения ООО  «Сибресурс» работ по договору, а также в связи с допущенными недостатками в  работах, выполненных ответчиком при строительстве многоквартирного жилого дома,  АО СЗ «Барнаулкапстрой» понесло убытки в размере сумм, взысканных  вышеуказанными судебными актами, истец обратился в суд с настоящим иском.  

Суд находит иск подлежащим удовлетворению частично по следующим  основаниям.  

Между истцом и ответчиком возникли вытекающие из договора подряда  обязательственные правоотношения, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ).  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену  (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами  в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов  работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми  актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за  нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения  работы.  

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы  должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего  рода.  

Пунктом 1 статьи 755 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик, если иное не  предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом  строительства указанных в технической документации показателей и возможность  эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на  протяжении гарантийного срока.  

В соответствии с пунктом 12.1 договора подрядчик гарантирует выполнение  всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и  действующими строительными нормами и правилами; своевременное устранение  недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации объекта; нормальное функционирование инженерных систем и  оборудования при нормальной эксплуатации объекта согласно нормативным  документам.  

Пунктом 17.6 договора предусмотрено, что подрядчик возмещает заказчику  суммы, присужденные третьим лицам по судебному решению, вступившему в  законную силу, либо в соответствии с мировым соглашением, если основанием для их  взыскания стало нарушение подрядчиком требований к качеству объекта и сроку ввода  объекта в эксплуатацию, а также все судебные издержки в течении 30 дней с даты  получения соответствующего требования от заказчика.  

По общему правилу, установленному в пункте 1 статьи 431 ГК РФ, при  толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение  содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в  случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и  смыслом договора в целом.  

Из буквального и системного толкования условий договора подряда следует  вывод о том, что возмещению подлежат взысканные суммы и издержки, взыскание и  понесение которых обусловлено нарушением подрядчиком требований к качеству  объекта и сроку ввода объекта в эксплуатацию.  

Судом установлено, что участники долевого строительства обратились в адрес  истца с требованием о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартир по  

ул. Павловский тракт, 291 в г. Барнауле, а также взысканием убытков за строительные  недостатки.  

Частью 3 статьи 69 АПК РФ предусмотрено, что вступившее в законную силу  решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу  обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об  обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих  отношение к лицам, участвующим в деле.  

Несвоевременная передача перечисленных выше квартир и помещений,  расположенных в многоэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Павловский  тракт, 291 в г. Барнауле, а также наличие строительно-монтажных недостатков  установлены вступившими в законную силу вышеперечисленными решениями.  

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 3 пункта 12 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении  судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса  Российской Федерации», отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим  обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее  вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его  вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на  лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении  обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.  

Учитывая, что указанные работы на спорном объекте выполнялись силами ООО  «Сибресурс», суд полагает, что нарушение сроков передачи квартир и помещений,  расположенных в многоэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Павловский  тракт, 291 в г. Барнауле, а также обнаруженные собственниками строительные  недостатки возникли по вине ответчика, компенсировав которые, истец правомерно  обратился с требованием к ООО «Сибресурс» о взыскании убытков с учетом пункта  17.6 договора, представляющего АО СЗ «Барнаулкапстрой» требовать возмещения  убытков, возникших по вине подрядчика, а также всех судебных издержек.  

Доказательств отсутствия своей вины в причиненных истцу убытках ответчик не  представил.  

В то же время, Арбитражный суд Алтайского края 05.03.2021 принял к  производству заявление о признании ответчика несостоятельным (банкротом);  возбуждено производство по делу № А03-2477/2021; решением Арбитражного суда  Алтайского края от 24.05.2021 ответчик признан несостоятельным (банкротом) и в  отношении него открыта процедура банкротства - конкурсное производство.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 

 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты  принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об  открытии конкурсного производства наступают в том числе следующие последствия:  все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных  платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей,  указанных в пункте 1 статьи 134 Закона о банкротстве, и требований о признании права  собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого  незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о  применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в  ходе конкурсного производства.  

Под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные  платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом  (пункт 1 статьи 5 Закона о банкротстве).  

Согласно пункту 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным  обязательствам в деле о банкротстве» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ № 63),  датой возникновения обязательства по возмещению вреда признается дата причинения  вреда кредитору, за который несет ответственность должник в соответствии со статьей  1064 ГК РФ, независимо от того, в какие сроки состоится исчисление размера вреда  или вступит в законную силу судебное решение, подтверждающее факт причинения  вреда и ответственность должника.  

В пункте 11 Пленума ВАС РФ № 63 разъяснено, что при решении вопроса о  квалификации в качестве текущих платежей требований о применении мер  ответственности за нарушение обязательств (возмещении убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, взыскании неустойки,  процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами) судам  необходимо принимать во внимание следующее. Требования о применении мер  ответственности за нарушение денежных обязательств, относящихся к текущим  платежам, следуют судьбе указанных обязательств. Требования о применении мер  ответственности за нарушение денежных обязательств, подлежащих включению в  реестр требований кредиторов, не являются текущими платежами.  

С учетом приведенных положений законодательства при определении того, к  каким обязательствам (текущим или реестровым) относится данное требование,  необходимо исходить из даты выполнения подрядчиком работ, не соответствующих  установленному договором качеству и сроков передачи квартир и помещений  собственнику.  

В рассматриваемом случае судом установлено и подтверждается материалами  дела, что срок передачи квартир и помещений участникам долевого строительства  нарушен, а также работы с недостатками выполнены до даты принятия арбитражным  судом заявления о признании ООО «Сибресурс» банкротом.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 27 постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О  некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,  в силу абзаца второго пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 1 статьи 81, абзаца  восьмого пункта 1 статьи 94 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Закона о  банкротстве с даты введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего  управления и конкурсного производства требования кредиторов по денежным  обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих  платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве в порядке  статей 71 или 100 Закона.  

Таким образом, заявленные в иске суммы требований о взыскании компенсации  морального вреда, штрафов, неустоек, расходов в счет уменьшения цены договора,  убытков, не относятся к текущим платежам и данные требования подлежат  рассмотрению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сибресурс».  

Сумма требований о взыскании судебных расходов, взысканных на основании  решений судов общей юрисдикции, вступивших в законную силу до даты принятия  арбитражным судом заявления о признании ООО «Сибресурс» банкротом, также  является реестровой и подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.  

Проверив расчет убытков, суд приходит к выводу, что общий размер убытков  рассчитан истцом неверно, поскольку в расчете имеется дублирование судебных актов,  а именно, решение Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от  26.10.2020 по делу № 2-3224/2020 указано дважды в п.45 и в п.89 уточненного расчета  истца и решение Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от  11.02.2021 № 2-4424/2020 (2-738/2021) указано дважды в п.56, а также в п.99  уточненного расчета истца.  

Кроме того в сумму убытков истцом включены судебные расходы по оплате  судебных экспертиз, досудебных исследований, проведенных в рамках дел, а также  государственной пошлины, расходов на оплату услуг представителя и почтовых  расходов в общей сумме 271 423 руб. 77 коп., взысканных на основании решений суда,  вступивших в законную силу после даты принятия к производству заявления о  признании ООО «Сибресурс» банкротом: № 2-1523/2021 от 05.04.2021 (3500 руб.),   № 2-1297/2021 от 12.05.2021 (400руб.), № 2-1677/2021 от 20.05.2021 (3700руб.),  

 № 2-1758/2021 от 08.06.2021 (20657,98 руб.), № 2-1323/2021 от 20.04.2021 

(15636,08 руб.), № 2-1528/2021 от 29.04.2021 (7094,58 руб.), № 2-59/2021 от 04.03.2021  (10732 руб.), № 2-302/2021 от 11.06.2021 (61344,65 руб.), № 2-1630/2021 от 19.05.2021  (4500 руб.), 2-1986/2021 от 09.06.2021 (2000руб.), № 2-1146/2021 от 22.03.2021  

(3700 руб.), № 2-4370/2020 от 25.03.2021 (2900 руб.), № 2-533/2021 от 12.05.2021  (1700 руб.), № 2-931/2021 от 16.02.2021 (2900 руб.), № 2-1730/2021 от 02.06.2021  (3200 руб.), № 2-495/2021 от 12.04.2021 (2300 руб.), № 2-1053/2020 от 22.03.2021  

(3200 руб.), № 2-1323/2021 от 20.04.2021 (15636,08 руб.), № 2-1528/2021 от 29.04.2021  (7094,58 руб.), № 2-1483/2021 от 13.04.2021 (2600 руб.), № 2-738/2021 от 11.02.2021  

(4100 руб.), № 2-1730/2021 от 02.06.2021 (3200 руб.), № 2-3669/2020 от 09.09.2020  (4425,12 руб.), № 2-1556/2021 от 08.06.2021 (3900 руб.), № 2-1724/2021 от 29.03.2021  (2900 руб.), № 2-2222/2020 от 22.12.2020 (2000 руб.), № 2-451/2021 от 15.02.2020  

(9200 руб.), № 2-1528/2021 от 29.04.2021 (7094,58 руб.), № 2-120/2021 от 01.03.2021  (8500 руб.), № 2-1249/2021 от 26.05.2021 (3080 руб.), № 2-4424/2020 от 16.03.2021  

(4100 руб.), № 2-24/2021 от 19.01.2021 (3220,44 руб.), № 2-3467/2021 от 10.11.2021  (12300 руб.), № 2-2984/2021 от 20.09.2021 (900 руб.), № 2-25/2020 от 06.03.2020  

(2780 руб.), № 2-2299/2021 от 09.09.2021 (2127,68 руб.), № 2-426/2021 от 10.03.2021  (9700 руб.), № 2-427/2021 от 26.02.2021(13100 руб.).  

В силу пунктов 1 и 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору  убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.  

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей  15 настоящего Кодекса.  

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать  полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не  предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,  произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,  утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные  доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,  если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

 Применение такой меры гражданско-правовой ответственности как возмещение  убытков возможно при доказанности истцом совокупности нескольких условий  (основания возмещения убытков): неисполнение (ненадлежащее исполнение)  обязательства, прямая причинная связь между неисполнением и/или ненадлежащим  исполнением и убытками, наличие и размер понесенных убытков.  

Право требовать возмещения судебных расходов в качестве убытков  согласовано сторонами в пункте 17.6 договора.  

Согласно пункту 16 Постановление Пленума ВАС РФ № 63 обязанность по  возмещению судебных расходов (расходов на оплату услуг представителя,  государственной пошлины и т.д.), понесенных лицом, в пользу которого принят  судебный акт, для целей квалификации в качестве текущего платежа считается  возникшей с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании  указанных расходов.  

Факт несения расходов по оплате судебных экспертиз, досудебных  исследований, проведенных в рамках дел, а также оплаты государственной пошлины в  доход федерального бюджета, расходов на оплату услуг представителей и почтовых  расходов в общей сумме 271 423 руб. 77 коп. подтверждены материалами дела.  

Судебные издержки в общей сумме 271 423 руб. 77 коп., взысканные на  основании решений судов, вступивших в законную силу после даты принятия к  производству заявления о признании ООО «Сибресурс» банкротом, относятся к  

текущим платежам и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в качестве  убытков на основании пункта 17.6 договора.  

В связи с двойным включения в расчет убытков относящихся к текущим  платежам судебных расходов в сумме 4 100 руб., взысканных решением  Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от 11.02.2021 по делу   № 2-4424/2020, в удовлетворении требование истца на сумму 4 100 суд отказывает.  

В остальной части иск подлежит оставлению без рассмотрения. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате  государственной пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным  требованиям.  

В части требований, подлежащих оставлению без рассмотрения, уплаченная при  подаче иска государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального  бюджета РФ в силу статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 148 (п. 4 ч. 1), 149, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

в удовлетворении исковых требований о взыскании 4 100 руб. убытков отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибресурс» в пользу  акционерного общества Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой»  

271 423 руб. 77 коп. убытков и 1 597 руб. 65 коп. в счет возмещения расходов по оплате  государственной пошлины.  

В остальной части иск оставить без рассмотрения. 

Возвратить акционерному обществу Специализированный застройщик  «Барнаулкапстрой» из федерального бюджета РФ 2 378 руб. 22 коп. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев  со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 05.04.2023 6:33:00 

 Кому выдана Сосин Евгений Александрович